22/2018-113374(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-7848/2018

г. Владивосток

09 августа 2018 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Л.В.Зайцевой, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску администрации  Артемовского городского округа (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,  дата государственной регистрации: 19.04.1999)  

к обществу с ограниченной ответственностью «ПРИМСТРОЙЛЮКС»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной  регистрации: 19.01.2005)  

об обязании устранить недостатки работ 

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 174, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью  «Примстройлюкс» безвозмездно, в 10-дневный срок с момента вступления  в законную силу решения Арбитражного суда Приморского края устранить  недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту   № 124/118АЭФ от 24.09.2012, осуществив следующие ремонтные работы  на кровле жилого дома расположенного по адресу: 

<

...>, в соответствии с требованиями СНиП 11-26-76 «Строительные нормы  и правила кровли», СП 17.13330.2011 «Свод правил кровли»: восстановить  козырек из оцинкованной стали между выходом на кровлю первого  

подъезда и дворовым фасадом площадью 1м2; восстановить кирпичную  кладку вентиляционной шахты над выходом на кровлю первого подъезда и  дворовым фасадом площадью 0,045 м3; восстановить фиксацию  примыкания из прижимной рейки на примыкании кровли с кирпичной  кладкой между выходом на кровлю первого подъезда и дворовым фасадом  длинной 2,5м; устранить трещины в кровельном покрытии с левой  стороны от выхода на кровлю первого подъезда длиной 1м и 0,5 м;  устранить трещину кровельного покрытия на коньке кровли между первым  и вторым подъездом длиной 1м; устранить трещину кровельного покрытия  над вторым подъездом со стороны главного фасада между коньком и  карнизом длиной 5 м.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Примстройлюкс» в доход федерального бюджета 6 000 (шесть тысяч)  рублей государственной пошлины по иску.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в  законную силу.  

 Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд  Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый  арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного  округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу.  

Судья Л.В. Зайцева