РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-136832/20-110-1021

12 апреля 2021 года

город Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 23 марта 2021 года 

Решение в полном объеме изготовлено 12 апреля 2021 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ермоловой В.В.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "АЙДИСМ" (115114, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ ДЕРБЕНЕВСКАЯ, 7, СТР.16, ОГРН: 1127746394753) к обществу с ограниченной ответственностью "МОСТООТРЯД-55" (121309, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ФИЛЁВСКАЯ Б., 21/19, 3, ОГРН: 1087746550352) о взыскании 34 038 211,33 рублей, 

третье лицо - общество с ограниченной ответственностью "СОФТИНТЕГРО" (117133, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АКАДЕМИКА ВАРГИ, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 2, ОГРН: 1147748156082), временный  управляющий  Ангелов Александр  Валерьевич (115211, г. Москва, Каширское шоссе, д. 53, к. 5, кв. 581),

при участии:

от истца –Перегудов  А.И. по дов.  от  22.01.2021

от ответчика-Свинин  П. В. По дов.  от  15.10.2020

от третьих лиц – Злобин  И.Г. , гендиректор,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "АЙДИСМ" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "МОСТООТРЯД-55" о взыскании 31 170 523,20 руб. задолженности по договору №Н-2/20 от 20.07.2019, 2 867 688,13 руб. штрафа; о признании работ выполненными и обязать принять их.

В порядке ст.51 АПК РФ судом были привлечены общество с ограниченной ответственностью "СОФТИНТЕГРО", временный  управляющий  Ангелов Александр  Валерьевич.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве. 

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, 20 июля 2019 года между ООО «АйДиСМ» и ООО «Мостотряд-55» был заключен договор подряда №Н-2/20 на выполнение работ по строительству объекта: «Транспортно-пересадочный узел на станции «Солнечная» Московской железной дороги в составе крытого пешеходного моста и наземного транзита пассажиров в границах полосы отвода РЖД».  

В обоснование своих требований Истец сослался на те обстоятельства, что он  выполнил работы своими силами в сроки предусмотренные договором подряда и по завершению работ, как указано в п. 9.1. Договора подряда Истец 11 ноября 2019 года направил в адрес Ответчика предусмотренный Договором комплект документов (акты КС2, КС3, счет на оплату, счет-фактура) на общую сумму 31 170 523 (Тридцать один миллион сто семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать три) рубля  20 копеек.  Руководствуясь условиями п. 4.1.3 и п. 9.2. договора подряда, Ответчик в течение 5 дней с момента получения, а именно: не позднее 25 ноября 2019 года, обязан принять выполненные работы, либо направить в адрес Истца мотивированные отказы от сдачи-приемки выполненных работ, подписания Акта выполненных работ КС-2, Справки КС-3 с указанием Ответчиком выявленных замечаний возникших в процессе приемки-сдачи выполненных работ.

В п. 3.2. Договора указано, оплата производится в течение 100 календарных дней с момента принятия работ. Следовательно, оплата выполненных Истцом работ должна быть произведена не позднее 04 марта 2020 года, что соответствует 100 календарным дням с момента завершения работ.

Как пояснил представитель истца, Ответчик уклоняется от обязательств по приемки выполненный работ и оплате выполненных работ. В нарушение п.п. 4.1.1, 4.1.3, 4.2.37 Договора подряда, оплата выполненных работ не произведена.

В адрес Истца ООО «АйДиСМ» обращений, предложений, возражений, отказов от сдачи-приемки выполненных работ, обоснованных замечаний к качеству выполненных работ Ответчиком не представлено.

Согласно п. 15.10 Договора подряда, при задержке расчетов за выполненные Работы, Истец вправе потребовать уплаты штрафа в размере 0,1% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости работ, подлежащих оплате.

Претензия от 04.06.2020г. направленная в адрес Ответчика, осталась без внимания, что и послужило поводом обращения в Арбитражный суд для защиты своих законных прав и интересов.

Вместе с тем, работы по  Договору  №М55-16/09-02 от 27 сентября 2016 года производились в рамках  проекта - выполнение работ по строительству объекта: «Транспортно-пересадочный узел на станции «Солнечная»  Московской железной дороги в составе крытого пешеходного моста и наземного транзита пассажиров в границах полосы отвода  РЖД.

Спецификой  строительства таких объектов является масштабная кооперация множества  строительных организаций.  Координация между ними осуществляется путем проведения совещаний,  масштабной  переписки, составлением многочисленных совместных актов, формированием единой исполнительной документации.

По акту  КС-2 № 1 от  07.11.2019 работы  выполнялись на основании утвержденной  сметы №04-01-02-И2 (Внешнее электроснабжение) компанией ООО «Софтинтегро» по проекту 307-740/14-ЭОМ, что подтверждается  ведомостью передаваемой исполнительной документации по проекту 307-740/14-ЭОМ, акт освидетельствования скрытых работ  № 07/03/17  от 05 июня 2017 года.

По акту КС-2 № 2  от 07.11.2019 работы выполнялись на основании  сметы №02-03-06-И2 (Электрообогрев) компанией ООО «Софтинтегро», что подтверждается   комплект исполнительной документации - Том 16  «Электрообогрев.Монтажные работы» 307-740/14-ЭС1 (Комплект 10.2.8), который  оформлялся ООО «Софтинтегро». 

В пункте 2 акта КС-2 № 2  имеется указание на счет-фактуру №12 от 30.03.2017 года, которая  выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пунктах  4,5,10,11,17 имеется указание на счет-фактуру №754/01 от 19.01.2017, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пунктах 21,25,26 акта КС-2 № 2 имеется указание на счет-фактуру №02-13-001 от 13.02.2017, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пунктах 22,23,24 акта КС-2 № 2 имеется указание на счет-фактуру №9 от 20.03.2017года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро». 

В пункте 27 акта КС-2 № 2 имеется указание на счет-фактуру №647 от 24.01.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

После плюсовой части акта идет ссылка на вычитание акта КС-2 №231 от 02.10.2017 сметы №02-03-06-И1 Электрообогрев. Как пояснил представитель ответчика, данного акта, предоставленного когда-либо истцом не существует, он никогда не подписывался между ООО «Мостоотряд-55» и ООО «АйДиСМ» и, соответственно, не может корректироваться.

По Акту КС-2 №3 от 07.11.2019 работы выполнялись на основании  сметы №05-01-08-И2 (Система видеонаблюдения) компанией ООО «Софт Интегро» на что имеется комплект исполнительной документации (Том 16. «Система видеонаблюдения, Монтажные работы»), исполненной ими.

В пунктах 17,18 акта КС-2 № 3 имеется указание на счет-фактуру №77013448 от 15.10.2016 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пункте  24  акта КС-2 № 3 имеется указание на счет-фактуру №ЛП087-152 от 28.03.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пунктах 25, 26 акта КС-2 № 3 имеется указание на счет-фактуру №ЦБ-77 от 31.10.2016 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пунктах 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 акта КС-2 № 3 имеется указание на счет-фактуру №13 от 01.11.2016 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пункте 36 акта КС-2 № 3 имеется указание на счет-фактуру №2643 от 19.10.2016 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пункте 37 акта КС-2 № 3 имеется указание на счет-фактуру №4288 от 28.08.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пункте 38  акта КС-2 № 3 имеется указание на счет-фактуру №71628 от 01.11.2016 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

После плюсовой части акта идет ссылка на вычитание акта КС-2 №200 от 17.07.2017 сметы №05-01-08-И1 Система видеонаблюдения. Данного плюсового акта не существует, он никогда не подписывался между ООО «Мостоотряд-55» и ООО «АйДиСМ» и, соответственно, не может корректироваться.

По Акту  КС-2 №4 от 07.11.2019 работы на основании сметы №05-01-11-И2 (Комплексная автоматика) выполняла компания ООО «СофтИнтегро», на что имеется комплект исполнительной документации (Том 16  «Комплексная автоматика инженерных систем. Монтажные работы»  307-740/14-СС10), исполненной ими.  Данный документ предоставлен нами  ранее к отзыву на исковое заявление.

В пунктах 2,3,4,5,6 акта КС-2 № 3 имеется указание на счет-фактуру №268 от 23.12.2016 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пункте 4  акта КС-2 № 3 имеется указание на счет-фактуру № №260 от 23.12.2016 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пункте 13 акта КС-2 № 3 имеется указание на счет-фактуру № 265 от 23.12.2016 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пункте 14 акта КС-2 № 3 имеется указание на счет-фактуру № 266 от 23.12.2016 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пункте 15 акта КС-2 № 3 имеется указание на счет-фактуру № 267 от 23.12.2016 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пункте 16  акта КС-2 № 3 имеется указание на счет-фактуру № ЛП087-153 от 28.03.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пункте 17 акта КС-2 № 3 имеется указание на счет-фактуру № ЛП227-315 от 15.08.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пунктах 18, 19, 20, 22  акта КС-2 № 3 имеется указание на счет-фактуру № 1495 от 08.11.2016 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пункте 21 акта КС-2 № 3 имеется указание на счет-фактуру № 71628 от 01.11.2016 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пункте 23 акта КС-2 № 3 имеется указание на счет-фактуру № CH01-0000420 от 25.01.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пункте 24  акта КС-2 № 3 имеется указание на счет-фактуру № 79915 от 14.11.2016 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пункте 25 акта КС-2 № 3 имеется указание на счет-фактуру № 1667 от 20.12.2016 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пункте 26 акта КС-2 № 3 имеется указание на счет-фактуру № 489 от 21.04.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пунктах 25, 26 акта КС-2 № 3 имеется указание на счет-фактуру № ЛП227-315 от 15.08.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пунктах 36,37,38, 43, 44, 45 акта КС-2 № 3 имеется указание на счет-фактуру № 23427/01 от 31.10.2016 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пунктах 39, 45 акта КС-2 № 3 имеется указание на счет-фактуру № 12845/01 от 15.06.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пункте 46 акта КС-2 № 3 имеется указание на счет-фактуру № 11400/01 от 30.05.17 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пункте 47 акта КС-2 № 3 имеется указание на счет-фактуру № 15180 от 08.11.2016 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

По Акту КС-2 №5 от 07.11.2019 работы на основании сметы №05-01-07-И2 (Система контроля и управления доступом) выполняла компания ООО «СофтИнтегро» на что имеется комплект исполнительной документации (Том 16  «Система контроля и управления доступом. Монтажные работы» 340-740/14-СС6 (Комплект 4.4.6.6), выполненной ими. 

В пункте 25 акта КС-2 № 5 имеется указание на счет-фактуру № ЛП087-153 от 28.03.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пункте 26 акта КС-2 № 5 имеется указание на счет-фактуру № ЛП087-152 от 28.03.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

После плюсовой части акта идет ссылка на вычитание акта КС-2 №238 от 02.10.2017 сметы №05-01-07-И1 Система контроля и управления доступом. Данный акта никогда не подписывался между ООО «Мостоотряд-55» и ООО «АйДиСМ» и, соответственно, не может корректироваться.

По Акту  КС-2 №6 от 07.11.2019 работы на основании сметы №05-01-09-И2 (Система пожарной сигнализации) выполняла компания ООО «СофтИнтегро», на что имеется комплект исполнительной документации (Том 16  «Система пожарной сигнализации.Монтажные работы»  307-740/14-СС8 (Комплект 4.4.6.8), выполненный ими.

В пунктах 18, 19, 20 акта КС-2 № 6 имеется указание на счет-фактуру № 10688/01 от 23.05.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пункте 21 акта КС-2 № 6 имеется указание на счет-фактуру № ЛП087-153 от 28.03.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пункте 22 акта КС-2 № 6 имеется указание на счет-фактуру № 1482 от 02.11.2016 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пункте 23 акта КС-2 № 6 имеется указание на счет-фактуру № ЛП087-152 от 28.03.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пункте 25 акта КС-2 № 6 имеется указание на счет-фактуру № 2643 от 19.10.2016 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пункте 37 акта КС-2 № 6 имеется указание на счет-фактуру № 79914 от 14.11.2016 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пунктах 41-48 акта КС-2 № 6 имеется указание на счет-фактуру № 5261 от 26.05.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

После плюсовой части акта идет ссылка на вычитание акта КС-2 №3 от 14.07.2017 сметы №05-01-09-И2 Система пожарной сигнализации. Данный акта никогда не подписывался между ООО «Мостоотряд-55» и ООО «АйДиСМ» и, соответственно, не может корректироваться.

По Акту  КС-2 №7 от 07.11.2019 работы на основании сметы №05-01-13-И2 (Городская радиосеть) выполняла компания ООО «СофтИнтегро» на что имеется комплект исполнительной документации, о чем свидетельствует ведомость передачи ООО «Софтинтегро» исполнительной документации Заказчику (АО «Центральная ППК»)

В пунктах 3, 5, 8, 11, 12 акта КС-2 № 7 имеется указание на счет-фактуру № 1580 от 25.11.2016 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

По Акту КС-2 №8 от 07.11.2019 работы выполнены на основании сметы №05-01-06-И2 (Охранно-тревожная сигнализация) компанией ООО «СофтИнтегро» на что имеется комплект исполнительной документации (Том 16  «Охранно-тревожная сигнализация. Монтажные работы» 307-740/14-СС5 (Комплект 4.4.6.5), выполненной ими.

В пункте 32 акта КС-2 № 8 имеется указание на счет-фактуру № ЛП326-151 от 21.11.2016 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

После плюсовой части акта идет ссылка на вычитание акта КС-2 №237 от 02.10.2017 сметы №05-01-06 Охранно-тревожная сигнализация. Данный акт  никогда не подписывался между ООО «Мостоотряд-55» и ООО «АйДиСМ» и, соответственно, не может быть откорректирован.

По Акту КС-2 №9 от 07.11.2019 работы  выполнялись на основании сметы №09-01-23 (Пусконаладочные работы. КТП-2. ВВОД) компанией ООО «СофтИнтегро», что подтверждается актом передачи исполнительной документации Заказчику (АО «Центральная ППК»).

Кроме этого, в материалы дела были представлены акт освидетельствования скрытых работ  № 07/03/17  от 05 июня 2017 года;

акт приемки и сдачи электромонтажных работ  от 05 июня 2017 года. В приложении к данному акту  в качестве  оборудования введенного в  эксплуатацию указана КТП/П-КК-400, исполненная по проекту  307-740/1-КТП «КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ВТОРОЙ ВВОД»; акт технической готовности  электромонтажных работ от 06 июня 2017 года, в котором отражено, что демонтаж существующей КТП и монтаж новой КТП  осуществлялся ООО «Софтинтегро».

По Акту  КС-2 №10 от 07.11.2019 работы  выполнялись на основании сметы №05-01-15-И1 (КТП-2.ВВОД) компанией ООО «СофтИнтегро», что подтверждается актом передачи исполнительной документации Заказчику (АО «Центральная ППК»).

В данном акте  отражена стоимость  самой КТП.  В пункте 10 акта КС-2 № 10 имеется указание на счет-фактуру № 103 от 11.09.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро». Данному счету-фактуре  соответствует  товарная накладная 26 от 11.09.2017 года, в которой получателем  дорогостоящего оборудования значится ООО «Софтинтегро».

По Акту КС-2 №11 от 07.11.2019 работы  выполнялись на основании сметы №05-01-14-И2 (Структурированная система мониторинга инженерных систем) компанией ООО «СофтИнтегро» на что имеется комплект исполнительной документации, а также акт передачи исполнительной документации Заказчику (АО «Центральная ППК»).

В пунктах 21, 23, 26, 66 акта КС-2 № 11 имеется указание на счет-фактуру № 23421/01 от 31.10.2016 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пунктах 27, 29, 41, 42 акта КС-2 № 11 имеется указание на счет-фактуру № 1496 от 08.11.2016 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро». 

В пунктах 28, 35, 36, 37, 39 акта КС-2 № 11 имеется указание на счет-фактуру № 971 от 30.01.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пунктах 30, 40, 54  акта КС-2 № 11 имеется указание на счет-фактуру № 667 от 18.04.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пунктах 31, 32, 33, 43   акта КС-2 № 11 имеется указание на счет-фактуру № Н-101116-045 от 10.11.2016 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пунктах 34, 38, 54  акта КС-2 № 11 имеется указание на счет-фактуру № 668 от 18.04.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пунктах 44, 45, 65 акта КС-2 № 11 имеется указание на счет-фактуру № Н-221216-051 от 22.12.2016 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пунктах 46, 47, 49, 50 акта КС-2 № 11 имеется указание на счет-фактуру № ЛП087-152 от 28.03.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пунктах 52, 53, 55  акта КС-2 № 11 имеется указание на счет-фактуру № 5/05-01 от 05.05.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пункте 57 акта КС-2 № 11 имеется указание на счет-фактуру № ЛП087-156 от 28.03.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пунктах 58, 59, 60 акта КС-2 № 11 имеется указание на счет-фактуру № 50 от 30.11.2016 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пункте 61  акта КС-2 № 11 имеется указание на счет-фактуру № 490 от 21.04.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пункте 62 акта КС-2 № 11 имеется указание на счет-фактуру № CT0004106 от 29.05.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пункте 63 акта КС-2 № 11 имеется указание на счет-фактуру № CT0004108 от 29.05.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

По Акту КС-2 №12 от 07.11.2019 работы на основании сметы №02-03-01-И2 (Силовое электрооборудование и электроосвещение) выполнены компанией ООО «СофтИнтегро» на что имеется комплект исполнительной документации (Том 16 «Силовое электрооборудование и электроосвещение» 307-740/14-ЭОМ (Комплект 4.4.1), которая  исполнена им.

В пунктах  282-287, 290 акта КС-2 № 12 имеется указание на счет-фактуру № 051/12777 от 25.05.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

По Акту  КС-2 №13 от 07.11.2019 работы на основании сметы №02-04-01-И3 (Технологические решения) компанией  ООО «Софт Интегро» на что имеется комплект исполнительной документации, а также акт передачи исполнительной документации Заказчику (АО «Центральная ППК»)

В пунктах 3- 8, 12, 26-30, 33-45, 49-65, 70, 72-79, 83-92, 94, 99-109, 115-122, 124-131, 133, 153,154  акта КС-2 № 12 имеется указание на счет-фактуру № /07/00032 от 31.07.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пунктах 18, 19, 22, 23, 135, 139-141, 144-147, 150, 151 акта КС-2 № 12 имеется указание на счет-фактуру № 105 от 24.05.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пунктах 20, 24, 137, 142, 148  акта КС-2 № 12 имеется указание на счет-фактуру № 76 от 17.04.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пунктах 46, 68, 81, 96, 112 акта КС-2 № 12 имеется указание на счет-фактуру № /09/00019 от 30.09.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пунктах 176-207 акта КС-2 № 12 имеется указание на счет-фактуру № 171 от 19.06.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пунктах 214-218, 222-224  акта КС-2 № 12 имеется указание на счет-фактуру № /07/00035 от 31.07.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пунктах 225, 226 акта КС-2 № 12 имеется указание на счет-фактуру № /07/00037 от 31.07.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пунктах 227-229, 236, 237 акта КС-2 № 12 имеется указание на счет-фактуру № 9-000575 от 26.01.2018 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пунктах 233, 235 акта КС-2 № 12 имеется указание на счет-фактуру № 782 от 27.05.2016 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пункте 238  акта КС-2 № 12 имеется указание на счет-фактуру № 87 от 10.12.2018 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пункте 243 акта КС-2 № 12 имеется указание на счет-фактуру № СТ0004104 от 29.05.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пункте 245 акта КС-2 № 12 имеется указание на счет-фактуру № 23424/01 от 31.10.2016 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

В пункте 247 акта КС-2 № 12 имеется указание на счет-фактуру № в8.Зип1610-2-0-3/23 от 21.04.2017 года, которая выписана в адрес ООО «Софтинтегро».

После плюсовой части акта идет ссылка на вычитание акта КС-2 №242 от 31.08.2018 сметы №02-04-01-И1 Технологические решения. Данный акта никогда не подписывался между ООО «Мостоотряд-55» и ООО «АйДиСМ» и, соответственно, не может быть откорректирован. 

При  этом истец  не представил   доказательств, подтверждающих факт выполнения, отраженных  в актах КС-2, работ.

При указанных обстоятельствах иск подлежит отклонению.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст.   110, 123, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:               А.В. Мищенко