РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-86643/24-7-815

г. Москва

25 июля 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 27 июня 2024 года

Полный текст решения изготовлен 25 июля 2024 года

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Огородниковой М.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Жуковой М.Г.

рассматривает в предварительном судебном заседании дело

по иску: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬТИМА" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к ответчику:  АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 2 991 346 руб. 91 коп.

при участии:

от истца – ФИО1 по дов. от 19.06.2024

от ответчика – не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬТИМА" обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ  о взыскании 2 991 346 руб. 91 коп.

Представитель истца поддержал заявленные исковые требования по доводам, указанные в уточненном исковом заявлении.

Представитель ответчика заявил ходатайство о признании иска.

Учитывая отсутствие возражений сторон против продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции, суд в соответствии с п.4 ст.137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.27 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ № 65 от 20.12.2006., завершил предварительное заседание и рассмотрел дело в судебном заседании в первой инстанции.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, 26 декабря 2022 года на основании результатов проведенного открытого конкурса в электронной форме и в соответствии с Протоколом подведения итогов электронного конкурса от 14.12.2022 года для закупки №. 0148300008322000034 (ИКЗ: 223500305702977510100100860010000244), между ООО «УЛЬТИМА» и Администрацией поселения Сосенское заключен муниципальный контракт за № 01483000083220000340001 на выполнение работ по комплексному содержанию дворовых территорий по адресам: посёлок Коммунарка, д. №№ 1-5, 9-11, 7, 8, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 22, 30, 32, 33, 6, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, ул. Бачуринская, 

<

...>, ул. Потаповская роща, д. 1-7 в 2023 году (далее - Контракт).

В соответствии с Техническим заданием к Контракту, состав работ предусмотренных Контрактом, предусматривает в том числе погрузку и вывоз снега.

Подрядчик обязан качественно оказать весь комплекс услуг, предусмотренных Контрактом в период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. (п. 11.2 статьи 2).

Погрузка и вывоз снега с ОДХ, осуществлялась в ходе выполнение работ по комплексному содержанию дворовых территорий поселения Сосенское, по следующим адресам:

- посёлок Коммунарка, д. №№ 1-5, 9-11, 7, 8, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 22, 30, 32, 33, 6, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, ПО, 111, ул. Бачуринская, 

<

...>,

- 

<

...>.

В целях обеспечения и повышения безопасности и комфортности условий дорожного движения на улично-дорожной сети города Москвы, оказание услуг ООО «УЛЬТИМА» обязано осуществлять в строгом соответствии с нормативными документами.

Планируемая высота снега, предусмотренного Контрактом на период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. составляла 80 см., на общую сумму 3 370 531 (Три миллиона триста семьдесят тысяч пятьсот тридцать один) рубль 73 копейки, НДС не облагается, что составляет 17 537,30 м3 снега.

Согласно справкам Управления метеорологических разработок Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Автомобильные дороги», и подписанным между сторонами Контракта Справкам расчета высоты снега по Контракту объем выпавшего снежного покрова в Холодный период 2023г. (январь, февраль, март, апрель (по 15 число включительно), ноябрь и декабрь 2023 года) превысил предусмотренные объемы работ по погрузке и вывозу снега.

Итого за Холодный период 2023 г. (январь, февраль, март, апрель (по 15 число включительно), ноябрь и декабрь 2023 года) выпало 162 см. снега, количество снега подлежащего уборке и вывозу составила 151 см., что на 71 см. превышает объем работ по погрузке и вывозу снега, предусмотренный Локальными сметами.

Таким образом, лимит предусмотренного Контрактом объем снега был исчерпан в ноябре 2023 года.

Из вышеуказанного объема фактически погруженного и вывезенного снега, 20 см. по каждому виду и категории убираемых площадей, что составляет 3 288,24 м3 на сумму 842 632,94 коп., НДС не облагается, было принято Заказчиком и оплачено в рамках объемов предусмотренных Контрактом, в ноябре 2023 года.

Стоимость сверхлимитного объема погруженного и вывезенного снега в объеме 71 см., что составляет 15 564,35 м3, составила 2 991 346,91 коп., НДС не облагается.

Работы по погрузке и вывозу сверхлимитного объема снега, выпавшего в ноябре-декабре 2023 года, относятся к категории социально-значимых, поскольку их невыполнение может привести к угрозе либо создавать угрозу жизни и здоровью людей, выполнялись в соответствии с требованиями нормативных документов, с целью предотвращения возникновения стихийных чрезвычайных ситуаций, обеспечения чистоты и порядка, поддержания дворовых территорий в надлежащем нормативном санитарно-техническом состоянии, обеспечения беспрепятственного движения всех видов транспортных средств и пешеходов, для достижения целей Контракта, а именно в целях обеспечения и повышения безопасности и комфортности условий дорожного движения на территории поселения Сосенское города Москвы и передвижения пешеходов, являлись безотлагательными, отвечали необходимым потребностям Заказчика (публичного образования), в целях предотвращения аварийных ситуаций.

Вышеуказанные работы производились на той же территории, что и работы по санитарному и техническому содержанию территории. Заказчик знал о том, что ООО «УЛЬТИМА» убирается снег на подведомственной территории, поскольку оказание услуг по уборке проезжей части невозможно без предварительной уборки снега, выпавшего на него.

Подрядчик выполнил работы по уборке снега, не терпящие отлагательств, в целях предотвращения вреда общественным интересам, исходя из очевидной выгоды Заказчика и его вероятных намерений.

Вывоз снега с территории поселения Сосенское производился на площадку для временного складирования снега по адресу: г.Москва, 

<

...> согласно схеме места временного складирования снега.

Вывоз снега осуществлялся привлеченным автотранспортом.

Отказаться от уборки снега из-за превышения контрактного объема работ Истец не имел права, так как являлся единственным Подрядчиком, ответственным за выполнение работ по комплексному содержанию и благоустройству на данной территории поселения Сосенское в 2023 году.

Обращение ООО «УЛЬТИМА» от 31.01.2024 за № 3 о приемке фактически выполненных работ, полученное Администрацией поселения Сосенское 02.02.2024, оставлено без ответа. Запросов о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ Ответчиком в адрес Истца не поступал, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (в.КС-3), Акты о приемке выполненных работ (КС-2) не подписаны, в адрес ООО «УЛЬТИМА» не поступали, работы не оплачены.

16 апреля 2024 года ООО «УЛЬТИМА» получен ответ за № 01-36-643/24 от 16.04.2024 на претензию за № 18 от 27.03.2024, согласно которому Администрация поселения Сосенкое сообщает, о том, что муниципальные контракты, подлежащие исполнению за счет бюджетных средств, заключаются и оплачиваются в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с учетом принятых и неисполненных обязательств, условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Выполнение работ по комплексному содержанию и благоустройству территории поселения Сосенское, в том числе по вывозу и утилизации снега Обществом с ограниченной ответственностью «УЛЬТИМА» осуществлялось на длительной и регулярной основе, претензии со стороны Заказчика относительно объема и качества оказанных услуг не предъявлялись.

Общий объем фактически вывезенного и утилизированного снега в период с 01.01.2023 по 31.12.2023, также подтверждается Справками расчета высоты снега, подписанными представителями Администрации поселения Сосенское и ООО «УЛЬТИМА».

Доказательством выполнения работ, а также доказательством того, что Заказчик контролировал ход производства работ на всей убираемой территории, являются подписанные акты о приемке выполненных работ за ноябрь, декабрь 2023 года.

Ввиду неудовлетворения Ответчиком требований Истца о погашении задолженности после получения претензии, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

В ходе рассмотрения дела, от ответчика заявил ходатайство о полном признании исковых требований.

Заявление  ответчика о признании исковых требований рассмотрено и подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В силу части 3 статьи 49 АПК РФ ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.

Признание иска является особым распорядительным действием ответчика со специальными правовыми последствиями, которое по смыслу части 3 статьи 49 АПК РФ и пункта 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2021 № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции» может быть совершено только в активной форме как в виде отдельного письменного заявления, которое приобщается к материалам дела, так и в виде записи в протоколе судебного заседания (пункт 9 части 2 статьи 153 АПК РФ).

В соответствии с ч. 4 ст. 170 АПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом.

Обстоятельства принятия судом признания ответчиком иска влекут необходимость перераспределения судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В соответствии со статьей 104 АПК РФ основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ при признании ответчиком иска до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.

Ответчиком исковые требования признаны полностью.

Таким образом, принимая во внимание подпункт 3 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ, из Федерального бюджета истцу подлежат возврату 70% государственной пошлины от признанной ответчиком суммы иска.

Соответственно остальные 30% государственной пошлины от признанной ответчиком суммы иска подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

При таких обстоятельствах, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат распределению в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 49, 65, 66,70, 71, 110, 112, 123, 156, 167 - 171, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬТИМА" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) сумму невозмещенного платежа по муниципальному контракту № 0148300008322000034 в размере 2 991 346 руб. 91 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 11 387 руб. 10 коп.

Возвратить ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬТИМА" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 26 569 руб. 90 коп., уплаченную по платежному поручению № 98 от 16.04.2024 г.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с даты изготовления полного текста решения.

 

Судья                                                                                                 М.С. Огородникова