АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-5004/2024

г. Чебоксары

05 декабря 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 21.11.2024.

Полный текст решения изготовлен 05.12.2024.

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в составе

судьи Борисова Д.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Егоровой А.А., рассмотрев в заседании суда дело по иску 

государственного унитарного предприятия Чувашской Республики "Чувашские государственные электрические сети" Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики, 428003, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 

к обществу с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Строительная компания "Глобус", 428003, 

<

...>, помещу. 6/1, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

муниципальному бюджетному учреждению "Управление капитального строительства и реконструкции" города Чебоксары Чувашской Республики, 428024, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, пр-т. Мира, д. 90, к. 2, помещ. 2, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>

о взыскании 203 233 руб. 22 коп.,

третье лицо, не заявляющее самостоятельное требование относительно предмета спора, - Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

при участии:

от истца – ФИО1 по доверенности от 09.01.2024 сроком по 31.12.2024,  

от муниципального бюджетного учреждения "Управление капитального строительства и реконструкции" города Чебоксары Чувашской Республики – ФИО2 по доверенности от 09.01.2024 сроком действия до 31.12.2024,

от общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Строительная компания "Глобус" – ФИО3 по доверенности от 23.10.2023 № 4 сроком действия на 3 года,

установил:

государственное унитарное предприятие Чувашской Республики "Чувашские государственные электрические сети" Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики (далее – истец, ГУП Чувашской Республики "ЧГЭС" Минпромэнерго Чувашии) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Строительная компания "Глобус" (далее – ответчик, ООО "СЗ "СК "Глобус"), муниципальному бюджетному учреждению "Управление капитального строительства и реконструкции" города Чебоксары Чувашской Республики (далее - ответчик, МБУ "Управление капитального строительства и реконструкции" города Чебоксары) о взыскании, с учетом принятых судом уточнений, 203 233 руб. 22 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 20.09.2022 по 20.09.2024.

Определением суда от 11.03.2024 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Определением суда от 26.04.2024 суд в соответствии с частью 5 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Определением суда от 29.07.2024 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары (далее – третье лицо).

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержала, с учетом уточнения, представила письменные пояснения.

Представитель ООО "СЗ "СК "Глобус" просила в удовлетворении требований отказать по основаниям, изложенным в отзыве и письменных пояснениях к нему. ООО "СЗ "СК "Глобус" считает себя ненадлежащим ответчиком, поскольку заявителем по договору технологического присоединения является МБУ "Управление капитального строительства и реконструкции" города Чебоксары.

Представитель МБУ "Управление капитального строительства и реконструкции" города Чебоксары просила в удовлетворении требований отказать по основаниям, изложенным в отзыве и письменных пояснениях к нему. МБУ "Управление капитального строительства и реконструкции" города Чебоксары считает себя ненадлежащим ответчиком, поскольку плательщиком по договору технологического присоединения является ООО "СЗ "СК "Глобус".

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о дне, времени и месте проведения судебного заседания, в суд своего представителя для участия в нем не направило.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителей Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары.

Выслушав объяснения представителей сторон, изучив материалы дела, суд установил следующее.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.08.2022 № 423 «О приеме безвозмездно из муниципальной собственности города Чебоксары - столицы Чувашской Республики в государственную собственность Чувашской Республики муниципального унитарного предприятия «Чебоксарские городские электрические сети» муниципального образования города Чебоксары-столицы Чувашской Республики как имущественного комплекса» принято безвозмездно из муниципальной собственности муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики в государственную собственность Чувашской Республики муниципальное унитарное предприятие «Чебоксарские городские электрические сети» муниципального образования города Чебоксары-столицы Чувашской Республики, расположенное по адресу: 428003, 

<

...>, ИНН 

<

***>, как имущественный комплекс и переименовано в государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Чувашские государственные электрические сети» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики (далее - Предприятие).

В связи со сменой собственника и переименованием Предприятия приказом Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 25.08.2022 № 01-05/94 утвержден Устав Предприятия в новой редакции.

Распоряжением Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 20.09.2022 № 619-р во исполнение постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.08.2022 № 423 «О приеме безвозмездно из муниципальной собственности города Чебоксары - столицы Чувашской Республики в государственную собственность Чувашской Республики муниципального унитарного предприятия «Чебоксарские городские электрические сети» муниципального образования города Чебоксары-столицы Чувашской Республики как имущественного комплекса» утверждены акт приема-передачи муниципального унитарного предприятия «Чебоксарские городские электрические сети» муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики в государственную собственность Чувашской Республики как имущественного комплекса и передаточный акт, в соответствии с которым муниципальное унитарное предприятие «Чебоксарские городские электрические сети» муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики передает государственному унитарному предприятию Чувашской Республики «Чувашские государственные электрические сети» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики имущественный комплекс, все права и обязанности. Имущество закрепляется за государственным унитарным предприятием Чувашской Республики «Чувашские государственные электрические сети» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики (далее - Истец) на праве хозяйственного ведения.

Между МУП «ЧГЭС» (сетевая организация) и МБУ "Управление капитального строительства и реконструкции" города Чебоксары (заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 20.07.2022 № 01-2022/560 (далее – договор от 20.07.2022 № 01-2022/560), по условиям которого сетевая организация обязуется выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель - мероприятия, предусмотренные техническими условиями. Плательщик обязуется оплатить сетевой организации расходы на технологическое присоединение энергопринимающих установок (ЛЭП-0,4 кВ и ВРУ-0,4кВ многоквартирного жилого дома) в соответствии с условиями договора.

В соответствии с протоколом разногласий от 07.07.2022 к договору от 20.07.2022 № 01-2022/560 преамбула договора изложена в следующей редакции: «Муниципальное унитарное предприятие «Чебоксарские городские электрические сети» муниципального образования города Чебоксары-столицы Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице директора ФИО4, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, ОГРН 

<

***>, в лице Муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары Чувашской Республики, действующего на основании соглашения между Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары и МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары о передаче полномочий .муниципального заказчика по  заключению  и  исполнению  от  имени  муниципального  образования  города  Чебоксары муниципальных контрактов от 31.03.2022 № 25, в лице начальника Муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары Чувашской Республики ФИО5, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Глобус» ОГРН 

<

***>, именуемое в дальнейшем «Плательщик», в лице генерального директора ФИО6, действующего на основании Устава, с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем».

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению установлен пунктом 5 договора и составляет 4 месяца со дня заключения договора.

Согласно пункту 11 договора (в редакции протокола разногласий от 20.07.2022) внесение платы за технологическое присоединение осуществляется плательщиком в следующем порядке:

1)        10 % платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора;

2)        30 % платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора;

3)        20 % платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения настоящего договора;

4)        30 % платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

5)        10 % платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Согласно пункту 10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам постановлением от 14.12.2021 № 80-22/тп и составляет 3 180 432 руб. 18 коп., в том числе НДС 20 % 530 072,03 руб., согласно расчету (Приложение № 3).

Между сторонами подписан акт об осуществлении технологического присоединения от 22.09.2023 № 26201, подтверждающий выполнение мероприятий по технологическому присоединению, включая фактическое присоединение. 

В указанном акте отражено, что сетевая организация оказала услугу по технологическому присоединению в соответствии с мероприятиями по Договору в полном объеме на сумму 3 180 432 руб. 18 (восемнадцать) коп. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрической сети Сетевой организации выполнено в соответствии с правилами и нормами. Заявитель претензий к оказанию услуг Сетевой организации не имеет.

Платежи по договору от 20.07.2022 № 01-2022/560 оплачены несвоевременно. На момент обращения в суд задолженность Ответчиков перед истцом по договору составляла 1 908 259 руб. 31 коп.

Поскольку направленные в целях досудебного урегулирования спора в адрес Ответчиков претензии о погашении задолженности по Договору (исх. № 172 от 30.01.2023, № 3220 от 24.11.2023 – в адрес МБУ "Управление капитального строительства и реконструкции" 

<

...> от 26.02.2024, исх. № 696 от 19.03.2023 – в адрес ООО «СЗ «СК «Глобус»), остались без полного удовлетворения, истец обратился с настоящим исковым заявлением о взыскании процентом за пользование чужими денежными средствами.

Суд приходит к выводу, что заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктами 2, 3 утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (далее - Правила № 861) сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению, в том числе в случае увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств при условии соблюдения им правил технологического присоединения и наличии технической возможности технологического присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом (пункт 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон об электроэнергетике).

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). К отношениям по договору, заключенному между сторонами, применяются нормы права, регулирующие договор энергоснабжения.

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике и пункты 16, 17 Правил № 861).

С учетом изложенного договор об осуществлении технологического присоединения от 20.07.2022 № 01-2022/560 является, в том числе, договором возмездного оказания услуг.

В соответствии со статьями 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить их в сроки и в порядке, которые указаны в соглашении.

Указанными нормами предусмотрена оплата стоимости услуг по факту их оказания. Авансирование заказчиком услуг исполнителя, исходя из положений статей 1, 421 и 422 ГК РФ, может устанавливаться законодательством или соглашением сторон.

Пунктом 16 Правил № 861 и пунктом 11 договора от 20.07.2022 № 01-2022/560 помимо платежей после фактического присоединения и составления соответствующих документов предусмотрены промежуточные (авансовые) платежи заявителя.

Согласно пункту 11 Типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых свыше 150 кВт и менее 670 кВт (за исключением случаев, указанных в приложениях № 9 и 10, а также осуществления технологического присоединения но индивидуальному проекту) внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора;

30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора;

20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения настоящего договора;

30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации (пункт 12 Типового договора).

Аналогичные положения отражены в пункте 11 договора от 20.07.2022 № 01-2022/560 относительно обязанности Плательщика по внесению платы за технологическое присоединение.

Таким образом, Правила № 861, договор №01-2022/560 обуславливают исполнение обязанности по внесению млаты наступлением определенного срока: в течение 15, 60 и 180 дней со дня заключения договора; в течение 15 дней со дня фактического присоединения; в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Кроме того, Правилами №861 при реализации мероприятий по технологическому присоединению предусмотрено составление акта о выполнении технических условий (пункт 18.1 Правил №861), акта об осуществлении технологического присоединения (пункт 19 Правил №861). В ходе проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий предусмотрено составление акта допуска прибора учета к эксплуатации (пункт 82.1 Правил №861).

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются но день уплаты этих средств кредитору (пункт 48 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»).

Акт об осуществлении технологического присоединения, подтверждающий выполнение мероприятий по технологическому присоединению, в том числе фактическое присоединение, подписан сторонами 22.09.2023. 

В соответствии с пунктом 11 договора от 20.07.2022 № 01-2022/560 оплата за технологическое присоединение должна была быть осуществлена в следующем порядке:

1)        318 043 руб. 22 коп. (10 % платы) - в срок по 04.08.2022 включительно;

2)        954 129 руб. 65 коп. (30 % платы) - в срок по 19.09.2022 включительно;

3)        636 086 руб. 44 коп. (20 % платы) - в срок по 16.01.2023 включительно;

4)        954 129 руб. 65 коп. (30 % платы) - в срок по 09.10.2023 включительно;

5)        318 043 руб. 22 коп. (10 % платы) - в срок по 02.10.2023 включительно.

Платеж в размере 318 043 руб. 22 коп. (10 % платы) произведен ООО «СЗ «СК «Глобус» по платежному поручению № 938 от 21.07.2022, т.е. в установленный Договором срок.

Платеж в размере 954 129 руб. 65 коп. (30 % платы) произведен ООО «СЗ «СК «Глобус» по платежному поручению № 1383 от 29.09.2022, т.е. с нарушением установленного Договором срока. Просрочка исполнения обязательства составила 10 календарных дней. 

Размер процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 20.09.2022 по 29.09.2022 по платежу 954 129 руб. 65 коп. (30 % платы) составляет 1 960 руб. 54 коп.

Платеж в размере 636 086 руб. 44 коп. (20 % платы) произведен ООО «СЗ «СК «Глобус» по платежному поручению № 418 от 20.03.2023, т.е. с нарушением установленного Договором срока на 63 календарных дня. Размер процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 17.01.2023 по 20.03.2023 по платежу 636 086 руб. 44 коп. (20 % платы) составляет 8 234 руб. 27 коп.

Оставшаяся часть платы за технологическое присоединение в размере 1 272 172 руб. 87 коп. внесена Ответчиком по платежному поручению № 1404 от 17.09.2024 на сумму 636 086 руб. 42 коп. и по платежному поручению № 1456 от 20.09.2024 на 636 086 руб. 45 коп. 

Таким образом, размер процентов за пользование чужими денежными средствами в отношении платежей в размере 954 129 руб. 65 коп. (30 % платы) и в размере 318 043 руб. 22 коп. (10 % платы) в период с 03.10.2023 по 20.09.2024 составляет 193 038 руб. 41 коп.

Общий размер процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 20.09.2022 по 20.09.2024 правомерно определен истцом в размере 203 233 руб. 22 коп.

Доводы ООО «СЗ «СК «Глобус» о том, что данная организация не является надлежащим ответчиком по делу, поскольку обязанной стороной в части внесения платы является МБУ "Управление капитального строительства и реконструкции" города Чебоксары, судом отклоняется на основании следующего.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. В силу положений статьи 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Проанализировав условия договора от 20.07.2022 № 01-2022/560 в редакции протокола разногласий от 07.07.2022, суд приходит к выводу, что договор является трехсторонним соглашением, где наряду с привычной конструкцией "заказчик - исполнитель" имеется третий участник правоотношений – плательщик (ООО «СЗ «СК «Глобус»).

В соответствии со статьей 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Как следует из условий договора, в обязанности ООО «СЗ «СК «Глобус» (плательщика) входит в том числе внесение платы за технологическое присоединение в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 11 договора.

Таким образом, именно ООО «СЗ «СК «Глобус» является должником в обязательстве по оплате услуг, оказанных исполнителем заказчику.

При отсутствии сведений со стороны исполнителя, подтверждающих исполнение обязательства по оплате спорной задолженности, основания для неисполнения плательщиком установленной договором обязанности по оплате отсутствовали.

Кроме указания в разделе договора "порядок расчетов" на внесение оплаты ООО «СЗ «СК «Глобус», в договоре регламентируется статус плательщика как участника договора, обладающего соответствующими обязанностями, порядком их исполнения (преамбула договора, пункт 11 договора).

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что именно ООО «СЗ «СК «Глобус» (плательщик), добровольно принявший на себя предусмотренные договором обязательства по оплате (статья 421 ГК РФ), как самостоятельная сторона договора, обязан оплатить оказанные услуги.

Кроме того, из технических условий к договору от 20.07.2022 № 01-2022/560 следует, что энергопринимающими устройствами являются ЛЭП-0,4 кВ и ВРУ-0,4кВ многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 21:01:0305006:1684 (г. Чебоксары), застройщиком которого является ООО «СЗ «СК «Глобус». 

Учитывая изложенное, заявленные требования подлежат удовлетворению за счет ООО «СЗ «СК «Глобус».

Расходы по уплате государственной пошлины относятся на ООО «СЗ «СК «Глобус» в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

исковое заявление удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Строительная компания "Глобус" (ИНН 

<

***>) в пользу государственного унитарного предприятия Чувашской Республики "Чувашские государственные электрические сети" Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики (ИНН 

<

***>) 203 233 (двести три тысячи двести тридцать три) руб. 22 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 20.09.2022 по 20.09.2024, 7 065 (семь тысяч шестьдесят пять) руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

В остальной части в удовлетворении искового заявления отказать.

Возвратить государственному унитарному предприятию Чувашской Республики "Чувашские государственные электрические сети" Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики (ИНН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 26 645 (двадцать шесть тысяч шестьсот сорок пять) руб., уплаченную платежным поручением от 07.06.2024 № 4606.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья

Д.В. Борисов