233/2017-13546(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 20 января 2017 года 

по делу № А33-25473/2016 Красноярск

20 января 2017 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Внести изменения в муниципальный контракт № 2016.32953 от 19.02.2016 на  выполнение работ по покраске металлических конструкций мостов в городе Красноярске у  субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих  организаций, заключенный между муниципальным казенным учреждением города  Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» и обществом с  ограниченной ответственностью «Леанта», изложив:  

 пункт 3.1. в следующей редакции:  « Срок начала выполнения работ – с момента заключения контракта. Срок завершения работ – 01.07.2017 г.»; 

Пункт 11.1. в следующей редакции: «Настоящий контракт вступает в силу с момента  заключения контракта и действует до полного исполнения обязательств обеими Сторонами,  принятых в соответствии с условиями настоящего контракта, но не позднее 01.07.2017 года».  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

 Судья О.В. Сысоева