29/2023-164499(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А70-20521/2022

г. Тюмень

17 октября 2023 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Соловьева К.Л., рассмотрев  исковое заявление Департамента городской среды Администрации города Тобольска (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 626152, 

<

...>) к акционерному обществу «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 625026,  

<

...>) о взыскании денежных средств, при  участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований  относительно предмета спора, МКУ «Тобольскстройзаказчик», ИП ФИО1, ООО  «Сирин», руководствуясь статьями 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,   

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить. 

Обязать акционерное общество «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное  предприятие» исполнить гарантийные обязательства по Муниципальному контракту от  31.12.2019 № 0167300000819000474 132643 на выполнение работ по объекту «Капитальный  ремонт дороги по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина) с устройством велосипедной  дорожки» в течение 2 (двух) месяцев с даты вступления решения суда в законную силу за  счет собственных средств и после выдачи истцом проекта производства работ АО «ТОДЭП»,  путем:  

- фрезерования асфальтобетона проезжей части автомобильной дороги (в том числе  примыкания): щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 0,05м;  

- укладки дорожной одежды капитального типа проезжей части автомобильной дороги  (в том числе примыкания): щебеночно-мастичного асфальтобетона по ГОСТ 3105-2022 марки  ЩМА-20 толщиной 0,05м;  

- фрезерования асфальтобетона тротуара толщиной 0,05 м.; 

- укладки дорожной одежды облегченного типа устройства тротуара: плотного  песчаного асфальтобетона по ГОСТ 9128-2013 типа Г марки III из горячей асфальтовой смеси  толщиной 0,05м;  

По участку по ул. Ленина от ул. Гагарина до ул. Дзержинского произвести устранение  просадки асфальтового покрытия у колодца инженерных сетей; установку люка ниже/выше  уровня асфальтового покрытия тротуара; очистку люка закатанного в асфальт; устранение  просадки бордюрного камня;  

По участку по ул. Ленина от ул. Дзержинского до ул. Декабристов произвести  устранение просадки асфальтового покрытия у колодца инженерных сетей; установку люка  ниже/выше уровня асфальтового покрытия тротуара; устранение просадки бордюрного камня;  

По участку по ул.Ленина от ул. Декабристов до ул. Кирова произвести устранение  просадки асфальтового покрытия у колодца инженерных сетей; установку люка ниже/выше  

уровня асфальтового покрытия тротуара; очистку люка закатанного в асфальт; устранение  просадки бордюрного камня.  

Взыскать с акционерного общества «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» в доходы федерального бюджета госпошлину в размере 6000  рублей.  

В удовлетворении ходатайства Автономной некоммерческой организации  «Независимая экспертиза Сибири» об увеличении стоимости экспертизы на 250 000 рублей  отказать.  

Перечислить денежные средства в размере 450 000 рублей, поступившие на  депозитный счет арбитражного суда Тюменской области от акционерного общества  «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» на основании платежного  поручения № 8 от 19114 от 22.11.2022 года на расчетный счет Автономной некоммерческой  организации «независимая экспертиза Сибири», ИНН: 

<

***>, адрес: 

<

...>, согласно банковским реквизитам,  указанным в счете на оплату № 3 от 25.05.2023 года (том 2 л.д. 102).  

Выдать исполнительный лист после вступления решения суда в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия путем  подачи жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через арбитражный суд  Тюменской области.  

 Соловьев К.Л. - 29   Судья