АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761

http://www.irkutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Иркутск                                                                                               

«24» октября 2022 года       Дело  № А19-17075/2022

Резолютивная часть решения вынесена 17.10.2022. Решение в полном объеме изготовлено 24.10.2022.

Арбитражный суд  Иркутской области в составе судьи Колосовой Е.Ю.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХЕЛПЕР» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, место нахождения: 121596, МОСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ, Г. МОСКВА, УЛ. ГОРБУНОВА,2/СТР 3, ЭТ. 8, ПОМ./КОМ/ОФ II/38Д/169А)

к  ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕСЛА»» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 123075, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МОСКВА,УЛ. КАЛИБРОВСКАЯ, 24А, КВ. 9)  

о взыскании 14 636 963 руб. 30 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен;

от ответчика: не явился, извещен.

установил:

ООО «ХЕЛПЕР» 10.08.2022 обратилось в суд к ООО «ТЕСЛА» с исковым заявлением о взыскании 2 000 000 руб. – задолженности по договору строительного подряда № ТСЛ/ХЛП-1 от 07.04.2021.

При рассмотрении дела истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил иск и просил взыскать 14 636 963 руб. 30 коп. - задолженности по договору строительного подряда № ТСЛ/ХЛП-1 от 07.04.2021.

Уточнение иска судом принято, иск подлежит рассмотрению в уточненной редакции.

Истец надлежащим образом извещенный о дате и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, об уважительности неявки суд не уведомил, ходатайств не заявил.

Ответчик надлежащим образом извещенный о дате и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, об уважительности неявки суд не уведомил, направил отзыв из которого следует, что задолженность по оплате возникла в виду финансовых трудностей предприятия.

Поскольку неявка истца, ответчика в судебное заседание, уведомленных надлежащим образом, не является препятствием для рассмотрения дела, дело в порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассматривается в их отсутствие по имеющимся материалам  дела.

Исследовав представленные доказательства, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, между ООО «ТЕСЛА» (подрядчик по договору, ответчик по делу) и ООО «ХЕЛПЕР» (субподрядчик по договору, истец по делу) заключен договор строительного подряда № ТСЛ/ХЛП-1 от 07.04.2021, по условиям которого субподрядчик принял на себя обязательство по выполнению строительно-монтажных работ в интересах заказчиков (ПАО «МТС», ПАО «Вымпелком» ПАО Мегафон», ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг») и сдать результат работ заказчикам, а подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные работы (п. 1.1, 1.2, 1.3 договора). В силу пункта 1.4 состав работ и сроки их выполнения определяются дополнительными соглашениями.    

По условиям пункта 1.1 дополнительного соглашения № 40064 от 07.04.2021 подрядчик (ООО «ХЕЛПЕР») обязался выполнить комплекс работ по строительно-монтажным работам на БС по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, садовое некоммерческое товарищество Экспериментатор-1, а заказчик (ООО «ТЕСЛА») обязался принять и оплатить выполненные работы согласно данным прайс листа.  Стоимость указанных работ составляет 3 211 427 руб. 21 коп. (п. 2.1.1 договора). Срок выполнения работ установлен – 30 календарных дней с момента подписания ДС.

Предусмотренные указанным ДС работы подрядчик выполнил и передал результат генподрядчику - ООО «ТЕСЛА», о чем свидетельствуют акты о приемке выполненных работ КС-2 № 40064-1 от 01.07.2021, 40064-2 от 05.07.2021, № 40064-3 от 12.07.2021, № 40064-4 от 15.07.2021, справки КС-3 № 40064-1 от 01.07.2021 на сумму 813 742,98 руб., №40064-2 от 05.07.2021 на сумму 990 553,30 руб., № 40064-3 от 12.07.2021 на сумму 850 636,01 руб., № 40064-4 от 15.07.2021 на сумму 556 494,92 руб., подписанные сторонами без замечаний.

   По условиям пункта 1.1 дополнительного соглашения № 40079 от 07.04.2021 подрядчик (ООО «ХЕЛПЕР») обязался выполнить комплекс работ по строительно-монтажным работам на БС по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, 

<

...> а заказчик (ООО «ТЕСЛА») обязался принять и оплатить выполненные работы согласно данным прайс листа.  Стоимость указанных работ составляет 2 241 177 руб. 60 коп. (п. 2.1.1 договора). Срок выполнения работ установлен – 30 календарных дней с момента подписания ДС. 

Предусмотренные указанным ДС работы подрядчик выполнил и передал результат генподрядчику - ООО «ТЕСЛА», о чем свидетельствуют акты о приемке выполненных работ КС-2 № 40079-3 от 06.09.2021, 40079-2 от 09.08.2021, №40079-1 от 05.07.2021 справки КС-3 № 40079-3 от 06.09.2021 на сумму 614 564,69 руб., №40079-2 от 09.08.2021 на сумму 953 631,31 руб., № 40079-1 от 05.07.2021 на сумму 672 981,60 руб., подписанные сторонами без замечаний.

По условиям пункта 1.1 дополнительного соглашения № 46709 от 07.04.2021 подрядчик (ООО «ХЕЛПЕР») обязался выполнить комплекс работ по строительно-монтажным работам на БС по адресу: 

<

...> а заказчик (ООО «ТЕСЛА») обязался принять и оплатить выполненные работы согласно данным прайс листа.  Стоимость указанных работ составляет  2 544 339 руб. 71 коп. (п. 2.1.1 договора). Срок выполнения работ установлен – 30 календарных дней с момента подписания ДС.

Предусмотренные указанным ДС работы подрядчик выполнил и передал результат генподрядчику - ООО «ТЕСЛА», о чем свидетельствуют акты о приемке выполненных работ КС-2 № 46709-3 от 02.07.2021, 46709-4 от 02.07.2021, № 46709-2 от 01.07.2021, № 46709-1 от 01.07.2021, справки КС-3 № 46709-3 от 02.07.2021 на сумму 654 958,45 руб., №46709-4 от 02.07.2021 на сумму 354 325,75 руб., № 46709-2 от 01.07.2021 на сумму 981 855,14 руб., № 46709-1 от 01.07.2021 на сумму 553 200,37 руб., подписанные сторонами без замечаний.

По условиям пункта 1.1 дополнительного соглашения № 73286 от 07.04.2021 подрядчик (ООО «ХЕЛПЕР») обязался выполнить комплекс работ по строительно-монтажным работам на БС по адресу: Курганская область, Долматовский район, д. малиновка, а заказчик (ООО «ТЕСЛА») обязался принять и оплатить выполненные работы согласно данным прайс листа.  Стоимость указанных работ составляет 51 239 руб. 25 коп. (п. 2.1.1 договора). Срок выполнения работ установлен – 30 календарных дней с момента подписания ДС.

Предусмотренные указанным ДС работы подрядчик выполнил и передал результат генподрядчику - ООО «ТЕСЛА», о чем свидетельствуют акты о приемке выполненных работ КС-2 № 73286 от 09.09.2021, справки КС-3 № 73286 от 09.09.2021 на сумму 51 239,25 руб., подписанные сторонами без замечаний.

По условиям пункта 1.1 дополнительного соглашения № 53816 от 08.04.2021 подрядчик (ООО «ХЕЛПЕР») обязался выполнить комплекс работ по строительно-монтажным работам на БС по адресу: 

<

...>, а заказчик (ООО «ТЕСЛА») обязался принять и оплатить выполненные работы согласно данным прайс листа.  Стоимость указанных работ составляет 16 983 руб. 90 коп. (п. 2.1.1 договора). Срок выполнения работ установлен – 30 календарных дней с момента подписания ДС.

Предусмотренные указанным ДС работы подрядчик выполнил и передал результат генподрядчику - ООО «ТЕСЛА», о чем свидетельствуют акты о приемке выполненных работ КС-2 № 53816 от 13.09.2021, справки КС-3 № 53816 от 13.09.2021 на сумму 16 983,90 руб., подписанные сторонами без замечаний.

По условиям пункта 1.1 дополнительного соглашения № 58537 от 29.04.2021 подрядчик (ООО «ХЕЛПЕР») обязался выполнить комплекс работ по строительно-монтажным работам на БС по адресу: 

<

...> а заказчик (ООО «ТЕСЛА») обязался принять и оплатить выполненные работы согласно данным прайс листа.  Стоимость указанных работ составляет 400 176 руб. 48 коп. (п. 2.1.1 договора). Срок выполнения работ установлен – 30 календарных дней с момента подписания ДС.

Предусмотренные указанным ДС работы подрядчик выполнил и передал результат генподрядчику - ООО «ТЕСЛА», о чем свидетельствуют акты о приемке выполненных работ КС-2 № 58537 от 28.09.2021, справки КС-3 № 58537 от 28.09.2021 на сумму 400 176,48 руб., подписанные сторонами без замечаний.

По условиям пункта 1.1 дополнительного соглашения № 42326 от 06.05.2021 подрядчик (ООО «ХЕЛПЕР») обязался выполнить комплекс работ по строительно-монтажным работам на БС по адресу: 

<

...>, а заказчик (ООО «ТЕСЛА») обязался принять и оплатить выполненные работы согласно данным прайс листа.  Стоимость указанных работ составляет 721 606 руб. 17 коп. (п. 2.1.1 договора). Срок выполнения работ установлен – 30 календарных дней с момента подписания ДС.

Предусмотренные указанным ДС работы подрядчик выполнил и передал результат генподрядчику - ООО «ТЕСЛА», о чем свидетельствуют акты о приемке выполненных работ КС-2 № 42326 от 13.07.2021, справки КС-3 № 42326 от 13.07.2021 на сумму 721 606,17 руб., подписанные сторонами без замечаний.

По условиям пункта 1.1 дополнительного соглашения № 12150 от 11.05.2021 подрядчик (ООО «ХЕЛПЕР») обязался выполнить комплекс работ по строительно-монтажным работам на БС по адресу: Новосибирский район, Кудряшовский дп, ул. Октябрьская, а заказчик (ООО «ТЕСЛА») обязался принять и оплатить выполненные работы согласно данным прайс листа.  Стоимость указанных работ составляет 1 126 489 руб. 57 коп. (п. 2.1.1 договора). Срок выполнения работ установлен – 30 календарных дней с момента подписания ДС.

Предусмотренные указанным ДС работы подрядчик выполнил и передал результат генподрядчику - ООО «ТЕСЛА», о чем свидетельствуют акты о приемке выполненных работ КС-2 № 12150-2 от 02.07.2021, № 12150-1 от 01.07.2021, справки КС-3 № 12150-2 от 02.07.2021 на сумму 490 294,48 руб., 12150-1 от 01.07.2021 на сумму 636 195,10 руб., подписанные сторонами без замечаний.

По условиям пункта 1.1 дополнительного соглашения № 40007 от 10.06.2021 подрядчик (ООО «ХЕЛПЕР») обязался выполнить комплекс работ по строительно-монтажным работам на БС по адресу: 

<

...> а заказчик (ООО «ТЕСЛА») обязался принять и оплатить выполненные работы согласно данным прайс листа.  Стоимость указанных работ составляет 2 572 675 руб. 22 коп. (п. 2.1.1 договора). Срок выполнения работ установлен – 30 календарных дней с момента подписания ДС.

Предусмотренные указанным ДС работы подрядчик выполнил и передал результат генподрядчику - ООО «ТЕСЛА», о чем свидетельствуют акты о приемке выполненных работ КС-2 № 4007-4 от 01.07.2021, № 4007-3 от 01.07.2021, № 4007-2 от 01.07.2021, № 4007-1 от 01.07.2021, справки КС-3 № 40007-4 от 01.07.2021 на сумму 332 217,62 руб., № 40007-3 от 01.07.2021 на сумму 613 787,89 руб., № 40007-2 от 01.07.2021 на сумму 954 408,11 руб., № 40007-1 от 01.07.2021 на сумму 672 261,60 руб., подписанные сторонами без замечаний.

По условиям пункта 1.1 дополнительного соглашения № 46776 от 10.06.2021 подрядчик (ООО «ХЕЛПЕР») обязался выполнить комплекс работ по строительно-монтажным работам на БС по адресу: 

<

...> а заказчик (ООО «ТЕСЛА») обязался принять и оплатить выполненные работы согласно данным прайс листа.  Стоимость указанных работ составляет 783 088 руб. 62 коп. (п. 2.1.1 договора). Срок выполнения работ установлен – 30 календарных дней с момента подписания ДС.

Предусмотренные указанным ДС работы подрядчик выполнил и передал результат генподрядчику - ООО «ТЕСЛА», о чем свидетельствуют акты о приемке выполненных работ КС-2 № 46776 от 12.07.2021, справки КС-3 № 46776 от 12.07.2021 на сумму 783 088,62 руб., подписанные сторонами без замечаний.

По условиям пункта 1.1 дополнительного соглашения № 50516 от 29.06.2021 подрядчик (ООО «ХЕЛПЕР») обязался выполнить комплекс работ по строительно-монтажным работам на БС по адресу: Республика Башкортостан, р-н Абзелиловский, д. Халилово, а заказчик (ООО «ТЕСЛА») обязался принять и оплатить выполненные работы согласно данным прайс листа.  Стоимость указанных работ составляет 17 824 руб. 80 коп. (п. 2.1.1 договора). Срок выполнения работ установлен – 30 календарных дней с момента подписания ДС.

Предусмотренные указанным ДС работы подрядчик выполнил и передал результат генподрядчику - ООО «ТЕСЛА», о чем свидетельствуют акты о приемке выполненных работ КС-2 № 50516 от 13.09.2021, справки КС-3 № 50516 от 13.09.2021 на сумму 17 824,80 руб., подписанные сторонами без замечаний.

По условиям пункта 1.1 дополнительного соглашения № 59484 от 29.06.2021 подрядчик (ООО «ХЕЛПЕР») обязался выполнить комплекс работ по строительно-монтажным работам на БС по адресу: Республика Башкортостан, Белорецкий район, Тирлянский, а заказчик (ООО «ТЕСЛА») обязался принять и оплатить выполненные работы согласно данным прайс листа.  Стоимость указанных работ составляет 17 824 руб. 80 коп. (п. 2.1.1 договора). Срок выполнения работ установлен – 30 календарных дней с момента подписания ДС.

Предусмотренные указанным ДС работы подрядчик выполнил и передал результат генподрядчику - ООО «ТЕСЛА», о чем свидетельствуют акты о приемке выполненных работ КС-2 № 59484 от 13.09.2021, справки КС-3 № 59484 от 13.09.2021 на сумму 17 824,80 руб., подписанные сторонами без замечаний.

По условиям пункта 1.1 дополнительного соглашения № 51728 от 09.07.2021 подрядчик (ООО «ХЕЛПЕР») обязался выполнить комплекс работ по строительно-монтажным работам на БС по адресу: Нижегородская область, Лысковский район, с. Валки, а заказчик (ООО «ТЕСЛА») обязался принять и оплатить выполненные работы согласно данным прайс листа.  Стоимость указанных работ составляет 42 978 руб. (п. 2.1.1 договора). Срок выполнения работ установлен – 30 календарных дней с момента подписания ДС.

Предусмотренные указанным ДС работы подрядчик выполнил и передал результат генподрядчику - ООО «ТЕСЛА», о чем свидетельствуют акты о приемке выполненных работ КС-2 № 51728 от 13.09.2021, справки КС-3 № 51728 от 13.09.2021 на сумму 42 978 руб., подписанные сторонами без замечаний.

По условиям пункта 1.1 дополнительного соглашения № 40079-1 от 01.09.2021 подрядчик (ООО «ХЕЛПЕР») обязался выполнить комплекс работ по строительно-монтажным работам на БС по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, 

<

...> а заказчик (ООО «ТЕСЛА») обязался принять и оплатить выполненные работы согласно данным прайс листа.  Стоимость указанных работ составляет 889 131 руб. 96 коп. (п. 2.1.1 договора). Срок выполнения работ установлен – 30 календарных дней с момента подписания ДС. 

Предусмотренные указанным ДС работы подрядчик выполнил и передал результат генподрядчику - ООО «ТЕСЛА», о чем свидетельствуют акты о приемке выполненных работ КС-2 № 40079-1-1 от 27.09.2021, справки КС-3 № 40079-1-1 от 27.09.2021 на сумму 889 131,96 руб., подписанные сторонами без замечаний.

Ответчик оплату за выполненные работы не произвел.

В целях досудебного урегулирования спора истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием произвести оплату в размере 14 636 963 руб. 30 коп., которая получена лично директором ответчика.

 Письмом исх. № 29/2022 от 08.06.2022 ООО «ТЕСЛА» гарантировал истцу оплату в полном размере  в срок до 30.06.2022, однако оплата так и не произведена.

Данные обстоятельства явились основанием для обращения истца в арбитражный суд с иском. 

Проанализировав условия представленного договора № ТСЛ/ХЛП-1 от 07.04.2021 и дополнительных соглашений к нему, суд считает, что по своей правовой природе он является договором подряда, правовое регулирование которого осуществляется главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 ГК РФ По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Пунктом 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы, по согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В силу требований статей 708, 743 Гражданского кодекса Российской Федерации к числу существенных условий договора строительного подряда относится согласование сторонами объема, содержания работ и других предъявляемых к ним требований, определяемых технической документацией, а также сроков выполнения подрядных работ.

Следовательно, в силу названных правовых норм существенными для спорного договора строительного подряда являются:

- условия о содержании и объеме работ (предмете);

- срок выполнения работ.

Оценив условия договора№ ТСЛ/ХЛП-1 от 07.04.2021 и дополнительных соглашений к нему, суд пришел к выводу о согласовании сторонами всех его существенных условий

С учетом проведенного анализа суд приходит к выводу, что вышеуказанный договор является заключенным – порождающим взаимные права и обязательства сторон.

Факт выполнения истцом работ подтверждается вышеуказанными актами о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справками о стоимости выполненных работ, подписанными и скрепленными печатями сторон без каких-либо замечаний относительно объема, качества и сроков выполненных работ.

Согласно пункту 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (статья 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из разъяснений, приведенных в пункте 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», следует, что основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В данном случае судом установлено и материалами дела подтверждается, что ответчиком приняты, но в установленный срок не оплачены выполненные ООО «ХЕЛПЕР» работы на сумму 14 636 963 руб. 30 коп.

Наличие задолженности по оплате работ в указанной сумме ООО «ТЕСЛА» подтверждается также гарантийным письмом, подписанным директором ООО «ТЕСЛА», что фактически свидетельствует о признании долга в указанной сумме.

Фактически в отзыве на иск ответчик требование истца не оспорил, указал на финансовые трудности, в связи с чем оплата не произведена вовремя, однако отсутствие денежных средств не может являться основанием для неисполнения обязательств по оплате выполненных и принятых работ.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что у ответчика возникла обязанность по оплате оказанных услуг.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом; односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается. 

Ответчик доказательства оплаты долга в размере 14 636 963 руб. 30 коп. не представил. 

Учитывая изложенное, положение статей  309, 310, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, условия договора № ТСЛ/ХЛП-1 от 07.04.2021 и дополнительных соглашений к нему, суд приходит к выводу, что иск о взыскании основного долга в размере 14 636 963 руб. 30 коп. заявлен обоснованно и подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

При принятии решения арбитражный суд в силу положений части 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации решает вопросы о сохранении действия мер по обеспечению иска или об отмене обеспечения иска либо об обеспечении исполнения решения; при необходимости устанавливает порядок и срок исполнения решения; определяет дальнейшую судьбу вещественных доказательств, распределяет судебные расходы, а также решает иные вопросы, возникшие в ходе судебного разбирательства.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Исковые требования истца судом признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Истец при обращении в суд с иском уплатил государственную пошлину в размере 33 000 руб., о чем свидетельствуют чек-ордер № 52 от 05.08.2022.

В соответствии со статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина за рассмотрение дела, с учетом уточнений, составляет              96 184 руб. 82 коп.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что с ответчика в пользу истца следует взыскать расходы по уплате государственной пошлины в размере 33 000 руб., государственную пошлину в размере 63 184 руб. 82 коп. следует взыскать в доход федерального бюджета с ответчика. 

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕСЛА»» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 123075, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МОСКВА,УЛ. КАЛИБРОВСКАЯ, 24А, КВ. 9) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХЕЛПЕР» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, место нахождения: 121596, МОСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ, Г. МОСКВА, УЛ. ГОРБУНОВА,2/СТР 3, ЭТ. 8, ПОМ./КОМ/ОФ II/38Д/169А) 14 636 963 руб. 30 коп. - задолженности по договору строительного подряда № ТСЛ/ХЛП-1 от 07.04.2021, 33 000 руб. – расходы по оплате государственной пошлины.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕСЛА»» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 123075, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МОСКВА,УЛ. КАЛИБРОВСКАЯ, 24А, КВ. 9) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 63 184 руб. 82 коп.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Иркутской области. 

Судья                                                                                                          Е.Ю. Колосова