Арбитражный суд Брянской области 241050, 

<

...> сайт: www.bryansk.arbitr.ru РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ решения по делу 

№ А09-128/2022

город Брянск

16 октября 2025 года

Арбитражный суд Брянской области в составе: судьи Ю.И. Дюбо 

при ведении протокола судебного заседания секретарями с/з Пимоновой А.К., Забугиной А.А., помощником судьи Корячкиной Н.П., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску некоммерческой организации Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области, г. Брянск, (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), к обществу с ограниченной ответственностью «ТримСтрой», г. Брянск, (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>), о понуждении устранить недостатки работ  

и по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ТримСтрой», г. Брянск, к Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области, г. Брянск, о взыскании 4 754 720 руб. (с учетом уточнения), третьи лица: 1) ООО «Регион», 2) ФИО1, 3) ООО «Домоуправление № 11», при участии в судебном заседании:  

от истца (по первоначальному иску): ФИО2 (доверенность № 2 от 07.03.2025г.),  

от ответчика (по первоначальному иску): ФИО3, доверенность от 09.01.2024 ФИО4 (доверенность от 07.07.2025г.), от третьих лиц: 1) не явились, 2) ФИО1 (паспорт), 3) ФИО5, доверенность от 23.05.2025,  

руководствуясь ст.ст.167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать ООО «ТримСтрой» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу, безвозмездно устранить недостатки (дефекты, несоответствия), допущенные при проведении капитального ремонта плоской кровли МКД по адресу: 

<

...>, а именно:  

1. Выполнить ремонт кровли в местах образования вздутий и отслоений  

рулонного ковра от поверхности (14 участков площадью около 1 кв.м,  

каждый), в объеме 15 кв.м.; 

2. Произвести обработку герметиком примыкания кровли к существующим вентстоякам и выходам на кровлю в местах, где герметик отсутствует, в объеме 30,0 м.п.;  

3. Произвести обработку герметиком стыков фартуков над парапетами из оцинкованной стали в местах, где герметик отсутствует, в объеме 20,0 м.п.;  

4. Установить заглушки желобов по краям горизонтальных участков водосточной системы, в количестве 3 шт.;  

5. Осуществить замену поврежденных участков желобов системы наружного организованного водостока, в объеме 10 м.п.;  

6. Осуществить ремонт поверхности вентканалов в местах отслоения штукатурного слоя, в объеме 5 кв.м.;  

7. Осуществить работы по окраске карнизных плит в районах входных групп с фронтальной зоны МКД. В том же районе произвести ремонт бетонных конструкций в объеме 0,1 куб.м.;  

8. Выполнить заделку отверстия в стене выхода на кровлю в соответствии с Рабочей документацией 25.ПСР.2021-7 на «Капитальный ремонт плоской крыши» и требованиям строительных норм и правил.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТримСтрой», г. Брянск,  

(ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>), в пользу Регионального фонда капитального  

ремонта многоквартирных домов Брянской области, г. Брянск (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>), 6 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. Встречное исковое заявление удовлетворить. 

Взыскать с Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов  

Брянской области, г. Брянск (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), в пользу общества  

с ограниченной ответственностью «ТримСтрой», г. Брянск, (ИНН 

<

***> ОГРН  

<

***>), 4 754 720 руб. долга и 10 000 руб. в возмещение расходов по уплате  

государственной пошлины. 

Взыскать с Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов  

Брянской области, г. Брянск (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход  

федерального бюджета 36 774 руб. госпошлины по иску. 

Решение

 суда вступает в законную силу по истечении месяца и может быть  

обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок. Судья Ю.И. Дюбо