Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-49434/2018

18 июля 2018 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  13 июля 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  18 июля 2018 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коросташова А.А.

 

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурно-строительная служба" (адрес:  Россия 192281, Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, д. 12/100, кв. 208, ОГРН: 

<

***>);

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "СК "ВИТА" (адрес:  Россия 197022, 

<

...>, лит. А, пом. 7-Н, оф. 1, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании, 

 

при участии: 

- от истца: ФИО2 (генеральный директор)

- от ответчика: ФИО3 (доверенность от 26.03.2018) 

 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурно-строительная служба" (далее - Служба) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании в Общества с ограниченной ответственностью "СК "Вита" (далее – Общество) 579 482 руб. 56 коп. долга по договору подряда от 01.03.2017 № 01-03-17 (далее - договор).

Возражая против удовлетворения исковых требований в заявленном размере, Общество заявило об удержании на основании п. 12.10 договора из суммы долга начисленной за нарушение сроков выполнения работ неустойки в размере 526 618 руб. 53 коп.

Исследовав материалы дела,  выслушав объяснения представителей сторон, суд признал иск подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Заявленный Службой размер задолженности по договору подтвержден материалами дела и не оспаривается Обществом.

Вместе с тем п. 12.10 договора предусмотрено право генподрядчика (Общества) удержать сумму требования (пени, штрафы, неустойки, иные штрафные санкции), предъявленные подрядчику (Службе) по условиям договора, путём удержания из суммы, подлежащей уплате подрядчику за выполненные и принятые генподрядчиком работы по договору.

Претензией от 19.03.2018 № 74 (направлена в адрес Службы 23.03.2018) Общество заявило об удержании 526 618 руб. 53 коп. неустойки из суммы долга.

Расчёт неустойки проверен судом и признан обоснованным (истцом также не оспорен).

В нарушение статьи 716 Гражданского кодекса РФ Служба своевременно не извещала Общество о невозможности исполнения работ в установленный срок, в связи с чем возражения истца в данной части отклонены судом. 

 При таких обстоятельствах и с учётом положений ст.ст. 309, 310, 330, 702, 711 Гражданского кодекса РФ, условий договора иск подлежит частичному удовлетворению в размере  52 864 руб. 03 коп. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СК "Вита" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Архитектурно-строительная служба" 52 864 руб. 03 коп. долга.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СК "Вита" в доход федерального бюджета 1 331 рублей 00 коп. государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Архитектурно-строительная служба" в доход федерального бюджета 13 259 руб. 00 коп. государственной пошлины.

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Коросташов А.А.