28/2018-71903(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 http://kirov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть 

 

Дело № А28-5841/2018

г.Киров

26 июня 2018 года

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Прозоровой Е.Ю., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по исковому заявлению 

муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, юридический адрес: 610027, Россия,  

<

...>)  

к публичному акционерному обществу «Стромит» (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>, юридический адрес: 610016, Россия, Кировская область, г. Киров, сл.  Большое Скопино, д.1)  

об устранении недостатков, 

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать публичное акционерное общество «Стромит» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) устранить недостатки выполненных работ по муниципальному  контракту от 10.07.2015 № 2015.240113 по строительству «под ключ» объекта:  «Многоквартирный жилой дом по ул.Зеленина (строительный № 4) в мкр Долгушино  г.Кирова» (новый адрес: г.Киров. ул.8 Марта, д.5), а именно:  

-устранить продувание оконных откосов в маленькой комнате и кухне (квартира   № 30)  

-устранить причины образования конденсата за вытяжной шахтой в кухне- гостиной на натяжном потолке (квартира № 157).  

-устранить образование конденсата на перекрытии в санузле за натяжным  потолком (квартира № 157).  

-устранить трещину с раскрытием до 4 мм в конструкции стены, в  пазогребневой плите (квартира № 61 в тамбуре 7 этажа выхода на лестницу),  

-устранить трещины в стенах в ванной комнате с раскрытием до 1 мм длиной 2 м  (квартира № 140),  

-устранить трещины в стенах комнаты-кухни под оконным блоком с раскрытием  до 1 мм длиной 20 см (квартира № 140),  

-устранить трещины в стенах на фасаде со стороны балкона между плитами  ЦСП (квартира № 140),  

-установить крепление (деталь) в балконной двери для плотного прижима к раме  (квартира № 140),  

-устранить вертикальные трещины в санузле на монтажном стыке колонны и  стены из пазогребневой плиты на всю высоту помещения с раскрытием 1 мм и наличие  дополнительного вентиляционного отверстия в санузле в плите перекрытия (квартира   № 87).  

Взыскать с публичное акционерное общество «Стромит» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 6 000  (шесть тысяч) рублей.  

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в  месячный срок в соответствии со статьями 257, 259 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации.  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кировской области. 

Судья Е.Ю.Прозорова.