АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761

http://www.irkutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Иркутск                                                                                                     Дело  № А19-4385/2021 

24.05.2021

Резолютивная часть решения суда объявлена в судебном заседании 17.05.2021.

Решение суда в полном объеме изготовлено 24.05.2021. 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Пенюшова Е.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации: 28.12.2007, адрес: 664003, 

<

...>) к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОБОЛЬ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации: 10.06.2016, адрес: 665903, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН, СЛЮДЯНКА ГОРОД, ГОРНЯЦКАЯ 

<

...>) 

о взыскании 4 641 196 рублей, об обязании выполнить рекультивацию,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2, доверенность, паспорт, диплом;

от ответчика: не явились, извещены;

установил:

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                          (далее - Министерство) обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОБОЛЬ"                   (далее – ООО "СОБОЛЬ") о взыскании 4 641 196 рублей - неустойки по договору от 14.06.2018 № 91-431/18, об обязании выполнить мероприятия по техническому этапу рекультивации лесного участка, переданного по договору аренды лесного участка от 14.06.2018 № 91-431/18, в соответствии с проектом освоения лесов, а именно: снять и складировать плодородный слой почвы; демонтаж оборудования, очистка территории                       от строительных остатков, временных строений, строительных отходов; удаление слоя грунта в местах его загрязнения нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими состояние грунта; ликвидацию шламовых амбаров; уборка строительного и бытового мусора; планировка рекультивируемой площади (засыпка и выравнивание ям, рытвин, за счёт имеющихся повышенных форм рельефа: холмов, бугров); нанесение плодотворного слоя почвы на площади 91,0792 га в тёплый бесснежный период года до 01.10.2021 года; об обязании выполнить мероприятия по биологоческому этапу рекультивации лесного участка, переданного по договору аренды лесного участка от 14.06.2018 № 91-431/18 в соответствии с проектом освоения лесов, а именно выполнить комбинированное лесовосстановление - создание лесных культур методом посадки сеянцев сосны обыкновенной в тёплый бесснежный период года, до 01.10.2021 года, на площади 84,659 га.

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал, в обоснование иска сослался на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по проведению мероприятий по рекультивации лесного участка, предусмотренных договором аренды лесного участка от 14.06.2018 № 91-431/18 и проектом освоения лесов. 

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения спора извещен надлежащим образом в порядке статей 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ); отзыв на иск не представил, ходатайств и возражений в отношении рассмотрения дела в отсутствие представителя общества не заявил.

Судебные акты по рассматриваемому делу опубликованы на официальном портале арбитражных судов «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Дело рассматривается в соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ в отсутствие представителя ответчика.

Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, суд установил следующее.

На основании распоряжения Министерства лесного комплекса Иркутской области                   от 28 июня 2018 года № 2206-мр между Министерством лесного комплекса Иркутской области (арендодатель) и ООО "СОБОЛЬ" (арендатор) заключен договор аренды лесного участка от 14.06.2018 № 91-431/18, по условиям которого арендодатель обязуется предоставить, а арендатор обязуется принять во временное пользование лесной участок, находящийся в государственной собственности, имеющий следующие характеристики: площадь: 95,4034 га, местоположение: Иркутская область, Ангарское муниципальной образование, Усольское лесничество, Ангарское участковое лесничество, Савватеевская дача, эксплуатационные леса, кварталы №№ 109 (в. 11ч, 14ч-18ч, 24ч, 25ч), 110 (в. 5ч, 7ч, 9ч-21ч, 23ч, 24н), 111 (в. 2ч, 4ч, 7ч, 8ч, 10ч, 12ч), 113 (в. 11ч-14ч, 16ч-23ч), 114 (в. 8ч, 9ч, 12ч-19ч), 139 (в. 1ч-6ч, 8ч), 140 (в. 1ч-16ч), 141 (в. 12ч, 14ч, 15ч, 18ч-20ч); вид разрешенного использования: выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых и заготовка древесины (для возможности реализации основной цели использования (с общим объемом древесины на корню 13418,44 м³,                                 в том числе ликвидной древесины 10842,09 м³). Арендатору передается лесной участок-                   с целью геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых (пункт 1.3 договора). 

Лесной участок передан в пользование арендатора по акту приема-передачи.

Срок действия договора от 14.06.2018 № 91-431/18 устанавливается с момента                    его подписания на 6 месяцев (пункт 6.1 договора).

Согласно подпункту «т» пункта 3.4 договора от 14.06.2018 № 91-431/18 по истечении срока действия настоящего договора или в случае досрочного прекращения срока действия договора арендатор обязан освободить лесной участок от объектов недвижимого имущества, обеспечить снос объектов, созданных для освоения лесного участка, и осуществить рекультивацию земель, на которых расположены леса и которые подверглись загрязнению и иному негативному воздействию в соответствии с проектом рекультивации земель и требованиями законодательства Российской Федерации.

В соответствии с разделом 7.2.5 проекта освоения лесов и приложением № 2 к составу проекта освоения лесов обществом запроектировано проведение рекультивации нарушенных при геологическом изучении недр, разработке месторождений полезных ископаемых                    земель на лесном участке в 2018 году.

Из представленного в материалы дела рабочего проекта рекультивации земель на лесном участке, переданном в аренду ООО "СОБОЛЬ" (раздел 3 пункт 3.1) мероприятия по рекультивации будут проведены после завершения работ на лесном участке, а также в случае досрочного расторжения договора аренды лесного участка. Срок окончания действия договора аренды установлен 04.01.2019. Работы по рекультивации будут проводиться не позднее 01.10.2018.

Рекультивация нарушенных земель должна осуществляться в два последовательных этапа: технический и биологический в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.01-83.

Работы технического этапа проводятся на площади 91,0792 га (0,6572 га – воды, 3,6670 га - болото).

Технический этап рекультивации земель, включает в себя следующие мероприятия:

- снятие и складирование плодородного слоя почвы;

- демонтаж оборудования, очистка территории от строительных остатков, временных строений, строительных отходов; удаление слоя грунта в местах его загрязнения нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими состояние грунта; ликвидацию шламовых амбаров;

- уборка строительного и бытового мусора;

- планировка рекультивируемой площади (засыпка и выравнивание ям, рытвин, за счёт имеющихся повышенных форм рельефа: холмов, бугров);

- нанесение плодородного слоя почвы.

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы. Биологический этап выполняется после завершения технического этапа, на площади 90,389 га.

На лесном участке предусматривается, проведение лесовосстановительных мероприятий комбинированным путем. Методом посадки сеянцев сосны обыкновенной на площадках шириной более 100 м, и естественное лесовосстановление вследствие-природных процессов, на участках под, буровые линии шириной 40 м, так как имеется плодородный слой почвы, благоприятный для произрастания леса на участках, и расположение между двумя стенами леса главных лесных древесных пород.

Мероприятия по созданию лесных культур на лесном участке, предоставленном по договору аренды лесного участка от 14.06.2018 № 91-431/18, должны быть осуществлены                   до 01.10.2018 (проект рекультивации нарушенных земель). 

Согласно акту от 15.01.2019 № 1 проверки исполнения договорных обязательств арендатором ООО "СОБОЛЬ" по договору аренды лесного участка от 14.06.2018                            № 91-431/18 и проекту освоения лесов, в ходе проверки установлено, что обществом не выполнены лесовосстановительные мероприятия на площади 84,659 га, а также не выполнены работы по рекультивации нарушенных земель.

В соответствии с подпунктом «с» пункта 4.2 договора от 14.06.2018 № 91-431/18 за невыполнение обязательств, установленных подпунктом «т» пункта 3.4 настоящего договора арендатор уплачивает арендодателю неустойку в следующем размере 4х-кратной стоимости работ, необходимых для восстановления соответствующей территории по нормативам в области лесного хозяйства, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, а при отсутствии таких нормативов - согласно калькуляции арендодателя.

Истцом произведен расчет неустойки на основании подпункта «с» пункта 4.2 договора от 14.06.2018 № 91-431/18 исходя из площади невыполненных объемов по виду работ и установленных приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 29.10.2019 № 3368-мр затрат на вид работ на 1 га в 2020 году, что составило                                           4 641 196 рублей.

В порядке досудебного урегулирования спора, истцом в адрес ответчика направлена претензия от 24.12.2020 № 02-91-17662/20 о необходимости выполнить рекультивацию лесного участка и уплатить неустойку по договору аренды лесного участка от 14.06.2018 № 91-431/18 в срок до 25.01.2020.

Требования истца ответчиком в добровольном порядке и в установленный срок не исполнены, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском о взыскании неустойки и о понуждении выполнить рекультивацию лесного участка.

Оценив представленные доказательства каждое в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности в соответствии с требованиями                     статьи 71 АПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

Согласно статье 11 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) защита нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляется в судебном порядке с использованием способов защиты, предусмотренных статьей 12 ГК РФ, либо иными способами, установленными законом.

Как следует из заявленных требований, истцом избран способ защиты гражданского права – понуждение к исполнению обязанности в натуре. 

В соответствии со статьей 1 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - ЛК РФ) одним из основных принципов лесного законодательства является обеспечение охраны и защиты лесов.

В силу статьи 12 ЛК РФ освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также развития лесной промышленности. Освоение лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций. При освоении лесов на основе комплексного подхода осуществляются: организация использования лесов; создание и эксплуатация объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры; проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов; проведение мероприятий по охране, использованию объектов животного мира, водных объектов.

По части 2 статьи 60.12 ЛК РФ при использовании лесов, охране лесов от пожаров, защите, воспроизводстве лесов, в том числе при выполнении лесосечных работ, должны соблюдаться установленные законодательством Российской Федерации требования по охране окружающей среды от загрязнения и иного негативного воздействия, выполняться меры по охране лесов от загрязнения (в том числе нефтяного, радиоактивного и другого) и иного негативного воздействия, включая меры по сохранению лесных насаждений, лесных почв, среды обитания объектов животного мира, других природных объектов в лесах, а также должна осуществляться, в том числе посредством лесовосстановления и лесоразведения, рекультивация земель, на которых расположены леса и которые подверглись загрязнению и иному негативному воздействию.

Особенности рекультивации земель, указанных в части 2 настоящей статьи, меры по сохранению лесных насаждений, лесных почв, среды обитания объектов животного мира, других природных объектов в лесах утверждаются Правительством Российской Федерации (часть 4 статьи 60.12 ЛК РФ).

Согласно части 2 статьи 43 ЛК РФ для использования лесов в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых лесной участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, предоставляется в аренду или в отношении этого лесного участка может быть установлен сервитут в соответствии со статьей 9 настоящего Кодекса.

Правила использования лесов для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых и перечень случаев использования лесов в указанных целях без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (часть 6 статьи 43 ЛК РФ).

Согласно пункту 19 Правил использования лесов для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых и Перечня случаев использования лесов в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, утвержденных Приказом Минприроды России от 07.07.2020 № 417 " (далее – Правила использования лесов для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых) лица, осуществляющие использование лесов в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, обеспечивают, в том числе консервацию или ликвидацию объектов, связанных с осуществлением геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, по истечении сроков выполнения соответствующих работ и рекультивацию земель, которые использовались для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации указанных объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, в соответствии с законодательством Российской Федерации (подпункт «в»).

Из пункта 20 Правил использования лесов для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых следует, что земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, подлежат рекультивации после завершения работ в соответствии с проектом рекультивации, а объекты, связанные с геологическим изучением, разведкой и добычей полезных ископаемых, подлежат консервации или ликвидации в соответствии с законодательством о недрах.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800                             "О проведении рекультивации и консервации земель" утверждены Правила проведения рекультивации и консервации земель (далее – Правила рекультивации земель).

Согласно пункту 6 Правил рекультивации земель рекультивации в обязательном порядке подлежат нарушенные земли в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а также земли, которые подверглись загрязнению химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, содержание которых не соответствует нормативам качества окружающей среды и требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нарушенные земли сельскохозяйственного назначения. 

По пункту 8 Правил рекультивации земель рекультивация осуществляется в соответствии с утвержденным проектом рекультивации земель путем проведения технических и (или) биологических мероприятий.

Технические мероприятия могут предусматривать планировку, формирование откосов, снятие поверхностного слоя почвы, нанесение плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических и мелиоративных сооружений, захоронение токсичных вскрышных пород, возведение ограждений, а также проведение других работ, создающих необходимые условия для предотвращения деградации земель, негативного воздействия нарушенных земель на окружающую среду, дальнейшего использования земель по целевому назначению и разрешенному использованию и (или) проведения биологических мероприятий.

Биологические мероприятия включают комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы.

При осуществлении биологических мероприятий по рекультивации земель, указанных в части 2 статьи 60.12 ЛК РФ, в целях создания защитных лесных насаждений проводятся работы по искусственному или комбинированному лесовосстановлению или лесоразведению с применением саженцев с закрытой корневой системой в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и в соответствии с Правилами лесовосстановления или Правилами лесоразведения, предусмотренными статьями 62 и 63 ЛК РФ соответственно                                       (пункт 8(1) Правил рекультивации земель).

Согласно частям 1, 2 статьи 61 ЛК РФ вырубленные, погибшие, поврежденные леса подлежат воспроизводству. Воспроизводство лесов включает в себя: 1) лесное семеноводство; 2) лесовосстановление; 3) уход за лесами; 4) осуществление отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, на которых расположены леса.

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов. Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов. Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов (пункты 2, 3 Правил лесовосстановления утвержденных Приказом Минприроды России от 29.06.2016 № 375 "Об утверждении Правил лесовосстановления" (далее – Правила лесовосстановления).

В силу части 4 статьи 61 ЛК РФ невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в части воспроизводства лесов является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, а также для принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесными участками или права безвозмездного срочного пользования лесными участками.

Исходя части 4 статьи 61 ЛК РФ, приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 29.02.2012 № 69 "Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки", пункта 8 Правила лесовосстановления объем соответствующих лесовосстановительных мероприятий на каждом лесном участке, предназначенном для проведения лесовосстановления, определяется проектом освоения лесов.

В материалы дела представлены копии проекта освоения лесов (выдержка из проекта освоения лесов) и проекта рекультивации земель, разработанные ООО "СОБОЛЬ" на основании договора от 14.06.2018 № 91-431/18, согласно которым к выполнению в 2018 году (до 01.10.2018) подлежат выполнению обществом мероприятия по рекультивации земель, включающие: два последовательных этапа: технический и биологический.

Работы технического этапа рекультивации проводятся на площади 91,0792 га и включают в себя следующие мероприятия:

- снятие и складирование плодородного слоя почвы;

- демонтаж оборудования, очистка территории от строительных остатков, временных строений, строительных отходов; удаление слоя грунта в местах его загрязнения нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими состояние грунта; ликвидацию шламовых амбаров;

- уборка строительного и бытового мусора;

- планировка рекультивируемой площади (засыпка и выравнивание ям, рытвин, за счёт имеющихся повышенных форм рельефа: холмов, бугров);

- нанесение плодородного слоя почвы.

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы. Биологический этап выполняется после завершения технического этапа, на площади 90,389 га.

На лесном участке предусматривается, проведение лесовосстановительных мероприятий комбинированным путем. Методом посадки сеянцев сосны обыкновенной на площадках шириной более 100 м, и естественное лесовосстановление вследствие-природных процессов, на участках под, буровые линии шириной 40 м, так как имеется плодородный слой почвы, благоприятный для произрастания леса на участках, и расположение между двумя стенами леса главных лесных древесных пород.

Как следует из материалов дела, и подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, ответчиком в полном объеме не исполнены обязательства по проведению мероприятий по рекультивации земель на лесном участке, предоставленном на основании договора аренды от 14.06.2018 № 91-431/18, предусмотренные проектом освоения лесов и проектом рекультивации к выполнению в 2018 году.

В нарушение части 1 статьи 65 АПК РФ документальных доказательств, подтверждающих проведение мероприятий по рекультивации земель на площади 91,0792 га (технический этап) и на площади 84,659 га (биологический этап), ответчиком не представлено, требование истца в указанной части в добровольном порядке не исполнено,                в ходе судебного разбирательства по существу не оспорено. 

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение                   его условий не допускаются (статья 310 ГК РФ).

Поскольку материалы дела не содержат доказательств надлежащего исполнения ответчиком обязательств по проведению мероприятий по рекультивации земель, факт неисполнения обязательств в указанной части ответчиком не оспорен, следовательно, требования истца об обязании ООО "СОБОЛЬ" мероприятия по техническому этапу рекультивации лесного участка, переданного по договору аренды лесного участка                                     от 14.06.2018 № 91-431/18, в соответствии с проектом освоения лесов, а именно: снять и складировать плодородный слой почвы; демонтаж оборудования, очистка территории от строительных остатков, временных строений, строительных отходов; удаление слоя грунта в местах его загрязнения нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими состояние грунта; ликвидацию шламовых амбаров; уборка строительного и бытового мусора; планировка рекультивируемой площади (засыпка и выравнивание ям, рытвин, за счёт имеющихся повышенных форм рельефа: холмов, бугров); нанесение плодотворного слоя почвы на площади 91,0792 га в тёплый бесснежный период года до 01.10.2021, а также выполнить мероприятия по биологоческому этапу рекультивации лесного участка, переданного по договору аренды лесного участка от 14.06.2018 № 91-431/18, в соответствии с проектом освоения лесов, а именно выполнить комбинированное лесовосстановление - создание лесных культур методом посадки сеянцев сосны обыкновенной                                                     на площади 84,659 га в тёплый бесснежный период года до 01.10.2021, являются правомерными, обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме.  

Пунктом 1 статьи 1 статьи 329 ГК РФ установлено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Истцом произведен расчет неустойки на основании подпункта «с» пункта 4.2 договора от 14.06.2018 № 91-431/18 исходя из площади невыполненных объемов по виду работ и установленных приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 29.10.2019 № 3368-мр затрат на вид работ на 1 га в 2020 году, что составило                                            4 641 196 рублей.

Представленный истцом расчет неустойку судом проверен, соответствует условиям договора, правильность расчета ответчиком не оспорена.

При таких обстоятельствах, в отсутствие в материалах дела доказательств выполнения мероприятий по рекультивации лесного участка, суд приходит к выводу о правомерности и обоснованности требований истца о взыскании с ответчика неустойки в сумме 4 641 196 рублей. 

Ответчиком ходатайства о снижении неустойки, равно как и доказательств ее несоразмерности, не заявлено, поэтому у суда отсутствует право на уменьшение неустойки в рамках своих полномочий согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7 от 24 марта 2016 года «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Суд неоднократно предлагал ответчику представить письменный мотивированный отзыв на исковое заявление с обоснованием возражений (при наличии); в нарушение                                    части 1 статьи 65 АПК РФ отзыв на иск не представлен, равно как не представлены доказательства выполнения мероприятий по рекультивации лесного участка.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

В силу части 3.1. статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Из положений части 3 статьи 110 АПК РФ следует, что государственная пошлина,                   от уплаты которой в установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты государственной пошлины.

Государственная пошлина по настоящему иску составляет 58 206 рублей, на основании статьи 110 АПК РФ подлежит отнесению на ответчика и взысканию с последнего в доход федерального бюджета.

руководствуясь статьями 110, 167-170, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

решил:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОБОЛЬ" в пользу МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 4 641 196 рублей - неустойки.

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОБОЛЬ" выполнить мероприятия по техническому этапу рекультивации лесного участка, переданного по договору аренды лесного участка от 14.06.2018 № 91-431/18, в соответствии с проектом освоения лесов, а именно: снять и складировать плодородный слой почвы; демонтаж оборудования, очистка территории от строительных остатков, временных строений, строительных отходов; удаление слоя грунта в местах его загрязнения нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими состояние грунта; ликвидацию шламовых амбаров; уборка строительного и бытового мусора; планировка рекультивируемой площади (засыпка и выравнивание ям, рытвин, за счёт имеющихся повышенных форм рельефа: холмов, бугров); нанесение плодотворного слоя почвы на площади 91,0792 га в тёплый бесснежный период года до 01.10.2021 года. 

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОБОЛЬ" выполнить мероприятия по биологоческому этапу рекультивации лесного участка, переданного по договору аренды лесного участка от 14.06.2018 № 91-431/18, в соответствии с проектом освоения лесов, а именно выполнить комбинированное лесовосстановление - создание лесных культур методом посадки сеянцев сосны обыкновенной на площади 84,659 га в тёплый бесснежный период года до 01.10.2021 года.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОБОЛЬ" в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 58 206 рублей. 

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд             в течение месяца со дня его принятия. 

Судья                                                                                                                             Е.С. Пенюшов