27/2021-373293(1) 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 18 февраля 2022 года 

по делу № А33-27069/2020 Красноярск

18 февраля 2022 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать акционерное общество "Российский институт градостроительства и  инвестиционного развития "Гипрогор" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата  регистрации 19.07.2007) в течение 6 месяцев с момента вступления решения в законную  силу исполнить муниципальный контракт от 02.09.2016 № 12/2016, выполнив следующие  виды работ:  

1) исполнить требования законодательства в части приведения проекта  межевания в соответствие со статьей 11.9 Земельного кодекса Российской  Федерации. Представить повторно координатное описание образуемых земельных  участков на 1 этапе в соответствии с приведением их границ к границам  территориальных зон Правил землепользования и застройки городского округа  город Красноярск, утвержденных решением Красноярского городского Совета  депутатов от 07.07.2015 № В-122;  

2) учитывая необходимость образования земельных участков исключительно  в соответствии с проектом межевания необходимо доработать проект планировки  и межевания в документ, подлежащий применению:  

- подготовить материалы проекта межевания территории для передачи в орган  государственного кадастрового учета согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 221- ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в соответствии с требованиями,  действующими на момент утверждения Проекта (правила подготовки направлялись  письмом № 3751 от 26.07.2019);  

- обновить исходные данные, указанные в пункте 4 раздела 10 технического задания:  материалы инвентаризации с характеристикой существующих объектов, сведения  государственного кадастра недвижимости, распределения их по категориям, формам  собственности и землепользователям, действующие земельные отводы для проектирования  и строительства капитальных объектов. Сбор перечисленных данных осуществляется  Исполнителем проекта самостоятельно. По результатам сбора исходных данных учесть  обновленную информацию в Проекте.  

- учесть наличие земельных участков, на которые выданы разрешения на  строительство (характеристики таких объектов), анализ наличия действующих  утвержденных схем расположения земельного участка или участков на кадастровом плане  территории (с 14.12.2017 до настоящего времени);  

- привести материалы проекта в соответствие с Правилами землепользования и  

застройки городского округа город Красноярск, утвержденных решением Красноярского  городского Совета депутатов от 07.07.2015 № В-122.  

Взыскать с акционерного общества "Российский институт градостроительства и  инвестиционного развития "Гипрогор" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата  регистрации 19.07.2007) в доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной  пошлины.  

Настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия  путем подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья Е.А. Куликовская 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 28.12.2021 7:20:52

Кому выдана Куликовская Екатерина Аркадьевна