1499/2018-143857(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е Р Е Ш Е Н И Е

 

18 июня 2018 года Дело № А33-30900/2017  

Красноярск 

Резолютивная часть дополнительного решения объявлена 14 июня 2018 года. В полном объёме дополнительное решение изготовлено 18 июня 2018 года. 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Бычковой Л.К., рассмотрев в  

судебном заседании вопрос о вынесении дополнительного решения 

в деле по иску общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания  

"Граджилсервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск, 

к открытому акционерному обществу "Красноярскпромстрой" (ИНН 

<

***>,  

ОГРН 

<

***>), г. Красноярск, об обязании устранить дефекты, о взыскании судебных расходов, в отсутствие лиц, участвующих в деле, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

установил:

общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания  "Граджилсервис" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с  иском к открытому акционерному обществу "Красноярскпромстрой" (далее – ответчик) об  обязании устранить дефекты, указанные в экспертном заключении от 03.11.2017 года по  результатам строительно-технической экспертизы кровли, отмостки, примыканий дома №  62, по ул. Судостроительная, расположенного в г. Красноярске; экспертном заключении  от 02.11.2017 года по результатам строительно-технической экспертизы помещений  подъезда № 1, расположенного в 

<

...>;  экспертном заключении от 02.11.2017 года по результатам строительно-технической  экспертизы помещений подъезда № 2, расположенного в 

<

...>; экспертном заключении от 02.11.2017 года по результатам  строительно-технической экспертизы помещений подъезда № 3, расположенного в 

<

...>; экспертном заключении от 03.11.2017 года  по результатам строительно-технической экспертизы помещений подъезда № 4,  расположенного в 

<

...>; экспертное  заключении от 02.11.2017 года по результатам строительно-технической экспертизы  помещений подъезда № 5, расположенного в 

<

...>; экспертном заключении от 02.11.2017 года по результатам строительно- технической экспертизы помещений подъезда № 6, расположенного в 

<

...>; экспертном заключении от 02.11.2017 года по результатам  строительно-технической экспертизы помещений подъезда № 7, расположенного в 

<

...>; Экспертном заключении от 03.11.2017  года по результатам строительно-технической экспертизы помещений подъезда № 8,  

расположенного в г. Красноярске, по ул. Судостроительная, дом 62; экспертном  заключении от 03.11.2017 года по результатам строительно-технической экспертизы  помещений подъезда № 9, расположенного в г. Красноярске, по ул. Судостроительная,  дом 62; экспертном заключении от 03.11.2017 года по результатам строительно- технической экспертизы помещений подъезда № 10, расположенного в г. Красноярске, по  ул. Судостроительная, дом 62; экспертном заключении от 03.11.2017 года по результатам  строительно-технической экспертизы помещений подъезда № 11, расположенного в г.  Красноярске, по ул. Судостроительная, дом 62; о взыскании судебных расходов на  проведение строительно-технических экспертиз общего имущества многоквартирного  дома, выполненных (экспертиз) в соответствии с договором № 088 от 27.10.2017 года, в  размере 249 300 (двести сорок девять тысяч триста) рублей 00 копеек.  

Определением от 30.11.2017 исковое заявление оставлено судом без движения. 

В арбитражный суд от истца поступили документы, устраняющие обстоятельства,  послужившие основанием для оставления искового заявления без движения.  

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 25.12.2017  возбуждено производство по делу.  

Судом, на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, принято заявленное истцом уточнение исковых требований, согласно  которому просит обязать открытое акционерное общество "Красноярскпромстрой", г.  Красноярск, в течение трех месяцев с момента вступления настоящего решения в  законную силу, устранить дефекты в жилом доме, расположенном по адресу: 

<

...>, а также взыскать с ответчика судебные расходы  на проведение строительно-технических экспертиз общего имущества многоквартирного  дома, выполненных (экспертиз) в соответствии с договором № 088 от 27.10.2017 года, в  размере 249 300 (двести сорок девять тысяч триста) рублей 00 копеек.  

Решением арбитражного суда от 18.05.2018 иск удовлетворен, открытое акционерное  общество "Красноярскпромстрой", г. Красноярск, в течение трех месяцев с момента  вступления настоящего решения в законную силу, обязано устранить следующие дефекты  в жилом доме, расположенном по адресу: 

<

...>, а  именно:  

5 

Устройство примыканий плит козырьков и крылец  подъездов № 3; № 5; № 4  

1 м3 заделки  

0,384  

6 

Гидроизоляция стыков плит рулонными кровельными  материалами  

100 м2 изолируемой 

поверхности  

0,0396  

7 

Заделка трещин отмостки по периметру здания 

100 м2 покрытия  

0,0412  

8 

Устройство покрытий из тротуарной плитки (устранение  провалов, ям)  

10 м2 

0,35 

9 

Плитка тротуарная 

м2 

3,57 

10 

Демонтаж кровельного ковра 

100 м2 кровли  

0,026  

11 

Ремонт цементной стяжки 

100 мест 

0,03 

12 

Устройство кровельного ковра 

100 м2 кровли  

0,026  

13 

Заделка трещин и пустот в ж/б полах подвального  помещения  

100 м2 покрытия  

0,005  

14 

Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка  

тонна 

0,0444  

15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера:  расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега  

1,478 час; класс груза 1 

1 т 

0,0444  

Дефекты подъезда № 1, расположенного в 

<

...> 

 № пп 

Наименование  

Ед. изм.  

Кол. 

Примечание 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

Заделка усадочных  

вертикальных и  горизонтальных трещин  

стен и потолков  помещений подъезда  

100 м2  

0,95 

- На лестничной площадке выше 10 этажа  

(возле входа на чердак): (0,15)  

1 горизонтальная трещина на выступе над  лестничной площадкой 10 этажа,  

Г-образная трещина на потолке и стене 

справа, 

1 продольная трещина на потолке 

2 вертикальных и 2 горизонтальных трещины  

на выступе над лестничной площадкой 10  этажа.  

- 10 этаж: (0,0448) 

1 вертикальная трещина справа от входа в  машинное отделение.  

- Между 10-9 этажами: (0,0446)  

Вертикальные и горизонтальные трещины в  стене с окном  

- Между 9-8 этажами: (0,0444)  

Вертикальные и горизонтальные трещины на  стене с окном.  

- 8 этаж: (0,0444) 

Вертикальная трещина слева от электрощита.  - Между 8-7 этажами: (0,0444)  

Вертикальные и горизонтальные трещины на  стене с окном,  

1 вертикальная трещина справа от 

мусоропровода. - 7 этаж: (0,0444) 

П-образная трещина относительно входа в  лифт,  

- Между 7-6 этажами: (0,0442)  

Вертикальные и горизонтальные трещины на  стене с окном,  

1 вертикальная трещина на стене слева от  

лестничного марша если спускаться с 7 этажа  к мусоропроводу.  

- 6 этаж: (0,0444) 

П-образная трещина на стене шахты лифта,  - Между 6-5 этажами: (0,0444)  

Вертикальные и горизонтальные трещины на  стене с окном  

- 5 этаж: (0,0444) 

Вертикальная трещина слева от электрощита.  - Между 5-4 этажами: (0,0444)  

Вертикальные и горизонтальные трещины на  стене с окном  

- 4 этаж: (0,0444) 

Вертикальная трещина слева от электрощита  - Между 4-3 этажами: (0,0444)  

Вертикальные и горизонтальные трещины на  стене с окном,  

Вертикальные и горизонтальные трещины на  стене с окном в помещении мусоропровода  

- 3 этаж: (0,0444) 

Вертикальная трещина между квартирой и  электрощитом.  

- Между 3-2 этажами: (0,0448)  

2 вертикальные трещины на стене слева если  спускаться от мусорного бака на 2 этаж.  

- 2 этаж: (0,0444) 

1 вертикальная трещина слева от электрощита  - Между 2-1 этажами: (0,0444)  

2 вертикальные трещины на стене слева если  спускаться от мусорного бака на 1 этаж,  

1 вертикальная трещина на стене слева, если  спускаться с 2 этажа к мусоропроводу.  

- 1 этаж: (0,0444) 

1 вертикальная трещина с левой стороны от  электрощита,  

1 вертикальная трещина в проходе к квартире   № 1,  

1 вертикальная трещина справа от фонаря  электроосвещения,  

2 

Заделка трещин потолков и стен ГКЛ в тамбуре, затирка 

100 м2 

0,143 

 Г-образная трещина продольная по потолку  выполненного из ГКЛ в районе стояка  

отопления: (0,143) 

3 

Окраска  

поливинилацетатными 

водоэмульсионными  составами, улучшенная по  

сборным конструкциям стен, потолков, 

подготовленным под  окраску  

100 м2  

0,143  

Г-образная трещина продольная по потолку 

выполненного из ГКЛ в районе стояка  отопления: (0,143)  

4 

Регулировка створок оконных блоков 

100 шт.  

0,06 

10 этаж 2 шт.,   9 этаж 2 шт.,  7 этаж 2 шт.  

5 

Разборка покрытий полов из керамических плиток (ремонт) 

100 м2  покрытия  

0,018  

9 этаж (0,006),  6 этаж (0,006),  5 этаж (0,006).  

6 

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем (ремонт) 

100 м2  покрытия  

0,018  

9 этаж (0,006),  6 этаж (0,006),  5 этаж (0,006).  

7 

Заделка отверстий по вертикали стояков отопления в тамбуре 

1 м3 заделки  

0,06 

 1 этаж 

8 

Заделка отверстий в перекрытиях, труб внутреннего водостока 

1 м3 заделки  

0,08 

 9 этаж (0,01),   8 этаж (0,02),  

7 этаж (0,02),  5 этаж (0,02),  4 этаж (0,01).  

9 

Устройство примыканий верхних ступеней ж/б лестничных маршей 

1 м3 заделки  

0,1 

 6 этаж (0,002),   5 этаж (0,004),  3 этаж (0,004).  

10 

Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка 

тонна 

0,0996  

11 

Перевозка грузов  

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т  работающих вне карьера:  

расстояние перевозки 20  км; нормативное время  

пробега 1,478 час; класс  груза 1  

1 т 

0,0996  

 Дефекты подъезда № 2, расположенного в 

<

...>   

 №  пп  

Наименование 

Ед. изм. 

Кол. 

Примечание 

1 2 

3 

4 

5 

1 Заделка усадочных  вертикальных и  горизонтальных  

трещин стен и  потолков помещений  подъезда  

100 м2 

0,92 

- На лестничной площадке выше 10 этажа (возле  входа на чердак): (0,12)  

3 вертикальные трещины на стене  перпендикулярной лестничному маршу,  

1 горизонтальная трещина на выступе над  лестничной площадкой 10 этажа,  

1 вертикально-горизонтальная трещина слева от  входа на чердак,  

2 продольные трещины на потолке, 

1 Г-образная трещина на стене слева лестничного  марша (если спускаться вниз на 10 этаж),  

1 продольная трещина слева на лестничном  

пролёте,  

2 горизонтальных и 2 вертикальных трещины на  выступе над лестничной площадкой 10 этажа.  

- 10 этаж: (0,13) 

1 вертикальная трещина справа от квартиры № 74,  1 вертикальная трещина слева от квартиры 73,  

1 вертикальная трещина слева от квартиры 72,  1 горизонтальная трещина возле кабель канала  

1 Г-образная трещина на стене прилегающей к  стене шахты лифта (справа от входа в машинное  отделение),  

2 вертикальные трещины с обоих сторон от  плафона электроосвещения в помещении возле  машинного отделения,  

1 вертикальная трещина слева на стене машинного  отделения.  

- Между 10-9 этажами: (0,14) 

Вертикальные и горизонтальные трещины на стене  с окном,  

1 вертикальная трещина слева на стене (если  спускаться с 10 этажа к мусоропроводу),  

4 вертикальные трещины в углах в помещении  мусоропровода,  

1 вертикальная трещина слева от стояка отопления  помещении мусоропровода,  

горизонтальные и вертикальные трещины между  окном и прибором отопления,  

1 горизонтальная трещина слева в помещении  мусоропровода между стеной и потолком  

1 продольная трещина на обратной части  лестничного марша, идущего с чердака на 10 этаж.  

1 вертикальная трещина на левой стене  лестничного пролёта, если спускаться от  мусоропровода на 9 этаж  

- 9 этаж: (0,0311) 

П-образная трещина относительно входа в лифт,  1 вертикальная трещина слева от квартиры 68,  

1 горизонтальная трещина в арке напротив  квартиры № 69  

- Между 9-8 этажами: (0,0313) 

Г-образная трещина на стене слева лестничного  марша если спускаться с 9 этажа к мусоропроводу,  

Вертикальные и горизонтальные трещина на стене  с окном,  

 4 вертикальные трещины в углах в помещении  мусоропровода,  

горизонтальные и вертикальные трещины между  окном и прибором отопления.  

- 8 этаж: (0,0309) 

П-образная трещина относительно входа в лифт,  1 вертикальная трещина справа от квартиры № 66,  

1 вертикальная трещина слева от квартиры № 64, - Между 8-7 этажами: (0,0311) 

Г-образная трещина на стене слева лестничного  марша если спускаться с 8 этажа к мусоропроводу,  

Вертикальные и горизонтальные трещина на стене  с окном,  

горизонтальные и вертикальные трещины между  окном и прибором отопления,  

1 горизонтальная трещина по левой стене в  помещении мусоропровода (возле потолка),  

4 вертикальные трещины в каждом углу помещения  мусоропровода,  

1 продольная трещина с обратной стороны  лестничного пролёта, идущего с 9 этажа к  мусоропроводу.  

- 7 этаж: (0,0314) П-образная трещина относительно входа в лифт, 1 вертикальная трещина справа от квартиры № 62, - Между 7-6 этажами: (0,0308) 

Вертикальные и горизонтальные трещины на стене  с окном,  

1 продольная трещина с обратной стороны  лестничного пролёта, идущего от мусоропровода на  8 этаж,  

1 горизонтальная трещина между окном и потолком  в помещении мусоропровода,  

горизонтальные и вертикальные трещины между  окном и прибором отопления.  

1 горизонтальная трещина по левой стене в  помещении мусоропровода (возле потолка),  

- 6 этаж: (0,0311) 

1 вертикальная трещина слева от входа в лифт,  1 горизонтальная трещина над входом в лифт,  1 вертикальная трещина справа от квартиры № 58   

Между 6-5 этажами: (0,0312) 

1 продольная трещина на обратной части  лестничного марша, идущего с 7 этажа к  мусоропроводу,  

Вертикальные и горизонтальные трещина на стене  с окном,  

горизонтальные и вертикальные трещины между  окном и прибором отопления.  

1 вертикальная трещина справа от стояка отопления  переходящая на потолок,  

2 вертикальные трещины по углам на стене за  мусоропроводом,  

1 горизонтальная трещина на стене слева при входе  в помещение мусоропровода ближе к потолку,  

1 вертикальная трещина слева на стене лестничного  марша если спускаться от мусоропровода на 5 этаж.  - 5 этаж: (0,031)  

1 вертикальная трещина слева от входа в лифт,  1 горизонтальная трещина над входом в лифт,  1 вертикальная трещина справа от квартиры № 54,  

1 вертикальная трещина слева от квартиры 52,  1 продольная трещина на лестничном марше  

- Между 5-4 этажами: (0,0311) Вертикальные и горизонтальные трещины, 

горизонтальные трещины между окном и прибором  отопления.  

Горизонтальная трещина между окном и потолком  в помещении мусоропровода,  

- 4 этаж: (0,0309) 

П-образная трещина на стене шахты лифта,  1 горизонтальная трещина от водостока,  

- Между 4-3 этажами: (0,0313) 

1 продольная трещина на обратной части  лестничного марша, идущего с 5 этажа к  мусоропроводу,  

Вертикальные и горизонтальные трещины на стене  с окном,  

Вертикальные и горизонтальные трещины между  окном и пробором отопления в помещении  мусоропровода,  

1 горизонтальная трещина между окном и потолком  

в помещении мусоропровода,  

1 вертикальная трещина справа от стояка  отопления,  

1 вертикальная трещина слева при входе в  помещение мусоропровода, между выключателем и  стояком отопления,  

1 продольная трещина с обратной стороны  лестничного пролёта, идущего от мусоропровода на  5 этаж.  

- 3 этаж: (0,0311) 

П-образная трещина на стене шахты лифта,  - Между 3-2 этажами: (0,0311)  

1 продольная трещина с обратной стороны  лестничного пролёта, идущего с 4 этажа к  мусоропроводу,  

Вертикальные и горизонтальные трещины на стене  с окном,  

Вертикальные и горизонтальные трещины между  окном и пробором отопления в помещении  мусоропровода,  

1 горизонтальная трещина между окном и потолком  в помещении мусоропровода,  

1 вертикальная трещина справа от стояка  отопления,  

1 вертикальная трещина слева при входе в  помещение мусоропровода, между выключателем и  стояком отопления,  

1 продольная трещина с обратной стороны  лестничного пролёта, идущего от мусоропровода на  4 этаж.  

- 2 этаж: (0,0311) 

П-образная трещина на стене шахты лифта,  1 вертикальная трещина слева от квартиры № 40,  

1 вертикальная трещина между электрощитом и  квартирой № 41,  

- Между 2-1 этажами: (0,0324) 

1 продольная трещина с обратной стороны  лестничного пролёта, идущего с 3 этажа к  мусоропроводу,  

Вертикальные и горизонтальные трещины на стене  с окном и пробором отопления,  

мусоропровода на 1 этаж, 

1 продольная трещина с обратной стороны  лестничного пролёта, идущего от мусоропровода на  3 этаж.  

- 1 этаж: (0,0311) 

1 вертикальная трещина с левой стороны от  электрощита,  

П-образная трещина на стене шахты лифта,  

1 вертикальная трещина между почтовыми  ящиками,  

1 вертикальная трещина справа от почтовых  ящиков,  

Горизонтальная трещина между потолком и стеной  возле стояков отопления.  

2 Заделка трещин 

потолков и стен ГКЛ  в тамбуре, затирка  

100 м2 

0,135  

Поперечная трещина на потолке, выполненного из  ГКЛ в тамбуре (0,079),  

1 вертикальная трещина на стене в тамбуре (0,056)  

3 Окраска 

поливинилацетатными  водоэмульсионными  

составами, 

улучшенная по  

100 м2 

0,135  

 Поперечная трещина на потолке, выполненного из  ГКЛ в тамбуре (0,079),  

1 вертикальная трещина на стене в тамбуре (0,056)  

сборным  

конструкциям стен,  потолков,  

подготовленным под  окраску  

4 Разборка 

керамической плитки  плинтуса (ремонт)  

100 м2 покрытия  

0,0285  

9 этаж (0,0095),  

7 этаж (0,0095),  6 этаж (0,0095).  

5 Монтаж керамической  плитки плинтуса  (ремонт)  

100 м2 покрытия  

0,0285  

9 этаж (0,0095),  

7 этаж (0,0095),  6 этаж (0,0095).  

6 Заделка отверстий в  перекрытиях, труб  внутреннего  

водостока 

1 м3 заделки  

0,12 

9 этаж (0,02),  8 этаж (0,02),  7 этаж (0,02),  

6 этаж (0,02), 

5 этаж (0,02),  2 этаж (0,02).  

7 Разборка покрытий  полов из  керамических плиток  (ремонт)  

100 м2 покрытия  

0,01 

9 этаж (0,0014),  7 этаж (0,0016),  

6 этаж (0,0014), 4 этаж (0,0014), 

3 этаж (0,0014),  2 этаж (0,0014),  1 этаж (0,0014)  

8 Устройство покрытий  на цементном  растворе из плиток  керамических для  полов одноцветных с  красителем (ремонт)  

100 м2 покрытия  

0,01 

9 этаж (0,0014),  

7 этаж (0,0016),  6 этаж (0,0014),  

4 этаж (0,0014),  3 этаж (0,0014),  2 этаж (0,0014),  1 этаж (0,0014)  

9 Выполнить заделку  отверстия в месте  установки плафона  электроосвещения  

1 м3 заделки  

0,005 

10 этаж 

0 

1Устройство 

примыканий верхних  ступеней ж/б  лестничных маршей  

1 м3 заделки  

0,1 

8 этаж (0,05), 3 этаж (0,05). 

1 

1Мусор строительный  с погрузкой вручную:  погрузка  

тонна 

0,2002  

2 

1Перевозка грузов  автомобилями- 

самосвалами 

грузоподъемностью  

10 т работающих вне  карьера: расстояние  перевозки 20 км;  нормативное время  пробега 1,478 час;  класс груза 1  

1 т 

0,2002  

 Дефекты подъезда № 3, расположенного в г. Красноярске, по ул. Судостроительная, дом 62  

 № пп 

Наименование 

Ед. изм. 

Кол. 

Примечание 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

Заделка усадочных  вертикальных и  горизонтальных трещин  

стен и потолков  помещений подъезда  

100 м2 

0,934 

- На лестничной площадке выше 10 этажа  (возле входа на чердак): (0,1522)  

2 горизонтальные трещина на выступе над  лестничной площадкой 10 этажа,  

1 продольная трещина на полу лестничной  площадки чердака,  

2 продольные трещины на потолке и 1  вертикальная трещина на стене,  

1 Г-образная трещина на стене слева лестничного  марша (если спускаться вниз на 10 этаж),  

1 вертикальных и 2 горизонтальных трещины на  выступе над лестничной площадкой 10 этажа.  

- 10 этаж: (0,1312) 

1 вертикальная трещина слева от электрощита,  1 вертикальная трещина справа от квартиры 109,  

1 вертикальная трещина слева в проходе к  квартире № 108,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры   № 111,  

1 вертикальная трещина справа в проходе к  квартире № 111,  

Г-образная трещина по стене напротив стены с  решеткой вентиляции,  

1 вертикальная трещина справа от двери в  машинное отделение,  

1-продольная трещина на потолке в помещении  возле машинного отделения,  

- Между 10-9 этажами: (0,14) 

Вертикальные и горизонтальные трещины на  стене с окном,  

1 вертикальная трещина слева на стене (если  спускаться с 10 этажа к мусоропроводу),  

В помещении мусоропровода 4 вертикальные  трещины по всем углам,  

1 продольная трещина между потолком и левой  стеной при входе в помещение мусоропровода,  

1 вертикальная трещина на левой стене  лестничного проёма при спуске от  мусоропровода на 9 этаж.  

- 9 этаж: (0,03) 

1 вертикальная трещина справа от квартиры   № 106,  

1 вертикальная трещина слева от электрощита,  

1 вертикальная трещина в проеме слева от  квартиры № 104,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры 107,  1 вертикальная трещина слева от квартиры 106,  

Г-образная трещина по правой стороне от входа в  лифт.  

- Между 9-8 этажами: (0,03) 

1 вертикальная трещина на стене слева  лестничного марша если спускаться с 9 этажа к  мусоропроводу,  

1 продольная трещина на обратной стороне  лестничного пролёта, ведущего с 10 этажа к  мусоропроводу,  

Горизонтальные и вертикальные трещины на  стене с окном,  

1 вертикальная трещина на левой стене  лестничного проёма при спуске от  мусоропровода на 8 этаж.  

1 продольная трещина на обратной стороне  лестничного пролёта, ведущего от мусоропровода  на 9 этаж.  

- 8 этаж: (0,02) 

1 вертикальная трещина слева от электрощита,  П-образная трещина относительно входа в лифт,  

1 вертикальная трещина слева от квартиры №  102,  

1 вертикальная трещина справа в проходе к  квартире № 103,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры №  101,  

1 вертикальная трещина слева от квартиры № 100.  - Между 8-7 этажами: (0,04)  

1 вертикальная трещина на стене слева  лестничного марша если спускаться с 8 этажа к  мусоропроводу,  

горизонтальные и вертикальные трещины на  стене с окном,  

в помещении мусоропровода вертикальные  трещины в каждом углу,  

вертикальные и горизонтальные трещины между  окном и прибором отопления в помещении  мусоропровода,  

горизонтальная трещина между окном и  потолком в помещении мусоропровода,  

1 горизонтальная трещина между стеной слева и  потолком в помещении мусоропровода,  

1 продольная трещина на обратной стороне  лестничного пролёта, ведущего от мусоропровода  на 8 этаж,  

1 вертикальная трещина на левой стене  лестничного проёма при спуске от  мусоропровода на 7 этаж.  

- 7 этаж: (0,03) 

П-образная трещина относительно входа в лифт,  1 вертикальная трещина слева от квартиры № 98,  

1 вертикальная трещина справа в проходе к  квартире № 99,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры № 99,  1 вертикальная трещина слева от электрощита,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры № 97,  1 вертикальная трещина слева от квартиры № 96,  

1 вертикальная трещина слева в проходе к  квартире № 96.  

- Между 7-6 этажами: (0,03) 

1 продольная трещина на обратной стороне  лестничного пролёта, ведущего с 8 этажа к  мусоропроводу,  

1 вертикальная трещина на стене слева  лестничного марша если спускаться с 7 этажа к  мусоропроводу,  

вертикальные и горизонтальные трещины на  стене лестничного марша,  

1 поперечная трещина на потолке в районе  примыкания вышестоящего лестничного марша,  ведущего от мусоропровода на 8 этаж  

1 вертикальная трещина слева на стене  лестничного марша если спускаться от  мусоропровода на 6 этаж.  

- 6 этаж: (0,02)  

П-образная трещина на стене шахты лифта,  1 вертикальная трещина слева от квартиры № 94,  

1 вертикальная трещина в проходе справа к  квартире № 95,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры № 95,  1 вертикальная трещина слева от электрощита,  

1 вертикальная трещина слева от квартиры № 92.  

1 вертикальная трещина слева от квартиры № 92 в  проходе.  

- Между 6-5 этажами: (0,04) 

1 продольная трещина на обратной стороне  лестничного пролёта, ведущего с 7 этажа к  мусоропроводу,  

1 вертикальная трещина на стене слева  лестничного марша если спускаться с 6 этажа к  мусоропроводу,  

вертикальные и горизонтальные трещины на  стене с окном,  

в помещении мусоропровода 4 вертикальных  трещины в каждом углу,  

горизонтальная трещина между окном и  прибором отопления в помещении  мусоропровода,  

2 горизонтальные трещины: 1 между окном и  потолком в помещении мусоропровода, 1 на  противоположной стене.  

- 5 этаж: (0,04) 

П-образная трещина на стене шахты лифта,  1 вертикальная трещина слева от электрощита,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры № 89,  1 вертикальная трещина слева в проходе к  квартире № 88,  

- Между 5-4 этажами: (0,04) 

1 вертикальная трещина на левой стене  лестничного марша, если спускаться с 5 этажа к  мусоропроводу,  

Вертикальные и горизонтальные трещины по  стене с окном,  

1 продольная трещина на нижней части  лестничного марша, ведущего с 6 на 5 этаж,  

1 вертикальная трещина на стене слева  лестничного марша, если спускаться от  мусоропровода на 4 этаж.  

- 4 этаж: (0,02) 

П-образная трещина на стене шахты лифта,  1 вертикальная трещина слева от квартиры № 86,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры № 87,  вертикальная трещина справа в проходе к  квартире № 87,  

1 вертикальная трещина слева от электрощита,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры № 85,  1 вертикальная трещина справа от квартиры № 84,  1 вертикальная трещина в проёме слева от  квартиры № 84.  

- Между 4-3 этажами: (0,02) 

2 вертикальные трещины на левой стене  лестничного марша, если спускаться с 4 этажа к  мусоропроводу,  

Вертикальные и горизонтальные трещины на  стене с окном  

в помещении мусоропровода 4 вертикальных  трещины в каждом углу,  

горизонтальная трещина между окном и  прибором отопления в помещении  мусоропровода,  

2 горизонтальные трещины: 1 между окном и  потолком в помещении мусоропровода, 1 на  противоположной стене,  

1 вертикальная трещина на стене слева  лестничного марша, если спускаться от  мусоропровода на 3 этаж.  

- 3 этаж: (0,03) 

П-образная трещина на стене шахты лифта,  1 вертикальная трещина слева от квартиры № 82,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры № 83,  1 вертикальная трещина справа в проходе к  квартире № 83,  

1 вертикальная трещина слева от электрощита,  1 вертикальная трещина слева от квартиры № 80,  

1 вертикальная трещина слева в проходе к  квартире № 80.  

1 вертикальная трещина справа от квартиры № 81 - Между 3-2 этажами: (0,02) 

1 вертикальная трещина на левой стене если  спускаться в низ от мусоропровода на 2 этаж,  

Вертикальные и горизонтальные трещины  расположены на стене с окном,  

1 продольная трещина на нижней части  лестничного марша, ведущего от мусоропровода  на 3 этаж,  

2 вертикальные трещины на стене слева  лестничного марша, если спускаться от  мусоропровода на 2 этаж.  

- 2 этаж: (0,04) 

П-образная трещина на стене шахты лифта,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры № 79,  1 вертикальная трещина справа в проходе к  квартире № 79,  

1 вертикальная трещина слева от квартиры № 78,  1 вертикальная трещина слева от электрощита,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры № 77,  1 вертикальная трещина слева от квартиры № 76,  

1 вертикальная трещина слева в проходе к  квартире № 76.  

- Между 2-1 этажами: (0,03) 

1 вертикальная трещина на левой стене если  спускаться в низ со 2 этажа к мусоропроводу,  

вертикальные и горизонтальные трещины на  стене с окном,  

горизонтальные и вертикальные трещины между  окном и отопительным прибором в помещении  мусоропровода,  

4 вертикальных трещины в каждом углу  помещения мусоропровода  

1 продольная трещина на нижней части  лестничного марша, ведущего от мусоропровода  на 2 этаж,  

1 вертикальная трещина на стене слева  лестничного марша, если спускаться от  мусоропровода на 2 этаж.  

- 1 этаж: (0,0306) 

П-образная трещина сверху на стене шахты  лифта,  

1 вертикальная трещина справа от почтового  ящика,  

1 вертикальная трещина с левой стороны от  электрощита,  

1 вертикальная трещина с левой стороны от  электрощита,  

1 горизонтальная трещина по стене в тамбуре, 

1 вертикальная трещина между почтовыми  ящиками,  

1 вертикальная трещина возле трубы водостока, 

1 вертикальная трещина возле стояков  отопления,  

1 горизонтальная трещина в тамбуре над входной  дверью в подъезд.  

2 

Заделка трещин  потолков и стен ГКЛ в  тамбуре, затирка  

100 м2 

0,025  

 ФИО2 продольная по потолку выполненного  из ГКЛ: (0,015)  

ФИО2 вертикальная на левой стене от стояка  отопления в тамбуре, выполненной из ГКЛ (0,01)  

3 

Окраска  

поливинилацетатными  водоэмульсионными  

составами улучшенная  по сборным  конструкциям стен,  потолков,  

подготовленным под  окраску  

100 м2 

0,025  

 ФИО2 продольная по потолку выполненного  из ГКЛ: (0,015)  

ФИО2 вертикальная на левой стене от стояка  отопления в тамбуре, выполненной из ГКЛ (0,01)  

4 

Очистка щетками  трещин лестничного  марша  

1 м2 очищаемой  поверхности  

0,3 

7 этаж (0,001),  6 этаж (0,001),  

3 этаж (0,001).  

5 

Заделка трещин  лестничного марша  

1 м3 заделки  

0,054  

1-2 этаж продольная трещины вдоль лестничного  марша. (0,27х0,2)  

6 

Улучшенная окраска  масляными составами  полов  

100 м2  окрашиваемой  

поверхности  

0,003  

7 этаж (0,001),  6 этаж (0,001),  3 этаж (0,001).  

7 

Заделка отверстий в  перекрытиях, труб  внутреннего водостока  

1 м3 заделки  

0,14 

1 этаж. 

8 

Разборка покрытий  полов из керамических  плиток (ремонт)  

100 м2  покрытия  

0,0205  

9 этаж (0,0041),  7 этаж (0,0041),  5 этаж (0,0041),  4 этаж (0,0041),  

1 этаж (0,0041).  

9 

Устройство покрытий на  цементном растворе из  плиток керамических  для полов одноцветных  с красителем (ремонт)  

100 м2  покрытия  

0,0205  

9 этаж (0,0041),  7 этаж (0,0041),  5 этаж (0,0041),  4 этаж (0,0041),  

1 этаж (0,0041).  

10 

Устройство примыканий  верхних ступеней ж/б  лестничных маршей  

1 м3 заделки  

0,12 

10 этаж (0,01),  

8 этаж (0,02),  7 этаж (0,03),  

6 этаж (0,02),  4 этаж (0,03),  2 этаж (0,01).  

11 

Мусор строительный с  погрузкой вручную:  погрузка  

тонна 

0,1066  

12 

Перевозка грузов  автомобилями- 

самосвалами 

грузоподъемностью 10 т  работающих вне  карьера: расстояние  перевозки 20 км;  нормативное время  пробега 1,478 час; класс  груза 1  

1 т 

0,1066  

 Дефекты подъезда № 4, расположенного в г. Красноярске, по ул. С удостроительная, дом 62  

 № пп 

Наименование 

Ед. изм. 

Кол. 

Примечание 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

Заделка усадочных  вертикальных и  горизонтальных трещин  

стен и потолков  помещений подъезда  

100 м2 

2,088 

- 13 этаж: (0,22)  

П-образная трещина над стеной шахты лифта,  

Горизонтальные и вертикальные трещины в  помещении где находиться стояки отопления,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры 157,  1 вертикальная трещина слева от квартиры № 156,  П-образная трещина в тамбуре перед балконом  - Между 13-12 этажами: (0,08)  

П-образная трещина в стене, которая находится  напротив стены с окном,  

Продольная трещина по левой стороне  лестничного марша,  

- 12 этаж: (0.03) 

2 вертикальные трещины с обеих сторон от  прибора отопления на лестничной площадке  

П-образная трещина на стене шахты лифта  - Между 12-11 этажами: (0.05)  

П-образная трещина в стене, которая находится  напротив стены с окном,  

- 11 этаж (0.12) 

П-образная трещина на стене шахты лифта,  

1 вертикальная трещина справа от выключателя  электроосвещения в арке перед мусоропроводом,  

1 вертикальная трещина слева от пожарного  шкафа,  

1 вертикальная трещина напротив входа в секцию,  1 вертикальная трещина справа от квартиры 149,  

1 вертикальная трещина между квартирами № 148  и № 149,  

Г-образная трещина в тамбуре перед лестничной  площадкой,  

2 вертикальные трещины с обеих сторон от  прибора отопления на лестничной площадке.  

- Между 11-10 этажами: (0.05) 

П-образная трещина в стене, которая находится  напротив стены с окном  

-10 этаж: (0.08) 

2 вертикальные трещины с обеих сторон от  прибора отопления на лестничной площадке.  

П-образная трещина в тамбуре перед балконом,  

1-вертикальная трещина справа от квартиры   № 145,  

1 вертикальная трещина слева от квартиры № 144,  П-образная трещина на стене шахты лифта.  - Между 10-9 этажами: (0.05)  

П-образная трещина в стене, которая находится  

напротив стены с окном.  

- 9 этаж: (0,08) 

2 вертикальные трещины справа от квартиры   № 141,  

1 вертикальная трещина слева от квартиры 140. - Между 9-8 этажами: (0.05) 

П-образная трещина в стене, которая находится  напротив стены с окном  

- 8 Этаж: (0.15) 

П-образная трещина на стене шахты лифта,  

1 вертикальная трещина слева от пожарного  шкафа,  

1 вертикальная трещина напротив двери в секцию,  1 вертикальная трещина справа от квартиры № 137,  2 вертикальные трещины с обеих сторон от  отопительного прибора.  

- Между 8-7 этажами: (0.05) 

П-образная трещина в стене, которая находится  напротив стены с окном.  

- 7 этаж: (0,13) 

2 вертикальные трещины с обеих сторон от  прибора отопления на лестничной площадке,  

1 вертикальная трещина при входе в секцию,  напротив двери,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры № 133,  1 вертикальная трещина слева от квартиры № 132,  

1 горизонтальная трещина относительно входа в  лифт.  

- Между 7-6 этажами: (0.05) 

П-образная трещина в стене, которая находится  напротив стены с окном.  

- 6 этаж: (0,18) 

2 вертикальные трещины с обеих сторон от  прибора отопления на лестничной площадке,  

1 вертикальная трещина при входе в секцию,  напротив двери,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры № 129,  П-образная трещина на стене шахты лифта.  

- Между 6-5 этажами: (0.05) 

П-образная трещина в стене, которая находится  напротив стены с окном  

- 5 этаж: (0,14) 

2 вертикальные трещины с обеих сторон от  прибора отопления на лестничной площадке,  

П-образная трещина на стене шахты лифта,  

1 вертикальная трещина справа от двери в секцию,  1 вертикальная трещина на стене напротив двери в  секцию,  

1 вертикальная трещина права от квартиры № 125.  - Между 5-4 этажами: (0.05)  

П-образная трещина в стене, которая находится  напротив стены с окном  

- 4 этаж: (0,11) 

3 Вертикальные трещины возле прибора  отопления на лестничные клетки,  

П-образная трещина на стене шахты лифта,  

1 вертикальная трещина при входе в секцию на  стене, на против двери,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры № 121.  - Между 4-3 этажами: (0,05)  

П-образная трещина в стене, которая находится  напротив стены с окном.  

- 3 этаж: (0,1) 

вертикальные трещины возле прибора отопления  на лестничные клетки,  

1 вертикальная трещина при входе в секцию на  стене, на против двери,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры № 117,  П-образная трещина на стене шахты лифта.  

- Между 3-2 этажами: (0,051) 

П-образная трещина в стене, которая находится  напротив стены с окном  

- 2 этаж: (0,13) 

вертикальные трещины возле прибора отопления  на лестничные клетки,  

1 вертикальная трещина слева от пожарного  шкафа,  

1 вертикальная трещина при входе в секцию на  стене, на против двери,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры № 113.  - 1 этаж: (0,037)  

1 горизонтальная трещина на стене шахты лифта  над входом в лифт,  

1 горизонтальная трещина при входе в подъезд над  входной дверью в тамбуре.  

2 

Заделка трещин  потолков и стен ГКЛ в  тамбуре, затирка  

100 м2 

0,2703  

 ФИО2 продольная по потолку в тамбуре,  выполненного из ГКЛ: (0,177)  

Вертикальная трещина при входе в подъезд на  стене справа (0,0933)  

3 

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными  

составами улучшенная по  сборным конструкциям  стен, потолков,  подготовленным под  окраску  

100 м2 

0,2703  

ФИО2 продольная по потолку в тамбуре,  выполненного из ГКЛ: (0,177)  

Вертикальная трещина при входе в подъезд на  стене справа (0,0933)  

4 

Очистка щетками трещин  лестничного марша  

1 м2  очищаемой  

поверхности  

0,3 

13 этаж (0,018),  11 этаж (0,018),  3 этаж (0,018  

5 

Заделка трещин  лестничного марша  

1 м3 заделки  

0,054  

13 этаж (0,018),  11 этаж (0,018),  3 этаж (0,018).  

6 

Улучшенная окраска  масляными составами  полов  

100 м2  

окрашиваемо й  

поверхности  

0,003  

13 этаж (0,001),  12 этаж (0,001),  

11 этаж (0,001).  

7 

Заделка отверстий в  перекрытиях стояков  

1 м3 заделки  

0,244  

11 этаж (0,0408),  

9 этаж (0,0406),  7 этаж (0,0406),  6 этаж (0,0408),  3 этаж (0,0406),  

2 этаж (0,0406). 

8 

Разборка покрытий полов  из керамических плиток  (ремонт)  

100 м2  покрытия  

0,2313  

13 этаж (0,093), 7 этаж (0,08), 5 этаж (0,0583). 

9 

Устройство покрытий на  цементном растворе из  плиток керамических для  полов одноцветных с  красителем (ремонт)  

100 м2  покрытия  

0,2313  

13 этаж (0,093),  7 этаж (0,08),  

5 этаж (0,0583).  

10 

Выравнивание стены  (обработка материалом  "ТСМ Керамик")  

100 м2  оштукатурива емой  

поверхности  

0,156 

5 этаж (7 м), 

4 этаж (8,6 м). 

11 

"ТСМ Керамик" 

м2 

15,6 

5 этаж (7 м), 

4 этаж (8,6 м). 

13 

Устройство штрабы для  кабеля  

100 м борозд  

0,006 

9 этаж 

14 

Заделка штрабы 

1 м3 заделки  

0,0018 

9 этаж 

15 

Устройство примыканий  верхних ступеней ж/б  лестничных маршей  

1 м3 заделки  

0,04 

13 этаж (0,01)  

7 этаж (0,01)  5 этаж (0,01)  

16 

Мусор строительный с  погрузкой вручную:  погрузка  

тонна 

1,203 

17 

Перевозка грузов  автомобилями- 

самосвалами 

грузоподъемностью 10 т  работающих вне карьера:  расстояние перевозки 20  км; нормативное время  пробега 1,478 час; класс  груза 1  

1 т 

1,203 

 Дефекты подъезда № 5, расположенного в 

<

...> 

 № пп 

Наименование 

Ед. изм. 

Кол. 

Примечание 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

Заделка усадочных  вертикальных и  горизонтальных трещин  стен и потолков  помещений подъезда  

100 м2 

0,946 

- На лестничной площадке выше 10 этажа  (возле входа на чердак): (0,1622)  

1 горизонтальная трещина на выступе над  лестничной площадкой 10 этажа,  

Г-образная трещина на потолке и стене  справа,  

1 продольная трещина на потолке  

1 Т-образная трещина на стене слева  лестничного пролёта (если спускаться вниз  на 10 этаж),  

2 вертикальных и 2 горизонтальных трещины  на выступе над лестничной площадкой 10  этажа.  

- 10 этаж: (0,1318) 

1 вертикальная трещина слева от  электрощита,  

1 вертикальная трещина слева от квартиры  198,  

1 вертикальная трещина справа в проходе к  квартире № 199,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры   № 199,  

1 вертикальная трещина напротив решетки  вентиляции, в помещении возле машинного  отделения,  

1 продольная трещина на потолке возле  машинного отделения лифта,  

1 вертикальная трещина справа от входа в  машинное отделение лифта,  

1 горизонтальная трещина на выступе  напротив входа в машинное отделение  лифта,  

1 вертикальная трещина слева от квартиры   № 196.  

- Между 10-9 этажами: (0,14) 

Вертикальные и горизонтальные трещины на  стене с окном,  

1 вертикальная трещина слева на стене (если  спускаться от мусоропровода на 9 этаж,  

- 9 этаж: (0,03) 

1 вертикальная трещина слева от квартиры  194,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры   № 195,  

1 вертикальная трещина справа в проходе к  квартире № 195  

П-образная трещина относительно входа в  лифт,  

1 вертикальная трещина слева от  электрощита,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры   № 193,  

1 вертикальная трещина слева от квартиры   № 192,  

1 вертикальная трещина слева в проходе к  квартире № 192.  

- Между 9-8 этажами: (0,03) 

1 вертикальная трещина на лестничном  марше если спускаться с 9 этажа к  мусоропроводу,  

Вертикальные и горизонтальные трещины на  стене с окном  

Вертикальная прерывистая трещина слева на  стене лестничного пролёта, если спускаться  от мусоропровода на 8 этаж,  

1 продольная трещина слева на лестничном  пролёте, если спускаться от мусоропровода  на 8 этаж.  

- 8 этаж: (0,02) 

П-образная трещина относительно входа в  лифт,  

1 вертикальная трещина слева от квартиры   № 190,  

1 вертикальная трещина справа в проходе к  квартире № 191,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры   № 191,  

1 вертикальная трещина слева от  электрощита,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры   № 189,  

1 вертикальная трещина слева в проходе к  квартире № 188,  

1 вертикальная трещина слева от квартиры   № 188.  

- Между 8-7 этажами: (0,04) 

1 вертикальная трещина на стене слева  лестничного марша если спускаться с 8  этажа к мусоропроводу,  

2 вертикальные трещины на стене с окном, 

Г-образная трещина справа от стояка  отопления переходящая на потолок в  помещении мусоропровода,  

2 вертикальные трещина по обеим сторонам  от мусоропровода,  

1 продольная трещина слева на лестничном  пролёте, если спускаться от мусоропровода  на 7 этаж.  

- 7 этаж: (0,03) 

1 вертикальная трещина между квартирами   № 186 № 187,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры   № 187,  

П-образная трещина относительно входа в  лифт,  

1 вертикальная трещина слева от  электрощита,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры   № 185,  

1 вертикальная трещина слева от квартиры   № 184.  

- Между 7-6 этажами: (0,03) 

1 вертикальная трещина на левой стене  лестничного пролета, ведущего с 7 этажа к  мусоропроводу,  

вертикальные и горизонтальные трещины,  идущие по стене с окном,  

1 продольная трещина на обратной стороне  лестничного марша, если спускаться от  мусоропровода на 7 этаж.  

- 6 этаж: (0,02) 

П-образная трещина на стене шахты лифта,  

 1 вертикальная трещина слева от квартиры   № 182,  

1 вертикальная трещина в проходе справа к  квартире № 183,  

1 вертикальная трещина слева от  электрощита,  

1 вертикальная трещина между квартирой   № 181 и электрощитом,  

1 вертикальная трещина слева от квартиры   № 180  

1 вертикальная трещина слева в проходе к  квартире № 180.  

- Между 6-5 этажами: (0,04) 

Вертикальные и горизонтальные трещины на  стене с окном,  

Г-образная трещина справа от стояка  отопления переходящая на потолок в  помещении мусоропровода,  

Горизонтальные и вертикальные трещины  между окном и прибором отопления в  помещении мусоропровода,  

2 вертикальные трещины по разным углам  стены за мусоропроводом,  

1 горизонтальная трещина между стеной  слева и потолком в помещении  мусоропровода,  

- 5 этаж: (0,04) 

П-образная трещина на стене шахты лифта,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры   № 179,  

1 вертикальная трещина справа в проходе к  

квартире № 179,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры   № 177,  

1 вертикальная трещина слева от  электрощита,  

1 вертикальная трещина слева от квартиры   № 176,  

1 вертикальная трещина слева в проходе к  квартире № 176.  

- Между 5-4 этажами: (0,04) 

1 вертикальная трещина на левой стене  лестничного марша, если спускаться с 5  этажа к мусоропроводу,  

Горизонтальные и вертикальные трещины по  стене с окном,  

1 вертикальная трещина слева на стене  лестничного пролёта, если спускаться от  мусоропровода на 4 этаж,  

1 продольная трещина на левой части  лестничного марша, если спускаться от  мусоропровода на 4 этаж.  

- 4 этаж: (0,02) П-образная трещина на стене шахты лифта, 

1 вертикальная трещина слева от квартиры   № 174,  

1 вертикальная трещина справа в проходе к  квартире № 175,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры   № 175,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры   № 173,  

1 вертикальная трещина слева в проходе к  квартире № 172,  

1 вертикальная трещина слева от квартиры   № 172.  

- Между 4-3 этажами: (0,02) 

1 вертикальная трещина на левой стене  лестничного марша, если спускаться с 4  этажа к мусоропроводу,  

Вертикальные и горизонтальные трещины на  стене с окном,  

Г-образная трещина справа от стояка  отопления переходящая на потолок в  помещении мусоропровода,  

1 вертикальная трещина справа от  мусоропровода.  

- 3 этаж: (0,03) 

Вертикальная трещина на стене шахты  лифта, слева, и 1 горизонтальная трещина  над входом в лифт,  

1 вертикальная трещина слева от  электрощита,  

1 вертикальная трещина слева от квартиры   № 170,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры   № 171,  

1 вертикальная трещина справа в проходе к  квартире № 171,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры   № 169,  

1 вертикальная трещина слева в проходе к  квартире № 168,  

- Между 3-2 этажами: (0,02) 

2 вертикальные трещины расположены на  стене с окном,  

1 вертикальная трещина слева при спуске от  мусоропровода на 2 этаж.  

- 2 этаж: (0,04) 

П-образная трещина на стене шахты лифта,  

1 вертикальная трещина справа в проходе к  квартире № 167,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры   № 167,  

1 вертикальная трещина слева от  электрощита,  

1 вертикальная трещина слева в проходе к  квартире № 164,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры   № 165.  

- Между 2-1 этажами: (0,03) 

Вертикальные и горизонтальные трещины на  стене с окном,  

1 продольная трещина, идущая по обратной  стороне лестничного пролета, если  спускаться с 2 этажа к мусоропроводу,  

Г-образная трещина справа от стояка  отопления переходящая на потолок в  помещении мусоропровода,  

1 вертикальная трещина справа от  мусоропровода.  

- 1 этаж: (0,032) 

1 вертикальная трещина с левой стороны от  электрощита,  

П-образная трещина на стене шахты лифта,  

1 продольная трещина между стеной и  дверным проёмом, ведущим в тамбур,  

1 вертикальная трещина возле водостока, 

1 вертикальная трещина слева от деревянной  двери входа в тамбур.  

2 

Заделка трещин потолков  и стен ГКЛ в тамбуре,  затирка  

100 м2 

0,0051  

 ФИО2 продольная по потолку в тамбуре,  выполненного из ГКЛ: (0,0024 и 0,0027)  

3 

Окраска  

поливинилацетатными  водоэмульсионными  

составами, улучшенная по  сборным конструкциям  стен, потолков,  подготовленным под  окраску  

100 м2 

0,0051  

 ФИО2 продольная по потолку в тамбуре,  выполненного из ГКЛ: (0,0024 и 0,0027)  

4 

Регулировка створок  оконных блоков  

100 шт. 

0,11 

10 этаж 2 шт.  

9 этаж 2 шт. 

8 этаж 2 шт.  7 этаж 2 шт.  

6 этаж 2 шт.  5 этаж 1 шт.  

5 

Заделка отверстий в  перекрытиях, труб  внутреннего водостока  

1 м3 заделки 

0,06 

10 этаж (0,02) 1 этаж (0,04) 

6 

Разборка покрытий полов  из керамических плиток  (ремонт)  

100 м2 покрытия 

0,028 

10 этаж (0,0046)  

8 этаж (0,0048)  7 этаж (0,0048)  5 этаж (0,0046)  

4 этаж (0,0043)  3 этаж (0,0049)  

7 

Устройство покрытий на  цементном растворе из  плиток керамических для  полов одноцветных с  красителем (ремонт)  

100 м2  покрытия  

0,028 

10 этаж (0,0046)  

8 этаж (0,0044) 

7 этаж (0,0048)  5 этаж (0,0046)  4 этаж (0,0043)  3 этаж (0,0049)  

8 

Демонтаж уплотнителя  рам оконных блоков  

100 м  восстановлен ной  

герметизации  стыков  

0,052 

10 этаж 

9 

Замена уплотнителя рам  оконных блоков  

100 м  восстановлен ной  

герметизации  стыков  

0,052 

10 этаж 

10 

Устройство примыканий  верхних ступеней ж/б  лестничных маршей  

1 м3 заделки  

0,14 

10 этаж (0,02),  

9 этаж (0,02),  8 этаж (0,02),  7 этаж (0,01),  5 этаж (0,02),  4 этаж (0,02)  

3 этаж (0,02) 2 этаж (0,01) 

11 

Мусор строительный с  погрузкой вручную:  погрузка  

тонна 

0,1566 

12 

Перевозка грузов  автомобилями- 

самосвалами 

грузоподъемностью 10 т  работающих вне карьера:  расстояние перевозки 20  км; нормативное время  пробега 1,478 час; класс  груза 1  

1 т 

0,1566 

 Дефекты подъезда № 6, расположенного в 

<

...>  

 № пп  

Наименование 

Ед. изм. 

Кол. 

Примечание 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

Заделка усадочных  верикальных и  горизонтальных трещин  

стен и потолков  помещений подъезда  

100 м2 

0,934 

- На лестничной площадке выше 10 этажа  (возле входа на чердак): (0,1522)  

1 горизонтальная трещина на выступе над  лестничной площадкой 10 этажа,  

2 продольные трещины на потолке и 1  вертикальная трещина на стене справа,  

1 Т-образная трещина на стене слева лестничного  пролёта (если спускаться вниз на 10 этаж),  

1 вертикальная и 2 горизонтальных трещины на  выступе над лестничной площадкой 10 этажа.  

1 поперечная трещина на потолке над  лестничным маршем.  

- 10 этаж: (0,1312) 

1 вертикальная трещина слева от электрощита,  

1 вертикальная трещина слева от квартиры 234,  

1 вертикальная трещина справа в проходе к  квартире № 235,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры №  235,  

1 горизонтальная и 2 вертикальных трещины  напротив решетки вентиляции, в помещении  возле машинного отделения,  

1 продольная трещина на потолке возле  машинного отделения лифта  

1 вертикальная трещина справа от входа в  машинное отделение лифта  

1 горизонтальная трещина на выступе напротив  входа в машинное отделение лифта  

- Между 10-9 этажами: (0,14) 

Вертикальные и горизонтальные трещины на  стене с окном,  

1 вертикальная трещина слева на стене (если  спускаться от мусоропровода на 9 этаж),  

4 вертикальные трещины в углах помещения  мусоропровода,  

1 горизонтальная трещина между прибором  отопления и полом в помещении мусоропроводы  - 9 этаж: (0,03)  

1 вертикальная трещина слева от квартиры 230,  1 вертикальная трещина слева от электрощита,  

П-образная трещина относительно входа в лифт,  

1 вертикальная трещина справа в проходе к  квартире № 231,  

1 вертикальная трещина справа в углу, от  квартиры № 231,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры   № 228,  

1 вертикальная трещина слева в проходе к  квартире № 228  

- Между 9-8 этажами: (0,03) 

1 вертикальная трещина на стене слева  лестничного марша если спускаться с 9 этажа к  мусоропроводу,  

1 Т-образная трещина справа на стене с окном,  

Вертикальная прерывистая трещина слева на  стене лестничного пролёта, если спускаться от  мусоропровода на 8 этаж,  

1 продольная трещина слева на лестничном  пролёте, если спускаться от мусоропровода на 8  этаж  

- 8 этаж: (0,02) 

1 вертикальная трещина слева от электрощита,  П-образная трещина относительно входа в лифт,  

1 вертикальная трещина слева от квартиры № 226,  1 вертикальная трещина справа в проходе к  квартире № 227,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры   № 227,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры №  225,  

1 вертикальная трещина слева в проходе к  квартире № 224.  

- Между 8-7 этажами: (0,04) 

1 вертикальная трещина на стене слева  лестничного марша если спускаться с 8 этажа к  мусоропроводу,  

1 продольная трещина вдоль лестничного  

пролета ведущего с 8 этажа к мусоропроводу,  

Вертикальные и горизонтальные трещины на  стене с окном,  

Г-образная трещина справа от стояка отопления  переходящая на потолок в помещении  мусоропровода,  

2 вертикальные трещина по обеим сторонам от  мусоропровода,  

1 горизонтальная трещина между окном и  прибором отопления в помещении  мусоропровода,  

1 горизонтальная трещина между прибором  отопления и полом в помещении мусоропровода.  

- 7 этаж: (0,03) 

2 вертикальные трещины слева от электрощита,  

2 вертикальные трещина по обеим сторонам от  входа в лифт  

1 вертикальная трещина слева от квартиры №  222,  

1 вертикальная трещина справа в проходе к  квартире № 223,  

1 вертикальная трещина между квартирой № 221  и электрощитом,  

1 вертикальная трещина слева в проходе к  квартире № 220.  

- Между 7-6 этажами: (0,03) 

1 продольная трещина с обратной стороны  лестничного пролета, ведущего с 8 этажа к  мусоропроводу,  

вертикальные и горизонтальные трещины,  идущие по стене с окном,  

Г-образная трещина справа от стояка отопления  переходящая на потолок в помещении  мусоропровода,  

вертикальные и горизонтальные трещины между  прибором отопления и окном в помещении  мусоропровода,  

2 вертикальные трещина по разным углам за  мусоропроводом  

1 горизонтальная трещина между стеной слева  при входе в помещение мусоропровода и  потолком  

1 продольная трещина на лестничном марше,  если спускаться от мусоропровода на 6 этаж  

- 6 этаж: (0,02) 

П-образная трещина на стене шахты лифта, 1  вертикальная трещина слева от квартиры № 218,  

1 вертикальная трещина в проходе справа к  квартире № 219,  

1 вертикальная трещина справа в углу от  квартиры № 219,  

1 вертикальная трещина слева от электрощита, 

1 вертикальная трещина справа от квартиры   № 217  

1 вертикальная трещина слева от квартиры № 216  в проходе.  

- Между 6-5 этажами: (0,04) 

Вертикальные и горизонтальные трещины на  стене с окном,  

Г-образная трещина справа от стояка отопления  переходящая на потолок в помещении  мусоропровода,  

Горизонтальные и вертикальные трещины между  

окном и прибором отопления в помещении  мусоропровода,  

1 горизонтальная трещина между отопительным  прибором и полом,  

2 вертикальные трещины по разным углам стены  за мусоропроводом,  

1 горизонтальная трещина между стеной слева и  потолком в помещении мусоропровода.  

- 5 этаж: (0,04) 

П-образная трещина на стене шахты лифта (фото  116 вертикальная трещина слева от квартиры   № 214,  

1 вертикальная трещина справа в проходе к  квартире № 215,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры   № 215,  

1 вертикальная трещина слева от электрощита, 

1 вертикальная трещина слева от квартиры № 212,  1 вертикальная трещина слева в проходе к  квартире № 212,  

1 вертикальные трещина справа от квартиры   № 213  

- Между 5-4 этажами: (0,04) 

1 продольная трещина на нижней части  лестничного марша, ведущего с 6 этажа к  мусоропроводу,  

1 вертикальная трещина на левой стене  лестничного марша, если спускаться с 5 этажа к  мусоропроводу,  

1 горизонтальная и 2 вертикальные трещины по  обеим углам стены с окном,  

горизонтальные трещины между окном и  прибором отопления в помещении  мусоропровода,  

1 горизонтальная трещина между отопительным  прибором и полом,  

2 вертикальные трещины по разным углам стены  за мусоропроводом,  

1 горизонтальная трещина между стеной слева и  потолком в помещении мусоропровода.  

- 4 этаж: (0,02) П-образная трещина на стене шахты лифта, 

1 вертикальная трещина справа от квартиры   № 211,  

1 вертикальная трещина справа в проходе к  квартире № 211,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры   № 209,  

1 вертикальная трещина слева в проходе к  квартире № 208,  

1 вертикальная трещина слева от квартиры № 208.  - Между 4-3 этажами: (0,02)  

1 продольная трещина на нижней части  лестничного марша, ведущего с 5 этажа к  мусоропроводу,  

1 Г-образная трещина на левой стене лестничного  марша, если спускаться с 4 этажа к  мусоропроводу,  

Вертикальные и горизонтальные трещины на  стене с окном,  

горизонтальные трещины между окном и  прибором отопления в помещении  мусоропровода,  

1 вертикальная трещина справа от стояка  отопления в помещении мусоропровода,  

1 вертикальная трещина в углу при входе в  помещение мусоропровода,  

1 горизонтальная трещина с левой стороны при  входе в помещение мусоропровода между стеной  и потолком.  

- 3 этаж: (0,03) 

П-образная трещина на стене шахты лифта,  

1 вертикальная трещина слева от квартиры № 206,  1 вертикальная трещина справа от квартиры   № 207,  

1 вертикальная трещина справа в проходе к  квартире № 207,  

1 вертикальная трещина слева от электрощита,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры   № 205,  

1 вертикальная трещина слева в проходе к  квартире № 204,  

1 вертикальная трещина слева от квартиры № 204.  - Между 3-2 этажами: (0,02)  

1 продольная трещина на нижней части  лестничного марша, ведущего с 4 этажа к  мусоропроводу,  

1 вертикальная трещина на левой стене если  спускаться в низ от мусоропровода на 2 этаж,  

2 вертикальные трещины расположены на стене с  окном,  

2 вертикальные трещины расположены по углам  за мусоропроводом,  

1 вертикальная трещина слева при входе в  помещение мусоропровода  

горизонтальные трещины между окном и  прибором отопления в помещении  мусоропровода ,  

1 горизонтальная трещина между прибором  отопления и полом в помещении мусоропроводы.  1 вертикальная трещина слева при спуске от  мусоропровода на 2 этаж.  

- 2 этаж: (0,04) 

П-образная трещина на стене шахты лифта,  

1 вертикальная трещина справа в проходе к  квартире № 203,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры   № 203,  

1 вертикальная трещина слева от квартиры № 202,  1 вертикальная трещина слева от электрощита,  

1 вертикальная трещина между квартирой № 201  и электрощитом,  

1 вертикальная трещина слева в проходе к  квартире № 200,  

1 вертикальная трещина слева от квартиры № 200.  - Между 2-1 этажами: (0,03)  

Вертикальные и горизонтальные трещины на  стене с окном,  

1 продольная трещина, идущая по обратной  стороне лестничного пролета, если спускаться от  мусоропровода на 2 этаж  

- 1 этаж: (0,0306) 

1 вертикальная трещина с левой стороны от  электрощита,  

П-образная трещина на стене шахты лифта,  

1 вертикальная трещина между водостоком и  

дверным проёмом 

2 

Заделка трещин  потолоков и стен ГКЛ в  тамбуре, затирка  

100 м2 

0,017 

 ФИО2 продольная по потолку в тамбуре,  выполненного из ГКЛ: (0,017)  

3 

Окраска  

поливинилацетатными  водоэмульсионными  

составами улучшенная  по сборным  конструкциям стен,  потолков,  

подготовленным под  окраску  

100 м2 

0,017 

 ФИО2 продольная по потолку в тамбуре,  выполненного из ГКЛ: (0,017)  

4 

Разборка покрытий  полов из керамических  плиток (ремонт)  

100 м2  покрытия  

0,036 

10 этаж (0,0072),  

9 этаж (0,0072),  6 этаж (0,0072),  

4 этаж (0,0072),  2 этаж (0,0072).  

5 

Устройство покрытий  на цементном растворе  из плиток керамических  для полов одноцветных  с красителем (ремонт)  

100 м2  покрытия  

0,036 

10 этаж (0,0072),  

9 этаж (0,0072), 

6 этаж (0,0072),  4 этаж (0,0072),  2 этаж (0,0072).  

6 

Заделка отверстия по  вертикали стояков  отопления в тамбуре  

1 м3  заделки  

0,06 

7 

Устройство  

примыканий верхних  ступеней ж/б  лестничных маршей  

1 м3  заделки  

0,08 

8 этаж (0,01),  7 этаж (0,01),  

5 этаж (0,01),  4 этаж (0,03),  3 этаж (0,02).  

8 

Мусор строительный с  погрузкой вручную:  погрузка  

тонна 

0,1872 

9 

Перевозка грузов  автомобилями- 

самосвалами 

грузоподъемностью 10 т  работающих вне  карьера: расстояние  перевозки 20 км;  нормативное время  пробега 1,478 час; класс  груза 1  

1 т 

0,1872 

 Дефекты подъезда № 7, расположенного в 

<

...> 

 № 

Наименование 

Ед. изм. 

Кол. 

Примечание 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

Заделка усадочных  вертикальных и  горизонтальных  

трещин стен и  потолков помещений  подъезда  

100 м2 

0,91 

- На лестничной площадке выше 10 этажа (возле входа  на чердак): (0,11)  

1 горизонтальная трещина на выступе над лестничной  площадкой 10 этажа,  

2 продольные трещины на потолке и 1 вертикальная  трещина на стене,  

1 Г-образная трещина на стене слева лестничного марша  (если спускаться вниз на 10 этаж),  

2 горизонтальных и 2 вертикальных трещины на выступе  

пп 

над лестничной площадкой 10 этажа.  

1 поперечная трещина на потолке над лестничным маршем.  - 10 этаж: (0,13)  

1 вертикальная трещина слева от электрощита,  1 вертикальная трещина слева от квартиры 270,  

1 вертикальная трещина справа в проходе к квартире   № 271,  

1 вертикальная трещина напротив решетки вентиляции, 

1 Г-образная трещина на стене прилегающей к стене шахты  лифта (справа от входа в машинное отделение)  

1 вертикальная трещина справа от квартиры № 269,  

1 вертикальная трещина слева в проходе к квартире № 268.  - Между 10-9 этажами: (0,14)  

Вертикальные и горизонтальные трещины на стене с  окном,  

1 вертикальная трещина слева на стене (если спускаться с  10 этажа к мусоропроводу),  

2 вертикальные трещины в углах за мусоропроводом,  

1 вертикальная трещина справа при входе в помещении  мусоропровода,  

1 горизонтальная трещина в углу между стеной с окном и  потолком,  

1 вертикальная трещина слева при входе в помещении  мусоропровода,  

1 горизонтальная трещина между левой стеной помещения  мусоропровода и потолком  

- 9 этаж: (0,0311) 

1 вертикальная трещина слева от квартиры 266,  1 вертикальная трещина справа от квартиры 267,  

1 вертикальная трещина в проеме справа от квартиры   № 267,  

П-образная трещина относительно входа в лифт,  1 вертикальная трещина слева от электрощита,  

1 вертикальная трещина между квартирой № 265 и  электрощитом,  

1 вертикальная трещина слева от квартиры № 264, 

1 вертикальная трещина слева в проходе к квартире № 264.  - Между 9-8 этажами: (0,0313)  

Г-образная трещина на стене с лева лестничного марша  если спускаться с 9 этажа к мусоропроводу,  

Г-образная трещина на стене с окном 

1 продольная трещина на нижней части лестничного  марша, идущего с 10 на 9 этаж.  

- 8 этаж: (0,0309) 

1 вертикальная трещина справа от квартиры № 263,  

1 вертикальная трещина справа в проходе к квартире   № 263,  

П-образная трещина относительно входа в лифт,  1 вертикальная трещина справа от квартиры № 261,  

1 вертикальная трещина слева в проходе к квартире № 260.  - Между 8-7 этажами: (0,0311)  

1 продольная трещина, по низу, вдоль лестничного марша  (если спускаться с 8 этажа к мусоропроводу),  

1 продольная трещина с обратной стороны лестничного  пролёта, идущего с 9 этажа к мусоропроводу,  

2 вертикальные трещины на стене с окном,  

П-образная трещина на правой стене в помещении  мусоропровода,  

1 вертикальная трещина слева от стояка отопления,  

1 вертикальная трещина на левой стене лестничного  пролёта, если спускаться от мусоропровода на 7 этаж  

- 7 этаж: (0,0314) 

П-образная трещина относительно входа в лифт,  

1 вертикальная трещина слева от квартиры № 258,  

1 вертикальная трещина справа в проходе к квартире   № 259,  

1 вертикальная трещина между квартирой № 257 и  электрощитом,  

1 вертикальная трещина слева в проходе к квартире № 256  - Между 7-6 этажами: (0,0308)  

1 вертикальная трещина на левой стене если спускаться в  низ с 7 этажа к мусоропроводу,  

Вертикальные и горизонтальные трещины на стене с  окном,  

1 вертикальная трещина слева на стене лестничного марша  если спускаться от мусоропровода на 6 этаж,  

1 продольная трещина с обратной стороны лестничного  пролёта, идущего с 8 на 7 этаж,  

- 6 этаж: (0,0311) 

П-образная трещина на стене шахты лифта, 1 вертикальная  трещина слева от квартиры № 254,  

1 вертикальная трещина в проходе справа к квартире   № 255,  

1 вертикальная трещина слева от электрощита,  

1 вертикальная трещина между квартирой № 253 и  электрощитом,  

1 вертикальная трещина слева от квартиры № 252 в  проходе.  

- Между 6-5 этажами: (0,0312) 

1 вертикальная трещина на левой стене если спускаться в  низ с 6 этажа к мусоропроводу ,  

Вертикальные и горизонтальные трещины на стене с  окном,  

Горизонтальные и вертикальные трещины между окном и  прибором отопления в помещении мусоропровода,  

1 вертикальная трещина справа от стояка отопления, 1 вертикальная трещина справа в углу от мусоропровода, 

1 продольная трещина между стеной слева (относительно  мусоропровода) и потолком,  

1 вертикальная трещина слева на стене лестничного марша  если спускаться от мусоропровода на 5 этаж.  

- 5 этаж: (0,031) 

П-образная трещина на стене шахты лифта,  1 вертикальная трещина слева от квартиры № 250,  

1 вертикальная трещина справа в проходе к квартире   № 251,  

1 вертикальная трещина слева от электрощита,  

1 вертикальная трещина между квартирой № 249 и  электрощитом,  

1 вертикальная трещина слева в проходе к квартире № 249.  - Между 5-4 этажами: (0,0311)  

1 вертикальная трещина на левой стене лестничного  марша, если спускаться с 5 этажа к мусоропроводу,  

1 горизонтальная и 2 вертикальные трещины на стене с  окном,  

1 вертикальная трещина слева на стене лестничного марша  если спускаться от мусоропровода на 4 этаж.  

- 4 этаж: (0,0309) 

П-образная трещина на стене шахты лифта,  1 вертикальная трещина слева от квартиры № 246,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры № 247,  

1 вертикальная трещина справа в проходе к квартире   № 247,  

1 вертикальная трещина слева в проходе к квартире № 244.  - Между 4-3 этажами: (0,0313)  

1 вертикальная трещина на левой стене лестничного  

марша, если спускаться с 4 этажа к мусоропроводу,  

1 продольная трещина на слева вдоль лестничного марша,  Вертикальные и горизонтальные трещины на стене с  окном,  

Вертикальные и горизонтальные трещины между окном и  пробором отопления в помещении мусоропровода,  

1 вертикальная трещина справа от мусоропровода,  

1 горизонтальная трещина между прибором отопления и  полом в помещении мусоропровода,  

1 вертикальная трещина слева при входе в помещение  мусоропровода,  

1 вертикальная трещина слева на стене лестничного марша  если спускаться от мусоропровода на 3 этаж.  

- 3 этаж: (0,0311) 

П-образная трещина на стене шахты лифта,  1 вертикальная трещина слева от квартиры № 242,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры № 243,  

1 вертикальная трещина справа в проходе к квартире   № 243,  

1 вертикальная трещина слева от электрощита,  1 вертикальная трещина слева от квартиры № 240,  

1 вертикальная трещина слева в проходе к квартире № 240.  - Между 3-2 этажами: (0,0311)  

1 вертикальная трещина на левой стене лестничного  пролета, если спускаться в низ с 3 этажа к мусоропроводу,  1 продольная трещина с обратной стороны лестничного  пролёта, идущего с 4 этажа к мусоропроводу,  

1 вертикальная трещина справа от стены с окном,  

1 вертикальная трещина слева на стене лестничного марша  если спускаться от мусоропровода на 2 этаж.  

- 2 этаж: (0,0311) 

П-образная трещина на стене шахты лифта,  

1 вертикальная трещина справа в проходе к квартире   № 239,  

1 вертикальная трещина слева от квартиры № 238,  1 вертикальная трещина справа от квартиры № 239,  1 вертикальная трещина слева от электрощита,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры № 237,  1 вертикальная трещина слева от квартиры № 236,  

1 вертикальная трещина слева в проходе к квартире № 236.  - Между 2-1 этажами: (0,0324)  

1 продольная трещина с обратной стороны лестничного  пролёта, идущего с 3 этажа к мусоропроводу,  

Вертикальные и горизонтальные трещины на стене с окном  и пробором отопления,  

Горизонтальные и вертикальные трещина между окном и  отопительным прибором в помещении мусоропровода,  

1 вертикальная трещина справа от стояка отопления в  помещении мусоропровода,  

1 вертикальная трещина справа в углу относительно  мусоропровода,  

1 вертикальная трещина слева на стене лестничного марша  если спускаться от мусоропровода на 1 этаж.  

- 1 этаж: (0,0311) 

1 горизонтальная трещина сверху над входом в лифт,  

1 вертикальная трещина с левой стороны от электрощита,  1 вертикальная трещина с левой стороны от электрощита,  1 вертикальная трещина возле трубы водостока,  

1 вертикальная трещина справа от стояка отопления,  

1 поперечная трещина над входной дверью в подъезд, в  тамбуре.  

2 

Заделка трещин  потолков и стен ГКЛ  в тамбуре, затирка  

100 м2 

0,0294  

Поперечная трещина на потолке, выполненного из ГКЛ в  тамбуре (0,0294)  

3 

Окраска  

поливинилацетатным и  

водоэмульсионными  составами,  

улучшенная по  сборным  

конструкциям стен,  потолков,  

подготовленным под  окраску  

100 м2 

0,0294  

 Поперечная трещина на потолке, выполненного из ГКЛ в  тамбуре (0,0294)  

4 

Регулировка створок  оконных блоков  

100 шт. 

0,16 

10 этаж 4 шт.  

9 этаж 2 шт.  8 этаж 4 шт.  7 этаж 2 шт.  6 этаж 2 шт.  5 этаж 2 шт.  

5 

Заделка отверстий в  перекрытиях, труб  внутреннего  

водостока 

1 м3  заделки  

0,04 

10 этаж 

6 

Разборка покрытий  полов из  керамических плиток  (ремонт)  

100 м2  покрытия  

0,0936  

10 этаж (0,0187)  

8 этаж (0,0188)  6 этаж (0,0186)  5 этаж (0, 0188)  

1 этаж (0,0187)  

7 

Устройство  

покрытий на  цементном растворе  из плиток  керамических для  полов одноцветных с  красителем (ремонт)  

100 м2  покрытия  

0,0936  

10 этаж (0,0187)  

8 этаж (0,0188) 

6 этаж (0,0186)  5 этаж (0, 0188)  1 этаж (0,0187)  

8 

Устройство  

примыканий верхних  ступеней ж/б  лестничных маршей  

1 м3  заделки  

0,1 

10 этаж (0,0144)  

9 этаж (0,0144)  7 этаж (0,0135)  6 этаж (0,0151)  5 этаж (0,0142)  3 этаж (0,0142)  1 этаж (0,0142)  

9 

Мусор строительный  с погрузкой  вручную: погрузка  

тонна 

0,5027  

10 

Перевозка грузов  автомобилями- 

самосвалами 

грузоподъемностью  

10 т работающих вне  карьера: расстояние  перевозки 20 км;  нормативное время  пробега 1,478 час;  класс груза 1  

1 т 

0,5027  

 Дефекты подъезда № 8, расположенного в г. Красноярске, по ул. Судостроительная, дом 62  

 № 

Наименование 

Ед. изм. 

Кол.  

Примечание 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

Заделка усадочных  вертикальных и  горизонтальных трещин  

стен и потолков  помещений подъезда  

100 м2 

0,912  

- На лестничной площадке выше 10 этажа  (возле входа на чердак): (0,14)  

3 вертикальные трещины на стене справа (если  идти в сторону вентиляции мусоропровода),  

1 горизонтальная трещины на выступе над  лестничным маршем,  

1 продольная трещина на потолке,  

1 продольная трещина вдоль лестничного марша  по левой стороне (если спускаться с чердака на  10 этаж),  

3 горизонтальных и 1 вертикальных трещины на  выступе над лестничной площадкой 10 этажа.  

1 поперечная трещина на потолке, над  лестничной клеткой 10 этажа  

- 10 этаж: (0,12) 

1 вертикальная трещина справа от квартиры 304,  

2 вертикальные трещины справа от квартиры 306,  1 горизонтальная трещина на стене напротив  машинного отделения лифта,  

2 вертикальные трещины по углам стены возле  вентиляционной решетки,  

1 горизонтальная трещина на стене напротив  вентиляционной решетки,  

1 продольная трещина на потолке в помещении  возле машинного отделения лифта.  

- Между 10-9 этажами: (0,11) 

Вертикальные и горизонтальные трещины на  стене с окном,  

1 вертикальная трещина слева на стене (если  спускаться от мусоропровода на 9 этаж),  

Вертикальные и горизонтальные трещины между  окном и прибором отопления в помещении  мусоропровода,  

1 вертикальная трещина слева при входе в  помещение мусоропровода,  

Г-образная трещина на нижней части (обратной)  лестничного марша, идущего с чердака на 10  этаж.  

- 9 этаж: (0,0318) 

2 вертикальные трещины по обеим сторонам от  входа в лифт,  

1 вертикальная трещина между квартирой № 302  и электрощитом,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры 300,  - Между 9-8 этажами: (0,0312)  

1 вертикальная трещина слева на стене  лестничного марша, если спускаться с 9 этаж к  мусоропроводу,  

Вертикальные и горизонтальные трещины по  стене с окном,  

1 вертикальная трещина слева по стене  лестничного марша, если спускаться от  мусоропровода на 8 этаж.  

- 8 этаж: (0,0324) 

2 вертикальные трещина с двух сторон от лифта,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры   № 298,  

1 поперечная трещина правее от квартиры 297 на  

пп 

потолке,  

1 вертикальные трещины справа от квартиры   № 296.  

- Между 8-7 этажами: (0,0318) 

1 вертикальная трещина слева на стене  лестничного марша, если спускаться с 8 этаж к  мусоропроводу,  

Вертикальные и горизонтальные трещины на  стене с окном,  

1 горизонтальная трещина между окном и  прибором отопления в помещении  мусоропровода,  

1 горизонтальная трещина между окном и  потолком в помещении мусоропровода,  

1 вертикальная трещина справа от стояка  отопления  

2 вертикальные трещины по обеим сторонам от  мусоропровода,  

1 вертикальная трещина слева по стене  лестничного марша, если спускаться от  мусоропровода на 7 этаж.  

- 7 этаж: (0,03) 

1 вертикальная трещина справа от квартиры   № 294,  

2 вертикальные трещины по обеим сторонам  относительно лифта,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры   № 292,  

- Между 7-6 этажами: (0,0336) 

1 вертикальная трещина на левой стене  лестничного марша если спускаться в низ с 7  этажа к мусоропроводу,  

вертикальные и горизонтальные трещины углам  на стене с окном,  

1 вертикальная трещина слева на стене  лестничного марша если спускаться от  мусоропровода на 6 этаж.  

- 6 этаж: (0,0317) 

П-образная трещина на стене шахты лифта, 1  вертикальная трещина справа от квартиры № 289,  

 1 вертикальная трещина между квартирами   № 290 и электрощитом,  

- Между 6-5 этажами: (0,0319) 

1 вертикальная трещина на левой стене  лестничного марша если спускаться в низ с 6  этажа к мусоропроводу,  

Вертикальные и горизонтальные трещины на  стене с окном,  

Горизонтальная трещина на стене за  мусоропроводом,  

1 вертикальная трещина справа от стояка  отопления,  

1 горизонтальная трещина между окном и  потолком в помещении мусоропровода,  

- 5 этаж: (0,0318) 

2 вертикальные трещины по обеим сторонам  относительно лифта,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры   № 286,  

Разрушение бетона на стене над квартирой № 287,  1 вертикальная трещина справа от квартире   № 284.  

- Между 5-4 этажами: (0,0218) 

Вертикальные и горизонтальные трещины на  стене с окном.  

- 4 этаж: (0,0418) 

2 вертикальные трещины по обеим сторонам  относительно лифта,  

1 горизонтальная трещина над плафоном  электроосвещения слева от лифта,  

1 вертикальная трещина между квартирой № 282  и электрощитом,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры   № 280,  

1 вертикальная трещина справа от квартиры   № 281.  

- Между 4-3 этажами: (0,0218) 

Горизонтальные и вертикальные трещины на  стене с окном,  

1 горизонтальная трещина между окном и  потолком в помещении мусоропровода,  

1 вертикальная трещина справа от стояка  отопления,  

1 горизонтальная трещина между окном и  прибором отопления в помещении  мусоропровода,  

1 вертикальная трещина слева при входе в  помещении мусоропровода  

1 горизонтальная трещина между левой стеной и  потолком в помещении мусоропровода.  

- 3 этаж: (0,0218) 

П-образная трещина относительно входа в лифт  (фото 130),  

1 горизонтальная трещина над плафоном  электроосвещения (фото 131).  

- Между 3-2 этажами: (0,0418) с 

Вертикальные и горизонтальные трещины  расположены на стене с окном,  

1 горизонтальная трещина между окном и  прибором отопления в помещении  мусоропровода,  

1 вертикальная трещина справа от стояка  отопления,  

1 горизонтальная трещина между левой стеной и  потолком при входе в помещении  мусоропровода,  

1 горизонтальная трещина между окном и  потолком в помещении мусоропровода.  

- 2 этаж: (0,0432) 

1 вертикальная трещина слева от лифта,  

1 вертикальная трещины справа от квартиры 274,  1 вертикальная трещина справа в проходе к  квартире 272.  

- Между 2-1 этажами: (0,0318) 

1 вертикальная трещина на левой стене  лестничного марша если спускаться в низ с 2  этажа к мусоропроводу,  

вертикальные и горизонтальные трещины на  стене с окном,  

горизонтальные и вертикальные трещина между  окном и отопительным прибором в помещении  мусоропровода,  

1 вертикальная трещина справа от стояка  отопления,  

1 горизонтальная трещина сверху возле стояка  

отопления,  

- 1 этаж: (0,0318) 

1 горизонтальная трещина над входом в лифт, 

1 вертикальная трещина между водостоком и  почтовым ящиком,  

1 вертикальная трещина в углу между почтовыми  ящиками,  

1 вертикальная трещина по правой стене при  входе в подъезд.  

2 

Заделка трещин потолков  и стен ГКЛ в тамбуре,  затирка  

100 м2 

0,0024  

 Г-образные трещины на потолке в районе  прибора электроосвещения (0,0024)  

3 

Окраска  

поливинилацетатными  водоэмульсионными  

составами улучшенная по  сборным конструкциям  стен, потолков,  подготовленным под  окраску  

100 м2 

0,0024  

 Г-образные трещины на потолке в районе  прибора электроосвещения (0,0024)  

4 

Регулировка створок  оконных блоков  

100 шт. 

0,06 

10 этаж в помещении мусоропровода 1 шт.  

7 этаж 2 шт.  4 этаж 2 шт.  2 этаж 1 шт.  

5 

Заделка отверстий в  перекрытиях, труб  внутреннего водостока  

1 м3  заделки  

0,02 

9 этаж  8 этаж  7 этаж  5 этаж  4 этаж  

6 

Разборка покрытий полов  из керамических плиток  (ремонт)  

100 м2  покрытия  

0,0828  

10 этаж (0,0139)  

9 этаж (0,0137)  8 этаж (0,0136)  

7 этаж (0,0140)  6 этаж (0,0138)  1 этаж (0,0138)  

7 

Устройство покрытий на  цементном растворе из  плиток керамических для  полов одноцветных с  красителем (ремонт)  

100 м2  покрытия  

0,0828  

10 этаж (0,0139)  

9 этаж (0,0137)  8 этаж (0,0136)  7 этаж (0,0140)  

6 этаж (0,0138)  1 этаж (0,0138)  

8 

Разборка керамической  плитки плинтуса (ремонт)  

100 м2  покрытия  

0,0285  

8 этаж (0,0093)  7 этаж (0,0097)  

3 этаж (0,0095)  

9 

Заделка отверстия по  вертикали стояков  отопления в тамбуре  

1 м3  заделки  

0,06 

10 

Монтаж керамической  плитки плинтуса (ремонт)  

100 м2  покрытия  

0,0522  

8 этаж (0,0174)  7 этаж (0,0174)  

3 этаж (0,0174)  

11 

Устройство примыканий  верхних ступеней ж/б  лестничных маршей  

1 м3  заделки  

0,18 

10 этаж (0,0257)  

9 этаж (0,0257) 8 этаж (0,0259) 

6 этаж (0,0255)  5 этаж (0,0257)  3 этаж (0,0257)  

2 этаж (0,0258)  

12 

Мусор строительный с  погрузкой вручную:  погрузка  

тонна 

0,5788  

13 

Перевозка грузов  автомобилями- 

самосвалами 

грузоподъемностью 10 т  работающих вне карьера:  расстояние перевозки 20  км; нормативное время  пробега 1,478 час; класс  груза 1  

1 т 

0,5788  

 Дефекты подъезда № 9, расположенного в 

<

...> 

 № 

Наименование 

Ед. изм. 

Кол.  

Примечание 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

Заделка усадочных  вертикальных и  горизонтальных трещин  

стен и потолков  помещений подъезда  

100 м2 

0,912  

- На лестничной площадке выше 10 этажа  

(возле входа на чердак): (0,1502)  

2 горизонтальных трещины на потолке и 1  

вертикальная трещина на стене, 

2 вертикальные трещины и 2 горизонтальные  

трещины на выступе над лестничным маршем ,   1 Г-образная трещина на стене слева (если  

спускаться вниз на 10 этаж) от лестничного  

пролета, 

2 горизонтальных и 2 вертикальных трещины  

на выступе над лестничной площадкой 10  

этажа. 

- 10 этаж: (0,1310) 

1 вертикальная трещина слева от электрощита   1 вертикальная трещина между квартирой  

 № 341 и электрощитом, 

1 вертикальная трещина между квартирами  

 № 340 и 341, 

1 вертикальная трещина слева от квартиры  

342 

1 вертикальная трещина слева по  

выступающей стене, прилегающей слева от  

машинного отделения 

1 горизонтальная трещина на стене на против  

машинные отделения лифта, 

Две вертикальные трещины справа от двери в  

машинное отделение. - Между 10-9 этажами: (0,14) 

Вертикальные и горизонтальные трещины на  

стене с окном, 

1 вертикальная трещина справа на стене (если  

спускаться с 10 этажа к мусоропроводу), 

T-образная трещина на стене с окном в  

помещении мусоропровода, 

1 горизонтальная трещина под окном в  

помещении мусоропровода, 

2 вертикальные трещины на стене с окном, с  

обеих сторон относительно окна,  

1 вертикальная трещина слева в углу при  

входе в помещение мусоропровода, 

1 вертикальная трещина на левой стене  

лестничного марша (если спускаться в низ от  

пп 

мусоропровода на 9 этаж) лестничного марша. - 9 этаж: (0,0288) 

1 вертикальная трещина слева от квартиры  

338, 

1 вертикальная трещина справа от квартиры  

339, 

1 вертикальная трещина в проеме справа от  

квартиры № 339, 

1 вертикальная трещина в районе цифры 9,  

1 вертикальная трещина слева от  

электрощита, 

1 вертикальная трещина между квартирой  

 № 337 и электрощитом, 

1 вертикальная трещина слева в проходе к  

квартире № 336, 

2 вертикальные трещина с двух сторон от  

лифта. - Между 9-8 этажами: (0,021) П-образная трещина на стене с окном, 

Г-образная трещина на нижней части  

лестничного марша, ведущего с 10 на 9 этаж 

1 вертикальная трещина на левой стене  

лестничного марша (если спускаться в низ от  

мусоропровода на 8 этаж. - 8 этаж: (0,0214) 

2 вертикальные трещина с двух сторон от  

лифта, 

1 вертикальная трещина справа от квартиры  

 № 335 в проёме, 

1 вертикальные трещины слева квартиры  

 № 334, 

1 вертикальная трещина между квартирой  

 № 333 и электрощитом, 

1 вертикальная трещина слева от  

электрощита, 

1 вертикальная трещина слева в проходе к  

квартире 332 

- Между 8-7 этажами: (0,0289)  

горизонтальные и вертикальные трещины на  

стене с окном, 

Г-образная трещина на нижней части  

лестничного марша, ведущего с 8 на 7 этаж  

продольная трещина справа от стояка  

отопления в помещении мусоропровода,  

идущая в верх вдоль потолка, - 7 этаж: (0,0219) 

1 вертикальная трещина слева от квартиры  

 № 330, 

2 вертикальные трещины по обеим сторонам  

относительно лифта, 

1 вертикальная трещина слева от  

электрощита, 

1 вертикальная трещина справа от квартиры  

 № 329, 

1 вертикальная трещина в проходе слева от  

квартиры 328. 

- Между 7-6 этажами: (0,0213)  

1 вертикальная трещина на левой стене если  

спускаться в низ с 7 этажа к мусоропроводу,  

2 вертикальные трещины по обеим углам на  

стене с окном, 

1 вертикальная трещина слева на стене  

лестничного марша если спускаться от  

мусоропровода на 6 этаж. - 6 этаж: (0,0289) 

П-образная трещина на стене шахты лифта, 1  

вертикальная трещина слева от квартиры  

 № 326, 

 1 вертикальная трещина между квартирами  

 № 324 и № 325, 

1 вертикальная трещина слева от  

электрощита, 

1 вертикальная трещина между квартирой  

 № 325 и электрощитом, 

1 вертикальная трещина слева от квартиры  

 № 324. 

- Между 6-5 этажами: (0,0312)  

Вертикальные и горизонтальные трещины на  

стене с окном, 

Горизонтальные и вертикальные трещины  

между окном и прибором отопления в  

помещении мусоропровода, 

1 горизонтальная трещина между  

отопительным прибором и полом, 

2 вертикальные трещины по разным углам  

стены за мусоропроводом, 

1 вертикальная трещина справа от стояка  

отопления, 

1 вертикальная трещина слева на стене  

лестничного марша если спускаться от  

мусоропровода на 5 этаж, 

1 поперечная трещина на нижней части  

лестничного пролёта соединяющий 7-6 этаж - 5 этаж: (0,0211) 

1 вертикальная трещина слева от квартиры  

 № 322, 

1 вертикальная трещина справа в проходе к  

квартире № 323, 

1 вертикальная трещина слева от  

электрощита, 

2 вертикальные трещины по обеим сторонам  

относительно лифта, 

1 вертикальная трещина между квартирой  

 № 321 и электрощитом. 

- Между 5-4 этажами: (0,0209)  

1 вертикальная трещина на левой стене  

лестничного марша, если спускаться с 5 этажа  

к мусоропроводу, 

2 вертикальные трещины по обеим углам  

стены с окном, 

1 продольная трещина на нижней части  

лестничного марша, ведущего с 6 на 5 этаж - 4 этаж: (0,0256) 

1 вертикальная трещина между квартирой  

 № 318 и водосливом, 

2 вертикальные трещины по обеим сторонам  

относительно лифта, 

1 вертикальная трещина между квартирой  

 № 317 и электрощитом, 

1 вертикальная трещина справа в проходе к  

квартире № 319, 

1 вертикальная трещина слева от  

электрощита, 

1 вертикальная трещина слева в проходе к  

квартире № 316. 

- Между 4-3 этажами: (0,0278)  

1 Г-образная трещина на левой стене  

лестничного марша, если спускаться с 4 этажа  

к мусоропроводу, 1 вертикальная трещина справа от окна, 

в помещении мусоропровода по правой стене  

идёт трещина по всему периметру, 

по левой стене 1 горизонтальна трещины  

между напольным плинтусом и стеной, 1  

горизонтальная трещина между стеной и  

потолком 

слева от мусоропровода 1 вертикальная  

трещина. - 3 этаж: (0,0299) 

2 вертикальные трещины по обеим сторонам  

относительно лифта, 

1 вертикальная трещина слева от квартиры  

 № 314, 

1 вертикальная трещина справа в проходе к  

квартире № 315, 

1 вертикальная трещина слева от  

электрощита, 

1 вертикальная трещина между квартирой  

 № 313 и электрощитом, 

1 вертикальная трещина слева от квартиры  

 № 312, 

1 вертикальная трещина слева в проходе к  

квартире № 312. - Между 3-2 этажами: (0,02) 

1 вертикальная трещина на левой стене если  

спускаться в низ от мусоропровода на 2 этаж, 

2 вертикальные трещины расположены на  

стене с окном. - 2 этаж: (0,0294) 

1 вертикальная справа в проходе к квартире  

 № 311, 

2 вертикальная трещины с двух сторон  

относительно лифта, 

1 вертикальная трещина между квартирой  

 № 310 и электрощитом, 

1 вертикальная трещина слева от  

электрощита, 

1 вертикальная трещина между квартирой  

 № 309 и электрощитом. - Между 2-1 этажами: (0,0296) 

Вертикальные и горизонтальные трещины на  

стене с окном, 

1 горизонтальная трещина между окном и  

отопительным прибором в помещении  

мусоропровода, 

2 вертикальные трещины с двух сторон от  

мусоропровода, 

1 горизонтальная трещина на левой стене в  

помещении мусоропровода. - 1 этаж: (0,0831) 

1 вертикальная трещина возле цифры с  

номером этажа, 

1 вертикальная трещина с левой стороны от  

электрощита, 

2 вертикальные трещины по обеим сторонам  

лифта, 

1 вертикальная трещина между почтовыми  

ящиками и водостоком. 

2 

Заделка трещин  потолков и стен ГКЛ в  тамбуре, затирка  

100 м2 

0,0345  

 Г-образные трещины на потолке в районе  стояков отопления (0,0345)  

3 

Окраска  

поливинилацетатными  водоэмульсионными  

составами улучшенная  по сборным  конструкциям стен,  потолков,  

подготовленным под  окраску  

100 м2 

0,0345  

 Г-образные трещины на потолке в районе  стояков отопления (0,0345)  

4 

Регулировка створок  оконных блоков  

100 шт. 

0,01  

Этаж 8 

5 

Установка вентеляционной решетки в тамбуре 

1 решетка 

1 

Фото 

6 

Решетки 

нерегулируемые (цена)  

м2 

0,03  

7 

Разборка покрытий  полов из керамических  плиток (ремонт)  

100 м2  покрытия  

0,315  

10 этаж (0,05)  

9 этаж (0,06)  6 этаж (0,03)  

5 этаж (0,07)  4 этаж (0,04)  2 этаж (0,02)  1 этаж (0,045)  

8 

Устройство покрытий на  цементном растворе из  плиток керамических  для полов одноцветных  с красителем (ремонт)  

100 м2  покрытия  

0,315  

10 этаж (0,05)  

9 этаж (0,06)  6 этаж (0,03)  5 этаж (0,07)  4 этаж (0,04)  2 этаж (0,02)  1 этаж (0,045)  

9 

Заделка отверстия по  вертикали стояков  отопления в тамбуре  

1 м3 заделки  

0,06  

10 

Устройство примыканий  верхних ступеней ж/б  лестничных маршей  

1 м3 заделки  

0,22  

10 этаж (0,0275)  

9 этаж (0,0275)  8 этаж (0,0275)  6 этаж (0,0275)  

5 этаж (0,0275) 

4 этаж (0,0275)  3 этаж (0,0275)  

2 этаж (0,0275)  

11 

Мусор строительный с  погрузкой вручную:  погрузка  

тонна 

1,639  

12 

Перевозка грузов  автомобилями- 

самосвалами 

грузоподъемностью 10 т  работающих вне  карьера: расстояние  перевозки 20 км;  нормативное время  пробега 1,478 час; класс  груза 1  

1 т 

1,639  

 Дефекты подъезда № 11, расположенного в г. Красноярске, по ул. Судостроительная, дом 62  

 № 

Наименование 

Ед. изм. 

Кол. 

Примечание 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

Заделка усадочных  вертикальных и  горизонтальных трещин  

стен и потолков  помещений подъезда  

100 м2 

0,907 

- На лестничной площадке выше 10 этажа  (возле входа на чердак) (0,177):  

3 вертикальные трещины, 

2 продольные трещины на потолке,  

1 горизонтальная трещина на выступе над  лестничным маршем, Г-образная трещина на  стене слева (если спускаться вниз) от  лестничного пролета,  

1 горизонтальная и 1 Г-образная трещина на  стене над лестничной площадкой на 10 этаже  

1 поперечная трещина на потолке над  лестничным маршем 10 этажа.  

- 10 этаж: (0,15) 

 1 вертикальная трещина между квартирой и  электрощитом,  

1 вертикальная трещина между квартирой и  электрощитом,  

1 горизонтальная трещина на стене на против  машинные отделения лифта, 1 вертикальная  трещина на поперечиной стене от машинного  отделения,  

1 вертикальная трещина на стене машинного  отделения,  

1 продольная трещина на потолке возле  машинного отделения.  

- Между 10-9 этажами: (0,16) 

 3 вертикальные и 1 горизонтальная трещина  расположенные на стене с окнами,  

4 вертикальные трещины по каждому углу  помещения мусоропровода,  

1 горизонтальная трещина между стеной и  потолком в помещении мусоропровода, слева  если стоять перед мусоропроводом,  

Горизонтальные и вертикальные трещины на  левой стене (если спускаться в низ)  лестничного марша.  

- 9 этаж: (0,021) 

1 вертикальная трещина между квартирой   № 412 и электрощитом,  

2 вертикальные трещины слева от  электрощита,  

1 вертикальная трещина слева от лифта. - Между 9-8 этажами: (0,019) 

1 вертикальная трещина на левой стене если  спускаться в низ,  

вертикальные и горизонтальные трещины на  стене с окнами,  

2 вертикальные трещины по обеим углам от  мусоропровода,  

1 горизонтальная трещина над окном в  помещении мусоропровода.  

- 8 этаж: (0,023) 

1 вертикальная трещина между квартирой   № 408 и электрощитом,  

1 вертикальные трещины слева лифта 

1 вертикальная трещина между квартирой   № 407 и электрощитом.  

- Между 8-7 этажами: (0,019) 

пп 

горизонтальные и вертикальные трещины на  стене с окнами,  

2 вертикальные трещины по обеим углам от  мусоропровода,  

1 горизонтальная трещина между окном и  прибором отопления в помещении  мусоропровода,  

1 горизонтальная трещина между прибором  отопления и полом,  

1 горизонтальная трещина на нижней части  лестничного пролета.  

- 7 этаж: (0,0247) 

1 вертикальная трещина между квартирой   № 404 и электрощитом,  

2 вертикальные трещины по обеим сторонам  относительно лифта,  

1 вертикальная трещина между квартирой   № 403 и электрощитом.  

- Между 7-6 этажами: (0,024) 

1 вертикальная трещина на левой стене если  спускаться в низ,  

1 горизонтальная 4 вертикальных трещины,  расположенные на стене с окном.  

- 6 этаж: (0,025) 

1 вертикальная трещина между квартирой   № 400 и электрощитом,  

2 вертикальные трещины по обеим сторонам  относительно лифта,  

1 вертикальная трещина между квартирой   № 399 и электрощитом.  

- Между 6-5 этажами: (0,023) 

1 горизонтальная и 3 вертикальных трещины,  расположенные на стене с окном,  

4 вертикальные трещины по всем углам в  помещении мусоропровода,  

1 горизонтальная трещина между окном и  потолком в помещении мусоропровода,  

1 вертикальная трещина на левой стене если  спускаться в низ.  

- 5 этаж: (0,022) 

1 вертикальная трещина между квартирой   № 396 и электрощитом,  

2 вертикальные трещины по обеим сторонам  относительно лифта,  

1 вертикальная трещина между квартирой   № 395 и электрощитом.  

- Между 5-4 этажами: (0,021) 

1 вертикальная трещина на левой стене если  спускаться в низ,  

вертикально и горизонтально расположенные  трещины на стене с окном,  

1 продольная трещина между нижней частью  лестничного марша и левой стеной, если  спускаться в низ.  

- 4 этаж: (0,022) 

1 вертикальная трещина между квартирой   № 392 и электрощитом,  

2 вертикальные трещины по обеим сторонам  относительно лифта,  

1 вертикальная трещина между квартирой   № 391 и электрощитом.  

- Между 4-3 этажами: (0,021) 

1 вертикальная трещина на левой стене если  

спускаться в низ,  

вертикально и горизонтально расположенные  трещины на стене с окном,  

1 продольная трещина между нижней частью  лестничного марша и левой стеной, если  спускаться в низ,  

Т образная трещина между окном и  отопительным прибором в помещении  мусоропровода,  

1 горизонтальная трещина между окном и  потолком в помещении мусоропровода,  

2 вертикальные трещины по обеим сторонам  от мусоропровода.  

- 3 этаж: (0,017) 

1 вертикальная трещина между квартирой   № 388 и электрощитом,  

1 вертикальная трещина с левой стороны  относительно лифта,  

1 вертикальная трещина между квартирой   № 387 и электрощитом.  

- Между 3-2 этажами: (0,015) 

1 продольная трещина между нижней частью  лестничного марша и левой стеной, если  спускаться в низ,  

1 вертикальная трещина на левой стене если  спускаться в низ,  

вертикальные и горизонтальные трещины  расположены на стене с окном  

- 2 этаж: (0,021) 

1 вертикальная трещина между квартирой   № 384 и электрощитом ,  

1 вертикальная трещина с левой стороны  относительно лифта,  

1 вертикальная трещина между квартирой   № 387 и электрощитом.  

- Между 2-1 этажами: (0,027) 

1 вертикальная трещина на левой стене если  спускаться в низ,  

вертикально и горизонтально расположенные  трещины на стене с окном,  

1 горизонтальная трещина между окном и  отопительным прибором в помещении  мусоропровода,  

1 вертикальная трещина с правой стороны от  стояка отопления в помещении  мусоропровода,  

1 горизонтальная трещина между потолком и  стеной с левой стороны от мусоропровода ,  

1 продольная трещина между нижней частью  лестничного марша и левой стеной, если  спускаться в низ.  

- 1 этаж: (0,0753) 

1 вертикальная трещина с левой стороны от  электрощита  

2 вертикальные трещины по обеим сторонам  лифта  

ФИО2 вертикальная на правой стене в  тамбуре,  

Горизонтальная трещина в тамбуре подъезда  над плафоном электроосвещения  

2 

Заделка трещин потолков  и стен ГКЛ в тамбуре,  затирка  

100 м2 

0,0075 

 ФИО2 поперечная по потолку  выполненного из ГКЛ: (0,0044)  

ФИО2 вертикальная на правой стене в  

тамбуре, выполненной из ГКЛ (0,0031)  

3 

Окраска  

поливинилацетатными 

водоэмульсионными  

составами улучшенная по  сборным конструкциям  стен, потолков,  подготовленным под  окраску  

100 м2 

0,0075  

 ФИО2 поперечная по потолку  выполненного из ГКЛ: (0,0044)  

ФИО2 вертикальная на правой стене в  тамбуре, выполненной из ГКЛ (0,0031)  

4 

Разборка покрытий полов  из керамических плиток  (ремонт)  

100 м2  покрытия  

0,182  

Этаж 8 (0,05)  Этаж 6 (0,03)  Этаж 4 (0,06)  Этаж 3 (0,042)  

5 

Устройство покрытий на  цементном растворе из  плиток керамических для  полов одноцветных с  красителем (ремонт)  

100 м2  покрытия  

0,182  

Этаж 8 (0,05)  Этаж 6 (0,03)  Этаж 4 (0,06)  Этаж 3 (0,042)  

6 

Устройство примыканий  верхних ступеней ж/б  лестничных маршей  

1 м3 заделки 

0,12 

Этаж 9 (0,023)  

Этаж 8 (0,027) 

Этаж 5 (0,024)  Этаж 4 (0,025)  Этаж 2 (0,021)  

7 

Мусор строительный с  погрузкой вручную:  погрузка  

тонна 

0,9464  

8 

Перевозка грузов  автомобилями- 

самосвалами 

грузоподъемностью 10 т  работающих вне карьера:  расстояние перевозки 20  км; нормативное время  пробега 1,478 час; класс  груза 1  

1 т 

0,9464  

с открытого акционерного общества "Красноярскпромстрой", г. Красноярск, взыскано  в пользу общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания  "Граджилсервис", 

<

...> 000 руб. судебных расходов по оплате государственной  пошлины.  

Определением от 15.05.2018 назначено судебное заседание по вопросу о вынесении  дополнительного решения.  

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание своих представителей не направили,  о времени и месте его проведения извещены надлежащим образом путем направления  определения и размещения информации в Картотеке арбитражных дел  (http://kad.arbitr.ru/). Согласно части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации дело рассматривается в их отсутствие.  

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для  рассмотрения вопроса о взыскании судебных расходов, обстоятельства.  

Как следует из иска, в процессе эксплуатации многоквартирного дома ООО УК  «Граджилсервис» были обнаружены недостатки отделки общего имущества  многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Красноярск, Свердловский район,  ул. Судостроительная, д. 62, а также другие дефекты.  

В целях установления дефектов, их характера между обществом с ограниченной  ответственностью Управляющая Компания «Граджилсервис» (далее «Заказчик) и  обществом с ограниченной ответственностью «Департамент оценочной деятельности»  

(далее «Испольнитель») был заключен договор № 088 на проведение строительно- технической экспертизы от 27.10.2017.  

Согласно пункту 1.1. Договора, Исполнитель обязуется провести по техническому  заданию Заказчика (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего  договора, строительно-техническую экспертизу и выдать экспертное заключение. Объект  экспертизы - многоквартирный жилой дом по адресу: 

<

...>. Целью проведения экспертизы является: определение  соответствия выполненных строительных работ на объекте требованиям строительных  норм и правил, проектной документации; определение способа устранения строительных  дефектов в случае их выявления.  

Результатом работы является экспертное заключение, соответствующее нормам  действующего законодательства РФ и техническому заданию на выполнение экспертизы  (пункт 1.2. Договора).  

В соответствии с пунктом 3.1. Договора, стоимость услуг по настоящему договору  составляет: 249 300,0 (двести сорок девять тысяч триста руб. 00 коп., в соответствии с  прилагаемым расчетом (Приложение № 2). НДС не облагается.  

Пунктом 3.2. Договора предусмотрено, что работы по настоящему договору  считаются выполненными после передачи Заказчику на бумажных носителях экспертных  

заключений, в количестве двенадцати экземпляров (по результатам  обследований одиннадцати подъездов, включая соответствующие подъездам кровлю,  иные помещения, места общего пользования и конструкции, дверные и оконные группы; а  также придомовой территории и фасада).  

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до  полного исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору (пункт 9.1.  Договора).  

Согласно Приложению 2 к Договору № 088 на проведение строительно-технической  экспертизы от 27.10.2017 расчет стоимости услуг соответствует следующему:  

Кровля, 

отмостка,  примыкание  

13100 

1200 

7400 

21700 

ИТОГО:  

249300 

Во исполнение условий договора № 088 от 27.10.2017, сторонами подписан Акт  выполненных работ от 10.11.2017, согласно которому Исполнитель передает, а Заказчик  принимает надлежащим образом оформленные двенадцать заключений строительно- технической экспертизы многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, выполненные согласно техническому заданию.  

Платежным поручением № 96 от 10.11.2017 на счет общества с ограниченной  ответственностью «Департамент оценочной деятельности» перечислено 249 300 руб., в  соответствии с назначением платежа, в качестве оплаты по сч. 117 от 09.11.2017 по  договору № 088 на проведение строительно-технической экспертизы от 27.10.2017.  

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в  деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.  

В соответствии со статьей 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных расходов на  лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, и другие вопросы о  судебных расходах разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в  судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в  определении, которое может быть обжаловано.  

В силу пункта 3 части 1 статьи 178 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации арбитражный суд, принявший решение, до вступления этого  решения в законную силу по своей инициативе или по заявлению лица, участвующего в  деле, вправе принять дополнительное решение в случае, если судом не разрешен вопрос о  судебных расходах.  

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных  с рассмотрением дела арбитражным судом.  

Частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в  пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В  

случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц,  участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований  (часть 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

В силу статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к  судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся  денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям,  переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте,  расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь  (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в  случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и  другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела  в арбитражном суде.  

Из положений статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации следуют критерии отнесения расходов к судебным: лицо понесло расходы  непосредственно в связи с рассмотрением дела; расходы являются необходимыми для  соблюдения процессуального порядка рассмотрения дела, обеспечения всестороннего,  полного и объективного рассмотрения дела; расходы связаны с осуществлением защиты  процессуальных прав лиц, участвующих в деле.  

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в абзаце втором пункта 2  Постановления от 21.01.2016 N 1 разъяснил, что перечень судебных издержек,  предусмотренный Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и  Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации, не является  исчерпывающим. Так, расходы, понесенные истцом, административным истцом,  заявителем в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления,  административного искового заявления, заявления в суд, могут быть признаны судебными  издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на  обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют  требованиям относимости, допустимости.  

Таким образом, расходы, предъявленные к возмещению стороной, в пользу которой  принят судебный акт, подлежат возмещению за счет проигравшей спор стороны, при  условии, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на  обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют  требованиям относимости и допустимости.  

В рассматриваемом случае двенадцать заключений строительно-технической  экспертизы многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, необходимы были истцу для формирования искового  требования, подтверждения своей позиции по делу и формирования доказательственной  базы.  

Согласно Решению Арбитражного суда от 18.05.2018 по делу № А33-30900/2017,  указанные экспертные заключения были приняты судом в качестве доказательств при  рассмотрении дела по существу и при принятии решения, указанные доказательства  соответствуют требованиям относимости и допустимости, в связи с чем, суд считает, что  понесенные истцом расходы в указанной части являются судебными издержками.  

В рамках настоящего дела, основанием для обращения истца в суд с исковым  заявлением послужили обстоятельства ненадлежащего выполнения ответчиком  строительных работ и наличие недостатков, являющихся следствием некачественной  работы ответчика.  

В обоснование исковых требований истцом представлены следующие заключения  строительно-технических экспертиз: от 03.11.2017 года по результатам строительно- технической экспертизы кровли, отмостки, примыканий дома № 62, по ул.  Судостроительная, расположенного в г. Красноярске; от 02.11.2017 года по результатам  строительно-технической экспертизы помещений подъезда № 1; от 02.11.2017 года по  результатам строительно-технической экспертизы помещений подъезда № 2; от  02.11.2017 года по результатам строительно-технической экспертизы помещений  подъезда № 3; от 03.11.2017 года по результатам строительно-технической экспертизы  помещений подъезда № 4; от 02.11.2017 года по результатам строительно-технической  экспертизы помещений подъезда № 5; от 02.11.2017 года по результатам строительно- технической экспертизы помещений подъезда № 6; от 02.11.2017 года по результатам  строительно-технической экспертизы помещений подъезда № 7; от 03.11.2017 года по  результатам строительно-технической экспертизы помещений подъезда № 8; от  03.11.2017 года по результатам строительно-технической экспертизы помещений  подъезда № 9; от 03.11.2017 года по результатам строительно-технической экспертизы  помещений подъезда № 10; от 03.11.2017 года по результатам строительно-технической  экспертизы помещений подъезда № 11.  

В целях рассмотрения вопроса о взыскании судебных расходов значение имеет факт  подготовки заключений строительно-технических экспертиз и факт оплаты услуг по  подготовке заключений. Указанные факты подтверждены материалами дела.  

Двенадцать заключений строительно-технической экспертизы многоквартирного дома  представлены в материалы дела, факт оплаты подтвержден платежным поручением № 96  от 10.11.2017 на сумму 249 300 руб.  

Расходы истца за подготовку указанных экспертных заключений являются  необходимыми для соблюдения процессуального порядка рассмотрения настоящего дела,  установления имеющих правовое значение обстоятельств, входящих в предмет  доказывания.  

Учитывая, что сведения, содержащиеся в указанных экспертных заключениях, были  использованы судом в качестве доказательств при рассмотрении дела по существу и при  принятии решения, указанные доказательства соответствуют требованиям относимости и  допустимости, судебные расходы по оплате стоимости строительно-технической  экспертизы подлежат взысканию с открытого акционерного общества  "Красноярскпромстрой" в пользу общества с ограниченной ответственностью  Управляющая компания "Граджилсервис" в размере 249 300 руб.  

В силу части 1 статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано  усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в  сети «Интернет». По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном  носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления  соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или  вручены им под расписку.  

Руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 170, 178 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО РЕШИЛ: 

Взыскать с открытого акционерного общества "Красноярскпромстрой", г. Красноярск,  в пользу общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания  "Граджилсервис", 

<

...> 300 руб. расходов на проведение экспертизы.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть  обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в  Третий арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд  Красноярского края.  

Судья Л.К. Бычкова