Арбитражный суд Калининградской области 

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040 

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru 

http://www.kaliningrad.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Калининград Дело № А21-6885/2020  «29» сентября 2020 года  

Резолютивная часть решения объявлена «28» сентября 2020 года  Решение изготовлено в полном объеме «29» сентября 2020 года  

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.  

при ведении протокола судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску МКП «Управление  капитального строительства» городского округа «Город Калининград» к ООО  «Специализированный застройщик «АКСТРОЙ» о взыскании 10 629 320,83 рублей  

от истца: ФИО2 по доверенности от ответчика: ФИО3 по доверенности установил. 

 Муниципальное казенное предприятие «Управление капитального  строительства» городского округа «Город Калининград» обратилось в суд иском к  обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик  «АКСТРОЙ» о взыскании неустойки в сумме 10 629 320,83 рублей.  

 Судом установлено. 

 Требования истца обусловлены нарушением ответчиком срока выполнения  работ по строительству многоквартирного жилого дома по ул. Согласия в городе  Калининграде» (1 этап) по договору генерального подряда от 26.12.2016 года № 517.  

 Согласно расчету истца с учетом положений пунктов 3.3, 7.3.1, 4.1 (в редакции  дополнительного соглашения от 30.08.2017 года № 2, дополнительного соглашения от  29.05.2020 года № 13) договора генерального подряда от 26.12.2016 года № 517 за  период с 31.10.2019 года по 28.05.2020 года подлежит уплате неустойка в сумме  10 629 320,83 рублей.  

 В представленном отзыве ответчик не признал требования по размеру, пояснив,  что все строительно-монтажные работы были завершены 23.03.2020 года, что  

подтверждается актом приемки объекта капитального строительства № 1; ответчик  просил снизить размер неустойки по положениям статьи 333 ГК РФ.  

 Период просрочки с 31.10.2019 года по 28.05.2020 года 211 дней в расчете  истца обусловлен датой выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию № 39- RU39301000-302-2016.  

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской  Федерации получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является  обязанностью заказчика, в связи с чем, неустойка не может начисляться до даты  получения такого разрешения.  

С учетом изложенного, начисление неустойки за период с 24.03.2020 года по  28.05.2020 неправомерно, поскольку отсутствует вина подрядчика.  

За период 31.10.2020 года по 23.03.2020 года неустойка составляет 7 354 885,5  рублей.  

Указанный размер судом приведен с целью определения пропорции при  расчете госпошлины.  

Ответчиком заявлено о применении положений статьи 333 ГК РФ. 

Учитывая цену контракта (объем работ), незначительный период просрочки,  привлечение ответчика к имущественной ответственности по этому же договору за  нарушение срока выполнения этапа работ суд применяет положения статьи 333 ГК  РФ и устанавливает размер ответственности за нарушение срока работ 1 900 000  рублей.  

Требования истца в части неустойки в сумме 1 900 000 рублей подлежат  удовлетворению на основании положений статьи 330 ГК РФ, положений договора.  

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный  застройщик «АКСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>) в пользу муниципального казенного  предприятия «Управление капитального строительства» городского округа «Город  Калининград» (ОГРН 

<

***>) неустойку в сумме 1 900 000 рублей, расходы  по госпошлине в сумме 52 617,6 рублей.  

Во взыскании остальной суммы отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в арбитражный  апелляционный суд.  

Судья О.Н.Шкутко