АРБИТРАЖНЫЙ СУД  САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОТИВИРОВАННОЕ 

РЕШЕНИЕ

по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства

г. Южно-Сахалинск                     

«24» сентября 2019 года                                              Дело № А59-4401/2019

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Ким С.И.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Масстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес регистрации: 

<

...>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Контек-Сервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес регистрации: 693000, 

<

...>)

о взыскании неустойки по договору подряда № КТ-Св 007 от 18.04.2018 в размере 133 053 руб. 58 коп. за период с 16.09.2018 по 05.11.2018,

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Масстрой» обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Контек-Сервис» о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда от 18.04.2018 № КТ-Св 007 на выполнение работ на объекте «Многофункциональный центр с встроенными помещениями водноспортивного, физкультурно-оздоровительного назначения в г. Южно-Сахалинске» в размере 133 053 руб. 58 коп. за период с 16.09.2018 по 05.11.2018.

В обоснование иска указано на нарушение ответчиком сроков выполнения работ по договору подряда.

Определением суда от 18.07.2019 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон, в соответствии со статьей 228 АПК РФ. 

09 августа 2019 года от ООО «Контек Сервис» поступили возражения на исковое заявление, в котором ответчик против удовлетворения иска возражал, указав, что после подписания договора подряда и составления акта о готовности объекта к монтажу воздуховодов, были выполнены неоднократные изменения проектного решения по монтажу вентиляции, что повлекло невозможность выполнения работ по договору. Поскольку заказчиком была допущена просрочка в предоставлении проектной документации более, чем на половину срока отведенного подрядчику для выполнения всех работ, полагает вины ответчика в просрочке выполнения работ по договору не имеется. В случае удовлетворения иска, просил снизить размер неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ. 

В отзыве на исковое заявление ответчик ходатайствовал о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц ООО «Городская управляющая компания» и ООО «Мегаград».

  12 сентября  2019 года  судом принята резолютивная часть решения по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства.

17.09.2019 от ответчика поступило заявления об изготовлении мотивированного решения суда по делу. Аналогичное заявление поступило от истца.

Поскольку сторонами соблюден пятидневный срок, предусмотренный частью 2 статьи 229 АПК РФ для подачи заявления о составлении мотивированного решения, заявления ООО «Масстрой» и ООО «Контек-Сервис» подлежат удовлетворению.

Рассмотрев ходатайство ООО «Контек-Сервис» о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц ООО «Городская управляющая компания» и ООО «Мегаград» суд не нашел оснований для его удовлетворения.

Согласно части 1 статьи 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Предусмотренный АПК РФ институт третьих лиц, как заявляющих, так и не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, призван обеспечить судебную защиту всех заинтересованных в исходе спора лиц и не допустить принятия судебных актов о правах и обязанностях этих лиц без их участия.

Основанием для привлечения к участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, является наличие у указанных лиц материально-правового интереса к рассматриваемому делу ввиду того, что указанные лица являются участниками правоотношений, связанных с правоотношениями, которые являются предметом разбирательства в настоящем деле, и, соответственно, объективная возможность того, что принятый по настоящему делу судебный акт может непосредственно повлиять на их права и обязанности по отношению к одной из сторон в споре.

Согласно статье 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Таким образом, привлечение к участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, не является безусловной обязанностью арбитражного суда.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, привлекаются арбитражным судом к участию в деле, если судебным актом, которым закончится рассмотрение дела в суде первой инстанции, непосредственно затрагиваются их права и обязанности, в том числе создаются препятствия для реализации их субъективного права или надлежащего исполнения обязанности по отношению к одной из сторон спора. Суд должен установить характер правоотношений между лицами, участвующими в деле, правовой интерес лица, а также может ли конечный судебный акт по делу повлиять на права или обязанности третьего лица по отношению к одной из сторон.

Лицо, чтобы быть привлеченным в процесс, должно иметь ярко выраженный материальный интерес на будущее, то есть после разрешения дела судом у такого лица должны возникнуть, измениться или прекратиться материально-правовые отношения с одной из сторон.

Доказательств наличия у ООО «Городская управляющая компания» и ООО «Мегаград» вышеуказанных признаков третьего лица, предусмотренных статьей 51АПК РФ, ответчиком в материалы дела не представлено.

ООО «Городская управляющая компания» и ООО «Мегаград» не являются стороной спорного договора. Следовательно, возникший из договорных отношений между самостоятельными хозяйствующими субъектами спор, не затрагивает прав и обязанностей указанных обществ, не являющихся сторонами договора, а принятие судебного акта по настоящему делу не может повлиять на их права и обязанности. 

По указанным основаниям ходатайство ответчика удовлетворению не подлежит.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ доказательства, имеющиеся в деле, суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, 18 апреля 2018 года между обществом с ограниченной ответственностью «МасСтрой» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Контек-Сервис» (подрядчик) заключен договор подряда № КТ-Св 007 на выполнение работ на объекте «Многофункциональный центр с встроенными помещениями водноспортивного, физкультурно-оздоровительного назначения в г. Южно-Сахалинске» (далее – договор).

Пунктом 2.1 договора предусмотрено, что общая стоимость работ, подлежащих выполнению в соответствии с п. 1.1 договора, определяется приложением № 1 и составляет 39 500 000 руб. 86 коп., включая НДС 18% в сумме 6 025 423 руб. 86 коп.

Согласно п. 3.1 договора, срок выполнения работ по настоящему договору составляет 150 календарных дней с момента готовности объекта к монтажу воздуховодов, о чем стороны составляют двухсторонний акт.

Дополнительным соглашением № 1 от 24 июля 2018 года к договору подряда от 18.04.2018 № КТ-Св 007 стороны определили, что общая стоимость работ, подлежащих выполнению в соответствии с п. 1.1 договора определяется приложением № 1 и составляет 41 300 001 руб. 18 коп., включая НДС 18% в сумме 6 300 000 руб. 18 коп.

04 сентября 2018 года стороны заключили дополнительное соглашение № 2 к договору подряда от 18.04.2018 № КТ-Св 007, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить, в соответствие с условиями настоящего дополнительного соглашения, работы по монтажу воздуховодов для присоединения текстильных воздухораспределителей развлекательной зоны в соответствии с проектной документацией и условиями настоящего дополнительного соглашения на объекте строительства: «Многофункциональный центр с встроенными помещениями водноспортивного, физкультурно-оздоровительного назначения в г. Южно-Сахалинске», а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их (пункт 1.1 дополнительного соглашения).

Согласно пункту 2.1 дополнительного соглашения, стоимость работ составляет 1 850 000 руб. 46 коп., включая НДС 18% в размере 282 203 руб. 46 коп.

В соответствии с п. 4.1 дополнительного соглашения условия договора подряда от 18.06.2018 № КТ-Св 007, незатронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются без изменений.

19 апреля 2018 года, в соответствии с пунктом 3.1 договора подряда, стороны подписали акт передачи строительной готовности площадки объекта «Многофункциональный центр с встроенными помещениями водноспортивного, физкультурно-оздоровительного назначения в г. Южно-Сахалинске».

Таким образом, срок выполнения работ по договору, с учетом пункта 3.1 договора – до 16 сентября 2018 года (19.04.2018 + 150 дней).

30.09.2018 сторонами подписан акт о приемке выполненных работ № 2 и справка о стоимости выполненных работ на сумму 15 038 112 руб. 34 коп. 

31.10.2018 сторонами подписан акт о приемке выполненных работ № 4 и справка о стоимости выполненных работ на сумму 10 999 386 руб. 52 коп. 

05.11.2018 сторонами подписан акт о приемке выполненных работ № 7 и справка о стоимости выполненных работ на сумму 11 744 948 руб. 28 коп.

Поскольку ответчиком работы по договору подряда выполнены с просрочкой, истец направил в адрес ООО «Контек-Сервис» претензию № 13ПД от 26.04.2019 с требованием уплатить неустойку в размере 133 053 руб. 59 коп., которая оставлена без удовлетворения, что и послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд.

Из условий договора правоотношения сторон подлежат регулированию нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о подряде, а также общими нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) о способах обеспечения исполнения обязательств. 

Согласно статье 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (п. 1 ст. 740 ГК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 708 ГК РФ, если иное не установлено законом, иными правовыми актами, или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного срока, так и промежуточных сроков выполнения работ.

Таким образом, срок выполнения работ является существенным условием договора подряда. 

Факт просрочки выполнения работ по договору подряда подтверждается материалами дела – договор, дополнительное соглашение, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ.

Согласно ст.ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

  В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

В соответствии с п. 8.4 договора подряда,  в случае если подрядчик не выполнит надлежащим образом свои обязательства в срок, предусмотренный договором, то заказчик вправе взыскать с него пени в размере 0,01 процента от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы настоящего договора.

При таких обстоятельствах суд считает требования истца о взыскании пени за просрочку выполнения работ по договору подряда за спорный период правомерными.

Расчет неустойки, подготовленный истцом, судом проверен и признан неверным в части определения начала периода просрочки выполнения работ, поскольку, как указано выше, с учетом пункта 3.1 договора и подписания акта о готовности объекта 19.04.2018, срок выполнения работ по договору – до 16 сентября 2018 года, а первый день просрочки выполнения работ является 17.09.2018.

С учетом вышеизложенных обстоятельств, судом произведен свой расчет неустойки:

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

15 038 112,34 

17.09.2018

30.09.2018

14

15 038 112,34 × 14 × 0.01% 

21 053,36 р.

10 999 386,52

17.09.2018

31.10.2018

45

10 999 386,52 × 45 × 0.01% 

49 497,24 р.

11 744 948,28

17.09.2018

05.11.2018

50

11 744 948,28 × 50 × 0.01%

58 724,74

                                                                                Итого: 129 275, 34

Таким образом, размер пени за просрочку выполнения работ по договору подряда от 18.04.2018 № КТ-Св 007 составил 129 275 руб. 34 коп.

Возражая против удовлетворения иска, ООО «Контек Сервис» в отзыве на исковое заявление указало, что вины ответчика в просрочке выполнения работ по договору не имеется, поскольку заказчиком была допущена просрочка в предоставлении проектной документации более, чем на половину срока отведенного подрядчику для выполнения всех работ, полагает. 

Суд не принимает указанные доводы в силу следующего.

В соответствии с п. 1 ст. 719 ГК РФ Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства (п. 2 ст. 716 ГК РФ).

        При таких обстоятельствах доводы ответчика о том, что работы не были выполнены в срок в связи с просрочкой исполнения истцом встречных обязательств, несостоятельны.

Суд, рассмотрев ходатайство ответчика о несоразмерности начисленной неустойки последствиям нарушения обязательства, приходит к следующему.

 Согласно п. 1, 2 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении. Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.       

Таким образом, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего суд вправе оценить указанный критерий, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела, как того требуют положения ст. 71 АПК РФ.

Пленум Верховного Суда РФ в пункте 75 Постановления № 7 от 24 марта 2016 года «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснил, что при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 21 декабря 2000 года № 263-О, задача суда состоит в устранении явной несоразмерности договорной ответственности. Суд может лишь уменьшить размер неустойки до пределов, при которых она перестанет быть явно несоразмерной, причем указанные пределы суд определяет в силу обстоятельств конкретного дела и по своему внутреннему убеждению.

Сложившаяся правоприменительная практика исходит из того, что договорная неустойка не должна являться способом получения прибыли от контрагента и должна быть направлена на соблюдение баланса интересов контрагентов гражданско-правовой сделки. Поэтому при определении подлежащей взысканию неустойки суд должен установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и отрицательными последствиями, наступившими для кредитора в результате нарушения обязательства.

При разрешении ходатайства ответчика судом принимаются во внимание, что истец не ссылается на наличие у него убытков, вызванных нарушением обязательства со стороны ответчика, или возможность возникновения таких убытков. Исходя из необходимости соблюдения реального баланса интересов сторон, суд полагает необходимым снизить размер подлежащей взысканию неустойки, полагая заявленные требования чрезмерными.

При вышеизложенных обстоятельствах, исходя из необходимости соблюдения реального баланса интересов сторон, чрезмерно высокий размер пени, отсутствие у ООО «МасСтрой»  убытков, вызванных нарушением срока выполнения работ по договору, количество дней просрочки, суд полагает возможным удовлетворить ходатайство ООО «Контек-Сервис» о снижении на основании ст. 333 ГК РФ размера пени и определить величину пени, достаточную для компенсации потерь истца, в размере  64 637 руб. 67 коп.

 При вышеизложенных обстоятельствах требования истца подлежат удовлетворению в сумме  64 637 руб. 67 коп.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Согласно пунктом 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» если размер заявленной неустойки снижен арбитражным судом по правилам статьи 333 ГК РФ на основании заявления ответчика, расходы истца по государственной пошлине не возвращаются в части сниженной суммы из бюджета и подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее снижения.

Руководствуясь ст.ст.  167-171 и 229 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Масстрой» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Контек-Сервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Масстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в сумме 64 637 руб. 67 коп.  и расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 850 руб. 24 коп., всего взыскать 69 487 (Шестьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят семь) руб. 91 коп.    

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Арбитражный суд составляет мотивированное решение по заявлению лица, участвующего в деле, которое может быть подано в течение пяти дней со дня размещения настоящего решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (часть 2 статьи 229 АПК РФ).

Решение по настоящему делу подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции – Арбитражный суд Дальневосточного округа только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 АПК РФ.

Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае составления мотивированного решения арбитражного суда решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. В случае подачи апелляционной жалобы решение арбитражного суда первой инстанции, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Судья                                                                                         С.И. Ким