Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-21143/2025

10 сентября 2025 года

г.Москва

 

 Судья Арбитражного суда Московской области А.О. Уваров  

при ведении протокола судебного заседания ФИО1, рассмотрел дело № А41-21143/2025 по иску АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к ООО ЭКОДОЛЬЕ ШОЛОХОВО - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

3-е лицо: Министерство жилищной политики Московской области, ООО «Шолохово»  

Об исключении из инвестиционного договора условий о постройке детского сада на 160 мест (п.1.6., 2.1.4, 3.2.1, 4.2.), исключении обязательства по выполнению проекта по строительству напорного канализационного коллектора «Аксаковские очистные сооружения» (п. 2.3., 5.2.8, 5.2.9, 5.3.16, 5.3.18), взыскании 453 991 475, 2 рублей понесенных в связи с отсутствием строительства детского сада, 13 330 472, 46 рублей убытков в виде стоимости земельного участка для постройки детского сада, 30 000 000 рублей убытков в виде стоимости проектных работ,  

при участии в судебном заседании: от истца (заявителя): не явился. извещен. от ответчика: ФИО2, уд адв. № 2116, доверенность от 30.05.2025; от ООО «Шолохово»: ФИО3 доверенность от 17.07.2025, диплом от Министерства жилищной политики: не явился. извещен. 

Руководствуясь статьями ст. 110,167-170, 176, 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Внести изменения в Инвестиционный договор № 09271301-И от 27.09.2013 г, а именно:  

- исключить из условий договора обязательство ООО "ЭКОДОЛЬЕ ШОЛОХОВО - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» по строительству детского дошкольного учреждения на 160 мест;  

- из п.1.6 исключить слова «детский сад на 160 мест»; 

- из ст. 2 исключить подпункт 2.1.4 «детский сад на 160 мест»; -из пп. 3.2.1 исключить слова «детский сад на 160 мест»;  

- из п. 4.2. исключить слова «выдача разрешения на строительство детского сада на 160 мест – в течение 48 месяцев от даты подписания настоящего договора», «окончание строительства и ввод в эксплуатацию детского сада на 160 мест – в течении 12 месяцев с даты выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию после завершения строительства всех инвестиционных объектов 1-ой и 2-ой строительной очереди или строительства жилых объектов общей площадью 50 000 кв.м.»;  

- исключить из Графика реализации инвестиционного проекта (Приложение № 2 у инвестиционному договору) объект «детское дошкольное учреждение (детский сад)»;  

- исключить обязательство по выполнению проекта строительства напорного канализационного коллектора «Аксаково-очистные сооружения в д. Сухарево»; - исключить пункты 5.2.8, 5.2.9, 5.3.16, 5.3.18 договора;  

-в ст. 2 исключить п. 2.3. договора. В удовлетворении остальной части иска отказать. 

 Взыскать с ООО ЭКОДОЛЬЕ ШОЛОХОВО - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 15 000 рублей государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано. 

Судья А.О. Уваров