РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 

26.04.2018 года                                                                    Дело № А40-236412/17-110-2099

Резолютивная часть решения объявлена 19.04.2018 года 

Решение в полном объеме изготовлено 26.04.2018 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И СТРАТЕГИЙ" (ОГРН 

<

***>, 109428, 

<

...>, этаж 8) к акционерному обществу холдинговая компания "ГЛАВНОЕ ВСЕРЕГИОНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЦЕНТР" (ОГРН 

<

***>, 109147, 

<

...>), третье лицо:  ООО «МОНОЛИТ-СТРОЙ» ,о взыскании 3 443 514,10 руб.,

при участии:

от истца – ФИО2 по дов.  от 09.01.2018№25-04/2017

от ответчика- ФИО3 П,В, по дов.  от  08.11.2017№219

от  третьего лица- ФИО2 по дов.  от09.01.2018№12-12/2017,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И СТРАТЕГИЙ" обратилось с иском к акционерному обществу холдинговая компания "ГЛАВНОЕ ВСЕРЕГИОНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЦЕНТР" о взыскании 3 443 514,10 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 03.03.2016 по 01.12.2017 по договору №24/12-Л от 12.04.2012.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложены в отзыве.

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, 20 февраля 2013 года между Истцом и Ответчиком было заключено соглашение о замене стороны в Договоре № 24/12-Л от 12 апреля 2012г., согласно которому Истец принял на себя обязательства выполнить по заданию Ответчика комплекс строительно-монтажных работ по строительству Объекта (индивидуальный жилой дом с подземным паркингом с освоением, инженерными коммуникациями и благоустройством без устройства электроснабжения по высокой стороне, строительство которого осуществляется в соответствии с Проектной и Рабочей документацией в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы) расположенного по адресу: г. Москва, Ломоносовский, мкр. 18, к 5А. 01 июня 2013 года Стороны подписали Дополнительное соглашение № 1 к Договору, в соответствии с которым Стороны решили изложить Договор №24/12-Л в новой редакции.

Согласно п. 4.3.1. Соглашения о замене стороны в договоре от 20.02.2013г. к Договору №24/12-Л от 12.04.2012г., Генподрядчик осуществляет текущие платежи Подрядчику в течении 10 рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за отчетный период.

29 октября 2016 года Стороны подписали Дополнительное соглашение № 12 к Договору, в котором изложили, что на основании заключения Контрольно-ревизионного управления по результатам проверки фактических объемов и стоимости работ по Объекту Итоговая стоимость выполненных Истцом по Договору работ, с учетом Дополнительных работ, составляет 1 008 227 368,26 руб.

30 апреля 2015 года Мосгосстройнадзор города Москва выдал Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации № 221-10-Р/ЗОС в котором также подтвердил фактическое выполнение работ.

Мосгосстройнадзор города Москва 07 мая 2015года выдал Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (RU77150000-006491) в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российский Федерации.

01 февраля 2016 года рабочей группой Контрольно-счетной палаты Москвы, застройщиком КП «УГС», техническим заказчиком ОАО «Центр-Инвест», руководителем проекта АО ХК «ГВСУ «Центр», Главным инженером эксплуатирующей организации

ГБУ «Жилищник» оформлен Акт выездного контроля мероприятий по проверке качества выполненных работ.

АО ХК «ГВСУ «Центр» по Договору подписаны только акты и справки по формам №№ КС-2, КС-3 на общую сумму 982 091 578,23 руб.

ООО «149 УНР» исходящим письмами № 4/39 от 17.02.16г., № 4/69 от 22.04.16г, № 4/94 от 10.05.16г., № 4/127 от 23.08.16г., № 4/129 от 05.09.16г. и № 4/154 от 14.12.16г. направлял в адрес АО ХК «ГВСУ «Центр» Акты о приемке выполненных работ КС-2 на сумму 26 135 790,02 руб., Справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 на сумму 26 135 790,02 руб. за период выполнения работ с 04.12.2015г. по 05.12.2015г.

ООО «149 УНР» также исходящими письмами № 4/69 от 22.04.16г, № 4/129 от 05.09.16г. передал Ответчику Акт ввода №RU77150000-006491 на 2-х листах, Акт ввода №77- 150000-006713-2015 от 29.08.15г. на 2-х листах, Перечень-реестр МАФ на 2-х листах, Акт передачи ключей на 1-м листе, Акты передаче МОП и технических помещений МОП на 12-ти листах, Справка о принятии в эксплуатацию технических этажей и помещений на 5-ти листах, Акт передачи ключей от машинных помещений на 1-м листе, Акты приема-передачи автостоянки и техподполья на 11 -ти листах, Акты приема-передачи квартир на 30-ти листах, ЗОС, Акт выездного контроля мероприятий по проверке качества выполненных работ от 01.02.16г.

АО ХК «ГВСУ «ЦЕНТР» оплату выполненных ООО «149 УНР» работ в полном объеме не произвело, от подписания Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и Акте о приемки выполненных работ по форме КС-2 уклонился, в связи с чем, у него образовалась задолженность в сумме 41 536 930,51 руб.

Учитывая, что денежная сумма в размере 2% от стоимости Работ, что составляет 20 164 547,37 руб., удерживается АО ХК «ГВСУ «Центр» в качестве суммы гарантийного удержания на основании Дополнительного соглашения № 1 к Договору, сумма к оплате составляет 21 372 383,15 руб.

В связи, с чем ООО «149 УНР» обратилось с иском в Арбитражный суд г. Москвы к АО ХК «ГВСУ «Центр» о взыскании задолженности (дело №А40-39330/17).

Протокольными определениями от 27.07.2017 г. суд заменил истца (ООО «149 УНР») в порядке ст. 48 АПК РФ на его правопреемника - ООО «КОМПАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И СТРАТЕГИЙ».

Исковые требования были удовлетворены в полном объеме, решение вступило в законную силу 16.11.2017г.

Указанная задолженность оплачена в полном объеме 01.12.2017г.

На основании чего истец просит взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 3 443 514,10 руб. за период с 03.03.2016г. по 01.12.2017г.

В соответствии с ч. 1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами произведен истцом на условиях ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, проверен судом и признан правильным.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

При  этом суд считает доводы ответчика несостоятельными,  поскольку  несогласие с объемом выполненных работ,  с их качеством,  не является основанием для освобождения  от ответственности за несвоевременную оплату работ,  тем боле , что такое несогласие было  неправомерным,  что и установлено в рамках дела  №А40-39330/17,  при этом подрядчик мог оплатить  своевременно часть работ ,  которую не оспаривал.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110,123,156,169-171 АПК РФ, 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  акционерного общества холдинговая компания "ГЛАВНОЕ ВСЕРЕГИОНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЦЕНТР"  в пользу общества с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И СТРАТЕГИЙ"  3 443 514 руб. 10 коп. процентов,   40 218 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:               А.В.Мищенко