Арбитражный суд Краснодарского края

Именем Российской Федерации

Мотивированное 

решение

в порядке части 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации 

 

Дело № А32-53095/2021

г. Краснодар

04 февраля 2022 года

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Бондаренко И.Н., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению НКО «Фонд капитального ремонта МКД», г. Краснодар, 

к ООО «Элемент Юг Строй», г. Новороссийск, 

о взыскании, 

 

У С Т А Н О В И Л :

НКО «Фонд капитального ремонта МКД» обратилось в арбитражный суд с заявлением о взыскании с ООО «Элемент Юг Строй» в пользу НКО «Фонд капитального ремонта МКД» неустойки в размере 713 661,25 руб.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 24.11.2021 данное дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства в соответствии со ст. 228  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Арбитражным судом Краснодарского края по результатам рассмотрения дела №А32-53095/2021 вынесена резолютивная часть решения 17.01.2022 и размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с частью 1 статьи 229 АПК РФ.

28.01.2022 от ООО «Элемент Юг Строй» поступило ходатайство о составлении мотивированного решения.

Согласно части 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 настоящего Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных настоящей главой.

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы.

В соответствии с частью 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Суд, исследовав материалы дела и оценив в совокупности все представленные доказательства, установил следующее. 

Как следует из материалов дела, между некоммерческой унитарной организацией «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее - заказчик) и ООО «Элемент Юг Строй» (далее - подрядчик) заключен договор № РТС223А190569 от 24.12.2019 (далее - договор) на оказание услуг по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных в г. Новороссийске, г. Геленджике Краснодарского края.

В соответствии с пунктом 4.2 указанного договора, срок выполнения работ по настоящему договору - до 300 календарных дней со дня передачи площадки.

Срок окончания работ по 1 этапу (ПИР) - 28.06.2020.

Срок окончания работ по 2 этапу (СМР) - 11.12.2020.

Срок окончания работ по капитальному ремонту крыш, фасадов многоквартирных домов, расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик-30.01.2021.

Срок окончания работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов, расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск - 05.02.2021.

Однако, в установленные договором сроки обязательства по проведению капитального ремонта многоквартирных домов не выполнены.

Работы по разработке проектно-сметной документации и получению положительного заключения проверки на достоверность определения сметной стоимости по адресам: г. Новороссийск, 

<

...>: 

<

...> корп. А выполнены 14.07.2020 и приняты заказчиком согласно комиссионным актам от 22.07.2020.

Работы по разработке проектно-сметной документации и получению положительного заключения проверки на достоверность определения сметной стоимости по адресам: г. Новороссийск, 

<

...> выполнены 26.08.2020 и приняты заказчиком согласно комиссионным актам от 31.08.2020.

Работы по разработке проектно-сметной документации и получению положительного заключения проверки на достоверность определения сметной стоимости по адресам: 

<

...>; 

<

...>

ул. Волгоградская, д. 32; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...> выполнены 18.09.2020 и приняты заказчиком, согласно комиссионным актам от 21.09.2020.

Работы по разработке проектно-сметной документации и получению положительного заключения проверки на достоверность определения сметной стоимости по адресам: г. Новороссийск, 

<

...> выполнены 21.09.2020 и приняты заказчиком согласно комиссионным актам от 21.09.2020.

Работы по разработке проектно-сметной документации и получению положительного заключения проверки на достоверность определения сметной стоимости по адресам: 

<

...> 

<

...> выполнены 11.11.2020 и приняты заказчиком согласно комиссионным актам от 13.11.2020.

Работы по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома по адресам: 

<

...>, 

<

...> выполнены 24.12.2020 и приняты согласно комиссионному акту от 30.12.2020.

Работы по капитальному ремонту подвальных помещений в многоквартирном доме по адресу: 

<

...> выполнены 24.12.2020 и приняты согласно комиссионному акту от 30.12.2020.

Работы по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома по адресам: г. Новороссийск, 

<

...>, г. Новороссийск, 

<

...> выполнены 26.01.2021 и приняты согласно комиссионному акту от 29.01.2021.

Работы по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома по адресу: 

<

...> выполнены 26.01.2021 и приняты согласно комиссионному акту от 28.01.2021.

Работы по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома по адресу: 

<

...> выполнены 02.02.2021 и приняты согласно комиссионному акту от 04.02.2021.

Работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по адресу: 

<

...> выполнены 02.02.2021 и приняты согласно комиссионному акту от 04.02.2021.

Работы по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома по адресу: 

<

...> выполнены 25.02.2021 и приняты согласно комиссионному акту от 05.03.2021.

Работы по капитальному ремонту водоотведения многоквартирного дома по адресу: 

<

...> выполнены 25.02.2021 и приняты согласно комиссионному акту от 05.03.2021.

Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: 

<

...> выполнены 05.04.2021 и приняты согласно комиссионному акту от 05.04.2021.

Работы по капитальному ремонту горячего водоснабжения многоквартирного дома по адресу: 

<

...> выполнены 05.04.2021 и приняты согласно комиссионному акту от 05.04.2021.

Работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по адресу: 

<

...> выполнены 14.04.2021 и приняты согласно комиссионному акту от 15.04.2021.

Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу: 

<

...> выполнены 13.05.2021 и приняты согласно комиссионному акту от 14.05.2021

Работы по капитальному ремонту горячего водоснабжения многоквартирного дома по адресу: 

<

...> выполнены 13.05.2021 и приняты согласно комиссионному акту от 14.05.2021.

Работы по капитальному ремонту водоотведения многоквартирного дома по адресу: 

<

...> выполнены 13.05.2021 и приняты согласно комиссионному акту от 14.05.2021. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и договором.

В соответствии с ч. 1 п. 11.3 договора, за невыполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по срокам выполнения работ на объектах в соответствии с графиком производства работ, подрядчик уплачивает заказчику неустойку в случае задержки подрядчиком срока исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором (начала и/или завершения работ по объектам в соответствии с графиком выполнения работ (начальный и конечный сроки выполнения работ) подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ, сроки по которому нарушены, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, включая срок исполнения

Нарушение ответчиком срока выполнения работ послужило основанием для начисления неустойки в соответствии с п. 11.3 договора.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Проверив и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к следующим выводам. 

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, оказать услуги, уплатить деньги и т.д. (пункт 1 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей в рассматриваемый период) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Как указано в статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные параграфом 1 главы 37 ГК РФ, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров (п. 2 ст. 702 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии со статьей 758 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Согласно пункту 1 статьи 760 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан:

--выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;

--согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;

--передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы 

Доказательством сдачи подрядчиком результата работ и приемки его заказчиком является акт или иной документ, удостоверяющий приемку выполненных работ (пункт 2 статьи 720 ГК РФ). 

Пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным сторонами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с п. 11.3 договора, за невыполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по срокам выполнения работ на объектах в соответствии с графиком производства работ, подрядчик уплачивает заказчику неустойку в случае задержки подрядчиком срока исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором (начала и/или завершения работ по объектам в соответствии с графиком выполнения работ (начальный и конечный сроки выполнения работ) подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ, сроки по которому нарушены, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, включая срок исполнения.

Согласно представленному истцом расчету, начисление неустойки произведено следующим образом:

1) 1 этап (ПИР):

- за период с 29.06.2020 по 14.07.2020 (кол-во дней просрочки – 16 дней) по адресам: г. Новороссийск, 

<

...>; 

<

...>

264 840 * 16 * 1/130 * 4,5% = 1 466,81 руб.

- за период с 29.06.2020 по 26.08.2020 (кол-во дней просрочки – 59 дней) по адресам: г. Новороссийск, 

<

...> 

138 350.00 * 59 * 1/130 * 4.25% = 2 668,56 руб.

- за период с 29.06.2020 по 18.09.2020 (кол-во дней просрочки – 82 дня) по адресам: 

<

...>; 

<

...> 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>: 

416 060.00 * 82 *1/130 * 4.25% = 11153.61р.

- за период с 29.06.2020 по 21.09.2020 (кол-во дней просрочки – 85 дней) по адресам: г. Новороссийск, 

<

...>:

45 620,00 * 85 * 1/130 * 4.25% = 1 267,71 руб.

- за период с 29.06.2020 по 11.11.2020 (кол-во дней просрочки – 136 дней) по адресам: 

<

...> 

<

...>

671 400.00 х 136 х 1/130 х 4.25% = 29 851,48 руб.

Общий размер неустойки по 1 этапу (ПИР) составляет 46 408,17 рублей.

2) 2 этап (СМР):

- по адресам: 

<

...> (ЭС); 

<

...> (ЭС); ул. Новороссийской

Республики, д. 28 (Подвал) за период с 12.12.2020 по 24.12.2020 (кол-во дней просрочки – 13 дней):

3 629 918.00 * 13 * 1/130 * 4.25% = 15 427,15 руб.

- по адресам: г. Новороссийск, 

<

...> (ЭС); ул. Мира, д. 20/22 (ЭС), г. Новороссийск, 

<

...> (ЭС) за период с 12.12.2020 по 26.01.2021 (кол-во дней просрочки – 46 дней):

838 597.00 * 46 * 1/130 * 4.25% = 20 029,57 руб.

- по адресу: 

<

...> за период с 12.12.2020 по 02.02.2021 (кол-во дней просрочки – 53 дня):

1 287 645.00 * 53 * 1/130 * 4.25% = 22 310,93 руб.

- по адресу: 

<

...> (Крыша) за период с 31.01.2021 по 02.02.2021:

2 879 988.00 x 3 x1/130 x 6.75% = 4 486,14 руб.

- по адресу: 

<

...> (ЭС, ВО) за период с 12.12.2020 по 25.02.2021 (кол-во дней просрочки – 76 дней):

822 990.00 x 76 x1/130 x 6.75% = 32 476,45 руб.

- по адресу: 

<

...> (ТС), 

<

...> (ГВС) за период с 12.12.2020 по 05.04.2021 (кол-во дней просрочки – 115 дней):

1 253 883.00 * 115 * 1/130 * 6.75% = 74 871,28 руб.

- по адресу: 

<

...> (крыша) за период с 31.01.2020 по 14.04.2021 (кол-во дней просрочки – 440):

1 309 631.00 * 440 * 1 /130 х 6.75% = 299 200,31 руб.

- по адресу: 

<

...> (ХВС, ГВС, ВО) за период с 12.12.2020 по 13.05.2021 (кол-во дней просрочки – 153):

2 498 055.00 x 153 x 1/130 x 6.75% = 198 451,25 руб.

Общий размер неустойки по 2 этапу (СМР) составляет 667 253,08 рублей.

Таким образом, общий размер неустойки составляет:

46 408, 17 руб. + 667 253, 08 руб. = 713 661,25 руб.

Указанный расчет судом проверен, признан арифметически и методологически верным, ошибок в расчете судом не выявлено.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Поскольку материалами дела факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору подтвержден, требование истца о взыскании с ответчика неустойки в размере 713 661,25 руб. является законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме.

В пункте 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» указано, что по смыслу норм статьи 110 АПК РФ вопрос о распределении судебных расходов по уплате государственной пошлины разрешается арбитражным судом по итогам рассмотрения дела, независимо от того, заявлено ли перед судом ходатайство о его разрешении.

Таким образом, с ответчика в пользу истца в возмещение расходов по уплате государственной пошлины подлежат взысканию 17 273 рублей. 

На основании изложенного, арбитражный суд, руководствуясь статьей 57 Конституции Российской Федерации, статьями 29, 110, 123, 167-171, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,   

 

                                                   Р Е Ш И Л:  

 

Взыскать с ООО «Элемент Юг Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу НКО «Фонд капитального ремонта МКД» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) неустойки в размере 713 661,25 руб. (перечисление на р/с 

<

***>, АО «Россельхозбанк», БИК 040349536, /с 30101810700000000536), расходы по оплате государственной пошлины в размере 17273 руб. (п/п от 10.11.2021 № 6279).

Решение суда по настоящему делу подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Лица, участвующие в деле, вправе подать ходатайство о составлении мотивированного решения в течение пяти дней со дня размещения резолютивной части решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.

 

Судья                                                                                                     И.Н. Бондаренко