АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-12072/2023

г. Владивосток

21 сентября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена  14 сентября 2023 года. 

Полный текст решения изготовлен  21 сентября 2023 года.

            Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Зайцевой Л.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  общества с ограниченной ответственностью «Портал - Прим ДВ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «ИнвестСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 1 153 908 рублей 18 копеек

при участии

от истца - ФИО1, удостоверение, доверенность от 01.08.2023 сроком на год;

от ответчика -  ФИО2, паспорт, доверенность от 01.09.2023 сроком на год, диплом,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Портал - Прим ДВ» (далее – истец, ООО «Портал - Прим ДВ») обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд Приморского края к обществу с ограниченной ответственностью «ИнвестСтрой» (далее – ответчик, ООО «ИнвестСтрой») о взыскании 1 153 908 рублей 18 копеек задолженности.

Исковые требования мотивированы не исполнением ответчиком обязанности по оплате выполненных работ. 

Ответчик  письменный отзыв не готовил, в судебном заседании устно заявил о недостатках выполненных истцом работ. 

Оценив доводы сторон и представленные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил следующее.

Между ООО «Портал-Прим ДВ» (Подрядчик) и ООО «ИнвестСтрой» (Заказчик)  заключены следующие договоры - договор подряда №9 от 25.03.2021, договор подряда №10 от 25.03.2021, договор подряда №12 от 09.04.2021.

В соответствии с пунктом 1.1 договора № 9 от 25.03.2021 Подрядчик обязан поставить запчасти, выполнить восстановление работоспособности, полное техническое освидетельствование двух эскалаторов на объекте - жилой дом, расположенный по адресу: 

<

...>, а Ответчик в свою очередь обязан принять и оплатить выполненные работы. Объем и стоимость работ оговорены сторонами в локальном ресурсном сметном расчете.

В соответствии с пунктом 3.1. Договора срок поставки запчастей составляет 70 календарных дней с момента поступления авансового платежа, срок выполнения работ составляет 70 календарных дней с момента передачи эскалаторов в монтаж.

В соответствии с пунктом 2.1. Договора стоимость договора составляет 574 469 рублей, из которых 42 178 рублей составляет стоимость запчастей, 532 291 рубль составляет стоимость работ.

Оплата осуществляется Заказчиком в три этапа:

- 100% от стоимости запчастей в размере 42 178 рублей оплачивается в течение 5 банковских дней после подписания договора,

- 30% от стоимости работ в размере 159 687 рублей 30 копеек оплачивается в течение 5 банковских дней после подписания договора,

- 70% от стоимости работ в размере 372 603 рубля 70 копеек оплачивается в течение 10 банковских дней по каждому эскалатору на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат.

13.10.2021 подписаны акт о приемке выполненных работ №1 от 13.10.2021 на сумму 574 469 рублей, акт № 23 от 13.10.2021 на сумму 574 469 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 13.10.2021 на сумму 574 469 рублей, по которым Подрядчик работы по договору выполнил в полном объеме и надлежащего качества, а Заказчик принял работы без замечаний.

Ответчик произвел оплату в размере 651 865 рублей 30 копеек. Таким образом, переплата ответчика по договору № 9 от 25.03.2021 составила 77 396 рублей 30 копеек.

В соответствии с пунктом 1.1 договора № 10 от 25.03.2021 Подрядчик обязан поставить запчасти, выполнить восстановительные и пусконаладочные работы, полное техническое освидетельствование пассажирского лифта KONE Elevators Co., Ltd на объекте - жилой дом, расположенный по адресу: 

<

...>, а Заказчик в свою очередь обязан принять и оплатить выполненные работы. Объем и стоимость работ оговорены сторонами в локальном ресурсном сметном расчете.

В соответствии с пунктом 3.1. Договора срок поставки запчастей составляет 70 календарных дней с момента поступления авансового платежа, срок выполнения работ составляет 50 календарных дней с момента поступления товара.

В соответствии с пунктом 2.1. Договора стоимость договора составляет 487 529 рублей 60 копеек, из которых 2 715 долларов США, что соответствует 201 359 рублей 60 копеек, составляет стоимость запчастей, 286 170 рублей составляет стоимость работ.

Оплата осуществляется Заказчиком в три этапа:        

- 100% от стоимости запчастей в размере 2 715 долларов США, что соответствует 201 359 рублей 60 копеек, оплачивается в течение 5 банковских дней после подписания договора,

- 30% от стоимости работ в размере 85 851 рубль оплачивается в течение 5 банковских дней после подписания договора,

- 70% от стоимости работ в размере 200 319 рублей оплачивается в течение 10 банковских дней на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат.

22.07.2022 подписан акт № 30 от 22.07.2022, акт о приемке выполненных работ №1 от 22.07.2022, справка о стоимости выполненных работ и затрат  №1 от 22.07.2022 на сумму 286 170 рублей, по которым Подрядчик работы по договору выполнил в полном объеме и надлежащего качества, а Заказчик принял работы без замечаний. Также факт выполнения работ надлежащего качества по данному договору подтверждается актом ООО «ДальЭкспертЦентр» полного технического освидетельствования лифта от 23.08.2022, составленного в присутствии представителя ООО «Портал-Прим ДВ» (Подрядчика), из которого следует, что лифт функционирует в соответствии с требованиями, регламентированными руководством по эксплуатации.

Истцом выставлены счета № 5 от 09.02.2022 на сумму 56 331 рубль 19 копеек, №6 от 09.02.2022 на сумму 100 254 рублей 60 копеек, №30 от 22.07.2022 на 286 170 рублей, итого на общую сумму в размере 487 529 рублей 60 копеек за запчасти и восстановительные и пусконаладочные работы. Между тем Заказчик произвел оплату в размере 337 080 рублей. Задолженность по договору № 10 от 25.03.2021 составила 150 449 рублей 60 копеек.

В соответствии пунктом 1.1 договора № 12 от 09.04.2021 Подрядчик  обязан поставить запчасти, выполнить восстановительные и пусконаладочные работы, полное техническое освидетельствование четырех пассажирских лифтов с заводскими номерами 15PT01ZY07, 15PT01ZY04, 15PT01ZY01, 15PT01ZY08, на объекте - жилой дом, расположенный по адресу: 

<

...>, а Ответчик в свою очередь обязан принять и оплатить выполненные работы. Объем и стоимость работ оговорены сторонами в локальном ресурсном сметном расчете.

В соответствии с пунктом 3.1. Договора срок поставки запчастей составляет 80 календарных дней с момента поступления авансового платежа, срок выполнения работ составляет 100 календарных дней с момента поступления товара.

В соответствии с пунктом 2.1. Договора стоимость договора составляет 3 521 516 рублей 58 копеек, из которых 25 069 долларов США, что соответствует 1 833 516 рублей 58 копеек, составляет стоимость запчастей, 1 688 000 рублей составляет стоимость работ.

Оплата осуществляется Заказчиком в три этапа:

- 100% от стоимости запчастей в размере 25 069 долларов США, что соответствует 1 833 516 рублей 58 копеек, оплачивается в течение 5 банковских дней после подписания договора,

- 30% от стоимости работ в размере 506 400 рубль оплачивается в течение 5 банковских дней после подписания договора, 

- 70% от стоимости работ в размере 1 181 160 рублей оплачивается в течение 10 банковских дней на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат.

18.01.2022 подписано дополнительное соглашение к договору № 12 о выполнении дополнительных работ на сумму в размере 308 349 рублей, согласно локальному сметному расчету.

Согласно пункта 4 Соглашения оплата осуществляется Ответчиком в два этапа:

- 30% от стоимости работ в размере 92 504 рубля 70 копеек оплачивается в течение 5 банковских дней после подписания дополнительного соглашения,

- 70% от стоимости работ в размере 215 844 рубля 30 копеек оплачивается в течение 10 банковских дней на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат.

По результатам выполнения работ подписан акт о приемке выполненных работ №1 от 28.11.2022, справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 28.11.2022 на сумму 1 688 000 рублей, акт о приемке выполненных работ №2 от 28.11.2022, справка о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 28.11.2022 на сумму 308 349 рублей

Кроме того, по каждому из четырех лифтов был подписан отдельный акт, акт №1 о приемке выполненных работ от 04.10.2022, акт № 2 о приемке выполненных работ от 06.10.2022, акт № 3 о приемке выполненных работ от 28.11.2022, акт № 4 о приемке выполненных работ от 28.11.2022, по которым Подрядчик работы по договору выполнил в полном объеме и надлежащего качества, а Заказчик принял работы без замечаний.

По каждому лифту пройдено полное техническое освидетельствование специализированной организацией ООО «ДальЭкспертЦентр» с выдачей акта полного технического освидетельствования лифта, из которого следует, что лифт функционирует в соответствии с требованиями, регламентированными руководством по эксплуатации, что подтверждается актами полного технического освидетельствования лифта № 15РТ01ZY07 от 30.09.202, № 15PT01ZY01 от 30.09.2022, № 15PT01ZY08 от 17.11.2022, № 15PT01ZY04 от 17.11.2022.

Истцом по указанным договорам были выставлены счета на общую сумму в размере 3 829 865 рублей 58 копеек за запчасти и основные и дополнительные восстановительные и пусконаладочные работы.

Ответчик произвел оплату в размере 2 749 010 рублей 70 копеек. Задолженность ответчика по договору № 12 от 09.04.2021 составила 1 080 854 рубля 88 копеек.

Истец свои обязательства по договорам выполнил в предусмотренные и согласованные сроки и объемы.

Оплата ответчиком произведена не в полном объеме.

С учетом сверки взаиморасчетов у ответчика образовалась задолженность в размере 1 153 908 рублей 18 копеек, что подтверждается подписанным актом сверки за период с 01.01.2022 по 19.12.2022.

Заказчику вручена претензия № 28 от 11.05.2023 (получена 29.06.2023 согласно входящей отметке № 156). 

Так как Заказчик в добровольном порядке не исполнил обязанность по оплате, Подрядчик был вынужден обратиться в арбитражный суд с нестоящим иском.

Исследовав и оценив в соответствии со статьями 65, 71 АПК РФ представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в силу следующего.

Между сторонами сложились правоотношения по договору на выполнение подрядных работ, которые подлежат регулированию нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (подряд) (далее – ГК РФ).

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В силу с пункта 1  статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами (пункт 1 статьи 704 ГК РФ).

Как указано в статье 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»). 

Согласно статьям 309, 310 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона и иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Материалами дела подтверждаются факты выполнения работ по договорам подряда №9 от 25.03.2021. №10 от 25.03.2021, №12 от 09.04.2021. В связи с чем у ответчика возникла обязанность оплатить выполненные работы.

Однако Заказчик оплатил работы частично, образовалась задолженность в размере 1 158 908 рублей 18 копеек, наличие которой подтверждено, в том числе подписанным ответчиком актом сверки взаимных расчетов. 

Доказательства оплаты в полном объеме выполненных работ ответчиком не представлены в нарушение статьи 65 АПК РФ. 

Представленный ответчиком акт осмотра работоспособности лифтов от 02.08.2023, в котором отражены неисправности лифтового оборудования по состоянию на 02.08.2023, то есть спустя практически год после сдачи-приемки выполненных работ согласно вышеуказанным  актам по форме КС-2 и КС-3, не является  основанием для неоплаты работ. 

Доказательств того, что заявленные ответчиком  недостатки являются существенными не представлено,  на назначении судебной экспертизы не заявлено.

В силу части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий. 

Таким образом, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных требований истца о взыскании основного долга в размере 1 153 908 рублей 18 копеек.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ, по результатам рассмотрения спора, понесенные истцом судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика.

            Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИнвестСтрой» (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Портал - Прим ДВ» (ИНН 

<

***>) 1 153 908 рублей 18 копеек задолженности, 24 539 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины.

            Исполнительный лист выдается после вступления решения суда в законную силу по заявлению взыскателя.

            Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и  в Арбитражный суд Дальневосточного округа  в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

 

            Судья                                                                                      Зайцева Л.В.