АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

15 марта 2022 года

Дело № А33-32539/2021

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 09 марта 2022 года.

В полном объёме решение изготовлено 15 марта 2022 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Винокуровой М.Ю., рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ФОРМУЛА-К" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к публичному акционерному обществу "РОССЕТИ СИБИРЬ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

об обязании осуществить действие,

в предварительном судебном заседании присутствуют:

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 10.01.2022 № 01, представлен диплом, личность удостоверена паспортом; 

от ответчика: ФИО2, представитель по доверенности от 29.04.2021 № 00/40, представлен диплом, личность удостоверена паспортом,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО3, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью "ФОРМУЛА-К" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к публичному акционерному обществу "РОССЕТИ СИБИРЬ" (далее – ответчик) об обязании в течение одного месяца со дня вступления в законную силу судебного акта исполнить обязательства по договору № 20.2400.11156.18 от 18.03.2019 осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя электроустановки гаража для сельхозтехники, расположенного по адресу: Красноярский край, Емельяновыми район, муниципальное образование Солонцовский сельсовет, площадка Западная, участок 2«Б», кадастровый номер земельного участка 24:11:0290109:934, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, со следующими характеристиками:

- максимальная мощность присоединяющих энергопринимающих устройств 150 кВт,

- категория надежности третья,

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение 10 кВ, 

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 22.12.2021 возбуждено производство по делу, предварительное и судебное заседания назначены на 09.03.2022.

10.08.2020 в материалы дела от ответчика поступил отзыв на исковое заявление от 09.09.2020 с приложенными документами.

Представитель истца поддержал исковые требования, дал пояснения.

Представитель ответчика возражает против удовлетворения иска, дал пояснения. 

На основании статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 №65 «О подготовке дела к судебному разбирательству», при отсутствии возражений лиц, участвующих в деле, суд определил завершить предварительное судебное заседание, окончить подготовку дела к судебному разбирательству, открыть судебное заседание арбитражного суда первой инстанции. 

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между истцом (заявителем) и ответчиком (сетевая организация) заключен договор        № 20.2400.11156.18 от 18.03.2019 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно пункту 1 которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) гаража для сельхозтехники, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: 

- максимальная мощность присоединяющих энергопринимающих устройств 150 кВт,

- категория надежности треть; 

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение 10 кВ; 

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения гаража для сельхозтехники, расположенного (который будет располагаться) по адресу; Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, муниципальное образование Солонцовский сельсовет, площадка Западная, участок №2 «Б», кадастровый номер земельного участка 24:11:0290109:934.

В соответствии с пунктами 4, 5 договора, технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 5 лет со дня заключения настоящего договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения настоящего договора. 

В соответствии с абзацам 4 пункта 6 договора сетевая организация обязуется: не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии Заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его Заявителю. 

В силу пункта 10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 27.12.2017г №645-п с изменениями, внесенными Приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 30.01.2018 г №5-п и составляет 51 223,50 руб. (Пятьдесят одна тысяча двести двадцать три рубля 50 копеек), кроме того НДС по ставке 18% - 9 220,23 руб. (Девять тысяч двести двадцать рублей 23 копейки). 

Всего с НДС цена Договора составляет 6 0443,73 -руб. (Шестьдесят тысяч четыреста сорок три рубля 73 копейки). Размер платы подлежит изменению при изменении ставки НДС без заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

В соответствии с пунктом 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.2.1, 10.2.2 технических условий сетевая организация осуществляет: подготовку технических условий на технологическое присоединение; проверка выполнения технический условий со стороны заявителем; фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств заявителя; проектировку и строительство ТП 10,04 кВ (тип и мощность трансформатора определить проектом); от ВЛ 10 кВ ф.121-35 (ф.121-18) до границе земельного участка заявителя запроектировать и построитель ЛЭП 10 кВ. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом; определить проектом необходимость установки подкоса на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.121-35 (ф.121-18). 

В соответствии с пунктами 11.а, 11.б, 11.в технических условий заявитель осуществляет: запроектировать и построить ТП 10/0,4 кВ Тап и мощность трансформаторов определить проектом; от проектируемой ЛЭП 10 кВ (п.10.2.1) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ (п.11.а) запроектировать и построить ЛЭП 10 кВ. Способ прокладки, марку и сечение ЛЭП определить проектом; от проектируемой ТП 10/0,4 кВ (п.11.а.) до РУ 0,4 Кв объекта заявителя запроектировать и построить ЛЭП 0,4 кВ. Способ прокладки, марку и сечение провод определить проектом. 

Срок действия настоящих технических условий составляет 5 лет со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (пункт 12 технических условий). 

Истец перечислил ответчику денежные средствам в счет оплат за осуществление технологического присоединения по договору № 20.2400.11156.18 от 18.03.2019 платежным поручением от 18.06.2019 № 611912 на сумму 9 220,23 руб. и платежным поручением от 20.09.2019 № 30569 на сумму 18 440,46 руб. 

Также истцом платежным поручением № 955661 от 04.08.2020 оплачено ответчику 4490 руб. за согласование проектов на энергообъекты для заявителей с максимальной мощностью более 150 кВт. 

Дополнительным соглашением № 1 от 26.02.2022 г. к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.11156.18 от 18.03.2019 г., пунктом 1 пункт 5 Договора изложить в следующей редакции: - Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению при условии, что заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, устанавливается до 01.09.2020.

Дополнительным соглашением № 2 от 30.12.2020 г. к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.11156.18 от 18.03.2019 г., пунктом 1 изложить пункт 5 договора в следующей редакции: «5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению при условии, что заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, устанавливается до 31.08.2021». 

Пунктом 2 Дополнительного соглашения, изложить пункт 6 Приложения № 1 к Договору в следующей редакции: «6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2021 г.». 

Актом допуска приборов учета в эксплуатацию от 06.09.2021 г. № 0/4-1137 на спорном объекте «гараж для сельхозтехники» не допущен в эксплуатацию прибор учета № 44887945. Акт подписан сторонами без замечаний. 

Истец в адрес ответчика направил уведомление от 02.11.2021 о выполнении в полном объеме со стороны истца мероприятий по технологическому присоединению по договору    № 20.2400.11156.18 от 18.03.2019 г., которое получено ответчиком 30.11.2021, согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 66302058705736. 

Письмом от 24.11.2021 № 1.3/19/20373-исх ответчик в ответ на обращение истца от 02.11.2021 по заявкам заявителей с максимальной мощностью, которая не превышает 150 кВт, понесенные расходы согласно действующему законодательству (п. 87 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178) должны компенсироваться сетевой организации за счет тарифа на передачу электрической энергии, как выпадающие доходы сетевой организации. При этом министерством тарифной политики Красноярского края выпадающие доходы на технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт в целях сдерживания роста тарифа на электрическую энергию для населения, не включаются в тариф на передачу и компенсируется лишь частично. В настоящее время Обществу в полном объеме не компенсированы затраты за 2019 год. При включении министерством тарифной политики Красноярского края плановых выпадающих доходов в тариф на передачу электрической энергии на 2022 год, мероприятия будут выполнены в данном периоде.

Как указывает истец в исковом заявление, до настоящего времени ответчик своих обязательств не исполнил, никакие действия по выполнению договорных условий сетевой организацией не предпринимаются. 

Учитывая изложенное, истец обратился с настоящим иском. 

Ответчик в отзыве на исковое заявление пояснил, что осуществляет все необходимые и возможные действия по исполнению договора и не имеет цели как-либо нарушить права и законные интересы истца. Задержка исполнения мероприятий по технологическому присоединению согласно Договору, вызвана недостатками финансирования, а также высокой фактической стоимостью выполнения мероприятий по Договору. Прибор учета заявителя признан пригодным для осуществления расчетов за потребленную электроэнергию и оказанные услуги по передаче электроэнергии только 06.09.2021 актом № 0/4-1137. Таким образом, исполнение Договора ответчиком было невозможно до исполнения технических условий истцом. В соответствии с бухгалтерской отчетностью у филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» за периоды 2018 - 2019 гг. отмечается положительный финансовый результат: 2018 = 850 857 тыс. руб., 2019 = 328 501 тыс. руб., в том числе по передаче э/энергии 2018 = 471 065 тыс. руб., 2019 = 199 996 тыс. руб. Полученная прибыль направлена на финансирование инвестиционной программы филиала. Однако, несмотря на наличие чистой прибыли из-за нехватки собственных средств для исполнения всех обязательств по договорам технологического присоединения, мероприятий по обеспечению надёжного энергоснабжения потребителей ПАО «Россети Сибирь», в целях реализации мероприятий по выполнению договоров ТП, дополнительно привлекаются заемные средства на реализацию инвестиционной программы (Далее - ИПР).

В период 2018-2019 гг. на ИПР кредитных средств привлечено:

- за 2018 г. 3 065 201 тыс. руб.;

- за 2019 г. 2 104 531 тыс. руб.

Заемные средства привлекались на выполнение следующих видов работ:

1)доп. работы в рамках подготовки к XXIX Всемирной зимней Универсиаде вг. Красноярске:

- за 2018 г. 2 022 109 тыс. руб.;

-за 2019 г. 110 469 тыс. руб.

2)на технологическое присоединение льготных категорий заявителей попричине не включения регулятором данных расходов в тариф:

- за 2018 г. 1 043 092 тыс. руб.;

- за 2019 г. 1 666 942 тыс. руб.

Суммы привлеченных кредитных средств подтверждаются «Отчетом по исполнению ИПР», размещенной в публичном доступе сети «Интернет» на сайте Общества.

Необходимо отметить, что привлечённые кредиты регулятором в полной мере не возмещены из-за ограничения темпов роста тарифов на услуги по передаче электрической энергии, плановые средства на подключение льготных заявителей при регулировании не учитываются.

Таким образом, наличие положительного финансового результата при фактическом росте кредитного портфеля не является обстоятельством, которое свидетельствует о доходности деятельности филиала за 2018-2019 гг.

При направлении регулятору тарифной заявки на очередной период регулирования филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» (далее - филиал) ежегодно включались в состав неподконтрольных расходов плановые выпадающие доходы на подключение льготной категории заявителей (далее - ВД от ЛТП): на 2018 год - 707 855 тыс. руб., на 2019 год -780 412 тыс. руб., на 2020 год -1 310 658 тыс. руб., на 2021 год - 2 731 597 тыс. руб.

Министерством тарифной политики (далее - МТП) плановые ВД от ЛТП при утверждении НВВ филиалу не учитываются. Для исполнения своих обязательств и подключения заявителей Филиал вынужден привлекать кредиты. Фактически привлечённые заёмные средства, направленные на финансирование инвестиционной программы с целью подключения льготной категорий заявителей, составили: за 2018г. - 1 043 093 тыс. руб., за 2019 год - 1 666 942 тыс. руб.

Однако, несмотря на то что, в составе тарифных заявок на соответствующий период регулирования в качестве выпадающих доходов филиалом были заявлены фактически привлечённые заемные средства на ЛТП, за период 2018-2019 г. в размере 2 710 035 тыс. руб. из них на текущий момент компенсировано в НВВ только 596 640 тыс. руб. (22%). Данный факт подтверждается выпиской из экспертного заключения направленной письмом МТП от 31.08.2020 №72/2151. В письме указана полная сумма компенсации 1 263 000 тыс. руб., с учетом кредитных средств привлеченных на строительство объектов Универсиады 2019 в размере 666 360 тыс. руб.

В нарушение законодательства регулятор не включают в НВВ филиала плановые ВД от ЛТП и не в полном объеме компенсируются фактически привлеченные заемные средства.

Потребность филиала в средствах на ЛТП на 2021 год составляет 4 844 992 тыс. руб. (плановые расходы на ЛТП 2 731 597 тыс. руб., не компенсированные фактические заемные средства 2 113 395 тыс. руб.).

В соответствии с проектом скорректированной инвестиционной программой филиалом увеличена кредитная нагрузка по ЛТП в 2020 году ещё на 661 190 тыс. руб., а в 2021 году был отказ от привлечения заемных средств в связи с невозможностью дальнейшего наращивания кредитного портфеля. Обязательства перед льготной категорией заявителей филиал в 2021 году вынуждены выполнять за счет амортизации, что может в последующем повлечь за собой снижение надежности энергоснабжения потребителей.

Кроме того, информация о количестве и общей сумме наложенных в 2017, 2018, 2019 годах антимонопольным органом на ПАО «Россети Сибирь» административных штрафов, свидетельствует о наличии значительной финансовой нагрузки на юридическое лицо, которая влечет отток денежных средств организации от финансирования мероприятия по осуществлению технологического присоединения по договорам, а так же от финансирования иных действий Общества, направленных на реализацию уставных целей и задача, приводит к избыточному государственному принуждению.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации определен такой способ защиты права как присуждение к исполнению обязанности в натуре. 

В силу статьи 9 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Неисполнение ответчиком обязательств, предусмотренных договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Спорные отношения сторон основаны на договоре, которые регулируются нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, нормами Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроснабжении».

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ    «Об электроснабжении» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила № 861).

Согласно пункту 3 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В силу пункта 4 Правил № 861 любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с Правилами № 861.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим лицом (пункт 6 Правил № 861).

Стороны подписали договор № 20.2400.11156.18 от 18.03.2019 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств гаража для сельхозтехники, расположенного по адресу: Красноярский край, Емельяновыми район, муниципальное образование Солонцовский сельсовет, площадка Западная, участок 2«Б», кадастровый номер земельного участка 24:11:0290109:934. 

Пунктом 4 договора предусмотрено, что срок действия технический условий составляет 5 лет со дня заключения настоящего договора. Таким образом, технические условия являются действующими. 

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению согласован сторонами в пункте 5 договора с учетом дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2020 к договору до 31.08.2021. 

На момент рассмотрения спора, в том числе по состоянию на 09.03.2022 технологическое присоединение ответчиком фактически не произведено, при этом истцом свои обязательства по договору исполнены. Доказательств обратного в дело не представлено. 

Пунктом 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

При этом арбитражный суд учитывает, что ответчик является специализированной организацией, длительное время оказывающей услуги по технологическому присоединению, по передаче электроэнергии, оперативно-техническому управлению. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц указанная организация создана 04.07.2005. 

Согласно уставу ПАО «Россети Сибирь» основными видами его деятельности  являются осуществление эффективного и надёжного функционирования объектов электросетевого комплекса, обеспечение устойчивого развития распределительного электросетевого комплекса, обеспечение надёжного и качественного энергоснабжения потребителей.

Ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих о невозможности совершения всех действий, необходимых для осуществления технологического подключения объектов ответчика. Ответчик с требованием о расторжении договора не обращался. 

С учётом изложенного исковые требования истца являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Частью 1 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Истец просит обязать ответчика осуществить вышеуказанные действия в течение одного месяца с момента вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу. 

Довод ответчика об установлении срока исполнения обязательств по технологическому присоединению в соответствии с условиями договора в течение 6 месяцев в момента вступления решения в законную силу, подлежит отклонению, поскольку данное требование не обусловлено нормами закона, выходит за пределы исковых требований, заявленных истцом. 

Учитывая длительность неисполнения обязательств по договору, неблагоприятные последствия для истца, а также особый статус сетевой организации, арбитражный суд считает указанный истцом срок исполнения мероприятий обоснованным.

При этом арбитражный суд учитывает, что частью 1 статьи 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрена возможность отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта. При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, и предоставлении подтверждающих доказательств сетевая организация вправе обратиться в арбитражный суд с указанным заявлением.

Учитывая изложенное, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально размеру удовлетворённых требований.

В силу подпункта 4 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче иных исковых заявлений неимущественного характера, в том числе заявления о признании права, заявления о присуждении к исполнению обязанности в натуре, установлена государственная пошлина в размере 6 000 рублей. 

При подаче иска истцом уплачена государственная пошлина по платежному поручению от 06.12.2021 № 2071 в сумме 6 000 руб. 

Учитывая результат рассмотрения дела, понесенные истцом расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 000 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать публичное акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение одного месяца со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу исполнить обязательства по договору № 20.2400.11156.18 от 18.03.2019, осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя электроустановки гаража для сельхозтехники, расположенного по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, муниципальное образование Солонцовский сельсовет, площадка Западная, участок 2«Б», кадастровый номер земельного участка 24:11:0290109:934, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, со следующими характеристиками: 

- максимальная мощность присоединяющих энергопринимающих устройств 150 кВт, 

- категория надежности третья, 

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение 10 кВ, 

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует; 

Взыскать с публичного акционерного общества "РОССЕТИ СИБИРЬ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ФОРМУЛА К" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

М.Ю. Винокурова