Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-12436/2020

04 марта 2021 года

г.Санкт-Петербург

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,    

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ГРСП "МАГНИТ" (190005, 

<

...>, литер Б, офис 454, ОГРН: 

<

***>) 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "СПБ-СМК" (188640, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>) 

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ" (ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании 

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 31.12.2020; 

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 20.04.2020; 

- от третьего лица: не явился (извещен); 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ГРСП "МАГНИТ" (далее – ООО "ГРСП "МАГНИТ") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "СПБ-СМК" (далее – ООО "СПБ-СМК") об обязании передать следующую исполнительную документацию: акты освидетельствования скрытых работ; исполнительные схемы; заверенные копии сертификатов/паспортов на используемые материалы (документы, подтверждающие качество материалов) по договорам от 13.03.2018 № 642 (далее – Договор № 642), от 30.03.2018 № 651 (далее – Договор № 651), , от 30.03.2018 № 652 (далее – Договор № 652), от 09.04.2018 № 657 (далее - Договор № 657), от 09.04.2018 № 663 (далее – Договор № 663), о взыскании 332460,52 руб. неосновательного обогащения по договору 657, 2000000 руб. неосновательного обогащения по договору 663, 210000 руб. штрафа за непредставление исполнительной документации по договору от 651, 210000 руб. штрафа по договору 652, 30000 руб. штрафа по договору 657, 30000 руб. штрафа по договору 663, 30000 руб. штрафа по договору 642, неустойки на случай неисполнения судебного акта в размере 10000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда, начиная с шестого дня после вступления решения в законную силу, спустя 30-ти календарных дней – неустойки в размере 15000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда.

ООО "ГРСП "МАГНИТ" уточнило в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) и просило взыскать 11474178,78 руб. неосновательного обогащения по Договору № 663. Суд принял уточнение иска.

Определением от 18.09.2020 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ". 

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между ООО  "ГРСП "МАГНИТ" (генподрядчиком) и ООО "СПБ-СМК" (подрядчиком) заключен Договор № 663, по условиям которого подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию генподрядчика своими и привлеченными силами собственных или из материалов генподрядчика комплекс работ по устройству систем вентиляции П1/В1-П48/В48, ПД1/ВД25, У1-У37, предусмотренный рабочей документацией (далее – работы) на объекте «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр художественной гимнастики», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Нагорный тупик, а также любые иные работы, необходимые для выполнения основных работ, а генподрядчик обязуется принять результат работ и оплатить его на предусмотренных Договором условиях.

В п.п. 3.1. Договора № 663 установлена ориентировочная цена работ по Договорам, которая составляет 212088424 руб.

Окончательная договорная цена работ по Договорам определяется из фактически выполненного объема работ в соответствии с актами по форме КС-2 и справками по форме КС-3, согласованными сторонами.

По п.п. 4.1. Договора № 663 генподрядчик перечисляет на расчетный счет подрядчика на основании выставленного им счета авансовый платеж в течение 20 банковских дней с даты заключения договора в размере 60% от договорной цены, что составляет 127253054,72 руб. 

Оплата за выполненные работы осуществляется генподрядчиком ежемесячно в течение 60 банковских дней после подписания указанных в пункте 4.3 договора документов, но не ранее чем по истечении 10 банковских дней календарных дней с момента наиболее позднего из событий: приемки соответствующих работ заказчиком у генподрядчика путем подписания документов за отчетный период; получения генподрядчиком денежных средств от заказчика за соответствующее выполнение.

По Договору № 663 из сумм ежемесячного платежа генподрядчик удерживает 5% от суммы платежа в счет удержания, указанного в п.п. 4.1.1. Договора. 

Согласно п.п. 4.1.1. Договора № 663 для обеспечения качества работ и надлежащего исполнения обязательств подрядчика по устранению дефектов генподрядчик удерживание 5 % от сумм, указанных в ежемесячных отчетах по ф. КС-2 и КС-3. все удержанные в таком порядке суммы выплачиваются подрядчику единовременно в течение 30 банковских дней со дня окончания гарантийного срока, составляющего 36 месяцев с даты завершения строительства объекта и подписания в установленном порядке акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).

В силу п.п. 4.3.3. Договора № 663 подрядчик не позднее 16-го числа текущего месяца предоставляет за отчетный период (полный предыдущий месяц) генподрядчику оригиналы в бумажном виде документов (со всеми необходимыми визами) согласно перечню.

ООО "ГРСП "МАГНИТ" перечислило подрядчику 127253054,72 руб. аванса по договору № 663 платежным поручением от 11.04.2018 № 722.

Генподрядчик направил подрядчику уведомление от 15.05.2019 № 621 об одностороннем отказе от исполнения Договора № 663 с требованием возврата неотработанного аванса.

Отказ ООО "СПБ-СМК" удовлетворить названное требование послужил основанием для обращения ООО "ГРСП "МАГНИТ" в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Пунктом 1 статьи 702 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (статья 711 ГК РФ). 

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АКП РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.

Факт перечисления 127253054,72 руб. аванса по Договору № 663 подтверждается платежным поручением от 11.04.2018 № 722. 

В материалы дела представлено двустороннее соглашение о зачете встречных однородных требований от 08.12.2020, в результате которого ООО "СПБ-СМК" подтвердило задолженность перед ООО "ГРСП "МАГНИТ" по возврату 11474178,78 руб. неотработанного аванса по договору № 663. 

Доказательств выполнения работ на спорную сумму и возврата перечисленного аванса ответчик в материалы дела не представил. 

Требование о взыскании 11474178,78 руб. неосновательного обогащения по Договору № 663 подлежит удовлетворению в полном объеме.

При подаче иска ООО "ГРСП "МАГНИТ" оплатило 67212 руб. государственной пошлины.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СПБ-СМК" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ГРСП "МАГНИТ" 11474178,78 руб. неосновательного обогащения по договору от 09.04.2018 № 663 и 67212 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СПБ-СМК" 13159 руб. в доход федерального бюджета 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Косенко Т.А.