﻿20/2021-80554(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А06-4683/2021

г. Астрахань

16 ноября 2021 года

Арбитражный суд Астраханской области в составе: судьи: Баскаковой И.Ю.  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Тулебаевой Б.К.  

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-170, 174, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Муниципальному унитарному предприятию г. Астрахани «Астрводоканал» устранить  препятствия в пользовании индивидуальным предпринимателем Агабалаевым Тельманом  Агабалаевичем земельным участком с кадастровым номером 30:12:030370:6 по адресу:  г.Астрахань, ул.Рождественского, 15а, произвести реконструкцию магистрального  водопровода путем прокладки новых труб, протяженностью 220 метров, диаметром 225 мм,  проходящих через указанный земельный участок, в срок 4 месяца со дня вступления  решения суда в законную силу.  

В случае неисполнения настоящего решения в части нарушения срока прокладки  новых труб взыскать с МУП г.Астрахани «Астрводоканал» в пользу ИП Агабалаева  Тельмана Агабалаевича судебную неустойку в размере 2000 (две тысячи) рублей за каждый  день с момента истечения срока, установленного для добровольного исполнения решения  суда, по день фактического его исполнения.  

Муниципальному унитарному предприятию г. Астрахани «Астрводоканал» в срок не  позднее 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу восстановить  асфальтовое покрытие в месте прокладки трубопровода протяженностью 220 м, шириной 3  метра, общей площадью 660 кв.м. на земельном участке с кадастровым номером  30:12:030370:6 по адресу: г.Астрахань, ул.Рождественского, 15а, расположенное за складом-платформой с кадастровым номером 30:12:030370:124, литер Д этажность 1.  

В случае неисполнения настоящего решения в части нарушения срока восстановления  асфальтового покрытия взыскать с МУП г.Астрахани «Астрводоканал» в пользу ИП  Агабалаева Тельмана Агабалаевича судебную неустойку в размере 2000 (две тысячи) рублей  за каждый день с момента истечения срока, установленного для добровольного исполнения  решения суда, по день фактического его исполнения.  

Взыскать с Муниципального унитарного предприятия г. Астрахани «Астрводоканал»  в пользу индивидуального предпринимателя Агабалаева Тельмана Агабалаевича судебные  издержки: 38000 руб. на оплату технической экспертизы, 50 000 рублей на оплату услуг  представителя и 12 000 рублей в возмещение расходов по оплате госпошлины.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного  суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через  Арбитражный суд Астраханской области.  

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте  Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»  

Судья И.Ю. Баскакова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 04.10.2021 10:20:44

 Кому выдана Баскакова Инна Юрьевна