АРБИТРАЖНЫЙ   СУД   РЕСПУБЛИКИ   ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)

29 сентября 2025 года

Дело № А74-7772/2025

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Н.Н. Моисеевой рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***> ОГРНИП 

<

***>)

к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>)

об обязании в течении 1 месяца со дня вступления решения в законную силу исполнить условия договора от 21.10.2024 № 20.1900.6651.24 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: 

<

...> земельный участок 25Л, в соответствии с мероприятиями, отраженными в технических условиях № 8000634663 и предоставить уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации

о взыскании 7463 руб. 56 коп. неустойки за период с 22.04.2025 по 15.07.2025, с последующим начислением неустойки до момента фактического исполнения обязательства, учитывая, что совокупный размер неустойки не может превышать размер неустойки, определенный в таком порядке за год просрочки; 

о взыскании 10 000 руб. судебного штрафа (астрент) в размере, за каждый календарный день неисполнения решения суда, начисляемый по истечении срока, предоставленного для исполнения решения суда, по день его фактического исполнения

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 228, 229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. В удовлетворении ходатайства публичного акционерного общества «Россети Сибирь» о рассмотрении дела по общим правилам искового производства отказать.

2. В удовлетворении ходатайства публичного акционерного общества «Россети Сибирь» о снижении неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации отказать.

3. Удовлетворить исковые требования.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» в течение 1 (одного) месяца со дня вступления решения в законную силу исполнить условия договора от 21.10.2024 № 20.1900.6651.24 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: 

<

...> земельный участок 25Л, в соответствии с мероприятиями, отраженными в технических условиях № 8000634663, а именно осуществить:

- обеспечить возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке;

- требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством;

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442);

- выполнить строительство ЛЭП 0,4 кВ от точки, указанной в пункте №7 настоящих ТУ, до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» предоставить уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации.

4. Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 7463 руб. 56 коп. неустойки, 25 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Производить начисление неустойки, исходя из расчета 0,25% от размера платы за технологическое присоединение по договору от 21.10.2024 № 20.1900.6651.24, составляющей 35 122 руб. 67 коп., за каждый день просрочки, начиная с 16.07.2025 до момента фактического исполнения обязательства по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению, но не более чем за год просрочки.

4. В случае неисполнения настоящего решения взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 судебный штраф в размере 3000 руб. за каждый календарный день неисполнения решения суда по истечении 1 (одного) месяца со дня вступления решения суда в законную силу по день его фактического исполнения. 

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объёме. 

Жалоба подается через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья

Н.Н. Моисеева