Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-75338/2017

25 декабря 2017 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  14 декабря 2017 года.

Полный текст решения изготовлен  25 декабря 2017 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "МОНТАЖЭЛЕКТРОПРОЕКТ" (адрес:  Россия 156009, г КОСТРОМА, КОСТРОМСКАЯ обл, ул ДРОВЯНАЯ 49, ОГРН:  1024400529834);

ответчик: закрытое акционерное общество "ПетроСтройИнвест" (адрес:  Россия 196233, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр-кт КОСМОНАВТОВ 96, ЛИТ. А/ПОМ. 11Н, ОГРН:  1057810701960);

о взыскании 2 851 896 руб. 06 коп. 

при участии

- от истца: не явился, извещен;

- от ответчика: не явился, извещен

установил:

ООО "МОНТАЖЭЛЕКТРОПРОЕКТ" просит взыскать с ЗАО "ПетроСтройИнвест" 2 851 896 руб. 06 коп. задолженности по договору № 7/04-СУБ от 07.04.2016. 

Истец просит рассмотреть дело без его участия. 

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом. Дело рассматривается без участия представителей сторон на основании ст.156 АПК РФ.

Судом установлено: 

Между сторонами был заключен договор № 7/04-СУБ от 07.04.2016 на выполнение комплекса работ по устройству уличного освещения на объекте «Реконструкция Оборонной ул. от Заводского пр. до Лагерного шоссе со строительством моста через Ижорский пруд и путепровода через ж.д пути Московского направления. 1 этапа строительства. Реконструкции Оборонной ул. от ул. Веры Слуцкой до Тверской ул. со строительством моста через Ижорский пруд» для государственных нужд Санкт-Петербурга. 

Общая стоимость работ по договору составляет 9 226 221 руб. 55 коп. 

Срок выполнения работ не позднее 11.08.2016. 

За период с 10.10.2016 по 30.11.2016 истец-субподрядчик выполнил работы на сумму 3 301 896 руб. 06 коп., что подтверждается подписанными сторонами актами. 

Ответчик-подрядчик оплатил работы частично. В настоящее время задолженность ответчика перед истцом составляет 2 851 896 руб. 06 коп. 

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по государственной пошлине на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с закрытого акционерного общества "ПетроСтройИнвест" в пользу общества с ограниченной ответственностью "МОНТАЖЭЛЕКТРОПРОЕКТ" 2 851 896 руб. 06 коп. задолженности и 37 259 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.