9_2901156  

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, 

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А19-20554/15

г. Иркутск

27 апреля 2018 года.

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Епифановой О.В.,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ КРАСНОЯРСК -  ИРКУТСК ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА" (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>, место нахождения 664007, 

<

...>) к закрытому акционерному обществу "Дорожник" (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>, место нахождения 665902, 

<

...>) о безвозмездном устранении недостатков выполненных работ,  возникших в период гарантийной эксплуатации объекта,  

третьи лица: акционерное общество «Дорожный проектно-изыскательский и научно- исследовательский институт «Иркутскгипродорнии» (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>, место нахождения: 

<

...>) 

общество с ограниченной ответственностью «ЗБСМ МК-162» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, место нахождения 368346, республика Дагестан, Гунибский район, село  Тлогоб, почтовый адрес 664519, Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Смоленщина,  

ул. Трактовая, д. 5), 

руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Обязать закрытое акционерное общество «Дорожник» в течение трех месяцев с  момента вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить недостатки  выполненных работ по государственному контракту от 12.02.2014 № 14/РД на выполнение  дорожных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги М-55 «Байкал» от  

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ  до Читы км 57+700 - км 64+000, в Иркутской области, возникшие в период гарантийной  эксплуатации объекта:  

- устранить деформации подпорной стенки ПК 38+00 - ПК 39+50 справа по ходу  километража обвал ее средней части длиной 78 м на участке ПК 38+44 - ПК 39+22:  

- устранить трещины в грунте, образовавшиеся вдоль подпорной стенки (ПК 38+00 -|  ПК 39+50),  

- на подпорной стенке ПК 3+00 - ПК 4+00 с верховой стороны устранить два промыва  в сторону стенки, в месте промыва устранить наклон стенки в сторону дороги;  

- на подпорной стенке ПК 54+50 – ПК 55+53 в месте застоя воды и образования  трещины в засыпке в 2-3 м. от подпорной стенки устранить застой воды и организовать  сток;  

- устранить на всех водопропускных трубах выкрашивание защитных лотков из  монолитного бетона;  

- на откосах земляного полотна и кюветов устранить локальные размывы,  местоположение и объем которых определены сторонами в акте комиссионного  обследования № 1 от 11.09.2017 с приложением к нему ведомости объемов и  местоположения дефектов автомобильной дороги (приложение № 1 к акту № 1 от  11.09.2017).  

Взыскать с закрытого акционерного общества «Дорожник» в пользу  ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ  МАГИСТРАЛИ КРАСНОЯРСК - ИРКУТСК ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА»  судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Иркутской области.  

Судья О.В. Епифанова