АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-7723/2022

г. Уфа

08 июня 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 06.06.2022

Полный текст решения изготовлен 08.06.2022

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе

судьи Кузнецова Д.П., 

при ведении протокола судебного заседания

секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 319028000054596) 

к Обществу с ограниченной ответственностью "Альтернатива" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 35 236 120 руб. 30 коп. (с учетом уточнений исковых требований)

при участии в судебном заседании:

От истца – ФИО3 по доверенности от 15.03.2022, представлен диплом рег. номер 263 от 10.07.2021, паспорт гражданина РФ.

От ответчика – ФИО4 по доверенности от 04.04.2022, представлен диплом рег. номер 243 от 10.07.2020, паспорт гражданина РФ.

 

Индивидуальный предприниматель ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 319028000054596) обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании суммы долга в размере 31 282 546 руб. 15 коп., пени в размере 2 862 785 руб. 15 коп. (с учетом уточнений исковых требований).

Определением суда от 22 марта 2022 года по делу №А07-7723/2022 исковое заявления было принято к производству.

От истца поступило уточнение исковых требований, по которому истец просит взыскать сумму долга в размере 31 282 546 руб. 15 коп., пени в размере 2 862 785 руб. 15 коп. Данное уточнение судом рассмотрено и принято в соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

От ответчика поступил отзыв на исковое заявление, который судом приобщен к материалам дела. 

От ответчика поступило ходатайство о назначении экспертизы. Просит назначить судебную строительно-техническую экспертизу, производство по делу поручить эксперту Общества с ограниченной ответственностью «Аргумент» ФИО5. 

Истец относительно  назначения экспертизы не возражал, просил производство экспертизы поручить эксперту Общества с ограниченной ответственностью «Ассоциация судебных экспертов и оценщиков Республики Башкортостан» ФИО6.

Ответчиком представлено платежное поручение № 108 от 13.04.2022 года на сумму 100 000 руб., подтверждающее внесение денежных средств на депозит суда. 

От ответчика поступила проектная и исполнительная документация на DVD-R диске, который судом приобщен к материалам дела.

Определением суда от 14 апреля 2022 года был объявлен перерыв в судебном заседании. Ходатайство о назначении экспертизы оставлено открытым.

Определением суда от 20 апреля 2022 года назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Производство экспертизы поручено эксперту Общества с ограниченной ответственностью «Аргумент» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, юр. адрес: 450059, 

<

...>) ФИО5. Производство по делу было приостановлено до получения результатов экспертизы.

Определением суда от 27 мая 2022 года было назначено судебное заседание для решения вопроса о возобновлении производства.

От истца в судебном заседании поступило ходатайство об уточнении исковых требований с учетом заключения эксперта, согласно которому просит взыскать сумму долга в размере 31 282 546 руб. 15 коп., пени в размере 3 953 574 руб. 19 коп. за период с 11.10.2021г. по 31.03.2022г.

В соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения исковых требований судом приняты к производству. Дело рассматривается судом с учётом уточнений.

Представитель истца в судебном заседании поддержал уточненные исковые требования.

Представитель ответчика в судебном заседании представил письменные пояснения, просил принять решение в соответствии с действующим законодательством.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, 1) 11.06.2019 г. между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (заказчик) был заключен Договор подряда №044/Л5Г2, по условиям которого ИП ФИО2 принял на себя обязательства по заданию ООО «Альтернатива» выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами работы по «Силовое электрооборудование. Внутреннее электрическое освещение» (далее – Работы) на объекте «Жилой дом (литер 5) со встроенными предприятиями обслуживания и пристроенной подземной автостоянкой в жилом районе «Глумилино», микрорайон 2, г. Уфа (секция «В»)» (далее – Объект) в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для полного исполнения своих обязательств по Договору и надлежащей эксплуатации Объекта, а ООО «Альтернатива» обязуется принять и оплатить результат Работ в установленном Договором порядке (п. 1.1). Цена по договору (стоимость работ) составляет 2 591 183 руб. 00 коп. без НДС (п. 2.1). Расчеты по выполненным и принятым работам по договору осуществляются Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания актов приемки выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и выполнения подрядчиком обязательства по предоставлению исполнительной документации в соответствии с п. 6.3 Договора (п. 7.2). 

Факт выполнения работ индивидуальным предпринимателем на общую сумму 440 213 руб. 27 коп. подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат №4 от 30.10.2020 г. на сумму 440 213 руб. 27 коп., актом о приемке выполненных работ (КС-2) №4 от 30.10.2020 г.

2) 11.06.2019 г. между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (заказчик) был заключен Договор подряда №045/Л5Г2, по условиям которого ИП ФИО2 принял на себя обязательства по заданию ООО «Альтернатива» выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами работы по «Силовое электрооборудование. Внутреннее электрическое освещение» (далее – Работы) на объекте «Жилой дом (литер 5) со встроенными предприятиями обслуживания и пристроенной подземной автостоянкой в жилом районе «Глумилино», микрорайон 2, г. Уфа (секция «В»)» (далее – Объект) в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для полного исполнения своих обязательств по Договору и надлежащей эксплуатации Объекта, а ООО «Альтернатива» обязуется принять и оплатить результат Работ в установленном Договором порядке (п. 1.1). Цена по договору (стоимость работ) составляет 2 504 194 руб. 00 коп. без НДС (п. 2.1). Расчеты по выполненным и принятым работам по договору осуществляются Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания актов приемки выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и выполнения подрядчиком обязательства по предоставлению исполнительной документации в соответствии с п. 6.3 Договора (п. 7.2). 

Факт выполнения работ индивидуальным предпринимателем на общую сумму 556 663 руб. 52 коп. подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат №4 от 31.08.2020 г. на сумму 37 923 руб. 48 коп., №5 от 30.10.2020 г. на сумму 518 740 руб. 04 коп., актами о приемке выполненных работ №4 от 31.08.2020 г., №5 от 30.10.2020 г.

3) 11.06.2019 г. между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (заказчик) был заключен Договор подряда №048/Л5Г2, по условиям которого ИП ФИО2 принял на себя обязательства по заданию ООО «Альтернатива» выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами работы по «Силовое электрооборудование. Внутреннее электрическое освещение» (далее – Работы) на объекте «Жилой дом (литер 5) со встроенными предприятиями обслуживания и пристроенной подземной автостоянкой в жилом районе «Глумилино», микрорайон 2, г. Уфа (секция «Г»)» (далее – Объект) в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для полного исполнения своих обязательств по Договору и надлежащей эксплуатации Объекта, а ООО «Альтернатива» обязуется принять и оплатить результат Работ в установленном Договором порядке (п. 1.1). Цена по договору (стоимость работ) составляет 2 557 085 руб. 00 коп. без НДС (п. 2.1). Расчеты по выполненным и принятым работам по договору осуществляются Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания актов приемки выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и выполнения подрядчиком обязательства по предоставлению исполнительной документации в соответствии с п. 6.3 Договора (п. 7.2). Стоимость дополнительных работ согласно локально-сметным расчетам на электромонтажные работы составляет 192 187 руб. 98 коп. (п.2 Дополнительного соглашения №1 от 11.06.2019 г.).

Факт выполнения работ индивидуальным предпринимателем на общую сумму 389 904 руб. 17 коп. подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат №7 от 31.08.2020 г. на сумму 192 187 руб. 98 коп., №8 от 30.09.2020 г. на сумму 164 688 руб. 58 коп., №9 от 30.10.2020 г. на сумму 111 027 руб. 61 коп., актами о приемке выполненных работ №7 от 31.08.2020 г., №8 от 30.09.2020 г., №9 от 30.10.2020 г. 

4) 11.06.2019 г. между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (заказчик) был заключен Договор подряда №055/Л5Г2, по условиям которого ИП ФИО2 принял на себя обязательства по заданию ООО «Альтернатива» выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами работы по «Силовое электрооборудование. Внутреннее электрическое освещение» (далее – Работы) на объекте «Жилой дом (литер 5) со встроенными предприятиями обслуживания и пристроенной подземной автостоянкой в жилом районе «Глумилино», микрорайон 2, г. Уфа (секция «Г»)» (далее – Объект) в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для полного исполнения своих обязательств по Договору и надлежащей эксплуатации Объекта, а ООО «Альтернатива» обязуется принять и оплатить результат Работ в установленном Договором порядке (п. 1.1). Цена по договору (стоимость работ) составляет 2 802 576 руб. 00 коп. без НДС (п. 2.1). Расчеты по выполненным и принятым работам по договору осуществляются Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания актов приемки выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и выполнения подрядчиком обязательства по предоставлению исполнительной документации в соответствии с п. 6.3 Договора (п. 7.2). 

Факт выполнения работ индивидуальным предпринимателем на общую сумму 84 725 руб. 43 коп. подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат №6 от 30.10.2020 г. на сумму 616 807 руб. 73 коп., актом о приемке выполненных работ №6 от 30.10.2020 г. Факт частичной оплаты работ обществом подтверждается платежным поручением №623 от 17.11.2020 г.

5) 11.06.2019 г. между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (заказчик) был заключен Договор подряда №056/Л5Г2, по условиям которого ИП ФИО2 принял на себя обязательства по заданию ООО «Альтернатива» выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами работы по «Силовое электрооборудование. Внутреннее электрическое освещение» (далее – Работы) на объекте «Жилой дом (литер 5) со встроенными предприятиями обслуживания и пристроенной подземной автостоянкой в жилом районе «Глумилино», микрорайон 2, г. Уфа (секция «Г»)» в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для полного исполнения своих обязательств по Договору и надлежащей эксплуатации Объекта, а ООО «Альтернатива» обязуется принять и оплатить результат Работ в установленном Договором порядке (п. 1.1). Цена по договору (стоимость работ) составляет 2 992 611 руб. 00 коп. без НДС (п. 2.1). Расчеты по выполненным и принятым работам по договору осуществляются Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания актов приемки выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и выполнения подрядчиком обязательства по предоставлению исполнительной документации в соответствии с п. 6.3 Договора (п. 7.2). 

Факт выполнения работ индивидуальным предпринимателем на сумму 506 056 руб. 65 коп. подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат №6 от 30.10.2020 г. на сумму 506 056 руб. 65 коп., актом о приемке выполненных работ №6 от 30.10.2020 г.

6) 11.06.2019 г. между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (заказчик) был заключен Договор подряда №057/Л5Г2, по условиям которого ИП ФИО2 принял на себя обязательства по заданию ООО «Альтернатива» выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами работы по «Силовое электрооборудование. Внутреннее электрическое освещение» (далее – Работы) на объекте «Жилой дом (литер 5) со встроенными предприятиями обслуживания и пристроенной подземной автостоянкой в жилом районе «Глумилино», микрорайон 2, г. Уфа (секция «Г»)» (далее – Объект) в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для полного исполнения своих обязательств по Договору и надлежащей эксплуатации Объекта, а ООО «Альтернатива» обязуется принять и оплатить результат Работ в установленном Договором порядке (п. 1.1). Цена по договору (стоимость работ) составляет 2 534 411 руб. 00 коп. без НДС (п. 2.1). Расчеты по выполненным и принятым работам по договору осуществляются Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания актов приемки выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и выполнения подрядчиком обязательства по предоставлению исполнительной документации в соответствии с п. 6.3 Договора (п. 7.2). 

Факт выполнения работ индивидуальным предпринимателем на общую сумму 568 116 руб. 74 коп. подтверждается справкой о приемке выполненных работ №5 от 30.10.2020 г. на сумму 568 116 руб. 74 коп., актом приемке выполненных работ №5 от 30.10.2020 г.

7) 11.06.2019 г. между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (заказчик) был заключен Договор подряда №058/Л5Г2, по условиям которого ИП ФИО2 принял на себя обязательства по заданию ООО «Альтернатива» выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами работы по «Силовое электрооборудование. Внутреннее электрическое освещение» (далее – Работы) на объекте «Жилой дом (литер 5) со встроенными предприятиями обслуживания и пристроенной подземной автостоянкой в жилом районе «Глумилино», микрорайон 2, г. Уфа (секция «Г»)» (далее – Объект) в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для полного исполнения своих обязательств по Договору и надлежащей эксплуатации Объекта, а ООО «Альтернатива» обязуется принять и оплатить результат Работ в установленном Договором порядке (п. 1.1). Цена по договору (стоимость работ) составляет 2 537 458 руб. 00 коп. без НДС (п. 2.1). Расчеты по выполненным и принятым работам по договору осуществляются Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания актов приемки выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и выполнения подрядчиком обязательства по предоставлению исполнительной документации в соответствии с п. 6.3 Договора (п. 7.2). 

Факт выполнения работ индивидуальным предпринимателем на общую сумму 778 406 руб. 65 коп. подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат №3 от 30.10.2020 г. на сумму 778 406 руб. 65 коп., актом о приемке выполненных работ №3 от 30.10.2020 г. 

8) 11.06.2019 г. между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (заказчик) был заключен Договор подряда №059/Л5Г2, по условиям которого ИП ФИО2 принял на себя обязательства по заданию ООО «Альтернатива» выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами работы по «Силовое электрооборудование. Внутреннее электрическое освещение» (далее – Работы) на объекте «Жилой дом (литер 5) со встроенными предприятиями обслуживания и пристроенной подземной автостоянкой в жилом районе «Глумилино», микрорайон 2, г. Уфа (секция «Г»)» (далее – Объект) в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для полного исполнения своих обязательств по Договору и надлежащей эксплуатации Объекта, а ООО «Альтернатива» обязуется принять и оплатить результат Работ в установленном Договором порядке (п. 1.1). Цена по договору (стоимость работ) составляет 2 537 458 руб. 00 коп. без НДС (п. 2.1). Расчеты по выполненным и принятым работам по договору осуществляются Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания актов приемки выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и выполнения подрядчиком обязательства по предоставлению исполнительной документации в соответствии с п. 6.3 Договора (п. 7.2). 

Факт выполнения работ индивидуальным предпринимателем на общую сумму 605 156 руб. 30 коп. подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат №4 от 30.10.2020 г. на сумму 605 156 руб. 30 коп., актом о приемке выполненных работ №4 от 30.10.2020 г.

9) 11.06.2019 г. между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (заказчик) был заключен Договор подряда №037/Л5/Г2, по условиям которого ИП ФИО2 принял на себя обязательства по заданию ООО «Альтернатива» выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами работы по «Силовое электрооборудование. Внутреннее электрическое освещение» (далее – Работы) на объекте «Жилой дом (литер 5) со встроенными предприятиями обслуживания и пристроенной подземной автостоянкой в жилом районе «Глумилино», микрорайон 2, г. Уфа (секция «В»)» в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для полного исполнения своих обязательств по Договору и надлежащей эксплуатации Объекта, а ООО «Альтернатива» обязуется принять и оплатить результат Работ в установленном Договором порядке (п. 1.1). Цена по договору (стоимость работ) составляет 2 221 302 руб. 00 коп. без НДС (п. 2.1). Расчеты по выполненным и принятым работам по договору осуществляются Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания актов приемки выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и выполнения подрядчиком обязательства по предоставлению исполнительной документации в соответствии с п. 6.3 Договора (п. 7.2). 

Факт выполнения работ индивидуальным предпринимателем на общую сумму 17 151 руб. 96 коп. подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат №3 от 30.06.2020 г. на сумму 864 151 руб. 96 коп., актом о приемке выполненных работ №3 от 30.06.2020 г. Факт частичной оплаты работ обществом подтверждается платежными поручениями №511 от 11.09.2020 г. на сумму 500 000 руб., №567 от 15.10.2020 г. на сумму 90 000 руб., №606 от 03.11.2020 г. на сумму 185 000 руб., №19 от 18.01.2021 г. на сумму 72 000 руб.

10) 11.06.2019 г. между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (заказчик) был заключен Договор подряда №039/Л5/Г2, по условиям которого ИП ФИО2 принял на себя обязательства по заданию ООО «Альтернатива» выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами работы по «Силовое электрооборудование. Внутреннее электрическое освещение» (далее – Работы) на объекте «Жилой дом (литер 5) со встроенными предприятиями обслуживания и пристроенной подземной автостоянкой в жилом районе «Глумилино», микрорайон 2, г. Уфа (секция «В»)» (далее – Объект) в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для полного исполнения своих обязательств по Договору и надлежащей эксплуатации Объекта, а ООО «Альтернатива» обязуется принять и оплатить результат Работ в установленном Договором порядке (п. 1.1). Цена по договору (стоимость работ) составляет 2 712 151 руб. 00 коп. без НДС (п. 2.1). Расчеты по выполненным и принятым работам по договору осуществляются Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания актов приемки выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и выполнения подрядчиком обязательства по предоставлению исполнительной документации в соответствии с п. 6.3 Договора (п. 7.2). 

Факт выполнения работ индивидуальным предпринимателем на общую сумму 738 242 руб. 35 коп. подтверждается справкой о стоимости выполненных работ №5 от 30.10.2020 г. на сумму 738 242 руб. 35 коп., актом о приемке выполненных работ №5 от 30.10.2020 г.

11) 11.06.2019 г. между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (заказчик) был заключен Договор подряда №041/Л5/Г2, по условиям которого ИП ФИО2 принял на себя обязательства по заданию ООО «Альтернатива» выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами работы по «Силовое электрооборудование. Внутреннее электрическое освещение» (далее – Работы) на объекте «Жилой дом (литер 5) со встроенными предприятиями обслуживания и пристроенной подземной автостоянкой в жилом районе «Глумилино», микрорайон 2, г. Уфа (секция «В»)» (далее – Объект) в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для полного исполнения своих обязательств по Договору и надлежащей эксплуатации Объекта, а ООО «Альтернатива» обязуется принять и оплатить результат Работ в установленном Договором порядке (п. 1.1). Цена по договору (стоимость работ) составляет 2 229 383 руб. 00 коп. без НДС (п. 2.1). Расчеты по выполненным и принятым работам по договору осуществляются Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания актов приемки выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и выполнения подрядчиком обязательства по предоставлению исполнительной документации в соответствии с п. 6.3 Договора (п. 7.2). 

Факт выполнения работ индивидуальным предпринимателем на общую сумму 92 602 руб. 76 коп. подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат №5 от 30.10.2020 г. на сумму 92 602 руб. 76 коп., актом о приемке выполненных работ №5 от 30.10.2020 г.

12) 11.06.2019 г. между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (заказчик) был заключен Договор подряда №042/Л5/Г2, по условиям которого ИП ФИО2 принял на себя обязательства по заданию ООО «Альтернатива» выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами работы по «Силовое электрооборудование. Внутреннее электрическое освещение» (далее – Работы) на объекте «Жилой дом (литер 5) со встроенными предприятиями обслуживания и пристроенной подземной автостоянкой в жилом районе «Глумилино», микрорайон 2, г. Уфа (секция «В»)» (далее – Объект) в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для полного исполнения своих обязательств по Договору и надлежащей эксплуатации Объекта, а ООО «Альтернатива» обязуется принять и оплатить результат Работ в установленном Договором порядке (п. 1.1). Цена по договору (стоимость работ) составляет 2 905 805 руб. 00 коп. без НДС (п. 2.1). Расчеты по выполненным и принятым работам по договору осуществляются Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания актов приемки выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и выполнения подрядчиком обязательства по предоставлению исполнительной документации в соответствии с п. 6.3 Договора (п. 7.2). 

Факт выполнения работ индивидуальным предпринимателем на общую сумму 172 260 руб. 20 коп. подтверждается справкой о стоимости выполненных работ (КС-3) №4 от 30.10.2020 г. на сумму 172 260 руб. 20 коп.

актом о приемке выполненных работ (КС-2) №4 от 30.10.2020 г.

13) 10.08.2019 г. между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (заказчик) был заключен Договор подряда №079/Л5Г2, по условиям которого ИП ФИО2 принял на себя обязательства по заданию ООО «Альтернатива» выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами работы по «Электроснабжение 0,4 кВ» (далее – Работы) на объекте «Жилой дом (литер 5) со встроенными предприятиями обслуживания и пристроенной подземной автостоянкой в жилом районе «Глумилино», микрорайон 2, г. Уфа» (далее – Объект) в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для полного исполнения своих обязательств по Договору и надлежащей эксплуатации Объекта, а ООО «Альтернатива» обязуется принять и оплатить результат Работ в установленном Договором порядке (п. 1.1). Цена по договору (стоимость работ) составляет 1 565 533 руб. 93 коп. без НДС (п. 2.1). Расчеты по выполненным и принятым работам по договору осуществляются Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания актов приемки выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и выполнения подрядчиком обязательства по предоставлению исполнительной документации в соответствии с п. 6.3 Договора (п. 7.2). 

Факт выполнения работ индивидуальным предпринимателем на общую сумму 375 887 руб. 08 коп. подтверждается справкой о стоимости выполненных работ №2 от 29.01.2021 г. на сумму 375 887 руб. 08 коп., актом о приемке выполненных работ №2 от 29.01.2021 г.

14) 11.06.2019 г. между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (заказчик) был заключен Договор подряда №049/Л5/Г2, по условиям которого ИП ФИО2 принял на себя обязательства по заданию ООО «Альтернатива» выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами работы по «Силовое электрооборудование. Внутреннее электрическое освещение» (далее – Работы) на объекте «Жилой дом (литер 5) со встроенными предприятиями обслуживания и пристроенной подземной автостоянкой в жилом районе «Глумилино», микрорайон 2, г. Уфа (секция «Г»)» (далее – Объект) в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для полного исполнения своих обязательств по Договору и надлежащей эксплуатации Объекта, а ООО «Альтернатива» обязуется принять и оплатить результат Работ в установленном Договором порядке (п. 1.1). Цена по договору (стоимость работ) составляет 2 750 011 руб. 00 коп. без НДС (п. 2.1). Расчеты по выполненным и принятым работам по договору осуществляются Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания актов приемки выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и выполнения подрядчиком обязательства по предоставлению исполнительной документации в соответствии с п. 6.3 Договора (п. 7.2). 

Факт выполнения работ индивидуальным предпринимателем на общую сумму 30 286 руб. 57 коп. подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат №3 от 28.02.2020 г. на сумму 1 133 794 руб. 69 коп., №4 от 30.10.2020 г. на сумму 3 662 руб. 43 коп., актами о приемке выполненных работ №3 от 28.02.2020 г., №4 от 30.10.2020 г. Факт частичной оплаты работ обществом подтверждается платежными поручениями №138 от 11.03.2020 г. на сумму 23 552 руб. 55 коп., №274 от 29.04.2020 г. на сумму 260 000 руб. 00 коп., №387 от 30.09.2021 г. на сумму 886 171 руб. 88 коп. 

15) 11.06.2019 г. между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (заказчик) был заключен Договор подряда №054/Л5/Г2, по условиям которого ИП ФИО2 принял на себя обязательства по заданию ООО «Альтернатива» выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами работы по «Силовое электрооборудование. Внутреннее электрическое освещение» (далее – Работы) на объекте «Жилой дом (литер 5) со встроенными предприятиями обслуживания и пристроенной подземной автостоянкой в жилом районе «Глумилино», микрорайон 2, г. Уфа (секция «Г»)» (далее – Объект) в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для полного исполнения своих обязательств по Договору и надлежащей эксплуатации Объекта, а ООО «Альтернатива» обязуется принять и оплатить результат Работ в установленном Договором порядке (п. 1.1). Цена по договору (стоимость работ) составляет 2 550 655 руб. 00 коп. без НДС (п. 2.1). Расчеты по выполненным и принятым работам по договору осуществляются Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания актов приемки выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и выполнения подрядчиком обязательства по предоставлению исполнительной документации в соответствии с п. 6.3 Договора (п. 7.2). 

Факт выполнения работ индивидуальным предпринимателем на общую сумму 148 703 руб. 20 коп. подтверждается справкой о стоимости выполненных работ №3 от 30.10.2020 г. на сумму 148 703 руб. 20 коп., актом о приемке выполненных работ №3 от 30.10.2020 г.

16) 11.05.2020 г. между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (заказчик) был заключен Договор подряда №049/Л5Г2, по условиям которого ИП ФИО2 принял на себя обязательства по заданию ООО «Альтернатива» выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами работы по монтажу силового электрооборудования и внутреннего электрического освещения (далее – Работы) на объекте «Многоквартирный жилой дом литер 5 со встроенными предприятиями обслуживания и пристроенной подземной автостоянкой в жилом районе «Глумилино», микрорайон 2, г. Уфа (секция «Ж»)» (далее – Объект) в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для полного исполнения своих обязательств по Договору и надлежащей эксплуатации Объекта, а ООО «Альтернатива» обязуется принять и оплатить результат Работ в установленном Договором порядке (п. 1.1). Цена по договору (стоимость работ) составляет 20 519 504 руб. 70 коп. без НДС (п. 2.1). Расчеты по выполненным и принятым работам по договору осуществляются Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания актов приемки выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и выполнения подрядчиком обязательства по предоставлению исполнительной документации в соответствии с п. 6.3 Договора (п. 7.2). Стоимость дополнительных работ составляет 222 556 руб. 95 коп. без НДС (п. 2 Дополнительного соглашения №1 от 07.12.2020 г.). Стоимость дополнительных работ составляет 12 193 руб. 17 коп. (п. 2 Дополнительного соглашения №2 от 01.04.2021 г.). 

Факт выполнения работ индивидуальным предпринимателем на общую сумму 14 246 754 руб. 76 коп. подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат №4 от 30.12.2020 г. на сумму 2 843 398 руб. 46 коп., №5 от 29.01.2021 г. на сумму 559 215 руб. 93 коп., №6 от 26.02.2021 г. на сумму 2 712 054 руб. 55 коп., №7 от 31.03.2021 г. на сумму 8 441 352 руб. 42 коп., №8 от 30.04.2021 г. на сумму 12 193 руб. 17 коп., актами о приемке выполненных работ №4 от 30.12.2020 г., №5 от 29.01.2021 г., №6 от 26.02.2021 г., №7 от 31.03.2021 г., №8 от 30.04.2021 г. Факт частичной оплаты работ обществом подтверждается платежным поручением №44 от 28.01.2021 г.

17) 13.05.2020 г. между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (заказчик) был заключен Договор подряда №050/Л5Г2, по условиям которого ИП ФИО2 принял на себя обязательства по заданию ООО «Альтернатива» выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами работы по монтажу силового электрооборудования и внутреннего электрического освещения (далее – Работы) на объекте «Многоквартирный жилой дом литер 5 со встроенными предприятиями обслуживания и пристроенной подземной автостоянкой в жилом районе «Глумилино», микрорайон 2, г. Уфа (секция «Д»)» (далее – Объект) в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для полного исполнения своих обязательств по Договору и надлежащей эксплуатации Объекта, а ООО «Альтернатива» обязуется принять и оплатить результат Работ в установленном Договором порядке (п. 1.1). Цена по договору (стоимость работ) составляет 26 535 429 руб. 22 коп. без НДС (п. 2.1). Расчеты по выполненным и принятым работам по договору осуществляются Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания актов приемки выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и выполнения подрядчиком обязательства по предоставлению исполнительной документации в соответствии с п. 6.3 Договора (п. 7.2). Стоимость дополнительных работ составляет 230 532 руб. 48 коп. без НДС (п. 2 Дополнительного соглашения №1 от 07.09.2020 г.). Стоимость дополнительных работ составляет 91 275 руб. 68 коп. (п. 2 Дополнительного соглашения №2 от 07.12.2020 г.). Стоимость дополнительных работ составляет 89 579 руб. 69 коп. без НДС (п. 2 Дополнительного соглашения №3 от 01.04.2021 г.). 

Факт выполнения работ индивидуальным предпринимателем на общую сумму 7 581 395 руб. 05 коп. подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат №7 от 26.02.2021 г. на сумму 5 120 399 руб. 28 коп., №8 от 30.04.2021 г. на сумму 6 646 574 руб. 27 коп., актами о приемке выполненных работ №7 от 26.02.2021 г., №8 от 30.04.2021 г. Факт частичной оплаты работ обществом подтверждается платежными поручениями.

18) 10.09.2020 г. между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (заказчик) был заключен Договор подряда №088/Л5Г2, по условиям которого ИП ФИО2 принял на себя обязательства по заданию ООО «Альтернатива» выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами работы по монтажу внутреннего электрического освещения (далее – Работы) на объекте «Многоквартирный жилой дом литер 5 со встроенными предприятиями обслуживания и пристроенной подземной автостоянкой в жилом районе «Глумилино», микрорайон 2, г. Уфа (секция А, Б, В, Г)» (далее – Объект) в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для полного исполнения своих обязательств по Договору и надлежащей эксплуатации Объекта, а ООО «Альтернатива» обязуется принять и оплатить результат Работ в установленном Договором порядке (п. 1.1). Цена по договору (стоимость работ) составляет 55 963 руб. 56 коп. без НДС (п. 2.1). Расчеты по выполненным и принятым работам по договору осуществляются Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания актов приемки выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и выполнения подрядчиком обязательства по предоставлению исполнительной документации в соответствии с п. 6.3 Договора (п. 7.2). 

Факт выполнения работ индивидуальным предпринимателем на общую сумму 55 963 руб. 56 коп. подтверждается справкой о стоимости выполненных работ №1 от 30.09.2020 г. на сумму 55 963 руб. 56 коп., актом о приемке выполненных работ №1 от 30.09.2020 г.

19) 11.12.2020 г. между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (заказчик) был заключен Договор подряда №130/Л5Г2, по условиям которого ИП ФИО2 принял на себя обязательства по заданию ООО «Альтернатива» выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами работы по монтажу внутреннего электрического освещения (далее – Работы) на объекте «Многоквартирный жилой дом литер 5 со встроенными предприятиями обслуживания и пристроенной подземной автостоянкой в жилом районе «Глумилино», микрорайон 2, г. Уфа (секция Г)» (далее – Объект) в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для полного исполнения своих обязательств по Договору и надлежащей эксплуатации Объекта, а ООО «Альтернатива» обязуется принять и оплатить результат Работ в установленном Договором порядке (п. 1.1). Цена по договору (стоимость работ) составляет 18 567 руб. 52 коп. без НДС (п. 2.1). Расчеты по выполненным и принятым работам по договору осуществляются Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания актов приемки выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и выполнения подрядчиком обязательства по предоставлению исполнительной документации в соответствии с п. 6.3 Договора (п. 7.2). 

Факт выполнения работ индивидуальным предпринимателем на общую сумму 18 567 руб. 52 коп. подтверждается справкой о стоимости выполненных работ №1 от 18.12.2020 г. на сумму 18 567 руб. 52 коп., актом о приемке выполненных работ №1 от 18.12.2020 г.

20) 11.12.2020 г. между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (заказчик) был заключен Договор подряда №131/Л5Г2, по условиям которого ИП ФИО2 принял на себя обязательства по заданию ООО «Альтернатива» выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами работы по монтажу внутреннего электрического освещения (далее – Работы) на объекте «Многоквартирный жилой дом литер 5 со встроенными предприятиями обслуживания и пристроенной подземной автостоянкой в жилом районе «Глумилино», микрорайон 2, г. Уфа (секция В)» (далее – Объект) в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для полного исполнения своих обязательств по Договору и надлежащей эксплуатации Объекта, а ООО «Альтернатива» обязуется принять и оплатить результат Работ в установленном Договором порядке (п. 1.1). Цена по договору (стоимость работ) составляет 18 567 руб. 52 коп. без НДС (п. 2.1). Расчеты по выполненным и принятым работам по договору осуществляются Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания актов приемки выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и выполнения подрядчиком обязательства по предоставлению исполнительной документации в соответствии с п. 6.3 Договора (п. 7.2). 

Факт выполнения работ индивидуальным предпринимателем на общую сумму 18 567 руб. 52 коп. подтверждается справкой о стоимости выполненных работ №1 от 18.12.2020 г. на сумму 18 567 руб. 52 коп., актом о приемке выполненных работ №1 от 18.12.2020 г.

21) 01.03.2021 г. между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (заказчик) был заключен Договор подряда №010/Л5Г2, по условиям которого ИП ФИО2 принял на себя обязательства по заданию ООО «Альтернатива» выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами работы по по монтажу внутреннего электрического освещения (далее – Работы) на объекте «Многоквартирный жилой дом литер 5 со встроенными предприятиями обслуживания и пристроенной подземной автостоянкой в жилом районе «Глумилино», микрорайон 2, г. Уфа (секция Д, Ж)» (далее – Объект) в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для полного исполнения своих обязательств по Договору и надлежащей эксплуатации Объекта, а ООО «Альтернатива» обязуется принять и оплатить результат Работ в установленном Договором порядке (п. 1.1). Цена по договору (стоимость работ) составляет 35 755 руб. 90 коп. без НДС (п. 2.1). Расчеты по выполненным и принятым работам по договору осуществляются Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания актов приемки выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и выполнения подрядчиком обязательства по предоставлению исполнительной документации в соответствии с п. 6.3 Договора (п. 7.2). 

Факт выполнения работ индивидуальным предпринимателем на общую сумму 35 755 руб. 89 коп. подтверждается справкой о стоимости выполненных работ №1 от 31.03.2021 г. на сумму 35 755 руб. 89 коп., актом о приемке выполненных работ №1 от 31.03.2021 г.

22) 01.03.2021 г. между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (заказчик) был заключен Договор подряда №011/Л5Г2, по условиям которого ИП ФИО2 принял на себя обязательства по заданию ООО «Альтернатива» выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами работы по монтажу внутреннего электрического освещения (далее – Работы) на объекте «Многоквартирный жилой дом литер 5 со встроенными предприятиями обслуживания и пристроенной подземной автостоянкой в жилом районе «Глумилино», микрорайон 2, г. Уфа (секция Д)» (далее – Объект) в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для полного исполнения своих обязательств по Договору и надлежащей эксплуатации Объекта, а ООО «Альтернатива» обязуется принять и оплатить результат Работ в установленном Договором порядке (п. 1.1). Цена по договору (стоимость работ) составляет 182 691 руб. 43 коп. без НДС (п. 2.1). Расчеты по выполненным и принятым работам по договору осуществляются Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания актов приемки выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и выполнения подрядчиком обязательства по предоставлению исполнительной документации в соответствии с п. 6.3 Договора (п. 7.2). 

Факт выполнения работ индивидуальным предпринимателем на общую сумму 182 691 руб. 43 коп. подтверждается справкой о стоимости выполненных работ №1 от 31.03.2021 г. на сумму 182 691 руб. 43 коп.; актом о приемке выполненных работ №1 от 31.03.2021 г.

23) 01.04.2021 г. между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (заказчик) был заключен Договор подряда №023/Л5Г2, по условиям которого ИП ФИО2 принял на себя обязательства по заданию ООО «Альтернатива» выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами работы по монтажу наружного электроосвещения (далее – Работы) на объекте «Многоквартирный жилой дом литер 5 со встроенными предприятиями обслуживания и пристроенной подземной автостоянкой в жилом районе «Глумилино», микрорайон 2, г. Уфа (секция А, Б, В)» (далее – Объект) в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для полного исполнения своих обязательств по Договору и надлежащей эксплуатации Объекта, а ООО «Альтернатива» обязуется принять и оплатить результат Работ в установленном Договором порядке (п. 1.1). Цена по договору (стоимость работ) составляет 1 053 363 руб. 62 коп. без НДС (п. 2.1). Расчеты по выполненным и принятым работам по договору осуществляются Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания актов приемки выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и выполнения подрядчиком обязательства по предоставлению исполнительной документации в соответствии с п. 6.3 Договора (п. 7.2). 

Факт выполнения работ индивидуальным предпринимателем на общую сумму 1 053 363 руб. 62 коп. подтверждается справкой о стоимости выполненных работ №1 от 30.04.2021 г. на сумму 1 053 363 руб. 62 коп., актом о приемке выполненных работ №1 от 30.04.2021 г.

24) 11.06.2019 г. между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (заказчик) был заключен Договор подряда №043/Л5Г2, по условиям которого ИП ФИО2 принял на себя обязательства по заданию ООО «Альтернатива» выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами работы по «Силовое электрооборудование. Внутреннее электрическое освещение» (далее – Работы) на объекте «Жилой дом (литер 5) со встроенными предприятиями обслуживания и пристроенной подземной автостоянкой в жилом районе «Глумилино», микрорайон 2, г. Уфа (секция «В»)» (далее – Объект) в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для полного исполнения своих обязательств по Договору и надлежащей эксплуатации Объекта, а ООО «Альтернатива» обязуется принять и оплатить результат Работ в установленном Договором порядке (п. 1.1). Цена по договору (стоимость работ) составляет 2 807 292 руб. 00 коп. без НДС (п. 2.1). Расчеты по выполненным и принятым работам по договору осуществляются Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания актов приемки выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и выполнения подрядчиком обязательства по предоставлению исполнительной документации в соответствии с п. 6.3 Договора (п. 7.2). 

Факт выполнения работ индивидуальным предпринимателем на общую сумму 971 601 руб. 85 коп. подтверждается справкой о стоимости выполненных работ №6 от 30.10.2020 г. на сумму 971 601 руб. 85 коп., актом о приемке выполненных работ №6 от 30.10.2020 г.

25) 11.06.2019 г. между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (заказчик) был заключен Договор подряда №046/Л5Г2, по условиям которого ИП ФИО2 принял на себя обязательства по заданию ООО «Альтернатива» выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами работы по «Силовое электрооборудование. Внутреннее электрическое освещение» (далее – Работы) на объекте «Жилой дом (литер 5) со встроенными предприятиями обслуживания и пристроенной подземной автостоянкой в жилом районе «Глумилино», микрорайон 2, г. Уфа (секция «В»)» (далее – Объект) в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для полного исполнения своих обязательств по Договору и надлежащей эксплуатации Объекта, а ООО «Альтернатива» обязуется принять и оплатить результат Работ в установленном Договором порядке (п. 1.1). Цена по договору (стоимость работ) составляет 2 504 194 руб. 00 коп. без НДС (п. 2.1). Расчеты по выполненным и принятым работам по договору осуществляются Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания актов приемки выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и выполнения подрядчиком обязательства по предоставлению исполнительной документации в соответствии с п. 6.3 Договора (п. 7.2). 

Факт выполнения работ индивидуальным предпринимателем на общую сумму 556 571 руб. 61 коп. подтверждается справкой о стоимости выполненных работ №4 от 30.10.2020 г. на сумму 556 571 руб. 61 коп., актом о приемке выполненных работ №4 от 30.10.2020 г.

26) 11.06.2019 г. между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (заказчик) был заключен Договор подряда №047/Л5/Г2, по условиям которого ИП ФИО2 принял на себя обязательства по заданию ООО «Альтернатива» выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами работы по «Силовое электрооборудование. Внутреннее электрическое освещение» (далее – Работы) на объекте «Жилой дом (литер 5) со встроенными предприятиями обслуживания и пристроенной подземной автостоянкой в жилом районе «Глумилино», микрорайон 2, г. Уфа (секция «В»)» (далее – Объект) в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для полного исполнения своих обязательств по Договору и надлежащей эксплуатации Объекта, а ООО «Альтернатива» обязуется принять и оплатить результат Работ в установленном Договором порядке (п. 1.1). Цена по договору (стоимость работ) составляет 2 507 248 руб. 00 коп. без НДС (п. 2.1). Расчеты по выполненным и принятым работам по договору осуществляются Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания актов приемки выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и выполнения подрядчиком обязательства по предоставлению исполнительной документации в соответствии с п. 6.3 Договора (п. 7.2). 

Факт выполнения работ индивидуальным предпринимателем на общую сумму 822 106 руб. 43 коп. подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат №4 от 31.08.2020 г. на сумму 272 131 руб. 37 коп., №5 от 30.10.2020 г. на сумму 549 975 руб. 06 коп., актами о приемке выполненных работ №4 от 31.08.2020 г., №5 от 30.10.2020 г.

27) 11.06.2019 г. между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (заказчик) был заключен Договор подряда №051/Л5/Г2, по условиям которого ИП ФИО2 принял на себя обязательства по заданию ООО «Альтернатива» выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами работы по  «Силовое электрооборудование. Внутреннее электрическое освещение» (далее – Работы) на объекте «Жилой дом (литер 5) со встроенными предприятиями обслуживания и пристроенной подземной автостоянкой в жилом районе «Глумилино», микрорайон 2, г. Уфа (секция «Г»)» (далее – Объект) в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для полного исполнения своих обязательств по Договору и надлежащей эксплуатации Объекта, а ООО «Альтернатива» обязуется принять и оплатить результат Работ в установленном Договором порядке (п. 1.1). Цена по договору (стоимость работ) составляет 1 499 186 руб. 00 коп. без НДС (п. 2.1). Расчеты по выполненным и принятым работам по договору осуществляются Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания актов приемки выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и выполнения подрядчиком обязательства по предоставлению исполнительной документации в соответствии с п. 6.3 Договора (п. 7.2). 

Факт выполнения работ индивидуальным предпринимателем на общую сумму 189 376 руб. 59 коп. подтверждается справкой о стоимости выполненных работ №5 от 30.10.2020 г. на сумму 189 376 руб. 59 коп., актом о приемке выполненных работ №5 от 30.10.2020 г.

28) 11.06.2019 г. между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (заказчик) был заключен Договор подряда №052/Л5/Г2, по условиям которого ИП ФИО2 принял на себя обязательства по заданию ООО «Альтернатива» выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами работы по «Силовое электрооборудование. Внутреннее электрическое освещение» (далее – Работы) на объекте «Жилой дом (литер 5) со встроенными предприятиями обслуживания и пристроенной подземной автостоянкой в жилом районе «Глумилино», микрорайон 2, г. Уфа (секция «Г»)» (далее – Объект) в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для полного исполнения своих обязательств по Договору и надлежащей эксплуатации Объекта, а ООО «Альтернатива» обязуется принять и оплатить результат Работ в установленном Договором порядке (п. 1.1). Цена по договору (стоимость работ) составляет 2 926 011 руб. 00 коп. без НДС (п. 2.1). Расчеты по выполненным и принятым работам по договору осуществляются Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания актов приемки выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и выполнения подрядчиком обязательства по предоставлению исполнительной документации в соответствии с п. 6.3 Договора (п. 7.2). 

Факт выполнения работ индивидуальным предпринимателем на общую сумму 45 453 руб. 38 коп. подтверждается справкой о стоимости выполненных работ №5 от 30.10.2020 г. на сумму 45 453 руб. 38 коп., актом о приемке выполненных работ №5 от 30.10.2020 г.

Общая стоимость выполненных истцом и неоплаченных ответчиком работ по вышеуказанным договорам подряда (1 – 28) составила 31 282 546 руб. 15 коп.

Истец направил ответчику претензию (исх. №11 от 14.03.2022 года, вход. №509 от 14.03.2022 года) с требованием оплатить сумму задолженности за выполненные работы в размере 31 282 546 руб. 15 коп. в течение десяти дней со дня ее получения. Ответчик направил истцу ответ на претензию (исх. №13 от 16.03.2022 года) с отказом в оплате выполненных работ в связи с ненадлежащим качеством выполненных работ по договорам подряда.

В ходе судебного разбирательства судом была назначена судебная строительно-техническая экспертиза, проведение экспертизы поручено эксперту Общества с ограниченной ответственностью «Аргумент» ФИО5. 

Согласно выводам экспертного заключения  № 24/05/2022-СА от 24.05.2022г. дан ответ на вопрос №1: «Соответствуют ли фактически выполненные работы индивидуальным предпринимателем ФИО2 объемам, указанным в подписанных актах о приемке выполненных работ по форме КС-2:

по Договору подряда №044/Л5Г2 от 11.06.2019 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №4 от 30.10.2020 г. на сумму 440 213 руб. 27 коп.;

по Договору подряда №045/Л5Г2 от 11.06.2019 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №4 от 31.08.2020 г. на сумму 37 923 руб. 48 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №5 от 30.10.2020 г. на сумму 518 740 руб. 04 коп.;

по Договору подряда №048/Л5Г2 от 11.06.2019 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №7 от 31.08.2020 г. на сумму 192 187 руб. 98 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №8 от 30.09.2020 г. на сумму 164 688 руб. 58 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) №9 от 30.10.2020 г. на сумму 111 027 руб. 61 коп.;

по Договору подряда №045/Л5Г2 от 11.06.2019 г. справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №4 от 31.08.2020 г. на сумму 37 923 руб. 48 коп.;

по Договору подряда №055/Л5Г2 от 11.06.2019 г Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №6 от 30.10.2020 г. на сумму 616 807 руб. 73 коп.;

по Договору подряда №056/Л5Г2 от 11.06.2019 г., справка о стоимости выполненных работ (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №6 от 30.10.2020 г. на сумму 506 056 руб. 65 коп.;

по договору подряда №057/Л5Г2 от 11.06.2019 г., справка о стоимости выполненных работ (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №5 от 30.10.2020 г. на сумму 568 116 руб. 74 коп.;

по договору подряда №058/Л5Г2 от 11.06.2019 г., справка о стоимости выполненных работ (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №3 от 30.10.2020 г. на сумму 778 406 руб. 65 коп.;

по договору подряда №059/Л5Г2 от 11.06.2019 г., справка о стоимости выполненных работ (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №4 от 30.10.2020 г. на сумму 605 156 руб. 30 коп.;

по договору подряда №037/Л5/Г2 от 11.06.2019 г., справка о стоимости выполненных работ (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №3 от 30.06.2020 г. на сумму 864 151 руб. 96 коп.;

по договору подряда №039/Л5/Г2 от 11.06.2019 г., справка о стоимости выполненных работ (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №5 от 30.10.2020 г. на сумму 738 242 руб. 35 коп.;

по договору подряда №041/Л5/Г2 от 11.06.2019 г., справка о стоимости выполненных работ (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №5 от 30.10.2020 г. на сумму 92 602 руб. 76 коп.;

по Договору подряда №042/Л5/Г2 от 11.06.2019 г., справка о стоимости выполненных работ (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №4 от 30.10.2020 г на сумму 172 260 руб. 20 коп.;

по договору подряда №079/Л5/Г2 от 10.08.2019 г., справка о стоимости выполненных работ (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №2 от 29.01.2021 г. на сумму 375 887 руб. 08 коп.;

по договору подряда №049/Л5/Г2 от 11.06.2019 г., справка о стоимости выполненных работ (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №3 от 28.02.2020 г. на сумму 1 133 794 руб. 69 коп., справка о стоимости выполненных работ (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №4 от 30.10.2020 г. на сумму 3 662 руб. 43 коп.;

по договору подряда №054/Л5Г2 от 11.06.2019 г., справка о стоимости выполненных работ (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №3 от 30.10.2020 г. на сумму 148 703 руб. 20 коп.;

по договора подряда №049/Л5Г2 от 11.05.2020 г. справка о стоимости выполненных работ (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №4 от 30.12.2020 г. на сумму 2 843 398 руб. 46 коп., справка о стоимости выполненных работ (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №5 от 29.01.2021 г. на сумму 559 215 руб. 93 коп., справка о стоимости выполненных работ (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №6 от 26.02.2021 г. на сумму 2 712 054 руб. 55 коп., справка о стоимости выполненных работ (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №7 от 31.03.2021 г. на сумму 8 441 352 руб. 42 коп., справка о стоимости выполненных работ (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №8 от 30.04.2021 г. на сумму 12 193 руб. 17 коп.;

по договору подряда №050/Л5Г2 от 13.05.2020 г., справка о стоимости выполненных работ (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №7 от 26.02.2021 г. на сумму 5 120 399 руб. 28 коп., справка о стоимости выполненных работ (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №8 от 30.04.2021 г. на сумму 6 646 574 руб. 27 коп.;

 по договору подряда №088/Л5Г2 от 10.09.2019 г., справка о стоимости выполненных работ (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №1 от 30.09.2020 г. на сумму 55 963 руб. 65 коп.;

по договору подряда №130/Л5Г2 от 11.12.2020 г., справка о стоимости выполненных работ (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №1 от 18.12.2020 г. на сумму 18 567 руб. 52 коп.;

по договору подряда №131/Л5Г2 от 11.12.2020 г., справка о стоимости выполненных работ (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №1 от 18.12.2020 г. на сумму 18 567 руб. 52 коп.;

по договору подряда №010/Л5Г2 от 01.03.2020 г., справка о стоимости выполненных работ (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №1 от 31.03.2021 г. на сумму 35 755 руб. 89 коп.;

по договору подряда №011/Л5Г2 от 01.03.2020 г., справка о стоимости выполненных работ (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №1 от 31.03.2021 г. на сумму 182 691 руб. 43 коп.;

по договору подряда №023/Л5Г2 от 01.04.2020 г., справка о стоимости выполненных работ (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №1 от 30.04.2021 г. на сумму 1 053 363 руб. 62 коп.;

по договору подряда №043/Л5Г2 от 11.06.2019 г., справка о стоимости выполненных работ (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №6 от 30.10.2020 г. на сумму 971 601 руб. 85 коп.;

по договору подряда №046/Л5Г2 от 11.06.2019 г., справка о стоимости выполненных работ (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №4 от 30.10.2020 г. на сумму 556 571 руб. 61 коп.;

по договору подряда №047/Л5Г2 от 11.06.2019 г., справка о стоимости выполненных работ (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №4 от 31.08.2020 г. на сумму 272 131 руб. 37 коп., справка о стоимости выполненных работ (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №5 от 30.10.2020 г. на сумму 549 975 руб. 06 коп.;

по договору подряда №051/Л5Г2 от 11.06.2019 г., справка о стоимости выполненных работ (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №5 от 30.10.2020 г. на сумму 189 376 руб. 59 коп.;

по договору подряда №052/Л5Г2 от 11.06.2019 г., справка о стоимости выполненных работ (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) №5 от 30.10.2020 г. на сумму 45 453 руб. 38 коп.» эксперт пришел к выводу, что фактически выполненные работы индивидуальным предпринимателем ФИО2 соответствуют объемам, указанным в подписанных актах о приемке выполненных работ по форме КС-2.

При ответе на Вопрос №2: «Определить, соответствует ли качество работ, отраженных в документах, указанных в вопросе «1», условиям договоров подряда, указанных в вопросе «1», требованиям СНиПов и ГОСТов. Имеет ли результат работ недостатки. Если имеет, каковы эти недостатки, являются ли они явными или скрытыми, существенными и неустранимыми, и стоимость работ по их устранению?» эксперт пришел к выводу, что качество работ, отраженных в документах, указанных в вопросе «1», условиям договоров подряда, указанных в вопросе «1», требованиям СНиПов и ГОСТов соответствует. Обнаруженные в ходе исследования недостатки являются несущественными, устранимыми, не требуют дополнительных затрат на их устранение.

В соответствии с частью 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заключение эксперта является одним из доказательств по делу, не имеет заранее установленной силы, не носит обязательного характера и подлежит исследованию и оценке судом наравне с другими представленными доказательствами.

Экспертное заключение в части выводов ответа на Вопросы 1, 2 исследовано судом на соответствие нормам вышеупомянутого действующего законодательства наряду с другими представленными доказательствами. Сомнений в неверности выданного экспертом заключения судом не выявлено.

То есть, фактически выполненные подрядчиком работы соответствуют объемам, указанным в подписанных актах о приемке выполненных работ по форме КС-2, качество выполненных работ соответствует требованиям действующего законодательства.

Каких-либо документов, свидетельствующих о признании указанных пунктов договоров, недействующими, недействительными в материалы дела не представлено.

Оценив все представленные доказательства в отдельности, относимость, допустимость и их достоверность, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме на основании следующего.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. 

Согласно п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Учитывая, что истцом выполнены, а ответчиком приняты работы, подписаны акты формы КС-2, между сторонами сложились фактические отношения по подряду, в связи с чем к отношениям сторон подлежат применению нормы параграфа 1 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По правилам ст. 431 Гражданского кодекса Российской Федерации для определения содержания договора в случае его неясности подлежит выяснению действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон. 

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определённое действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Статьей 709 ГК РФ предусмотрено, что цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения указываются в договоре подряда. В данном случае стоимость выполненных работ согласована в подписанных обеими сторонами актах выполненных работ формы КС-2 и справках о стоимости выполненных работ формы КС-3. 

Подписание данных документов представителями обеих сторон без замечаний и возражений по объемам и стоимости выполненных работ, их качеству, скрепление печатями истца и ответчика свидетельствуют о выполнении работ подрядчиком (истцом), принятии их результата заказчиком (ответчиком), а также о потребительской ценности результата работ для ответчика и желании последнего ими воспользоваться. 

Пунктом 1 ст. 711, ст. 746 ГК РФ определен порядок оплаты за выполненные подрядные работы. Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом. 

Ответчик принял выполненные истцом работы без замечаний в соответствии со ст.753 ГК РФ с подписанием актов выполненных работ формы КС-2, в связи с чем на основании ст. ст. 711 и 746 ГК РФ у него возникла обязанность по оплате фактически выполненных и принятых работ. Однако ответчик не исполнил в полном объеме свои обязательства по оплате выполненных работ в разумный срок после их принятия, а также в предоставленный ему срок по претензии от 14.03.2022 года.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Суд обращает внимание, что наличие акта приемки работ, подписанного заказчиком, не лишает заказчика права представить суду возражения по объему и стоимости работ. При наличии сведений о предъявлении истцом работ к приемке ответчиком, доказыванию подлежит наличие или отсутствие у заказчика оснований для подписания актов.

Таким образом, обязанность доказывания обоснованности мотивов отказа от приемки выполненных работ возложена законом на заказчика. При непредставлении таких доказательств заказчиком односторонний акт приемки выполненных работ является надлежащим доказательством.

То есть, в отсутствие мотивированных возражений акт сдачи-приемки выполненных работ, по общему правилу, является допустимым доказательством выполнения истцом работ и их принятия заказчиком.

Таким образом, доказательств оплаты задолженности в полном объеме ответчиком в материалы дела не представлено. Обстоятельства, на которые ссылается истец, ответчиком не опровергнуты. 

Принимая во внимание положения ст. 9 АПК РФ, которой установлено осуществление судопроизводства в арбитражном суде на основе состязательности, заинтересованные в исходе дела лица вправе отстаивать свою позицию в споре путем представления доказательств, состязательность предполагает возложение бремени доказывания на сами стороны и снятие, по общему правилу, с арбитражного суда обязанности по сбору доказательств, учитывая обстоятельства дела. Гарантируя каждому лицу, участвующему в деле, право представлять арбитражному суду доказательства ч. 2 ст. 9 АПК РФ одновременно возлагает на названных лиц риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Согласно ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

Учитывая вышеизложенное, требование о взыскании суммы долга за выполненные работы в размере 31 282 546 руб. 15 коп. подлежит удовлетворению.

Истцом также заявлено требование о взыскании неустойки (пени) в размере 3 953 574 руб. 19 коп. за период с 11.10.2021г. по 31.03.2022г.

Согласно пункту 7.2 вышеуказанных договоров подряда расчеты по выполненным и принятым Работам по Договору осуществляются Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания Заказчиком и Подрядчиком актов приемки выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и выполнения подрядчиком обязательства по предоставлению исполнительной документации в соответствии с п. 6.3 Договора.

Предложенный истцом расчет процентов судом проверен, признан верным. Оснований для его переоценки у суда не имеется. Возражений относительно методики и периода начисления процентов, примененных ставок и арифметической верности произведенных вычислений ответчик не представил.

В соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Согласно пунктам 69, 71, 73, 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 года №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ). 

Если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ). 

Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика. 

При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. 

Ответчик расчет неустойки не оспорил, контррасчет не представил, заявил ходатайство об уменьшении неустойки в порядке статьи 333 ГК РФ.

Суд обращает внимание на то, что определенный в договоре размер пени не является чрезмерным, а взыскиваемая общая сумма неустойки по договору образовалась по вине самого ответчика.

Сам по себе размер неустойки не является основанием для его снижения, учитывая правовую природу института неустойки как средства упрощенной компенсации потерь кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением должником своих обязательств с учетом документального подтверждения наличия нарушения обязательства.

В этой связи у суда отсутствуют основания для снижения размера подлежащей взысканию неустойки.

При таких обстоятельствах требование о взыскании неустойки (пени) в размере 3 953 574 руб. 19 коп. за период с 11.10.2021г. по 31.03.2022г подлежит удовлетворению. 

В силу пункта 2 статьи 82 АПК РФ круг и содержание вопросов, по которым проводиться экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы. Отклонение вопросов, представленных лицами, участвующими в деле, суд обязан мотивировать.

Как следует из материалов дела, определением суда от 20.04.2022 года по настоящему делу назначена строительно-техническая экспертиза, производство которой поручено эксперту Общества с ограниченной ответственностью «Аргумент» (

<

...>) ФИО5.

 Расходы на проведение экспертизы возложены на ООО «Альтернатива» (денежные средства в размере 100 000 руб. находятся на депозите суда, что подтверждается платежным поручением №108 от 13.04.2022 года на сумму 100 000 руб.).

Частями 1 и 2 статьи 109 АПК РФ установлено, что денежные суммы, причитающиеся экспертам, специалистам, свидетелям и переводчикам, выплачиваются по выполнении ими своих обязанностей. Денежные суммы, причитающиеся экспертам и свидетелям, выплачиваются с депозитного счета арбитражного суда.

Согласно части 1 статьи 107 АПК РФ экспертам, специалистам, свидетелям и переводчикам возмещаются понесенные ими в связи с явкой в арбитражный суд расходы на проезд, расходы на наем жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).

Из абзаца 2 части 2 указанной статьи следует, что размер вознаграждения эксперту определяется судом по согласованию с лицами, участвующими в деле, и по соглашению с экспертом.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 22 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» до назначения экспертизы по ходатайству или с согласия лиц, участвующих в деле, суд определяет по согласованию с этими лицами и экспертом (экспертным учреждением, организацией) размер вознаграждения, подлежащего выплате за экспертизу, и устанавливает срок, в течение которого соответствующие денежные суммы должны быть внесены на депозитный счет суда лицами, заявившими ходатайство о проведении экспертизы или давшими согласие на ее проведение (часть 1 статьи 108 АПК РФ).

При этом суд вправе назначить экспертизу без внесения денежных средств на депозитный счет суда, при согласии эксперта (экспертного учреждения, организации), учитывая, что оплата экспертизы в таком случае будет производиться в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 110 Кодекса.

В силу изложенного, стоимость судебной экспертизы в сумме 100 000 руб. подлежит перечислению Обществу с ограниченной ответственностью «Аргумент» с депозитного счета арбитражного суда Республики Башкортостан на основании отдельного определения с указанием реквизитов.

Судебные расходы по оплате судебной экспертизы, назначенной судом в сумме 100 000 руб. 00 коп. в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика, поскольку исковые требования удовлетворены в полном объеме.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации и подлежат взысканию в федеральный бюджет ввиду предоставленной отсрочки уплаты госпошлины при подаче иска и удовлетворении исковых требований. 

Руководствуясь статьями  49, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО2  удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Альтернатива" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 319028000054596)  сумму  долга в размере 31 282 546 руб. 15 коп., пени в размере 3 953 574 руб. 19 коп. за период с 11.10.2021г. по 31.03.2022г, расходы по оплате  государственной пошлины в размере 37 261 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Альтернатива" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 161 920 руб.

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его  в  полном  объеме)  через  Арбитражный  суд  Республики Башкортостан.                                   

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.

 

Судья                                   Д.П.Кузнецов