Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-46980/22

03 июля 2024 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

председательствующий судья Н.А. Кондратенко ,при ведении протокола судебного  заседания секретарем с/з Король К.А., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению  АО "УК "НАУКОГРАД" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ФОНД  КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании,  

третье лицо: ООО "СЕРВИС-КОМ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  ГБУ МО "УТНКР" При участии в судебном заседании- согласно протоколу 

Руководствуясь статьями ст. 110,167-170, 176, 211 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. Обязать Фонда капитального ремонта произвести в течении 2-х месяцев с момента 

вступления решения суда в законную силу в многоквартирном доме по адресу: 

<

...>:  

1. привести в соответствии с проектной документацией ПКР-ЖКВ-5/20-КР длину и  высоту стропильной системы односкатной кровли;  

2. заменить доски с корой на обзоле, которые уложены в обрешетки кровли;  3. привести в соответствие с проектной документацией удлинение стропильных балок с  

использованием 8 шпилек резьбовых М10х2000мм din 97; 

4. устранить зазоры между соединениями выводных труб и вентиляционных шахт к  кровле;  

5. установить систему снегозадержания (снеговой барьер) согласно проектной документации; 6. привести в соответствие с проектной документацией элементы ограждающих конструкций на кровли дома в осях 4-5/Г-Е и 4-5/Б-В; 

7. Провести огнебиозащитную обработку стропильной системы замененной в ходе  проведения капитальных работ по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул.  

Жуковского, д. 5. 8. выполнить работы по восстановлению пароизоляционного слоя кровли. 

Взыскать с Фонда капитального ремонта в пользу АО «УК «Наукоград» расходы на  проведение оценки технического состояния и качества выполненных строительномонтажных  работ четырехэтажного жилого дома по адресу: 

<

...> в размере 119 100 руб.; расходы на оплату госпошлины в размере 6. 000  руб.; расходы на юридический услуги в размере 47.000 руб. расходы на проведение  дополнительной экспертизы по адресу; 

<

...> в размере 251 650 руб.  

В остальной части требований отказать. 

Взыскать с АО «УК «НАУКОГРАД» в пользу ООО «СЕРВИС-КОМ» 40 000 руб. за  проведение судебной экспертизы.  

 Судебный акт может быть обжалован в порядке и в сроки, установленные АПК РФ.  

Судья Н.А. Кондратенко