АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443001, г.Самара, ул. Самарская,203Б, тел. (846) 207-55-15

http://www.samara.arbitr.ru, e-mail: info@samara.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №

А55-15999/2023

23 августа 2023 года

город Самара

Арбитражный суд Самарской области

в составе судьи

ФИО1,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску

Публичного акционерного общества "Россети Волга" 

к  Акционерному обществу "Самарская сетевая компания"

о взыскании неустойки в связи с невыполнением мероприятий по технологическому присоединению по договору №1491-000270 за период с 22.05.2020 по 31.03.2022 в сумме 16 644 руб. 47 коп., за период с 02.10.2022 по 30.06.2023 в сумме 6 667 руб. 59 коп. всего: 23 312 руб. 06 коп.

установил:

Истец обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о взыскании с ответчика неустойки за период с 22.05.2020 по 22.05.2023 в размере 26 866,48 руб.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 25.05.2023 заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства в соответствии со статьями 226, 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

В соответствии со  статьей 228 АПК РФ судья рассматривает дело в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов. 

Согласно материалам дела истец и ответчик были надлежащим образом извещены о процессе, что подтверждается почтовыми уведомлениями.

В процессе рассмотрения дела в порядке упрощенного судопроизводства от истца поступило заявление об уточнении исковых требований, согласно которому ПАО «Россети Волга» просит суд взыскать с АО «ССК» неустойку за период с 22.05.2020 по 31.03.2022, и с 02.10.2022 по 22.06.2023 в размере 23 312 руб. 06 коп.

Уточнение иска принято судом в порядке ст. 49 АПК РФ. 

Ответчик представил отзыв на заявление, в котором просит отказать в удовлетворении исковых требований, а в случае удовлетворения исковых требований принять конттрасчет ответчика. 

24.07.2023 арбитражным судом принято решение об удовлетворении исковых требований.

От ответчика поступило ходатайство о составлении мотивированного решения, которое судом удовлетворено.

Как следует из материалов дела, между ОАО «МРСК Волги» (Сетевая организация) и ЗАО «Самарская сетевая компания» (Заявитель) был заключен Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 21.04.2014 № 1491-000270 (далее по тексту -Договор), в соответствии с условиями которого, Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения объекта заявителя: КЛ-6 кВ, ТП 6/0,4 кВ. 

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения потребителей З    АО «ССК» по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 16000кВт, категория надежности 2, класс напряжения в точках присоединения 6 кВ.

29.06.2015 ОАО «МРСК Волги» было переименовано в ПАО «МРСК Волги».

На годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Волги» 29.05.2020 принято решение о переименовании в Публичное акционерное общество «Россети Волга».

04.08.2020 были внесены изменения в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги», в пункте 1.1 статьи Устава слова «Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» заменено на «Публичное акционерное общество «Россети Волга».

Вышеуказанное изменение Общества не является реорганизацией юридического лица и не влечет прекращения или изменения прав и обязанностей по договорным и иным обязательствам Общества.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 17.02.2014 № 29 составляет 20 869,83 руб. с НДС 18 % (на дату заключения договора), а в настоящее время 21 223,56 руб., в том числе НДС 20% (в редакции ДС №1 от 28.06.2022).

Перечень мероприятий по технологическому присоединению и распределению обязанностей между Сторонами по их выполнению определены в Технических условиях (приложение № 1 к Договору, далее также ТУ).

Согласно пункту 5 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны Заявителя и Сетевой организации составляет три года с даты заключения Договора (то есть в срок до 21.04.2017).

Письмом от 16.03.2016 № 76/2-ЦоП ЗАО «ССК» сообщило о полном выполнении мероприятий по договору технологического присоединения № 1491-000270 от 21.04.2014

Однако часть мероприятий, предусмотренных пл. 10.1 - 10.5 ТУ оказались не исполненными, о чем ПАО «Россети Волга» сообщило Заявителю письмом от 29.03.2016 №МР6/121/56.02/2571.

К указанному Договору стороны 28.06.2022 заключили Дополнительное соглашение № 1, в соответствии с которым срок действия ТУ продлен до 31.12.2023.

Заявитель в установленный Договором срок и по настоящее время свои обязательства по выполнению мероприятий по технологическому присоединению не исполнил.

Уведомление об исполнении ТУ от Заявителя в адрес ПАО «Россети Волга» до настоящего времени не поступило.

Актуальность договора для Заявителя не утрачена, что подтверждается письмом Заявителя от 15.12.2022 № 11С-349/72 - ЦОП.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон № 35-ФЗ), технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

«Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861), определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, регламентируют процедуру технологического присоединения, устанавливают существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения.

В соответствии с пунктами 3 и 6 Правил № 861, сетевая организация на основании заявки заявителя обязана заключить с ним договор на технологическое присоединение, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств заявителя мероприятия по технологическому присоединению.

Существенные условия договора указаны в пункте 16 Правил № 861. К ним, в частности, относятся и условия об ответственности сторон за несоблюдение сроков исполнения своих обязательств.

В соответствии со статьями 329, 330 ГК РФ, исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой; неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В связи с неисполнением Заказчиком мероприятий по технологическому присоединению в установленный Договором срок в полном объеме с Заявителя подлежит взысканию неустойка.

В соответствии с нормой Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» в частности абз. 5 ч, 2 ст. 26 введенной Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» потребители услуг по передаче электрической энергии, определяемые правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, несвоевременно и (или) не полностью оплатившие оказанные им услуги по передаче электрической энергии, обязаны уплатить сетевой организации пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" с 01.04.2022 на территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей (за исключением лиц, указанных в пункте 2 данного постановления).

Согласно Указанию Центрального Банка РФ от 11,12.2015 № 3894-У, начиная с 01.01.2016 ставка рефинансирования приравнивается к значению ключевой ставки Банка России.

Ставка Центрального Банка РФ на момент заключения договора составляла 8,25 %.

В силу пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 №497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами, неустойка, пени за просрочку уплаты налога или сбора, а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве).

Согласно уточненному расчету, представленному истцом, сумма неустойка в связи с неисполнением мероприятий по технологическому присоединению за период с 22.05.2020 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 30.06.2023 составляет 23 312,06 рублей.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия № МР6/3/2208 от 24.08.2022 с требованием погашения задолженности. Оплату ответчик не произвел, что послужило основанием для обращения в суд. 

Возражая относительно удовлетворения заявленных требований, ответчик указал, что вина АО «ССК» в нарушении срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению отсутствует, поскольку просрочка была вызвана затягиванием процесса согласования документации со стороны истца, а также ненадлежащим исполнением своих обязательств подрядчиками ответчика. 

Суд отклоняет доводы ответчика, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что АО «ССК» предприняты достаточные меры для исполнения обязательств по договору в предусмотренные сроки. Кроме того, ссылки ответчика на неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами (подрядчиками ответчика) в данном случае являются также необоснованными, поскольку не освобождают и не могут освободить ответчика от предусмотренной законом и договором ответственности за нарушения сроков исполнения своих обязательств по договору технологического присоединения.

Заключив договор с учетом дополнительного соглашения от 28.06.2022 № 1, стороны согласовали порядок его выполнения и размера ответственности при его неисполнении, и, следовательно, ответчик тем самым согласился с его условиями.

Доводы ответчика не опровергают обоснованность исковых требований и не могут являться основанием для отказа в их удовлетворении. Переписка сторон до 20.05.2020 не имеет отношения к заявленному ко взысканию периоду начисления неустойки. В спорный период переписка между лицами, участвующими в деле, о невозможности выполнения работ, не велась. Извещение о приостановлении работ по договору ответчиком в адрес ПАО «Россети Волга» не направлялось, доказательств обратного материалы дела не содержат. 

При таких обстоятельствах, в связи с нарушением ответчиком сроков осуществления мероприятий по техническому присоединению, требования о взыскании договорной неустойки в размере 23 312 руб. 06 коп.., заявлены истцом правомерно, не противоречат Правилам N 861, а также положениям заключенного договора на технологическое присоединение. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине подлежат возмещению с ответчика в пользу истца. 

Руководствуясь ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с акционерного общества "Самарская сетевая компания" ИНН:6367047389 в пользу публичного акционерного общества "Россети Волга" ИНН:6450925977 неустойку 23 312 руб. 06 коп., а также 2 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Мотивированное решение, составленное по заявлению лица, участвующего в деле, может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области. 

Судья

/

ФИО1