Арбитражный суд Республики Карелия

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

                         

РЕШЕНИЕ

Дело №

 А26-9799/2020

г. Петрозаводск

29 июня 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 25 июня 2021 года. 

           Решение в полном объеме изготовлено 29 июня 2021 года.

Судья Арбитражного суда Республики Карелия Киселева О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску Министерства здравоохранения Республики Карелия (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  к обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная механика» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) об обязании устранить недостатки и взыскании неустойки (после уточнений).  

третьи лица ГБУЗ РК "Сортавальская центральная районная больница"; ГБУЗ РК "Межрайонная больница № 1"; ГБУЗ РК "Олонецкая центральная районная больница"; ГБУЗ РК "Республиканская больница им. В.А. Баранова"; ГБУЗ РК "Пряжинская цетральная районная больница"; ГБУЗ РК "Пудожская центральная районная больница"; ГБУЗ РК "Медвежьегорская центральная районная больница"

при участии представителей:

истца -  ФИО2, доверенность от 20.07.2020

ответчика -  не явились извещены надлежащим образом,

третьих лиц, ГБУЗ РК "Сортавальская центральная районная больница"; ГБУЗ РК "Межрайонная больница № 1"; ГБУЗ РК "Олонецкая центральная районная больница"; ГБУЗ РК "Республиканская больница им. В.А. Баранова"; ГБУЗ РК "Пряжинская цетральная районная больница"; ГБУЗ РК "Пудожская центральная районная больница"; ГБУЗ РК "Медвежьегорская центральная районная больница", -  не явились извещены надлежащим образом;

установил:

Министерство здравоохранения Республики Карелия (далее – истец, Министерство) обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная механика» (далее – ответчик, Общество) об обязании устранить недостатки и  взыскании неустойки (после уточнений).

Иск обоснован статьями 309, 330, 332 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 8 статьи 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Ответчик, извещенный надлежащим образом, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, отзыв на иск не представил. В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное разбирательство, дело рассматривается в отсутствие ответчика. 

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержала в полном объеме. 

11.03.2020 от истца поступило ходатайство от 10.03.2021 № 3113/11.2-18/МЗ-и об изменении предмета иска в соответствии со статьёй 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает уточнение иска и рассматривает требования в уточненной редакции. 

Судом в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв в судебном заседании до 25.06.2021 до 12 час. 30 мин. После перерыва ходатайств и заявлений от сторон не поступило, от третьих лиц поступили отзывы на исковое заявление, в которых они просят исковые требования удовлетворить. 

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи, представленные в материалы дела доказательства, изучив и заслушав позиции лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к выводу об  удовлетворении требований истца, исходя из следующего. 

Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Из материалов дела следует, что 01.08.2018 года между Министерством здравоохранения Республики Карелия и обществом с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная механика»  заключен контракт № 0106200000518000167-01311651-01 на поставку, установку, монтаж и оснащение модульного фельдшерско-акушерского пункта, согласно пункту 1.1 которого Общество обязуется осуществить поставку модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов и установку, монтаж и оснащение модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов, в соответствии  с условиями настоящего контракта и спецификации (Приложение № 1).

 Цена контракта  составляет 75 646 700 руб., в т.ч НДС 11 539 327 руб. 10 коп. (пункт 5.6 контракта). 

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок действия настоящего контракта (пункт 5.7 контракта).

Срок действия контракта с момента подписания его Сторонами и до 31.12.2018 года (пункт 6.4 контракта).

Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию (пункт 6.4 контракта)

06.12.2019 между сторонами подписано Соглашение о расторжении контракта (далее по тексту соглашение).

Согласно пункта 2 соглашения, на момент заключения соглашения Поставщиком осуществлена поставка семнадцати модульных фельдшерско-акушерских пунктов их установка, монтаж и оснащение, а Заказчиком оплачено 71 444 105 руб. 48 коп.

Прекращение действия контракта прекращает  действие всех обязательств сторон по контракту, за исключением обязательств поставщика по оплате штрафных санкций за просрочку исполнения и ненадлежащее исполнение контракта, а также по гарантийным обязательствам Поставщика.

Согласно пункта 6.6 договора при Получении Поставщиком уведомления о необходимости проведения работ по техническому обслуживанию в период гарантийного срока эксплуатации, поставщик обязан в течении пяти рабочих дней с момента получения такого уведомления провести работы по техническому обслуживанию. Если совокупный срок гарантийного ремонта превышает 30 рабочих дней, Поставщик обязан произвести замену поставленного оборудования на новое.

В соответствии с условиями пункта 6.8 контракта при наступлении гарантийного случая и необходимости замены Оборудования поставщик обязан в течении 10 календарных  дней  с момента уведомления о несоответствии поставленного оборудования условиям контракта устранить выявленные неисправности и произвести замену оборудования.

В связи с обнаружением недостатков в течении гарантийного срока, в адрес ответчика направлялись уведомления о необходимости прибытия представителя ответчика для составления актов о выявленных недостатках (л.д. 179-185). 

Представитель ответчика для составления актов не явился. Представителями истца с участием представителей 3 лиц были составлены акты обследования зданий фельдшерско-акушерских пунктов.(л.д. 67-78).  Комиссиями выявлены следующие недостатки: 

- в фельдшерско-акушерском пункте (далее - ФАП), расположенном по адресу: поселок Лумиваара, Лахденпохский район, Республика Карелия:

 - деформация полов, напольного покрытия (керамическая плитка) трещины по всей длине коридора, двери при открытии упираются в пол;

- отсутствие жалюзи, кулеров для питьевой воды, исполнительная документация и паспорт на пожарную сигнализацию.

            - в ФАП  по адресу: поселок Терву, Лахденпохский район, Республика Карелия:

 - деформация полов, напольного покрытия (керамическая плитка) трещины по всей длине коридора, двери при открытии упираются в пол;

- отсутствуют жалюзи, кулеры для питьевой воды, исполнительная документации и паспорт на пожарную сигнализацию.

                - в ФАП по адресу: поселок Ласанен, Лахденпохский район, Республика Карелия:

- отсутствие жалюзи, кулеров для питьевой воды, исполнительной документации и паспорта на пожарную сигнализацию.

              - в ФАП по адресу:  поселок Гимолы,  Муезерский муниципальный район, Республика Карелия: 

- ржавчина на входной двери;

- крыльцо, пандус, перила не окрашены;

- плитка по всем помещениям неустойчива (гуляет при ходьбе, затирка отсутствует);

- в зоне ожидания плитка вздыбилась;

- в процедурном кабинете по линолеуму множественные волнообразные переходы и неровное примыкание к полу, соединительный профиль не примыкает к линолеуму.

- перекос дверей в кабинете приема фельдшера, процедурном кабинете, санитарном узле.

     - в ФАП по адресу:  поселок Заречный, Костомукшский городской округ, Республика Карелия: 

- трещины и вздутия на полах из линолеума. Полы вибрируют, прогибаются, соединительные порожки деформировались.

- плитка неустойчива, швы осыпались, затирка отсутствует.

- в ФАП по адресу:  поселок Речная Сельга, Олонецкий район, Республика Карелия: 

- проседание (колебание) полов, отслоение кафельных плиток;

- перекос дверной коробки (при открывании дверное полотно задевает пол) – 3 шт.;

- нарушение герметичности стеклопакетов – 3 шт.;

- неисправна пожарно-охранная сигнализация;

- неисправен электронасос;

- размытие грунта прилегающего участка.

-  в ФАП по адресу:  деревня Устье Тулоксы, Олонецкий район, Республика Карелия: 

- проседание (колебание) полов, отслоение кафельных плиток;

- перекос дверной коробки (при открывании дверное полотно задевает пол) – 3 шт.;

- нарушение герметичности стеклопакетов – 3 шт.

- в ФАП по адресу:  деревня Педасельга, Прионежский район, Республика Карелия

- отсыпка участка просела более чем на 10 см.;

- плитка пола в ожидальне растрескалась, местами вспучилась, двери в кабинеты не открываются;

- стыкоперекрывающие планки линолеума деформировались;

- линолеум в комнате персонала вспучился.

- в ФАП по адресу:  поселок Кудама, Пряжинский район, Республика Карелия:

- в ожидальной и в тамбуре отслоился кафель;

- у стен здания осел грунт и образовалась яма.

- в ФАП по адресу:  станция Падозеро, Пряжинский район, Республика Карелия:

- в ожидальной и в тамбуре отслоился кафель;

- в кабинете приема и в процедурном кабинете вздулся линолеум.

- в ФАП по адресу:  поселок Соддер, Пряжинский район, Республика Карелия:

- сорвано 3 листа металлической кровли;

- в ожидальной отслоилось напольное покрытие (кафель);

- отвалилась потолочная плитка в санитарной комнате и в тамбуре.

- в ФАП по адресу: поселок Чернореченский, Пудожский район, Республика Карелия:

- полы деформированы, имеются вздутия линолеума;

- деформировано напольное покрытие (керамическая плитка), что затрудняет открывание и закрывание дверей;

- в коридоре стены имеют многочисленные выступающие над поверхностью шурупы;

- отсутствуют металлические жалюзи на всех окнах;

- калитка не закрывается на замок.

-  в ФАП по адресу: деревня Великая Нива, Медвежьегорский район, Республика Карелия:

- отсутствие жалюзи на окнах;

- отсутствует дозатор для мыла;

- наружное освещение входных площадок над входными дверьми выполнено в виде герметичных неразборных светодиодных светильников без защитных кожухов и возможности замены ламп;

- освещение подсобных помещений и санузлов выполнено в виде герметичных неразборных светодиодных светильников без возможности замены ламп;

- конвекторы 1,0 кВт отсутствуют; 

- бактерицидные светильники и светильники с автоматически включающейся надпись «Не входить» отсутствуют;

- гипсокартонные потолочные панели типа «Armstrong» имеют косметические дефекты (провисы);

- нарушения целостности полового покрытия из керамогранитной плитки в коридорах и санузле.

-  в ФАП по адресу: деревня Космозеро, Медвежьегорский район, Республика Карелия:

- отсутствие жалюзи на окнах;

- отсутствует дозатор для мыла;

- наружное освещение входных площадок над входными дверьми выполнено в виде герметичных неразборных светодиодных светильников без защитных кожухов и возможности замены ламп;

- освещение подсобных помещений и санузлов выполнено в виде герметичных неразборных светодиодных светильников без возможности замены ламп;

- конвекторы 1,0 кВт отсутствуют; 

- бактерицидные светильники и светильники с автоматически включающейся надпись «Не входить» отсутствуют;

- гипсокартонные потолочные панели типа «Armstrong» имеют косметические дефекты (провисы);

- нарушения целостности полового покрытия из керамогранитной плитки в коридорах и санузле.

В адрес ответчика 26.05.2020 была направленна претензия № 5834/11.2-15 МЗ-и об обнаружении многочисленных недостатков при обследовании ФАПов с приложением комиссионных актов. Претензия осталась без удовлетворения. 

Согласно пункта 8.9 Контракта за каждый факт неисполнения  или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, поставщик выплачивает заказчику штраф в размере 756 467 рублей. Сумма неустойки составляет 10 590 538 руб. 00 коп. ( 756467 руб.x 14 кол-во ФАПов, в которых выявлены недостатки).

26.06.2020 в адрес ответчика направлена претензия № 7263/11.2-15/МЗ-и с требованием оплатить неустойку  в размере 10 590 538 руб. 00 коп. Ответчиком оплата неустойки  не произведена, претензия оставлена без удовлетворения. Неисполнение ответчиком гарантийных обязательств и оплате штрафа послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском. 

В рассматриваемом споре правоотношения сторон регулируются нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, а также положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

 В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ). 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 469 Гражданского кодекса Российской федерации Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи.

 Пунктом 2 статьи 476 Гражданского кодекса Российской федерации, предусмотренно, что в отношении товара, на который продавцом предоставлена гарантия качества, продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

Если на товар установлен гарантийный срок, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока (пункт 3 статьи 477 Гражданского кодекса Российской федерации).

Исходя, из того, что контрактом предусмотрены поставка, монтаж, установка и оснащение модульных фельдшерско-акушерских пунктов в рассматриваемом споре также подлежат применению нормы главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Согласно положениям статей 763, 768 ГК РФ подрядные работы, предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд, к отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной настоящим Кодексом, применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд. При этом как следует из пункта 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении (пункт 2 статьи 720 ГК РФ). 

В силу пункта 1 статьи 715 ГК РФ заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Согласно пункту 1 статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного  срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721). Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы (статья 722 ГК РФ).

 Статья 723 ГК РФ регламентирует ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором. Согласно части 1 статьи 329, части 2 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения, при этом по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Частью 4 статьи 34 Закона № 44-ФЗ установлено, что в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ установлено, что в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (часть 8 названной статьи).  Согласно пункту 1 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Поскольку материалы дела свидетельствуют о нарушении Обществом гарантийных обязательств по контракту, арбитражный суд считает, что истцом правомерно предъявлены требования о взыскании штрафа  за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту. 

  Поскольку, истцом представлены надлежащие доказательства, свидетельствующие о нарушении ответчиком своих обязательств по спорному контракту, суд полагает исковые требования подлежат удовлетворению.

Стороны не воспользовались свои процессуальным правом о назначении экспертизы по делу. 

Расходы по уплате государственной пошлины на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат взысканию с истца. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия

                                  РЕШИЛ:

1. Иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Строительная механика» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в течение тридцати дней с момента вступления  решения в законную силу исполнить гарантийные обязательства по государственному контракту от 1 августа 2018 года №0106200000518000167-0131651-01, а именно устранить следующие недостатки: 

- в фельдшерско-акушерском пункте (далее - ФАП), расположенном по адресу: поселок Лумиваара, Лахденпохский район, Республика Карелия:

 - деформация полов, напольного покрытия (керамическая плитка) трещины по всей длине коридора, двери при открытии упираются в пол;

- отсутствие жалюзи, кулеров для питьевой воды, исполнительная документация и паспорт на пожарную сигнализацию.

            - в ФАП  по адресу: поселок Терву, Лахденпохский район, Республика Карелия:

 - деформация полов, напольного покрытия (керамическая плитка) трещины по всей длине коридора, двери при открытии упираются в пол;

- отсутствуют жалюзи, кулеры для питьевой воды, исполнительная документации и паспорт на пожарную сигнализацию.

                - в ФАП по адресу: поселок Ласанен, Лахденпохский район, Республика Карелия:

- отсутствие жалюзи, кулеров для питьевой воды, исполнительной документации и паспорта на пожарную сигнализацию.

              - в ФАП по адресу:  поселок Гимолы,  Муезерский муниципальный район, Республика Карелия: 

- ржавчина на входной двери;

- крыльцо, пандус, перила не окрашены;

- плитка по всем помещениям неустойчива (гуляет при ходьбе, затирка отсутствует);

- в зоне ожидания плитка вздыбилась;

- в процедурном кабинете по линолеуму множественные волнообразные переходы и неровное примыкание к полу, соединительный профиль не примыкает к линолеуму.

- перекос дверей в кабинете приема фельдшера, процедурном кабинете, санитарном узле.

     - в ФАП по адресу:  поселок Заречный, Костомукшский городской округ, Республика Карелия: 

- трещины и вздутия на полах из линолеума. Полы вибрируют, прогибаются, соединительные порожки деформировались.

- плитка неустойчива, швы осыпались, затирка отсутствует.

- в ФАП по адресу:  поселок Речная Сельга, Олонецкий район, Республика Карелия: 

- проседание (колебание) полов, отслоение кафельных плиток;

- перекос дверной коробки (при открывании дверное полотно задевает пол) – 3 шт.;

- нарушение герметичности стеклопакетов – 3 шт.;

- неисправна пожарно-охранная сигнализация;

- неисправен электронасос;

- размытие грунта прилегающего участка.

-  в ФАП по адресу:  деревня Устье Тулоксы, Олонецкий район, Республика Карелия: 

- проседание (колебание) полов, отслоение кафельных плиток;

- перекос дверной коробки (при открывании дверное полотно задевает пол) – 3 шт.;

- нарушение герметичности стеклопакетов – 3 шт.

- в ФАП по адресу:  деревня Педасельга, Прионежский район, Республика Карелия

- отсыпка участка просела более чем на 10 см.;

- плитка пола в ожидальне растрескалась, местами вспучилась, двери в кабинеты не открываются;

- стыкоперекрывающие планки линолеума деформировались;

- линолеум в комнате персонала вспучился.

- в ФАП по адресу:  поселок Кудама, Пряжинский район, Республика Карелия:

- в ожидальной и в тамбуре отслоился кафель;

- у стен здания осел грунт и образовалась яма.

- в ФАП по адресу:  станция Падозеро, Пряжинский район, Республика Карелия:

- в ожидальной и в тамбуре отслоился кафель;

- в кабинете приема и в процедурном кабинете вздулся линолеум.

- в ФАП по адресу:  поселок Соддер, Пряжинский район, Республика Карелия:

- сорвано 3 листа металлической кровли;

- в ожидальной отслоилось напольное покрытие (кафель);

- отвалилась потолочная плитка в санитарной комнате и в тамбуре.

- в ФАП по адресу: поселок Чернореченский, Пудожский район, Республика Карелия:

- полы деформированы, имеются вздутия линолеума;

- деформировано напольное покрытие (керамическая плитка), что затрудняет открывание и закрывание дверей;

- в коридоре стены имеют многочисленные выступающие над поверхностью шурупы;

- отсутствуют металлические жалюзи на всех окнах;

- калитка не закрывается на замок.

-  в ФАП по адресу: деревня Великая Нива, Медвежьегорский район, Республика Карелия:

- отсутствие жалюзи на окнах;

- отсутствует дозатор для мыла;

- наружное освещение входных площадок над входными дверьми выполнено в виде герметичных неразборных светодиодных светильников без защитных кожухов и возможности замены ламп;

- освещение подсобных помещений и санузлов выполнено в виде герметичных неразборных светодиодных светильников без возможности замены ламп;

- конвекторы 1,0 кВт отсутствуют; 

- бактерицидные светильники и светильники с автоматически включающейся надпись «Не входить» отсутствуют;

- гипсокартонные потолочные панели типа «Armstrong» имеют косметические дефекты (провисы);

- нарушения целостности полового покрытия из керамогранитной плитки в коридорах и санузле.

-  в ФАП по адресу: деревня Космозеро, Медвежьегорский район, Республика Карелия:

- отсутствие жалюзи на окнах;

- отсутствует дозатор для мыла;

- наружное освещение входных площадок над входными дверьми выполнено в виде герметичных неразборных светодиодных светильников без защитных кожухов и возможности замены ламп;

- освещение подсобных помещений и санузлов выполнено в виде герметичных неразборных светодиодных светильников без возможности замены ламп;

- конвекторы 1,0 кВт отсутствуют; 

- бактерицидные светильники и светильники с автоматически включающейся надпись «Не входить» отсутствуют;

- гипсокартонные потолочные панели типа «Armstrong» имеют косметические дефекты (провисы);

- нарушения целостности полового покрытия из керамогранитной плитки в коридорах и санузле.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Строительная механика» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 10 590 538 руб. 00 коп. неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту от 1 августа 2018 года № 0106200000518000167-0131651-01.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Строительная механика» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 75953 руб. госпошлины. 

4. Решение может быть обжаловано:

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, 

<

...>);

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000, 

<

...>) при условии, что данное решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Республики Карелия.

 

Судья

Киселева О.В.