77/2024-155702(1) 

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (р е з о л ю т и в н а я ч а с т ь)

Дело № А13-14937/2023

город Вологда

15 февраля 2024 года

 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области  

р е ш и л :

внести изменения в муниципальный контракт от 31.08.2021 №  01303000311210000330001 на выполнение работ по разработке проектной документации  «Реконструкция системы водоотведения в поселке Вожега Вологодской области»  следующего содержания:  

пункт 1.4 муниципального контракта изложить в новой редакции: «Срок оказания  услуг: с даты заключения муниципального контракта до 01 июня 2024 года».  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня принятия в  Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.  

Судья Л.А. Соколова