ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

№ 09АП-80501/2023

Дело № А40-189931/23

г. Москва

18 декабря 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 11 декабря 2023 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 18 декабря 2023 года 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Тетюка В.И.,

судей: Бодровой Е.В., Семёновой А.Б.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ХИМСТРОЙЭНЕРГО" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 11.10.2023 по делу № А40-189931/23 

по иску ИП ФИО2 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ХИМСТРОЙЭНЕРГО"  

о взыскании 2 161 987,43 руб.

 

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 01.07.2022 

 

УСТАНОВИЛ:

ИП ФИО2 (далее – истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ХИМСТРОЙЭНЕРГО" (далее – ответчик) о взыскании неосновательного обогащения в сумме 2 011 792 руб. 00 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.09.2022 по 21.08.2023 в размере 150 195 руб. 43 коп., а так же с 22.08.2023 по дату фактического исполнения обязательства.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.10.2023 с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ХИМСТРОЙЭНЕРГО" (ИНН: 

<

***>)  в пользу ИП ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРНИП: 08.05.2020) взыскано - задолженность по договору № 01207/07/ХСЭ-ВИП от 07.12.2020 в сумме 2 011 792 (два миллиона одиннадцать тысяч семьсот девяносто два) руб. 00 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с вышеуказанным судебным актом, ООО "НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ХИМСТРОЙЭНЕРГО" обратился с апелляционной жалобой, в которой считает обжалуемый акт незаконным и необоснованным, принятым при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела, при неправильном применении норм материального и процессуального права, просит отменить решение суда и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований. 

В своей жалобе заявитель указывает, что ответчик правомерно отказался от договора.

В судебном заседании апелляционного суда заявитель доводы жалобы поддержал в полном объеме.

Истец в судебное заседание не явился, надлежаще извещен о времени и месте судебного заседания, дело на основании ст. 156 АПК РФ рассмотрено в его отсутствие.

Рассмотрев дело в порядке ст.ст. 266, 268 АПК РФ, заслушав представителя стороны, изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для ее удовлетворения.

Как усматривается из материалов дела, между ООО «НПК Химстройэнерго» (Подрядчик/Ответчик) и Индивидуальным предпринимателем ФИО2 (Субподрядчик/Истец) заключен договор субподряда № 01207/07/ХСЭ-ВИП от 07.12.2020 года (далее по тексту Договор субподряда) согласно которому Субподрядчик принял на себя обязательства по выполнению работ по восстановлению благоустройства территории по титулу: «Реконструкция КВЛ 220кВ « ТЭЦ-23-Елоховская 1,2»».

Вышеназванный договор, по правовым признакам, является договором строительного подряда и регулируется нормами материального права, содержащимися в параграфах 1, 3 главы 37 ГК РФ (ст. ст. 702 - 729, 740 - 757).

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно п. 3.1 договора срок начала выполнения работ установлен с момента подписания сторонами договора. Окончание работ - 30.09.2021. Ориентировочная цена по п.2.1 договора составляет 2.436.675 руб. (НДС не облагается).

Окончательная цена работ по договору определяется, исходя из фактических выполненных субподрядчиком работ, и подтверждается подписанными сторонами актами о сдаче-приемке выполненных работ по образцу, согласованному сторонами в приложении №4 к договору.

В связи с уточнением объемов работ сторонами заключено дополнительное соглашение №1 от 05.05.2021 г.  к договору субподряда по изменению ориентировочной цены договора. С учетом дополнительного соглашения итоговая ориентировочная цена составляет 2.873.077 руб. (НДС не облагается).

Во всем остальном, что не предусмотрено соглашением, стороны руководствуются условиями договора.

Субподрядчик принял на себя все обязательства, обусловленные разделом 4 договора.

Подрядчик воспользовался своим правом согласно п.2.4.1 договора и перечислил на расчетный счет субподрядчика денежные средства в размере 1.303.800 руб. (без НДС), что подтверждается платежным поручением №5726 от 30.04.2021 на сумму 318.000 руб., платежным поручением №7158 от 31.05.2021 на сумму 318.000 руб., платежным поручением №8028 от 15.06.2021 на сумму 371.000 руб., платежным поручением №10906 от 16.08.2021 на сумму 296.800 руб., в качестве авансовых платежей.

Согласно п. 2  ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Факт выполнения между сторонами работ и их частичной оплаты установлен вступившим в законную силу Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда   от 06.07.2023 г. по делу №А А40-299938/22 (вступило в законную силу 06.07.2023 г.)

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации установлена обязанность заказчика уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с положениями статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В силу статьи 717 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

Ответчик письмом от 11.08.2022 за исх. №01-04/ХСЭ/1832 отказался от исполнения Договора субподряда.

Учитывая, отказ Ответчика от договора, а также обязанность Ответчика, в силу положений  ст. 717 ГК оплатить фактически выполненные до момента расторжения договора работы. Для фиксации выполненных по договору обязательств Истец к 01.09.2022 вызвал Ответчика на приемку работ и к уведомлению приложил акты сдачи-приемки работ в 4 экз. Ответчик получил указанное письмо 31.08.2022 г., однако на приемку работ не явился.

В письме № 01-04/ХСЭ/2059 от 13.09.2022 Ответчик в качестве обоснования отказа участия в приемке указывает на факт непредставления акта сдачи-приемки работ, который фактически был предоставлен, но при этом, не выражает замечаний к самим работам, указанным в акте.

30.09.2022 Истец направил повторный вызов на приемку с приложением актов сдачи-приемки работ, для сальдирования обязательств по договору (передано нарочно 30.09.2022, вх. № истца 1433/01-03/ХСЭ от 30.09.2022). Дата приемки была назначена на 07.10.2022 г.

Повторный вызов  также оставлен Ответчиком без ответа, на приемку Ответчик, надлежащим образом извещенный неоднократно, не явился, акт или мотивированный отказ подписания акта не предоставил. Ввиду чего, окончательный акт сдачи приемки работ от 07.10.2022 был составлен Истцом в одностороннем порядке, в соответствии с п. 4 ст. 753 ГК РФ (при отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной).

Факт выполнения работ по договору установлен вступившим в законную силу Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда   от 06.07.2023 г. по делу №А А40-299938/22 (вступило в законную силу 06.07.2023 г.) «Суд апелляционной инстанции отмечает, что истец неоднократно вызывался на приемку выполненных по договору, в результате неявки на приемку работ ответчиком составлен односторонний акт от 07.10.2022 г., в соответствии с положениями ст. 753 ГК РФ. Акт о приемке выполненных работ был направлен в адрес истца дважды (в августе и сентябре 2022 г.)

Мотивированного отказа от приемки работ и обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата работ для указанной в договоре подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком, истец не предоставил».

Факт наличия задолженности Ответчика в пользу истца в размере 2 011 792  р. также установлен вступившим в законную силу Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда   от 06.07.2023 г. по делу № А40-299938/22 (вступило в законную силу 06.07.2023) «Стоимость выполненных ответчиком работ, которые не оплачены истцом, и зафиксированы соответствующим односторонним актом, замечаний по которому не поступало, составляет сумму в размере 3.286.972 руб., что превышает сумму авансового платежа».

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ч. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Из статей 133, части 1 статьи 168, пункта 3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что суд не связан правовыми основаниями заявленного требования.

Обязанность по определению правоотношений, из которых возник спор, и норм права, подлежащих применению при разрешении дела, возлагается на суд.

В соответствии с пунктом 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление №25) по смыслу части 1 статьи 168 АПК РФ суд определяет, какие нормы права следует применить к установленным обстоятельствам, а также указывает мотивы, по которым не применил нормы права, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Согласно представленному в материалы дела договору № 01207/07/ХСЭ-ВИП от 07.12.2020 истец по отношения к ответчику является подрядчиком, а ответчик заказчиком, предметом иска является взыскание задолженности за выполненные истцом работы в размере 2 011 792 руб.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 2 информационного письма N 51, пункте 7 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.02.2014 N 165 "Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными", правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.09.2011 N 1302/11, следует, что отсутствие самостоятельного договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ, заключенного в требуемой законом форме, не освобождает заказчика от оплаты фактически выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ, имеющих для последнего потребительскую ценность.

Суд квалифицировал данный иск в качестве взыскания долга по расторгнутому договору подряда, расторжение договора не освобождает заказчика от обязанности оплатить принятые им работы по правилам гл. 37 ГК РФ.

Исходя из вышеизложенного следует, что истцом фактически заявлено требование о взыскании задолженности по договору № 01207/07/ХСЭ-ВИП от 07.12.2020 в размере 2 011 792 руб., в связи с чем, суд квалифицировал исковые требования как о взыскании задолженности).

Согласно пункту 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Из положений статей 702, 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате работ по договору является совокупность следующих обстоятельств: выполнение работ и передача их результата заказчику.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате обусловленных договором работ является сдача работ заказчику путем подписания акта выполненных работ (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» (далее - информационное письмо №51).

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

С учетом изложенного, истец доказал факт наличия у ответчика задолженности представленными в материалы дела доказательствами, требование о взыскании задолженности по договору № 01207/07/ХСЭ-ВИП от 07.12.2020 в сумме 2 011 792 руб. 00 коп. является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Как следует из разъяснений пункта 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35 "О последствиях расторжения договора", если к моменту расторжения договора, исполняемого по частям, поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в том числе по ведению чужого дела (по договору комиссии, доверительного управления и т.п.), не были оплачены, то взыскание задолженности осуществляется согласно условиям расторгнутого договора и положениям закона, регулирующим соответствующие обязательства.

При этом сторона сохраняет право на взыскание долга на условиях, установленных договором или законом, регулирующим соответствующие договорные обязательства, а также права, возникшие из обеспечительных сделок, равно как и право требовать возмещения убытков и взыскания неустойки по день фактического исполнения обязательства (пункты 3 и 4 статьи 425 ГК РФ). Таким образом, расторжение договора, в том числе по мотиву нарушения сроков выполнения работ, не влечет за собой освобождение заказчика от обязательства оплатить выполненные работы.

Истцом заявлено требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.09.2022 по 21.08.2023 в размере 150 195 руб. 43 коп., а также с 22.08.2023 по дату фактического исполнения обязательства.

Согласно положениям пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Федеральным законом от 08.03.2015 г. N 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации" положения статьи 395 ГК РФ дополнены пунктом 4, который с 01.06.2015 г. устанавливает, что в случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей проценты, не подлежат взысканию.

Исходя из п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", если законом или соглашением сторон установлена неустойка за нарушение денежного обязательства, на которую распространяется правило абзаца первого пункта 1 статьи 394 ГК РФ, то положения пункта 1 статьи 395 ГК РФ не применяются. В этом случае взысканию подлежит неустойка, установленная законом или соглашением сторон, а не проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ (пункт 4 статьи 395 ГК РФ).

Согласно п. 8.6 Договора субподрядчик за нарушение подрядчиком сроков платежей, установленных договором, имеет право начислить и взыскать с подрядчика неустойку в размере 0,01% от подлежащей оплате денежной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от цены договора, указанной в п.2.1 Договора.

Таким образом, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств между сторонами возможно применение только договорной ответственности.

Учитывая изложенное, принимая во внимание тот факт, что Договором предусмотрена ответственность Заказчика за просрочку оплаты выполненных работ, требование о взыскании процентов является необоснованным и не подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

По существу, доводы апелляционной жалобы выражают несогласие ответчика с оценкой данной судом обстоятельствам дела и доказательствам, что не опровергает правильность выводов суда и в силу положений главы 34 АПК РФ не может быть положено в основу отмены судебного акта.

Иная оценка ответчиком установленных судом фактов, равно как иное толкование им нормативных актов, не свидетельствуют о наличии допущенной при рассмотрении дела судебной ошибке.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным в материалы дела доказательствам, и вопреки доводам жалобы, основаны на правильном применении судом норм материального и процессуального права, отсутствуют основания для отмены либо изменения принятого по делу решения.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 11.10.2023 по делу № А40-189931/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Взыскать с ООО "НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ХИМСТРОЙЭНЕРГО" в доход федерального бюджета  государственную пошлину по апелляционной жалобе в сумме 3000 рублей.

            Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа. 

 

Председательствующий судья                                                            В.И. Тетюк  

 

Судьи                                                                                                        Е.В. Бодрова 

 

                                                                                                                             А.Б. Семёнова  

 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.