АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Краснодар        дело № А32-32057/2023

«23» мая 2024 года 

резолютивная часть судебного акта объявлена 06.05.2024 года

полный текст судебного акта изготовлен 23.05.2024 года

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Миргородской О.П., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Таланиной А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО СК «ЛидерГрупп» (ИНН 

<

***>, г. Краснодар), к ООО «Строй-Блок» (ИНН 

<

***>, г. Самара), 

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО1, представитель по доверенности,

от ответчика: не явился, извещен,

У С Т А Н О В И Л:

ООО СК «ЛидерГрупп» (далее – истец) обратилось в суд с иском к ООО «Строй-Блок» (далее – ответчик) о взыскании договорной неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда №166859-БЕР-ЛС от 30.12.2022 в размере 1 060 000 (Один миллион шестьдесят тысяч) рублей за период с 01.02.2023 по 18.05.2023.

В судебном заседании представитель истца требование о взыскании договорной неустойки поддержал, просил его удовлетворить. 

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса РФ в судебном заседании 06.05.2024 объявлен перерыв до 06.05.2024 до 15 часов 00 минут., после перерыва стороны явку представителей не обеспечили. 

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующее. 

Между обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЛидерГрупп» (далее – ООО СК «ЛидерГрупп») и обществом с ограниченной ответственностью «Строй-Блок» (ООО «Строй-Блок») заключен договор подряда №166859-БЕР-ЛС от 30.12.2022 года (далее - Договор).

Согласно пункту 2.1. Договора Генподрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы, в соответствии с Приложениями 1-4 по строительству берегоукрепительных сооружений на Объекте: «Мостовой переход через реку Кудепста, берегоукрепление береговой линии и благоустройство прилегающей территории русла р. Кудепста в Адлерском и Хостинском внутригородских районах города Сочи объекта: «Жилой комплекс со встроенными помещениями социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры по ул. Искры в мкр. Кудепста, участок № 1, Адлерского района г. Сочи. Корректировка «этап 1,2,3,4» (далее - Объект).

В соответствии с п.5.1. Договора подряда, работы, указанные в п.2.1. Договора, должны быть полностью выполнены и сданы Генподрядчику в срок с 02.01.2023 до 24.03.2023. Этапы выполнения работ определяются в Графике выполнения строительно- монтажных работ на объекте, являющимся Приложением №3 к настоящему Договору. График выполнения работ на объекте должен быть составлен подрядчиком по форме №16 к настоящему Договору. 

Согласно Приложению № 3 к Договору подряда (График выполнения строительно – монтажных работ) на четвертой неделе января 2023 года должны быть завершены, в том числе, этапы работ с 6-го по 10-й: 

6) срезка плодородного слоя бульдозером слоем 10 см – площадью 1423,3 кв.м.;

7) погрузка на самосвалы и вывоз растительного грунта на расстояние до 1 км – объемом 142,33 куб.м.;

8) разработка грунта экскаватором (траншея, колодцы, камера) III-IV группа грунтов – объёмом 21 345,59 куб.м.; 

9) погрузка на самосвалы и вывоз лишнего грунта с переработкой силами Подрядчика – объёмом 11 429,92 куб.м.;

10) погрузка на самосвалы и вывоз лишнего грунта на расстояние до 1 км – объёмом 9 717,53 куб.м.

Согласно п. 3.1. и Приложения №1 Договора подряда, договорная цена, подлежащая оплате Подрядчику, составляет 67 064 060,64 рублей.

В нарушение вышеуказанных условий договора согласованные этапы работ Ответчиком своевременно не выполнены, сданы Истцу только частично по Акту приемки выполненных работ от 18.05.2023 в следующих объемах:

- разработка грунта экскаватором (траншея, колодцы, камера) III-IV группа грунтов в объёме 3 737,4 куб.м. (из 21 345,59 куб.м.);

-  погрузка на самосвалы и вывоз лишнего грунта на расстояние до 1 км в объёме 3 737,4 куб.м. (из 9 717,53 куб.м.).

В соответствии с пунктом 24.1.1. Договора подряда в случае задержки Подрядчиком срока завершения работ или этапа работ по Объекту Генподрядчик вправе удержать из причитающихся Подрядчику средств или взыскать с Подрядчика штрафную неустойку, в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, за каждый день нарушения сроков исполнения обязательства.

Полагая, что указанные нарушения сроков работ являются основанием для взыскания с Ответчика неустойки, Истец обратился в арбитражный суд с требованием о взыскании с Ответчика договорной неустойки в размере 1 060 000 рублей за период с 01.02.2023 по 18.05.2023.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам.

Правоотношения сторон в рамках настоящего дела регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс).

В соответствии с частью 1 статьи 702 Гражданского кодекса, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В силу статьи 740 Гражданского кодекса, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы; по согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В силу статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 Кодекса. 

Согласно пункту 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

В соответствии с положениями статьи 309 Гражданского кодекса, обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового обороты или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с положениями статьи 310 Гражданского кодекса, недопустим односторонний отказ от исполнения обязательства.

Пунктом 5.1. Договора подряда №166859-БЕР-ЛС от 30.12.2022 стороны установили, что, работы, указанные в п.2.1. Договора, должны быть полностью выполнены и сданы Генподрядчику в срок с 02.01.2023 до 24.03.2023. Этапы выполнения работ определяются в Графике выполнения строительно- монтажных работ, являющимся Приложением №3 к Договору. 

Согласно Приложению № 3 к Договору подряда (График выполнения строительно – монтажных работ) на четвертой неделе января 2023 года должны быть завершены, в том числе, этапы работ с 6-го по 10-й: 

6) срезка плодородного слоя бульдозером слоем 10 см – площадью 1423,3 кв.м.;

7) погрузка на самосвалы и вывоз растительного грунта на расстояние до 1 км – объемом 142,33 куб.м.;

8) разработка грунта экскаватором (траншея, колодцы, камера) III-IV группа грунтов – объёмом 21 345,59 куб.м.; 

9) погрузка на самосвалы и вывоз лишнего грунта с переработкой силами Подрядчика – объёмом 11 429,92 куб.м.;

10) погрузка на самосвалы и вывоз лишнего грунта на расстояние до 1 км – объёмом 9 717,53 куб.м.

Ответчиком принятые обязательства своевременно не выполнены, результат выполненных работ сдан Истцу только частично по Акту приемки выполненных работ от 18.05.2023 и с нарушением сроков, установленных в Приложении № 3 к Договору подряда (График выполнения строительно – монтажных работ).

Доказательств выполнения работ в полном объеме как в спорный период с 01.02.2023 по 18.05.2023, так и в последующий период Ответчиком не представлены.

В соответствии со статьей 719 Гражданского кодекса подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328 Гражданского кодекса).

Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок (пункт 1 статьи 716 Гражданского кодекса).

Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 статьи 716 Гражданского кодекса, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства (пункт 2 статьи 716 Гражданского кодекса).

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Доказательств наличия обстоятельств, при которых подрядчик может быть освобожден от ответственности за нарушение срока работ, в материалы дела Ответчиком также не представлено.

В соответствии с положениями статьи 12 Гражданского кодекса, неустойка является одним из способов защиты нарушенного права.

В соответствии с частью 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

На основании статьи 329 Гражданского кодекса исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (статья 330 Кодекса).

В соответствии с пунктом 24.1.1. Договора подряда в случае задержки Подрядчиком срока завершения работ или этапа работ по Объекту Генподрядчик вправе удержать из причитающихся Подрядчику средств или взыскать с Подрядчика штрафную неустойку, в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, за каждый день нарушения сроков исполнения обязательства.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки за период с 01.02.2023 до 18.05.2023 (106 дней), в размере 1 060 000 руб., исходя из размера неустойки за один день просрочки в размере 10 000 руб., умноженной на количество дней просрочки.

Суд соглашается с расчетом суммы неустойки, приведенным Истцом в тексте искового заявления, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Оплату государственной пошлины следует возложить на ответчика в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь ст. ст. 110, 167 - 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО «Строй-Блок» (ИНН 

<

***>, г. Самара) в пользу ООО «СК «ЛидерГрупп» (ИНН 

<

***>) г. Краснодар 1 060 000 (Один миллион шестьдесят тысяч) рублей неустойки за период с 01.02.2023 по 18.05.2023, а также 23 600 (Двадцать три тысячи шестьсот) рублей в порядке возмещения судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в порядке апелляционного производства и в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения, через принявший решение в первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края. 

Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке, если было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Судья                                                                                               О.П. Миргородская