АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 

E-mail: info@crimea.arbitr.ru http://www.crimea.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А83-16410/2024

07 октября 2025 года

город Симферополь

 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить полностью. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «СК Консоль-Строй ЛТД» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 15 (пятнадцати) дней с момента вступления в законную силу судебного акта устранить за свой счет недостатки (дефекты) работ на объекте «Строительство образовательной школы в г. Судак», расположенном по адресу: пер. Пихтовый, д. 1, г. Судак, Республика Крым, путем выполнения следующих работ:  

1. Привести в соответствии с проектом расположение кабеля электроснабжения и электроосвещения (т.е. расположить кабель в пределах ограждения территории) - 100 мп.  

2. Восстановить целостность оптоволоконного кабеля с последующим подключением камер наружного видеонаблюдения - 2 шт.  

3. Выполнить герметизацию стыков в районе подшивки кровли спортзала. 

4. Устранить протечку пожарных резервуаров в количестве 2 шт.  

5. Устранить просадку тротуара на территории вокруг школы вдоль осей «Э» и «41» в объеме 160 кв.м.  

Взыскать с общество с ограниченной ответственностью «СК Консоль-Строй ЛТД» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объёме).  

Судья Е.А. Дергачев