Дело № А79-8328/2020

17 апреля 2024 года

г. Владимир

 

Резолютивная часть постановления объявлена  11.04.2024.

Постановление

 изготовлено в полном объеме  17.04.2024.

 

Первый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Тарасовой Т.И., 

судей Насоновой Н.А., Семеновой М.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Казаковой Е.Ю., 

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания» на решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 29.03.2022 по делу № А79-8328/2020 по иску общества с ограниченной ответственностью «Жил-Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 453838, 

<

...>, к обществу с ограниченной ответственностью «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 428000, 

<

...>, эт/пом 2/14, о взыскании 122439970 руб. 60 коп.

 

В судебном заседании принимали участие представители:

от истца - общества с ограниченной ответственностью «Жил-Строй» - ФИО1 по доверенности от 14.12.2023;

от ответчика (заявителя) – общества с ограниченной ответственностью                     «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания» - ФИО2 по доверенности от 08.12.2023 (сроком действия по 30.06.2024);

 эксперт  ФИО3

 

Общество с ограниченной ответственностью "Жил-Строй" (далее – ООО "Жил-Строй", истец) обратилось в арбитражный суд с иском, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ (т.6 л.д. 111117), к обществу с ограниченной ответственностью "Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания" (далее – ООО "Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания", ответчик) о взыскании 122439970 руб. 60 коп., в том числе:

1)  55 292 462 руб. 21 коп. долга по договору №20180822-01 от 22.08.2018 на проведение культуротехнических работ на объекте "Сычуань - Чувашия агрокомплекс", кадастровые номера №21:18:070101:126, 127, 132, 133, 134, 136, 138, 139, 140; 21:18:000000:7963;

2)  4 821 502 руб. 70 коп. штрафа по договору №20180822-01 от 22.08.2018 за период с 01.07.2019 по 18.11.2021 и по день фактического исполнения обязательств;

3)  57 327 083 руб. 97 коп. долга по договору №20181023-01 от 23.10.2018 на проведение культуротехнических работ на объекте "Сычуань - Чувашия агрокомплекс", кадастровые номера №21:18:060301:490, 491, 492, 493, 494, 495, 496; 21:18:000000:7703, общей площадью 1250,70 га;

4) 4 998 921 руб. 72 коп. штрафа по договору №20180822-01 от 22.08.2018 за период с 01.07.2019 по 18.11.2021 и по день фактического исполнения обязательств.

Решением  от 29.03.2022 суд первой инстанции исковые требования удовлетворил частично: взыскал с ООО "Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания" в пользу ООО "Жил-Строй" 93 440 189 руб. 77 коп. долга, 7 662 095 руб. 56 коп. штрафа за период с 24.12.2019 по 22.03.2022, 850 574 руб. расходов по экспертизе, указал, что с 23.03.2022 начисление штрафа производить по день фактической оплаты долга исходя из 0,01 процента от неоплаченной суммы за каждый день просрочки (но не более 99 037 865 руб. 57 коп. - 35 процентов от стоимости договоров); в удовлетворении остальной части требований отказал.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания" обратилось в Первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить на основании статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Оспаривая законность принятого судебного акта, заявитель указывает следующее: заключение эксперта необоснованно (расчет произведен в рыночных, а не договорных ценах),  требовалось назначение повторной экспертизы; договорами предусмотрена оплата только после выполнения работы по каждому участку земли, в то время как работы не были завершены ни по одному  из участков;  суд взыскал по договору № 20180822-01 стоимость свыше установленной договором твердой цены; суд в нарушение условий договора взыскал сумму гарантийных удержаний, которая подлежит возврату только после предоставления банковских гарантий; обязанность по оплате работ не наступила, следовательно, начисление штрафов за нарушение сроков оплаты неправомерно; суд вопрос о правомерности приостановления работ подрядчиком не исследовал; правовых оснований для приостановления выполнения работ не имелось; судом нарушены нормы материального права.

Определением от 01.09.2022 апелляционным судом назначена повторная судебная экспертиза, проведение которой поручено автономной некоммерческой организации «Судебные Эксперты и Оценщики».

19.12.2023 в апелляционный суд поступило заключение эксперта.

 Определением апелляционного суда от 21.12.2023 производство по делу возобновлено.

В суде апелляционной инстанции заявитель поддержал доводы апелляционной жалобы, с учетом заключения экспертов просил решение отменить, в удовлетворении иска отказать в полном объеме.

Конкурсный управляющий ООО "Жил-Строй"  возразил против доводов апелляционной жалобы, заявил ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица АО «Россельхозбанк», являющегося мажоритарным кредитором в рамках дела о банкротстве №А07-32642/2021 ООО "Жил-Строй".

Рассмотрев ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица АО «Россельхозбанк», апелляционный суд отказал в его удовлетворении   на основании части 3 статьи 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  При этом суд учитывает, что      судебным актом права и обязанности данного лица не затрагиваются.

         Законность и обоснованность принятого по делу решения проверены апелляционным судом в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Повторно рассмотрев дело, обсудив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, 22.08.2018  между ООО «Жил - Строй» (далее - Генеральный Подрядчик, Подрядчик, Исполнитель) и ООО «Сычуань-Чувашия Агропромышленная Торговая Компания» ( далее - Заказчик) был заключен договор №20180822-01 по произведению культуротехнических работ (т. 1 л.д. 41-53).

Согласно положениям главы 1 договора №20180822-01 от 22.08.2018 Генеральный Подрядчик обязался в установленные договором сроки выполнить культуротехнические и подготовительные работы для посадки кормовых трав по объекту: «Сычуань - Чувашия агрокомплекс», кадастровые номера №21:18:070101:126, 127, 132, 133, 134, 136, 138, 139, 140; 21:18:000000:7963, общей площадью 1245,9 га (приложение №3), расположенного по адресу: Республика Чувашия, Порецкий район, в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией (приложения №1, 2 к договору), согласованной Заказчиком, действующими нормами и правилами, а Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их в установленном договором порядке.

В соответствии с пунктом 2.1 договора календарные сроки выполнения работ: начало работ - с момента заключения Договора и получения авансового платежа, окончание работ - в течение 120 дней с момента начала Работ. Ежемесячный объем выполнения работы не менее 350 гектаров. При возникновении непредвиденных обстоятельств, в т.ч. климатических, при которых невозможно выполнять работы по договору, срок окончания работ по согласованию сторон, может быть изменен.

Цена договора предварительно определена объектным сметным расчетом без учета НДС и составляет 70136612.21 рублей (пункт 3.1).

Пунктом 3.2 договора установлено, что оплата выполненных работ производится после представления и подписания сторонами актов приемки выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), представленного Генеральным подрядчиком счёта-фактуры, оформленного в установленном порядке в течение 14 дней. 10% удерживается из каждого платежа по итогам выполнения каждого этапа работы до окончательного расчета в соответствии с п.3.3 Договора.

Согласно пункту 3.3 договора окончательный расчет в размере 10% от цены договора производится заказчиком в течение 14 дней после полного завершения работ при наличии акта приемки законченного строительством объекта, включая устранение выявленных дефектов.

18.11.2019 было заключено дополнительное соглашение №2019116-02 к договору №20180822-01 (далее по тексту дополнительное соглашение №201911602) по произведению культуротехнических работ, по условиям которого Генеральный подрядчик обязуется выполнить все необходимые работы в соответствии требованиями технического задания, утвержденного Сторонами, указанные в Приложении 2 к Договору, в целях подготовки участков земли для посадки посева до 30-го апреля 2020 г., не учитывая условия погоды и случаи, указанные в п.2.2 Договора (т.1 л.д. 54-55).

Общая цена договора №20180822-01 определена в дополнительном соглашении №2019116-02 в сумме 92307685,41 рублей без учета НДС.

Согласно пункту 3 дополнительного соглашения в обеспечение исполнения договора ответчик предоставляет истцу банковскую гарантию в течение 10 дней на исполнение договора в размере 20 процентов от общей стоимости договора, что составляет 18 461 537 рублей 08 копеек. Банковская гарантия должна содержать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта.

В пункте 4 дополнительного соглашения определено, что ответчик обязуется уплатить неустойку и возместить убытки в соответствии с договором в сумме 20 307 690 рублей 79 копеек.

При этом стороны с учетом пункта 3 соглашения согласовали отмену гарантийных удержаний за выполненные объемы работ, изложенных в договоре от 22.08.2018 № 20180822-01 (пункт 5 соглашения).

В рамках дела №А79-588/2020 ООО «Сычуань - Чувашия агропромышленная торговая компания» обратилось в Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии к ООО «Жил-Строй» с исковым заявлением о взыскании 20 307 690 рублей 79 копеек неустойки за несвоевременное выполнение обязательств по договору по произведению культуротехнических работ от 22.08.2018 № 20180822 и предоставлении банковской гарантии на сумму 18 461 537 рублей 08 копеек в рамках дополнительного соглашения от 18.11.2019 № 2019116-02. ООО «Жил-Строй» предъявило в суд встречный иск к Компании о расторжении дополнительного соглашения от 18.11.2019 № 2019116-02 к договору от 22.08.2018 № 20180822-01. Решением от 28.07.2020 суд исковые требования удовлетворил частично: обязал Общество предоставить Компании банковскую гарантию на 18 461 537 рублей 08 копеек для обеспечения обязательств в рамках дополнительного соглашения от 18.11.2019 № 2019116-02 по договору подряда от 22.08.2018 № 20180822-01 на проведение культуротехнических работ, в оставшейся части первоначального иска о взыскании 20 307 690 рублей 79 копеек штрафной неустойки и в удовлетворении встречного иска отказал. Первый арбитражный апелляционный суд постановлением от 02.10.2020 оставил решение суда первой инстанции без изменения.

По настоящему делу истец указывает, что выполнил работы, предусмотренные Договором №20180822-01, на общую сумму 154 284 674,78 руб. Ответчиком произведена частичная оплата за выполненные работы в размере 95 456 979,93 руб. По данным истца, на момент подачи иска за ответчиком образовалась задолженность в размере 58 827 694,85 руб. с учетом НДС.

23.10.2018  между ООО «Жил - Строй» ( далее - Генеральный Подрядчик, Подрядчик, Исполнитель) и ООО «Сычуань-Чувашия Агропромышленная Торговая Компания» (далее - Заказчик) был заключен договор №20181023-01 на проведение культуротехнических работ (т.2 л.д. 183-200).

Согласно положениям главы 1 договора №20181023-01 от 23.10.2018 Генеральный Подрядчик обязался в установленные договором сроки выполнить полевые, сельскохозяйственные культуротехнические и подготовительные работы для посадки кормовых трав по объекту: «Сычуань - Чувашия агрокомплекс», кадастровые номера №21:18:060301:490, 491, 492, 493, 494, 495, 496; 21:18:000000:7703, общей площадью 1250,70 га, расположенного по адресу: Республика Чувашия, Порецкий район, в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией (приложения №1, 2 к договору), согласованной Заказчиком, действующими нормами и правилами, а Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их в установленном договором порядке.

В соответствии с пунктом 2.1 договора календарные сроки выполнения работ: начало работ - с момента заключения Договора и получения авансового платежа, окончание работ - до 1 июня 2019 г., но до 20 декабря 2018 г. Генеральный подрядчик обязательно выполнит 2 прохода дискования почвы площадью не менее 700 га. При возникновении непредвиденных обстоятельств, в т.ч. климатических, при которых невозможно выполнять работы по договору, срок окончания работ по согласованию сторон может быть изменен.

Цена договора предварительно определена объектным сметным расчетом без учета НДС и составляет 70136612.21 рублей (пункт 3.1).

Пунктом 3.2 договора установлено, что оплата выполненных работ производится после представления и подписания сторонами актов приемки выполненных работ (унифицированная форма № КС -2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), представленного Генеральным подрядчиком счёта-фактуры, оформленного в установленном порядке в течение 14 дней. 10% удерживается из каждого платежа по итогам выполнения каждого этапа работы до окончательного расчета в соответствии с п.3.3 Договора.

Согласно пункту 3.3 договора окончательный расчет в размере 10% от цены договора производится заказчиком в течение 14 дней после полного завершения работ при наличии акта приемки законченного строительством объекта, включая устранение выявленных дефектов.

В силу пунктов 3.4 договора в течение пяти дней после подписания сторонами настоящего договора истец оплачивает ответчику авансовый платеж в размере 20 процентов от стоимости работ, указанной в пункте 3.1 договора, для приобретения оборудования и материалов и доставки техники на площадку производства работ. Оплата по представляемым ежемесячно актам выполненных работ, справкам о стоимости выполненных работ будет производиться в размере 70 процентов от стоимости выполненных работ, указанных в платежных документах. Остальные 10 процентов оплачиваются в течение 14 дней после приемки полного завершения работ по договору.

18.11.2019  сторонами было заключено дополнительное соглашение№20191116-01 к договору №20181023-01 по произведению культуротехнических работ, в соответствии с которым Генеральный подрядчик обязуется выполнить все необходимые работы в соответствии с требованиями технического задания, утвержденного Сторонами, указанные в Приложении 2 к Договору, в целях подготовки участков земли для посадки посева до 30-го апреля 2020 г., не учитывая условия погоды и случаи, указанные в п.2.2 Договора.

Общая стоимость Работ по договору №20181023-01 и дополнительному соглашению №20191116-01 составила 190 657 644,79 руб., без учета НДС.

В пункте 3 дополнительного соглашения предусмотрена обязанность генподрядчика выполнить все необходимые работы в соответствии с требованиями технического задания, утвержденного сторонами, указанные в приложении 2 к договору, в целях подготовки участков земли для посадки посева до 30.04.2020, не учитывая условия погоды и случаи, указанные в пункте 2.2 договора.

Согласно пункту 4 соглашения  в обеспечение исполнения договора генподрядчик предоставляет заказчику банковскую гарантию в течение 10 дней на исполнение договора в размере 20 процентов от его общей стоимости, что составляет 38 131 528 рублей 95 копеек. Банковская гарантия должна содержать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта.

Генподрядчик обязуется выплатить неустойку и возмещение убытков в соответствии с пунктами 12.3 и 12.4 договора от 23.10.2018 № 20181023-01 в сумме 34 318 376 рублей 06 копеек (пункт 5).

В пункте 6 стороны с учетом пункта 4 соглашения отменили гарантийные удержания за выполненные объемы работ.

В рамках дела №А79-589/2020 ООО «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания» обратилось в Арбитражный суд Чувашской Республики -Чувашии с иском о взыскании с ООО «Жил-Строй» 34 318 376 рублей 06 копеек неустойки, начисленной в связи с ненадлежащим исполнением генподрядчиком договора подряда от 23.10.2018 № 20181023-01 с учетом дополнительного соглашения от 18.11.2019 № 20191116-01, понуждении предоставить банковскую гарантию на сумму 38 131 528 рублей 95 копеек. ООО «Жил-Строй» заявило встречный иск к Компании о расторжении дополнительного соглашения от 18.11.2019 № 20191116-01 в связи с неисполнением заказчиком договорных обязательств по оплате гарантийного удержания и авансового платежа.        

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии от 03.07.2020 суд обязал Общество предоставить Компании банковскую гарантию на сумму 38 131 528 рублей 95 копеек для обеспечения исполнения обязательств по договору подряда от 23.10.2018 № 20181023-01, в удовлетворении остальной части исковых требований и встречного иска отказал. Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 01.10.2020 решение суда оставлено без изменения.

По настоящему делу истец указывает, что во исполнение договора №20181023-01 от 23.10.2018 им выполнены работы на общую сумму 203 322 580,85 руб., ответчиком произведена частичная оплата за выполненные работы в размере 144 240 148,22 руб., на дату подачи иска образовалась задолженность в размере 59 082 437,63 руб.

Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательства по оплате работ явилось основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Разрешая настоящий спор, суд исходил из следующего.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Пунктом 1 статьи 746 ГК РФ установлено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В связи с возникшим между сторонами спором относительно объема, стоимости и качества выполненных работ судом была назначена экспертиза.

Согласно заключению эксперта условиями договоров от 22.08.2018 №20180822-01 и от 23.10.2018 №20181023-01 (в рамках дополнительных соглашений №1) предусмотрена единая комплексная расценка на валку, трелевку, устройство разделочных площадок, разделку деревьев; отдельно расценивается корчевка пней. Однако, фактически работы по валке деревьев произведены сразу вместе с корнем, без отдельной корчевки пней, что изменяет вид работ и технологические процессы, без изменения итогового результата.

 На части участков имеются незавершённые работы:

-   По участку 21:18:070101:133 - на 40% территории участка, в том числе смежного участка, имеются хаотичным образом раскиданные стволы поваленных деревьев и кустарников, трелевка, сгребание в кучи и создание валов не завершены, устройство разделочных площадок и разделка указанных деревьев не произведена;

-   По участку 21:18:070101:134 - на 30% территории участка, в том числе смежного участка, имеются хаотичным образом раскиданные стволы поваленных деревьев и кустарников, трелевка, сгребание в кучи и создание валов не завершены, устройство разделочных площадок и разделка указанных деревьев не произведена;

-   По участку 21:18:000000:769 - на 20% территории части 1 участка имеются многочисленные навалы и кучи неправильной формы и различной протяженной длины, также навалы имеются вдоль 30% периметра всех частей 1,2,4,6 участка, (общая длина древесных и кустарниковых навалов составляет 8 540 м, при усредненной ширине навала 4,5м). Также имеются участки с хаотично разбросанными стволами деревьев и кустарников на территории S=67 га, трелевка, сгребание в кучи и создание валов не завершены, устройство разделочных площадок и разделка указанных деревьев не произведена. На части №3 и №5 участка (17,56 га) какие-либо работы не выполнялись;

- По участку 21:18:000000:7703 - Общая площадь, на которой производились какие-либо работы на данном участке = 161,35 га (из 489,16 га). На площади 31,87 га имеются хаотичным образом раскиданные стволы поваленных деревьев и кустарников, трелевка и сгребание в кучи не завершены, устройство разделочных площадок и разделка указанных деревьев не произведена.

            На участках с кадастровыми номерами 21:18:070101:126, 21:18:070101:127, 21:18:070101:132, 21:18:070101:133, 21:18:070101:134, 21:18:070101:136, 21:18:070101:138, 21:18:070101:139. 21:18:070101:140, 21:18:000000:7693; 21:18:060301:490, 21:18:060301:492, 21:18:060301:493, 21:18:060301:494, 21:18:060301:495, 21:18:060301:496, 21:18:000000:7703,  имеются участки (области, площади), на которых не произведены работы по валке, трелевке, устройству разделочных площадок, разделке деревьев; также имеются как единичные, так и значительные по площади области с несваленными деревьями (т.е. на данных областях какие-либо работы не производились); также выявлены площади, на которых не произведены работы по выкашиванию газонов, сжиганию с перетряхиванием валов из кустарников мелколесья и корней, имеются остатки стволов деревьев, складированные древесные и кустарниковые навалы. Т.е. итоговый результат работ, предусмотренный договорами от 22.08.2018 №20180822-01 и   от   23.10.2018 №20181023-01, а именно полевые сельскохозяйственные культуротехнические и подготовительные работы для посадки кормовых культур, в процессе производства работ для большинства участков не достигнут.

Стоимость выполненных ООО "Жил-Строй" на земельных участках 21:18:000000:126, 127, 132, 133, 134, 136, 138, 139, 140; 7693 работ по договору от 22.08.2018 №20180822-01, исходя из условий договора, составляет 126 499 489,92 рублей, без учета НДС.   Стоимость выполненных ООО "Жил-Строй" на земельных участках 21:18:060301:490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 21:18:000000:7703 работ по договору от 23.10.2018 №20181023-01, исходя из условий договора, составляет 168 717 859,87 рублей без учета НДС.

При этом в стоимости фактически выполненных работ НДС экспертами не учтен в связи с тем, что расчеты объемов фактически выполненных работ могут быть рассчитаны только по итоговым данным в целом по земельным участкам, и объемы работ не могут быть достоверно распределены по периодам выполнения работ (до 2019 г. или после 2019 г.), в связи с отсутствием достоверных сведений в материалах дела. На усмотрение суда для дальнейшей правовой оценки экспертами рассчитана итоговая стоимость фактически выполненных работ в трех вариантах НДС: с НДС 18%, с НДС 20%, с НДС, распределенным пропорционально стоимостных сумм, указанных в актах выполненных работ КС-2.

Кроме того, указанные стоимости по двум договорам рассчитаны по укрупнённым расценкам, предусмотренными договорами, однако условиями договоров предусмотрен полный комплекс работ для достижения итогового результата работ, в том числе путем согласования комплексных расценок, исключающих возможность выделения из них стоимости отдельных видов фактически невыполненных работ (например: валка, трелевка, устройство разделочных площадок, разделка деревьев - технологически являются отдельными видами работ, но включены в общую комплексную договорную расценку; при этом часть работ по трелевке, устройству разделочных площадок, разделке деревьев не выполнена). По указанному методу расчета (расчет фактически выполненных работ по условиям договора) результат расчета включает отдельные фактически невыполненные технологические операции, что приводит к значительному завышению стоимости фактически выполненных работ, рассчитанной исходя из условий договоров. Произвести иные вычисления по данному методу не представляется возможным, в связи с отсутствием методик.

С учетом выводов экспертов истец уточнил исковые требования и просил взыскать  55 292 462 руб. 21 коп. долга по договору №20180822-01 от 22.08.2018 из расчета 150 749 442,14 руб., определенная экспертами итоговая стоимость фактически выполненных работ с НДС, распределенным пропорционально стоимостных сумм, указанных в актах выполненных работ КС-2, минус оплата 95 456 979,93 руб. и 57 327 083 руб. 97 коп. долга по договору №20181023-01 от 23.10.2018 из расчета: 201 567 227,19 руб. определенная экспертами итоговая стоимость фактически выполненных работ с НДС, распределенным пропорционально стоимостных сумм, указанных в актах выполненных работ КС-2, минус оплата 144 240 143,22 руб.

Исследовав представленные в дело доказательства, приняв во внимание доводы и возражения сторон, выводы экспертов о том, что результат расчета стоимости фактически выполненных работ по договорам включает отдельные фактически невыполненные технологические операции, и это приводит к значительному завышению стоимости фактически выполненных работ, рассчитанной исходя из условий договоров, а также приняв во внимание пояснения экспертов от 02.02.2022 №138, суд счел, что определенная экспертами итоговая стоимость фактически выполненных работ в сумме 150 749 442,14 руб. по договору №20180822-01  от 22.08.2018 и в сумме 201  567 227,19 руб. по договору №20181023-01 от 23.10.2018 подлежит уменьшению на 19 179 356,41 руб. (стоимость работ, необходимых для завершения работ, определенная экспертами для объема отдельных невыполненных технологических операций в составе комплексной договорной расценки).

Суд счел, что данный способ расчета позволяет устранить завышение стоимости фактически выполненных работ, рассчитанной исходя из условий договоров, предусматривающих комплексные расценки, исключающие возможность выделения из них стоимости отдельных видов фактически невыполненных работ.

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что  задолженность ответчика по договорам составляет 93 440 189 руб. 77 коп.: 150 749 442,14 руб. - 95 456 979,93 руб. + 201 567 227,19 руб. - 144 240 143,22 руб. - 19179356,41 руб.

Доводы ответчика о не полном выполнении работ и о том, что обязанность по оплате не наступила, судом отклонены, как несостоятельные. 

Установив факт просрочки исполнения денежного обязательства, суд счел требование о взыскании штрафа правомерным. Оснований для уменьшения размера штрафа суд не установил.

Таким образом, суд иск удовлетворил частично. 

Рассмотрев доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд приходит к следующим выводам.

Определением апелляционного суда от 01.09.2022 с учетом приведенных истцом доводов, заключения специалиста ООО «Антарес», а также того, что суд первой инстанции самостоятельно скорректировал определенную экспертами итоговую  стоимость фактически выполненных работ на общую сумму без разбивки по  двум договорам, апелляционный суд назначил повторную экспертизу по следующим вопросам: определить объём и стоимость качественно выполненных ООО «Жил-Строй» работ на земельных участках 21:18:060301:490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 21:18:000000:7703 по договору от 23.10.2018 №2018102301 (по каждому участку отдельно); определить объём и стоимость качественно выполненных ООО «Жил-Строй» работ на земельных участках 21:18: 070101:126, 127, 132, 133, 134, 136, 138, 139, 140, 21:18:000000:7693 по договору от 22.10.2018 №20180822-01 (по каждому участку отдельно).

Согласно экспертному заключению  (ответ на вопрос №1)  по участку 21:18:060301:490 объем качественно выполненных работ ООО «Жил-Строй» в соответствии с условиями Договора № 20181023-01 от 23.10.2018 на земельном участке с кадастровым номером 21:18:060301:490:

- Удаление (корчевка и сгребание) кустарника и мелколесья - 280 320 м2;

-   Валка, трелевка, деревьев до 16 см -16 215 шт;

-   Корчёвка пней до 16 см -16 215 шт;

-   Валка, трелевка, деревьев с 16 см до 24 см - 5 828 шт;

-   Корчёвка пней с 16 см до 24 см - 5 828 шт;

-   Валка, трелевка, деревьев более 24 см - 5 шт;

-   Корчёвка пней более 24 см - 5 шт;

-   Засыпка подкоренных ям - 22 048 шт.

Стоимость качественно выполненных ООО «Жил-Строй» работ в соответствии с условиями Договора № 20181023-01 от 23.10.2018 на земельном участке с кадастровым номером 21:18:060301:490 составляет без НДС: 3 367126,14 (три миллиона триста шестьдесят семь тысяч сто двадцать шесть) рублей 14 копеек.

Участок 21:18:060301:491.

Объем качественно выполненных работ ООО «Жил-Строй» в соответствии с условиями Договора № 20181023-01 от 23.10.2018 на земельном участке с кадастровым номером 21:18:060301:491:

- Удаление (корчевка и сгребание) кустарника и мелколесья -118 660

м2;

-   Валка, трелевка, деревьев до 16 см - 37 796 шт;

-   Корчёвка пней до 16 см - 37 796 шт;

-   Валка, трелевка, деревьев с 16 см до 24 см - 20 520 шт;

-   Корчёвка пней с 16 см до 24 см - 20 520 шт;

-   Засыпка подкоренных ям - 58 316 шт.

Стоимость качественно выполненных ООО «Жил-Строй» работ в соответствии с условиями Договора № 20181023-01 от 23.10.2018 на земельном участке с кадастровым номером 21:18:060301:491 составляет без НДС: 7 299 982,81 (семь миллионов двести девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят два) рублей 81 копеек.

Участок 21:18:060301:492.

Объем качественно выполненных работ ООО «Жил-Строй» в соответствии с условиями Договора № 20181023-01 от 23.10.2018 на земельном участке с кадастровым номером 21:18:060301:492:

- Удаление (корчевка и сгребание) кустарника и мелколесья - 78 578

м2;

-   Валка, трелевка, деревьев до 16 см - 70 730 шт;

-   Корчёвка пней до 16 см - 70 730 шт;

-   Валка, трелевка, деревьев с 16 см до 24 см -1 265 шт;

-   Корчёвка пней с 16 см до 24 см -1 265 шт;

-   Засыпка подкоренных ям - 71 995 шт.

Стоимость качественно выполненных ООО «Жил-Строй» работ в соответствии с условиями Договора № 20181023-01 от 23.10.2018 на земельном участке с кадастровым номером 21:18:060301:492 составляет без НДС: 8 319 326,19 (восемь миллионов триста девятнадцать тысяч триста двадцать шесть) рублей 19 копеек.

Участок 21:18:060301:493.

Объем качественно выполненных работ ООО «Жил-Строй» в соответствии с условиями Договора № 20181023-01 от 23.10.2018 на земельном участке с кадастровым номером 21:18:060301:493:

- Удаление (корчевка и сгребание) кустарника и мелколесья - 57 090

 м2;

-   Валка, трелевка, деревьев до 16 см - 6 408 шт;

-   Корчёвка пней до 16 см - 6 408 шт;

-   Валка, трелевка, деревьев с 16 см до 24 см - 3 955 шт;

-   Корчёвка пней с 16 см до 24 см - 3 955 шт;

-   Засыпка подкоренных ям -10 363 шт.

         В ходе обследования (осмотра) присутствующие на обследовании подтвердили, что на земельном участке с кадастровым номером 21:18:060301:493 в 2020 году проводились культуртехнические работы организацией ООО «МИР». Однако, вопросов поставленных судом относительно взаимоотношений ООО «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания» и ООО «МИР» поставлено не было. Поэтому в рамках данной экспертизы работы, выполненные ООО «МИР» на данном земельном участке, не учитывались.

Стоимость качественно выполненных ООО «Жил-Строй» работ в соответствии с условиями Договора № 20181023-01 от 23.10.2018 на земельном участке с кадастровым номером 21:18:060301:493 составляет без НДС: 1 401 501,25 (один миллион четыреста одна тысяча пятьсот один) рублей 25 копеек.

Участок 21:18:060301:494.

Объем качественно выполненных работ ООО «Жил-Строй» в соответствии с условиями Договора № 20181023-01 от 23.10.2018 на земельном участке с кадастровым номером 21:18:060301:494:

- Удаление (корчевка и сгребание) кустарника и мелколесья -16 214

м2;

-   Валка, трелевка, деревьев до 16 см - 5 090 шт;

-   Валка, трелевка, деревьев с 16 см до 24 см - 324 шт;

-   Корчёвка пней с 16 см до 24 см - 324 шт.

          В ходе обследования (осмотра) присутствующие на обследовании подтвердили, что на земельном участке с кадастровым номером 21:18:060301:494 в 2020 году проводились культуртехническиеработы организацией ООО «МИР». Однако, вопросов поставленных судом относительно взаимоотношений ООО «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания» и ООО «МИР» поставлено не было. Поэтому в рамках данной экспертизы работы, выполненные ООО «МИР» на данном земельном участке, не учитывались.

Стоимость качественно выполненных ООО «Жил-Строй» работ в соответствии с условиями Договора № 20181023-01 от 23.10.2018 на земельном участке с кадастровым номером 21:18:060301:494 составляет без НДС: 549 788,30 (пятьсот сорок девять тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 30 копеек.

Участок 21:18:060301:495.

Объем качественно выполненных работ ООО «Жил-Строй» в соответствии с условиями Договора № 20181023-01 от 23.10.2018 на земельном участке с кадастровым номером 21:18:060301:495:

- Удаление (корчевка и сгребание) кустарника и мелколесья - 30 320

м2;

-   Валка, трелевка, деревьев до 16 см -11 451 шт;

-   Корчёвка пней до 16 см -11 451 шт;

-   Валка, трелевка, деревьев с 16 см до 24 см - 7 359 шт;

-   Корчёвка пней с 16 см до 24 см - 7 359 шт;

-   Засыпка подкоренных ям -18 810 шт.

В ходе обследования (осмотра) присутствующие на обследовании подтвердили, что на земельном участке с кадастровым номером 21:18:060301:495 в 2020 году проводились культуртехнические работы организацией ООО «МИР». Однако, вопросов поставленных судом относительно взаимоотношений ООО «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания» и ООО «МИР» поставлено не было. Поэтому в рамках данной экспертизы работы, выполненные ООО «МИР» на данном земельном участке, не учитывались.

Стоимость качественно выполненных ООО «Жил-Строй» работ в соответствии с условиями Договора № 20181023-01 от 23.10.2018 на земельном участке с кадастровым номером 21:18:060301:495 составляет без НДС: 2 346 919,89 (два миллиона триста сорок шесть тысяч девятьсот девятнадцать) рублей 89 копеек.

Участок 21:18:060301:496.

Объем качественно выполненных работ ООО «Жил-Строй» в соответствии с условиями Договора № 20181023-01 от 23.10.2018г. на земельном участке с кадастровым номером 21:18:060301:496:

- Удаление (корчевка и сгребание) кустарника и мелколесья - 26150

 м2;

-   Валка, трелевка, деревьев до 16 см - 3172 шт;

-   Корчёвка пней до 16 см - 3 172 шт;

-   Валка, трелевка, деревьев с 16 см до 24 см -1 780 шт;

-   Корчёвка пней с 16 см до 24 см -1 780 шт;

-   Засыпка подкоренных ям - 4 992 шт.

Стоимость качественно выполненных ООО «Жил-Строй» работ в соответствии с условиями Договора № 20181023-01 от 23.10.2018 на земельном участке с кадастровым номером 21:18:060301:496 составляет без НДС: 665129,06 (шестьсот шестьдесят пять тысяч сто двадцать девять) рублей 06 копеек.

Участок 21:18:000000:7703.

Объем качественно выполненных работ ООО «Жил-Строй» в соответствии с условиями Договора № 20181023-01 от 23.10.2018 на земельном участке с кадастровым номером 21:18:000000:7703:

- Удаление (корчевка и сгребание) кустарника и мелколесья - 374 530

м2.

Стоимость качественно выполненных ООО «Жил-Строй» работ в соответствии с условиями Договора № 20181023-01 от 23.10.2018 на земельном участке с кадастровым номером 21:18:000000:7703 составляет без НДС: 1 025 512,86 (один миллион двадцать пять тысяч пятьсот двенадцать) рублей 86 копеек.

Согласно  ответу  на второй вопрос  по участку 21:18:070101:126 объем качественно выполненных работ ООО «Жил-Строй» в соответствии с условиями Договора № 20180822-01 от 22.08.2018  на земельном участке с кадастровым номером 21:18:070101:126:

- Удаление (корчевка и сгребание) кустарника и мелколесья – 49120 м2;

-   Валка, трелевка, деревьев до 16 см - 7 920 шт;

-   Корчёвка пней до 16 см - 7 920 шт;

-   Валка, трелевка, деревьев с 16 см до 24 см - 3526 шт;

-   Корчёвка пней с 16 см до 24 см - 3526 шт;

-   Валка, трелевка, деревьев более 24 см - 207 шт;

-   Корчёвка пней более 24 см - 207 шт;

-   Засыпка подкоренных ям -11 446 шт.

Стоимость качественно выполненных ООО «Жил-Строй» работ в соответствии с условиями Договора № 20180822-01 от 22. 08.2018 на земельном участке с кадастровым номером 21:18:070101:126 составляет без НДС: 1 527 862,78 (один миллион пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот шестьдесят два) рублей 78 копеек.

Участок 21:18:070101:127.

Объем качественно выполненных работ ООО «Жил-Строй» в соответствии с условиями Договора № 20180822-01 от 22.08.2018г. на земельном участке с кадастровым номером 21:18:070101:127:

- Удаление (корчевка и сгребание) кустарника и мелколесья - 57 890

 м2.

Стоимость качественно выполненных ООО «Жил-Строй» работ в соответствии с условиями Договора № 20180822-01 от 22. 08.2018 на земельном участке с кадастровым номером 21:18:070101:127 составляет без НДС: 158 510,46 (сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот десять) рублей 46 копеек.

Участок 21:18:070101:132.

Объем качественно выполненных работ ООО «Жил-Строй» в соответствии с условиями Договора № 20180822-01 от 22.08.2018г. на земельном участке с кадастровым номером 21:18:070101:132:

- Удаление (корчевка и сгребание) кустарника и мелколесья - 36 410

 м2.

Стоимость качественно выполненных ООО «Жил-Строй» работ в соответствии с условиями Договора № 20180822-01 от 22.08.2018 на земельном участке с кадастровым номером 21:18:070101:132 составляет без НДС: 99 695,41 (девяносто девять тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 41 копеек.

Участок 21:18:070101:133.

Объем качественно выполненных работ ООО «Жил-Строй» в соответствии с условиями Договора № 20180822-01 от 22.08.2018 на земельном участке с кадастровым номером 21:18:070101:133:

- Удаление (корчевка и сгребание) кустарника и мелколесья -10 838

 м2;

-   Валка, трелевка, деревьев до 16 см - 6 064 шт;

-   Корчёвка пней до 16 см - 6 064 шт;

-   Валка, трелевка, деревьев с 16 см до 24 см - 2 628 шт;

-   Корчёвка пней с 16 см до 24 см - 2 628 шт;

-   Валка, трелевка, деревьев более 24 см -19 шт;

-   Корчёвка пней более 24 см -19 шт;

-   Засыпка подкоренных ям - 5 559 шт.

Стоимость качественно выполненных ООО «Жил-Строй» работ в соответствии с условиями Договора № 20180822-01 от 22. 08.2018 на земельном участке с кадастровым номером 21:18:070101:133 составляет без НДС: 1 000 006,88 (один миллион шесть) рублей 88 копеек.

Участок 21:18:070101:134.

Объем качественно выполненных работ ООО «Жил-Строй» в соответствии с условиями Договора № 20180822-01 от 22.08.2018г. на земельном участке с кадастровым номером 21:18:070101:134:

- Удаление (корчевка и сгребание) кустарника и мелколесья -13 920

 м2;

-   Валка, трелевка, деревьев до 16 см -12 903 шт;

-   Корчёвка пней до 16 см -12 903 шт;

-   Валка, трелевка, деревьев с 16 см до 24 см - 3 482 шт;

-   Корчёвка пней с 16 см до 24 см - 3 482 шт;

-   Валка, трелевка, деревьев более 24 см - 98 шт;

-   Корчёвка пней более 24 см - 98 шт;

-   Засыпка подкоренных ям -16 483 шт.

Стоимость качественно выполненных ООО «Жил-Строй» работ в соответствии с условиями Договора № 20180822-01 от 22.08.2018 на земельном участке с кадастровым номером 21:18:070101:134 составляет без НДС: 1 967 930,72 (один миллион девятьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот тридцать) рублей 72 копеек.

Участок 21:18:070101:136.

Объем качественно выполненных работ ООО «Жил-Строй» в соответствии с условиями Договора № 20180822-01 от 22.08.2018: 

- Удаление (корчевка и сгребание) кустарника и мелколесья - 24 910 м2.

Стоимость качественно выполненных ООО «Жил-Строй» работ в соответствии с условиями Договора № 20180822-01 от 22. 08.2018 на земельном участке с кадастровым номером 21:18:070101:136 составляет без НДС: 68 206,93 (шестьдесят восемь тысяч двести шесть) рублей 93 копеек.

Участок 21:18:070101:138.

Объем качественно выполненных работ ООО «Жил-Строй» в соответствии с условиями Договора № 20180822-01 от 22.08.2018 на земельном участке с кадастровым номером 21:18:070101:138:

- Удаление (корчевка и сгребание) кустарника и мелколесья -19 710 м2;

-   Валка, трелевка, деревьев до 16 см - 4 494 шт;

-   Корчёвка пней до 16 см - 4 494 шт;

-   Валка, трелевка, деревьев с 16 см до 24 см - 2 696 шт;

-   Корчёвка пней с 16 см до 24 см -1 400 шт;

-   Валка, трелевка, деревьев более 24 см -127 шт;

-   Корчёвка пней более 24 см -127 шт;

-   Засыпка подкоренных ям - 7 317 шт.

Стоимость качественно выполненных ООО «Жил-Строй» работ в соответствии с условиями Договора № 20180822-01 от 22. 08.2018 на земельном участке с кадастровым номером 21:18:070101:138 составляет без НДС: 917 625,62 (девятьсот семнадцать тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 62 копеек.

Участок 21:18:070101:139.

Объем качественно выполненных работ ООО «Жил-Строй» в соответствии с условиями Договора № 20180822-01 от 22.08.2018 на земельном участке с кадастровым номером 21:18:070101:139:

- Удаление (корчевка и сгребание) кустарника и мелколесья - 39 850 м2;

-   Валка, трелевка, деревьев до 16 см - 7 480 шт;

-   Корчёвка пней до 16 см - 7 480 шт;

-   Валка, трелевка, деревьев с 16 см до 24 см - 2 9 70 шт;

-   Корчёвка пней с 16 см до 24 см - 2 970 шт;

-   Валка, трелевка, деревьев более 24 см - 63 шт;

-   Корчёвка пней более 24 см - 63 шт;

-   Засыпка подкоренных ям -10 513 шт.

Стоимость качественно выполненных ООО «Жил-Строй» работ в соответствии с условиями Договора № 20180822-01 от 22. 08.2018 на земельном участке с кадастровым номером 21:18:070101:139 составляет без НДС: 1 326 951,72 (один миллион триста двадцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят один) рублей 72 копеек.

Участок 21:18:070101:140.

Объем качественно выполненных работ ООО «Жил-Строй» в соответствии с условиями Договора № 20180822-01 от 22.08.2018 на земельном участке с кадастровым номером 21:18:070101:140:

-         Удаление (корчевка и сгребание) кустарника и мелколесья - 42 650 м2;

-   Валка, трелевка, деревьев до 16 см - 27 340 шт;

-   Корчёвка пней до 16 см - 27340 шт;

-   Валка, трелевка, деревьев с 16 см до 24 см - 5 694 шт;

-   Корчёвка пней с 16 см до 24 см - 5 694 шт;

-   Валка, трелевка, деревьев более 24 см -137 шт;

-   Корчёвка пней более 24 см -137 шт;

-   Засыпка подкоренных ям - 31 469 шт.

Стоимость качественно выполненных ООО «Жил-Строй» работ в соответствии с условиями Договора № 20180822-01 от 22. 08.2018 на земельном участке с кадастровым номером 21:18:070101:140 составляет без НДС: 4 134 990,54 (четыре миллиона сто тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто) рублей 54 копеек.

Участок 21:18:000000:7693.

Объем качественно выполненных работ ООО «Жил-Строй» в соответствии с условиями Договора № 20180822-01 от 22.08.2018 на земельном участке с кадастровым номером 21:18:000000:7693:

- Удаление (корчевка и сгребание) кустарника и мелколесья - 259 550 м2.

Стоимость качественно выполненных ООО «Жил-Строй» работ в соответствии с условиями Договора № 20180822-01 от 22. 08.2018 на земельном участке с кадастровым номером 21:18:000000:7693 составляет без НДС: 710 682,28 (семьсот десять тысяч шестьсот восемьдесят два) рублей 28 копеек.

Таким образом, согласно заключению экспертов стоимость работ по всем земельным участкам по договору от 23.010.2018 № 20181023-01 составляет 24 975 286 руб. 50 коп. В то время как оплата произведена в сумме   144 240 148 руб. 22 коп.

          По договору от 22.10.2018 №20180822-01 работы выполнены на   общую сумму 11 912 463 руб. 34 коп., оплата  произведена в сумме  95 456 979 руб. 93 коп.

          Оценив заключения экспертов, суд апелляционной инстанции считает, что в данном случае необходимо исходить из заключения повторной экспертизы, поскольку она основана на непосредственном визуальном осмотре спорных участков.

            Эксперт ФИО3 в суде апелляционной инстанции указала, что лично производила осмотр каждого спорного участка, в последующем для более точного исследования производилось сравнение полученных результатов с космическими спутниковыми снимками этой местности.

          Суждение истца о недостоверности экспертного заключения несостоятельно. То обстоятельство, что при проведении осмотра участков эксперту оказывали помощь иные лица, не является основанием для вывода о том, что экспертиза проведена лицами, которые судом не назначались. Из пояснений эксперта следует, что эти лица, с учетом специфики экспертного исследования,  оказывали только помощь в проведении физических замеров. 

           Ссылка истца на подписание актов выполненных работ не может быть принята во внимание, поскольку по общему правилу эти акты могут быть оспорены по объему и стоимости. Согласно заключению повторной экспертизы работы выполнены  на меньшую сумму.

           При таких обстоятельствах  апелляционная жалоба является обоснованной, решение суда первой инстанции подлежит отмене на основании пунктов 3 и 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В удовлетворении иска надлежит отказать в полном объеме.

           Судебные расходы в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на истца.

По делу проведено две судебные  экспертизы. 

Стоимость первоначальной экспертизы в сумме  1 030 000 руб., оплачена за истца третьим лицом, перечислена экспертному учреждению  судом  первой инстанции отдельным определением.

Повторная экспертиза оплачена ответчиком  в сумме  2 500 000 руб., следовательно, указанная сумма подлежит взысканию в пользу ответчика, также как и госпошлина по апелляционной жалобе.

При подаче иска  истцу предоставлена  отсрочка  от уплаты госпошлины по иску, в связи с этим с него  в доход федерального бюджета надлежит взыскать госпошлину по иску в сумме 200 000 руб.

         Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 29.03.2022 по делу № А79-8328/2020 отменить.

Иск общества с ограниченной ответственностью «Жил-Строй» к обществу с ограниченной ответственностью «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания» о взыскании долга  оставить без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Жил-Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) расходы за проведение судебной экспертизы в сумме 2 500 000 руб., по апелляционной жалобе в сумме 3 000 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Жил-Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  госпошлину по иску в сумме 200 000 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня его принятия.

 

Председательствующий судья 

  Т.И. Тарасова

 

Судьи

             Н.А. Насонова

           

 

             М.В.Семенова