АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/,

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-35286/2023

г. Уфа

24 апреля 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 16 апреля 2024 г.

Полный текст решения изготовлен 24 апреля 2024 г.

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Ганеева Р. Ф., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ягудиной А.А.,  рассмотрел в судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Нефтегазсоюз" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Водоканал строй сервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

третье лицо - АО «Транснефть – Урал» (ИНН:

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании задолженности по договору № 69 от 29.07.2022 за период 25.09.2022 по 20.11.2022 в размере 7 386 569 руб. 47 коп.

 

при участии:  

от истца – ФИО1, паспорт, представитель по доверенности от 23.10.2023.

от ответчика – не явились, извещены в соответствии со ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

 от третьего лица – ФИО2, паспорт, представитель по доверенности от 25.09.2023.

 

Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазсоюз" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением  к обществу с ограниченной ответственностью "Водоканал строй сервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) при участии третьего лица - АО «Транснефть – Урал» (ИНН:

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании задолженности по договору № 69 от 29.07.2022 за период 25.09.2022 по 20.11.2022 в размере 7 386 569 руб. 47 коп.

От третьего лица поступил отзыв на исковое заявление.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв не представил, возврат конверта по юридическому адресу регистрации согласно выписке из ЕГРЮЛ.

Согласно ч. 4 ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации извещения направляются арбитражным судом по месту нахождения юридического лица. Место нахождения юридического лица, его филиала или представительства определяется на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

В соответствии с ч. 1 ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

Процедура доставки почтовых отправлений (включая заказные письма разряда "Судебное") прописана в Правилах оказания услуг почтовой связи, утв. Приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 234 (далее - Правила), а также в Порядке приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений (редакция N 2), утв. Приказом ФГУП "Почта России" от 07.03.2019 N 98-п (далее - Порядок).

В соответствии с п. 6.2.2.4 Порядка, правом пересылки почтовых отправлений в разряде "Судебное" пользуются федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов РФ при наличии договора на оказание услуг почтовой связи, заключенного в письменной форме с ФГУП "Почта России" (далее - Договор).

В почтовых отправлениях разряда "Судебное" пересылаются судебные извещения (судебные повестки), копии судебных актов (в том числе определений, решений, постановлений судов), судебные дела (материалы), исполнительные документы, в том числе могут пересылаться приложения на электронном носителе информации (п. 6.2.4.2 Порядка).

Заказные письма и заказные бандероли разряда "Судебное" должны пересылаться с уведомлением о вручении (пункт 6.2.5.1. Порядка N 98). Услуги по пересылке почтовых отправлений разрядов "Судебное", "Межоператорское" оказываются объектами почтовой связи на условиях партионного приема почтовых отправлений в ОПС, определенных Предприятием (пункт 6.2.6.2. Порядка N 98).

Согласно пункту 11.1 Порядка N 98, почтовые отправления разряда "Судебное" при невозможности их вручения адресатам (их уполномоченным представителям) хранятся в объектах почтовой связи места назначения в течение 7 дней. При исчислении срока хранения почтовых отправлений разряда "Судебное" день поступления и возврата почтового отправления, а также нерабочие праздничные дни, установленные трудовым законодательством РФ, не учитываются. Срок хранения почтовых отправлений исчисляется со следующего рабочего дня ОПС после поступления почтового отправления в объект почтовой связи места назначения.

По истечении установленного срока хранения почтовые отправления возвращаются по обратному адресу, указанному на почтовом отправлении (если иное не предусмотрено договором с пользователем услугами почтовой связи) (пункт 119 Порядка N 98).

Как следует из п. 11.10 Порядка, возврат почтового отправления по обратному адресу, указанному на РПО, до истечения срока хранения производится, в частности, при обстоятельствах, исключающих возможность выполнения оператором почтовой связи обязательств по Договору, в том числе отсутствия указанного на отправлении адреса адресата.

На каждое возвращаемое по обратному адресу РПО разряда "Судебное" почтовый работник оформляет ярлык ф. 20, оформляет оболочку возвращаемого РПО в порядке, представленном в приложении N 39 к настоящему Порядку. В случае возврата иных почтовых отправлений ярлык ф. 20 не оформляется.

При возврате по обратному адресу почтовый работник оформляет возвращаемые РПО следующим образом: на лицевой стороне оболочки на свободном месте слева от зоны адресного блока получателя указывается "В" и индекс ОПС места возврата, при этом адрес и индекс получателя перечеркиваются (приложение N 41 к настоящему Порядку).

При возврате по новому адресу почтовый работник оформляет возвращаемые РПО следующим образом: на лицевой стороне оболочки на свободном месте слева от зоны адресного блока получателя указывается "В", новый подробный адрес и индекс ОПС места возврата, при этом прежний адрес и индекс отправителя и получателя перечеркиваются 

<

67> (приложение N 42 к настоящему Порядку)

Помимо сведений о направлении ответчику извещений на почтовом конверте, арбитражные суды принимают во внимание аналогичную информацию, размещенную на официальном сайте ФГУП "Почта России" (https://www.pochta.ru/).

Определения суда ответчику направлялись по  адресу регистрации: 450076, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.О. ГОРОД УФА, Г УФА, УЛ ГОГОЛЯ, Д. 60, ОФИС 18.

Конверт с определением возвращен почтовым отделением связи с отметкой: «истек срок хранения».

При проверке почтового отправления № 45097692559988 на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://www.pochta.ru), судом установлено, что указанное почтовое отправление прибыло в место вручения 27.02.2024, неудачная попытка вручения 27.02.2024 и 06.03.2024 произошел возврат отправителю из-за истечения срока хранения.

Согласно абзацу 2 пункта 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 61 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридических лиц", юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по этому адресу своего представителя, и такое юридическое лицо не вправе в отношениях с лицами, добросовестно полагавшимися на данные ЕГРЮЛ об адресе юридического лица, ссылаться на данные, не внесенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем (в том числе на ненадлежащее извещение в ходе рассмотрения дела судом, в рамках производства по делу об административном правонарушении и т.п.), за исключением случаев, когда соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица (пункт 2 статьи 51 Гражданского кодекса Российской Федерации; далее - ГК РФ).

Кроме того, в соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации информация о времени и месте судебного заседания по рассмотрению искового заявления  была   опубликована на официальном интернет-сайте суда.

Лица участвующие в деле, несут риск  наступления неблагоприятных последствий в результате не принятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе (абз. 2 часть 6 ст. 121 АПК РФ).

Определениями суда сторонам разъяснена возможность проведения судебного онлайн-заседания с использованием системы веб-конференции и возможности онлайн-ознакомления с материалами судебных дел через электронный сервис «Мой арбитр».

Таких ходатайств от ответчика не поступило.

Ответчик отзыв не представил.

Согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела документы сторон, доказательства в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

УСТАНОВИЛ:

Как установлено материалами дела, 29.07.2022 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Водоканал Строй Сервис», именуемым в дальнейшем «Генеральный подрядчик» и «Ответчик», и Обществом с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗСОЮЗ», именуемым в дальнейшем «Субподрядчик» и «Истец», был заключен Договор субподряда № 69 к КОНТРАКТУ ТУР-1418-2022 от 14.06.2022 на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организаций системы «Транснефть» при реализации Программы развития, технического перевооружения и реконструкции, программы капитального и текущего ремонта по объекту АО «Транснефть - Урал»  Лот № 2600-М05-ЕП-У02-01739-2022 "Работы по реконструкции линейной части МНПП" 09-ТПР-001-020948 «Магистральный нефтепродуктопровод «Уфа-Омск». Замена трубы на участке 529,8-600 км, DN350. Курганское НУ. Реконструкция. 2 этап». Заказчиком и конечным потребителем выполняемых по договору субподряда работ является  АО «Транснефть-Урал» (ИНН 

<

***>, КПП 027401001, ОГРН 

<

***>, юр. адрес: 450008, 

<

...>).

Согласно пункту 2.1. Договора Субподрядчик в установленные Договором сроки и в счет Договорной цены выполнит за свой риск, своими силами и силами согласованных Подрядчиком Субсубподрядных организаций, все Работы и услуги по Объекту «09-ТПР-001-020948 «Магистральный нефтепродуктопровод «Уфа-Омск». Замена трубы на участке 529,8-600 км, DN350. Курганское НУ. Реконструкция. 2 этап» в объеме, определенном настоящим Договором и Рабочей документацией, а также обеспечит страхование Объекта в соответствии с настоящим Договором, предоставит обеспечение исполнения обязательств по Договору в виде безусловных и безотзывных банковских гарантий и/или обеспечительного платежа в соответствии с настоящим Договором (если иной способ обеспечения исполнения обязательств по Договору не согласован Сторонами, в том числе путем заключения Дополнительных соглашений в соответствии с условиями Договора) и выполнит все иные требования, установленные Договором.

Пунктом 3.1. Договора установлено, что Договорная цена Работ и услуг, подлежащая оплате Субподрядчику, составляет 14 959 305 руб. 17 коп. (четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч триста пять руб. 17 коп.) в том числе НДС (20%) - 2 493 217 руб. 53 коп. (два миллиона четыреста девяноста три тысячи двести семнадцать руб. 53 коп.). Согласно пункту 3.3. Договора Договорная цена не включает стоимость Материалов и Оборудования поставки Генерального подрядчика, указанных в Приложении к настоящему Договору «График поставки Материалов и Оборудования Заказчиком», а также стоимость Оборудования, передаваемого для обеспечения работ, указанного в Приложении к настоящему Договору «Перечень оборудования, передаваемого для обеспечения работ субподрядной организации».

Положениями пункта 5.3. Договора предусмотрено, что Оплата выполненных согласно Графику выполнения работ и принятых Генеральным подрядчиком работ осуществляется подрядчиком в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней (при этом, по Объекту программы ТПР и КР оплата производится в первые 3 (Три) рабочих дня соответствующего месяца), следующих за датой получения подрядчиком оригинала счета- фактуры, оформленной Субподрядчиком, при условии своевременно выполненных работ Субподрядчиком, поступления оплаты со стороны Заказчика, и наличия у подрядчика оригиналов следующих документов:

-           «Акта о приемке выполненных работ», принятым (подписанным) полномочным сотрудником/работником Представителя подрядчика;

-           «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (Форма КС-3);

-           «Ведомости переработки давальческих материалов поставки подрядчика» за отчетный месяц;

-           Отчет о ходе поставки Субподрядчиком оборудования и материалов.

В рамках указанного договора Субподрядчиком были выполнены, а Подрядчиком приняты без замечаний следующие работы: 

- 25.09.2022 г. между сторонами подписан Акт (формы КС-2) за номером 1 о приемке выполненных работ за период с 26.08.2022 r. по 25.09.2022 г. и Справка (формы КС-3) о стоимости выполненных за период с 26.08.2022 г. по 25.09.2022 г. работ и затрат за номером 1 от 25.09.2022 г. Стоимость работ согласно указанным актам и справке с учетом НДС составила 5 103 817 руб. 55 коп. Срок оплаты работ наступил 20.12.2022 г. Работы оплачены на сумму 5 100 000 руб. Остаток задолженности составляет 3 817,55 руб.; 

- 15.10.2022 г. между сторонами подписан Акт (формы КС-2) за номером 2 о приемке выполненных работ за период с 26.09.2022 r. по 15.10.2022 г. и Справка (формы КС-3) о стоимости выполненных за период с 26.09.2022 г. по 15.10.2022 г. работ и затрат за номером 2 от 15.10.2022 г. Стоимость работ согласно указанным актам и справке с учетом НДС составила 852 365 руб. 18 коп. Срок оплаты работ наступил 17.01.2023 г. Генеральный подрядчик до настоящего момента указанный этап работ не оплатил.

- 25.10.2022 г. между сторонами подписан Акт (формы КС-2) за номером 3 о приемке выполненных работ за период с 15.10.2022 r. по 25.10.2022 г. и Справка (формы КС-3) о стоимости выполненных за период с 15.10.2022 г. по 25.10.2022 г. работ и затрат за номером 3 от 25.10.2022 г. Стоимость работ согласно указанным актам и справке с учетом НДС составила 2 924 835 руб. 74 коп. Срок оплаты работ наступил 25.01.2023 г. Генеральный подрядчик до настоящего момента указанный этап работ не оплатил.

- 20.11.2022 г. между сторонами подписан Акт (формы КС-2) за номером 4 о приемке выполненных работ за период с 26.10.2022 r. по 20.11.2022 г. и Справка (формы КС-3) о стоимости выполненных за период с 26.10.2022 г. по 20.11.2022 г. работ и затрат за номером 4 от 20.11.2022 г. Стоимость работ согласно указанным актам и справке с учетом НДС составила 3 605 551 руб. 00 коп. Срок оплаты работ наступил 20.02.2023 г. Генеральный подрядчик до настоящего момента указанный этап работ не оплатил.

Итого: за период с 26.08.2022 г. по 20.11.2022 года в рамках договора Субподрядчиком выполнено работ и произведено в связи с этим затрат на сумму 12 486 569 руб. 47 коп. Подрядчиком оплачено 5 100 000 руб. 00 коп. Не оплаченными являются работы, выполненные с августа по ноябрь 2022 года на общую сумму: 12 486 559,47 руб. – 5 100 000 руб. = 7 386 569,47 руб. 

31.12.2022 г. между сторонами был подписан акт сверки взаимных расчетов, согласно которому остаток задолженности ООО «Водоканал Строй Сервис» перед ООО «НЕФТЕГАЗСОЮЗ» составлял 7 386 569,47 руб. 

При этом все работы, выполненные Субподрядчиком (ООО «НЕФТЕГАЗСОЮЗ») августе-ноябре 2022 года приняты без замечаний не только Подрядчиком (ООО «Водоканал Строй Сервис»), но и Заказчиком (АО «Транснефть-Урал»).

Как пояснил истец, акты формы КС-2 и КС-3 на работы, выполненные  ООО «НЕФТЕГАЗСОЮЗ» для нужд АО «Транснефть-Урал» по заказу ООО «Водоканал Строй Сервис» в период с 15.10.2022 г. по 20.11.2022 г. были переданы для подписания в адрес ООО «Водоканал Строй Сервис» немедленно после выполнения таких работ – 15.10.2022 г., 25.10.2022 г. и 20.11.2022 г. соответственно, но до настоящего момента в адрес Субподрядчика не возвращены. Все указанные в данных актах работы (их стоимость) отражены в подписанном сторонами 31.12.2022 г. акте сверки. 

Согласно пункту 21.1. Договора субподряда «Сдача-приемка выполненных работ за отчетный месяц, осуществляется по «Журналу учета выполненных работ» (форма КС-ба), Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работах и затратах (форма КС-3 Госкомстата РФ). Журнал учета выполненных работ, Акт о приемке выполненных работ за отчетный месяц, в том числе в электронном виде формата Microsoft Excel (версия не выше 2003 года), Справку о стоимости выполненных работ и затрат Субподрядчик предоставляет Генеральному подрядчику с сопроводительным письмом в срок не позднее 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца». 

Положениями пункта 21.2. Договора субподряда также предусмотрено, что  «В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Субподрядчика Журнала учета выполненных работ и Акта о приемке выполненных работ, Генеральный подрядчик обязан направить Субподрядчику подписанный Журнал учета выполненных работ и Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Субподрядчиком Работ в письменной форме. В случае получения Субподрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Генеральным подрядчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Журнал учета выполненных работ и Акт Генеральному подрядчику. При не предоставлении Генеральным подрядчиком отказа от поднисания Субподрядчику в течение пяти календарных дней Акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и КС-3 считаются подписанными Сторонами».

Каких-либо замечаний от Генерального подрядчика по объему и качеству выполненных работ в адрес Субподрядчика до настоящего момента не поступало.

Кроме того, пунктом 21.4. Договора субподряда предусмотрено, что «21.4. Приемка Работ оформляется Актом приемки законченного строительством Объекта (КС-11) и Актом приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (КС-14). Генеральный подрядчик не позднее последнего числа месяца подписания Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (КС-14) направляет на подписание Субподрядчику «Акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств» (унифицированная форма первичной учетной документации по учету основных средств № ОС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 №7). Субподрядчик в течение 2 (Двух рабочих дней подписывает этот Акт и направляет его Генеральный Генеральному подрядчику».

Согласно имеющейся у ООО «НЕФТЕГАЗСОЮЗ» информации, акты формы КС-11 и КС-14 на весь объем выполненных по Договору субподряда № 69 от «29» июля 2022 к КОНТРАКТУ ТУР-1418-2022 от 14.06.2022 г. Работ, подписан как Заказчиком - АО «Транснефть - Урал» (ИНН 

<

***>) так и Генеральным подрядчиком – ООО «Водоканал Строй Сервис» (ИНН 

<

***>).

29.09.2021 г. за исх. № 215 Субподрядчиком (ООО «НЕФТЕГАЗСОЮЗ») в адрес Подрядчика (ООО «Водоканал Строй Сервис») посредством почтового отправления «Почтой России» (идентификатор № ED305936247RU) были повторно направлены для приема и оплаты следующие документы:

- Журнал учета выполненных работ» (форма КС-ба) за октябрь 2022 года на 3 листах, Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) за номером 2 от 15.10.2022 г. о приемке выполненных работ за период с 26.09.2022 r. по 15.10.2022 г. на 1 листе, Справка о стоимости выполненных работах и затратах (форма КС-3 Госкомстата РФ) за номером 2 от 15.10.2022 г. за период с 26.09.2022 г. по 15.10.2022 г. на 1 листе, Счет на оплату № 14 от 15.10.2022 г. на 1 листе;

- Журнал учета выполненных работ» (форма КС-ба) за октябрь 2022 года на 4 листах, Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) за номером 3 от 25.10.2022 г. о приемке выполненных работ за период с 15.10.2022 r. по 25.10.2022 г. на 1 листе, Справка о стоимости выполненных работах и затратах (форма КС-3 Госкомстата РФ) за номером 3 от 25.10.2022 г. за период с 15.10.2022 г. по 25.10.2022 г. на 1 листе, Счет на оплату № 15 от 25.10.2022 г. на 1 листе;

- Журнал учета выполненных работ» (форма КС-ба) за ноябрь 2022 года на 3 листах, Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) за номером 4 от 20.11.2022 г. о приемке выполненных работ за период с 13.11.2022 r. по 20.11.2022 г. на 2 листах, Справка о стоимости выполненных работах и затратах (форма КС-3 Госкомстата РФ) за номером 4 от 20.11.2022 г. за период с 13.11.2022 г. по 20.11.2022 г. на 1 листе, Счет на оплату № 20 от 20.11.2022 г. на 1 листе;

Все указанные документы поступили в адрес генподрядчика 12.10.2023 г., но от их получения Генподрядчик немотивированно уклонился. Соответственно, в пятидневный срок, предусмотренный пунктом 21.2. Договора субподряда, Генеральный подрядчик не направил в адрес Субподрядчика в письменной форме мотивированный отказ от подписания полученных документов на выполнение работ.

В связи с чем, считаем все работы, выполненные Субподрядчиком в период с 15.10.2022 г. по 20.11.2022 г. в рамках Договора по поручению Генерального подрядчика (ООО «Водоканал Строй Сервис») в интересах Заказчика (АО «Транснефть-Урал»), принятыми Генеральным подрядчиком без замечаний и подлежащими оплате в сроки, предусмотренные пунктом 5.3. Договора.

В целях досудебного урегулирования спора в адрес ответчика  была направлена претензия от 06.09.2023 об оплате суммы задолженности, данное письмо было оставлено ответчиком без удовлетворения. 

Поскольку инициированный и реализованный истцом досудебный порядок урегулирования спора не принес положительного результата, истец обратился в суд с настоящим иском.

От третьего лица поступил отзыв на исковое заявление, согласно которому между АО «Транснефть-Урал» и ООО «Водоканал строй сервис» (далее - Подрядчик) заключен Контракт от 14.06.2022 № ТУР-1418-2022 на выполнение СМР по объекту: «09-ТПР- 001-020948 «Магистральный нефтепродуктопровод «Уфа-Омск». Замена трубы на участке 529,8- 600 км, DN350. Курганское НУ. Реконструкция. 2 этап».

Объем указанный в журналах учета между ООО «Нефтегазсоюз» и ООО «Водоканал строй сервис» принят в полном объеме АО «Транснефть-Урал» (КС-ба);

Объем выполненных работ указанный в журналах учета между ООО «Нефтегазсоюз» и ООО «Водоканал строй сервис», соответствует объему работ принятом АО «Транснефть-Урал» от ООО «Водоканал строй сервис»:

В связи с тем, что ООО «Нефтегазсоюз» не согласовывался в качестве субподрядной организаций для выполнения работы по Контракту от 14.06.2022 № ТУР-1418-2022 АО «Транснефть-Урал» не обладает информацией о фактически сложившихся взаимоотношениях между Истцом и Ответчиком.

Оценив все представленные доказательства в отдельности, относимость, допустимость и их достоверность, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает иск подлежащим удовлетворению в полном объеме на основании следующего.

В силу ст.ст. 64, 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии со ст. 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных названным кодексом.

По правилам ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, в силу ст.ст. 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд на основе принципа состязательности с учетом представленных сторонами доказательств устанавливает значимые для дела обстоятельства. При этом каждая из сторон несет риск процессуальных последствий непредоставления доказательств.

В силу ст.ст. 64, 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии с п. 1 ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

В силу п. 4 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Согласно ст. 161 Гражданского кодекса Российской Федерации сделки юридических лиц между собой должны совершаться в письменной форме. В соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом, совершающим сделку, или должным образом уполномоченными лицами.

Согласно разъяснениям, данным в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 23.07.2009 г. № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением, либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств» арбитражный суд, рассматривающий дело о взыскании по договору, оценивает обстоятельства, свидетельствующие о заключенности и действительности договора, независимо от того, заявлены ли возражения или встречный иск; определяет круг обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, к которым относятся обстоятельства, свидетельствующие о заключенности и действительности договора, в том числе о соблюдении правил его заключения, о наличии полномочий на заключение договора у лиц, его подписавших.

Согласно п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Судом установлено, что правоотношения между истцом и ответчиком возникли на основании договора строительного подряда (с учетом статьей 432, 434 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ)), спорные отношения регулируются положениями главы 37 ГК РФ.

Поскольку исследуемый договор подряда содержит все существенные условия, по которым сторонами достигнуто соглашение, соответствует требованиям, предъявляемым законом к форме и содержанию договора подряда, подписан сторонами, а также учитывая осуществление действий по фактическому выполнению договорных обязательств, оснований полагать о незаключенности либо ничтожности договоров у суда не имеется. Действительность договоров сторонами не оспаривается.

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ (ч. 1 - 2 ст. 740 ГК РФ).

Согласно ст. 740 ГК РФ договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком должны оформляться актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии со статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснениями, изложенными в пункте 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" (далее - информационное письмо N 51) принятые заказчиком работы подлежат оплате. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (статьи 711 и 746 ГК РФ).

Обстоятельства дела, которые, согласно закону, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (статья 68 АПК РФ).

В рамках указанного договора Субподрядчиком были выполнены, а Подрядчиком приняты без замечаний следующие работы: 

- 25.09.2022 г. между сторонами подписан Акт (формы КС-2) за номером 1 о приемке выполненных работ за период с 26.08.2022 r. по 25.09.2022 г. и Справка (формы КС-3) о стоимости выполненных за период с 26.08.2022 г. по 25.09.2022 г. работ и затрат за номером 1 от 25.09.2022 г. Стоимость работ согласно указанным актам и справке с учетом НДС составила 5 103 817 руб. 55 коп. Срок оплаты работ наступил 20.12.2022 г. Работы оплачены на сумму 5 100 000 руб. Остаток задолженности составляет 3 817,55 руб.; 

- 15.10.2022 г. между сторонами подписан Акт (формы КС-2) за номером 2 о приемке выполненных работ за период с 26.09.2022 r. по 15.10.2022 г. и Справка (формы КС-3) о стоимости выполненных за период с 26.09.2022 г. по 15.10.2022 г. работ и затрат за номером 2 от 15.10.2022 г. Стоимость работ согласно указанным актам и справке с учетом НДС составила 852 365 руб. 18 коп. Срок оплаты работ наступил 17.01.2023 г. Генеральный подрядчик до настоящего момента указанный этап работ не оплатил.

- 25.10.2022 г. между сторонами подписан Акт (формы КС-2) за номером 3 о приемке выполненных работ за период с 15.10.2022 r. по 25.10.2022 г. и Справка (формы КС-3) о стоимости выполненных за период с 15.10.2022 г. по 25.10.2022 г. работ и затрат за номером 3 от 25.10.2022 г. Стоимость работ согласно указанным актам и справке с учетом НДС составила 2 924 835 руб. 74 коп. Срок оплаты работ наступил 25.01.2023 г. Генеральный подрядчик до настоящего момента указанный этап работ не оплатил.

- 20.11.2022 г. между сторонами подписан Акт (формы КС-2) за номером 4 о приемке выполненных работ за период с 26.10.2022 r. по 20.11.2022 г. и Справка (формы КС-3) о стоимости выполненных за период с 26.10.2022 г. по 20.11.2022 г. работ и затрат за номером 4 от 20.11.2022 г. Стоимость работ согласно указанным актам и справке с учетом НДС составила 3 605 551 руб. 00 коп. Срок оплаты работ наступил 20.02.2023 г. Генеральный подрядчик до настоящего момента указанный этап работ не оплатил.

За период с 26.08.2022 г. по 20.11.2022 года в рамках договора Субподрядчиком выполнено работ и произведено в связи с этим затрат на сумму 12 486 569 руб. 47 коп. Подрядчиком оплачено 5 100 000 руб. 00 коп. Не оплаченными являются работы, выполненные с августа по ноябрь 2022 года на общую сумму: 12 486 559,47 руб. – 5 100 000 руб. = 7 386 569,47 руб. 

31.12.2022 г. между сторонами был подписан акт сверки взаимных расчетов, согласно которому остаток задолженности ООО «Водоканал Строй Сервис» перед ООО «НЕФТЕГАЗСОЮЗ» составлял 7 386 569,47 руб.  (л.д.44).

При этом все работы, выполненные Субподрядчиком (ООО «НЕФТЕГАЗСОЮЗ») августе-ноябре 2022 года приняты без замечаний не только Подрядчиком (ООО «Водоканал Строй Сервис»), но и Заказчиком (АО «Транснефть-Урал»).

Акты формы КС-2 и КС-3 на работы, выполненные  ООО «НЕФТЕГАЗСОЮЗ» для нужд АО «Транснефть-Урал» по заказу ООО «Водоканал Строй Сервис» в период с 15.10.2022 г. по 20.11.2022 г. были переданы для подписания в адрес ООО «Водоканал Строй Сервис» немедленно после выполнения таких работ – 15.10.2022 г., 25.10.2022 г. и 20.11.2022 г. соответственно, но до настоящего момента в адрес Субподрядчика не возвращены. Все указанные в данных актах работы (их стоимость) отражены в подписанном сторонами 31.12.2022 г. акте сверки. 

Согласно пункту 21.1. Договора субподряда «Сдача-приемка выполненных работ за отчетный месяц, осуществляется по «Журналу учета выполненных работ» (форма КС-ба), Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работах и затратах (форма КС-3 Госкомстата РФ). Журнал учета выполненных работ, Акт о приемке выполненных работ за отчетный месяц, в том числе в электронном виде формата Microsoft Excel (версия не выше 2003 года), Справку о стоимости выполненных работ и затрат Субподрядчик предоставляет Генеральному подрядчику с сопроводительным письмом в срок не позднее 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца». 

Положениями пункта 21.2. Договора субподряда также предусмотрено, что  «В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Субподрядчика Журнала учета выполненных работ и Акта о приемке выполненных работ, Генеральный подрядчик обязан направить Субподрядчику подписанный Журнал учета выполненных работ и Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Субподрядчиком Работ в письменной форме. В случае получения Субподрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Генеральным подрядчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Журнал учета выполненных работ и Акт Генеральному подрядчику. При не предоставлении Генеральным подрядчиком отказа от поднисания Субподрядчику в течение пяти календарных дней Акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и КС-3 считаются подписанными Сторонами».

Каких-либо замечаний от Генерального подрядчика по объему и качеству выполненных работ в адрес Субподрядчика до настоящего момента не поступало.

Кроме того, пунктом 21.4. Договора субподряда предусмотрено, что «21.4. Приемка Работ оформляется Актом приемки законченного строительством Объекта (КС-11) и Актом приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (КС-14). Генеральный подрядчик не позднее последнего числа месяца подписания Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (КС-14) направляет на подписание Субподрядчику «Акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств» (унифицированная форма первичной учетной документации по учету основных средств № ОС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 №7). Субподрядчик в течение 2 (Двух рабочих дней подписывает этот Акт и направляет его Генеральный Генеральному подрядчику».

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые ссылается как на основание своих требований и возражений.

При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований и возражений (ч. 2 ст. 9, ч. 1 ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик в нарушение ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  доказательств полной оплаты выполненных работ, в материалы дела не представил, доводы истца не опроверг, контррасчет долга не представил, в связи с чем несет риск неисполнения им данного процессуального действия (ст. 9, 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд расценивает процессуальное бездействие ответчика как признание фактических обстоятельств, на которых основывает свои требования истец, что допускает применение положений части 5 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, принимая во внимание отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих факт оплаты ответчиком выполненных истцом работ в полном объеме, суд приходит к выводу о том, что требования истца о взыскании задолженности в размере 7 386 569 руб. 47 коп. подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Водоканал строй сервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Нефтегазсоюз" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 7 386 569 руб. 47 коп., 59 933 руб. сумму расходов по оплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

 

Судья                                                                        Р.Ф. Ганеев