Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-75939/2019

16 сентября 2019 года

г.Санкт-Петербург

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Сергеева О.Н.,

рассмотрев дело по иску:

Истец: общество с ограниченной ответственностью"АС-Строй" (адрес:  Россия 350022, Краснодар, а/я 6500, ОГРН: 1052307175480);

Ответчик:  общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕГМЕНТА" (адрес:  Россия 199155, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Уральская д.17, лит.Д, пом.1-Н5-Н, офис 313, ОГРН:  1147847393935);

о взыскании 

установил:

ООО "АС-СТРОЙ" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО "СК "СЕГМЕНТА" о взыскании 684 010 руб. 60 коп. задолженности по оплате выполненных работ и 100 549 руб. 56 коп. пеней по договору подряда №ВГ-2-1-18-14 от 27.06.18, а также 50 000 руб. 00 коп. расходов на оплату услуг представителя.

Ответчик иск отклонил по мотивам, изложенным в отзыве, заявил о снижении неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства на основании главы 29 АПК РФ.

Судом установлено:

Между ООО «АС-Строй» - подрядчик и ООО «СК«Сегмента» - заказчик 27 июня 2018 года был заключен договор подряда № ВГ-2-1-18-14. Согласно вышеуказанному договору Подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по пуско-наладке трансформаторной подстанции наружной установки напряжением 6.3 кВ с трансформаторной подстанцией собственных нужд энергоцентра 0,4 кВ в блочно-модульном здании № 22.3 по генеральному плану, обозначение завода-изготовителя «2КТПНу-630/6,3/0,4 кВ» по объекту: «Строительство объектов военного городка № 5 «Дядьковская» г. Кореновск Краснодарский край» и сдать их результат Заказчику, а Заказчик (ООО «СК«Сегмента») обязался принять результат работ и оплатить его.

Объем работ и их стоимость согласованы сторонами в Локальном сметном расчете. Стоимость работ составила 977 158 руб. 00 коп.

Ответчик обязанность по приемке и оплате выполненных работ не исполнил.

Истец, после выполнения работ, письмом от 25.09.18 направил ответчику акты формы КС-2 и КС-3. Исполнительная документация неоднократно направлялась ответчику по электронной почте.

Ответчик в течении 10 рабочих дней, предусмотренных п. 6.1 договора, акты не подписал, мотивированного отказа от их подписания не заявил.

При указанных обстоятельствах на основании ст. 753 ГК РФ работы считаются принятыми.

В настоящее время задолженность ответчика, с учетом оплаченного аванса, составляет 684 010 руб. 60 коп.

В соответствии с п.8.3 договора истец начислил ответчику пени за нарушение сроков оплаты в размере 0,1% за каждый день просрочки по состоянию на 24.06.19 в сумме 100 549 руб. 56 коп.

Суд, с учетом ходатайства ответчика, на основании ст. 333 ГК РФ уменьшает неустойку до 100 000 руб. 00 коп.

Расходы на оплату услуг представителя не могут быть удовлетворены, поскольку истцом не представлены документы, подтверждающие их несение. 

Учитывая изложенное, исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

Руководствуясь статьями 309, 310, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕГМЕНТА" в пользу общества с ограниченной ответственностью "АССтрой" 684 010 руб. 60 коп. основного долга и 100 000 руб. 00 коп. пеней, а также 18 691 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине. 

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В остальной части иска отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со дня принятия.

Судья Сергеева О.Н.