Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Москва                                                                                Дело № А40-159730/21-31-1064

Резолютивная часть объявлена 08 ноября 2021г.

Решение изготовлено в полном объеме 02 декабря 2021г.

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи Давледьяновой Е.Ю. (единолично) 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Цечоевым И.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" (119526, МОСКВА ГОРОД, ВЕРНАДСКОГО ПРОСПЕКТ, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017, ОГРН: 1047796974092, Дата присвоения ОГРН: 16.12.2004, ИНН: 7720518494) 

к ответчику – ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЕТА" (142701, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВИДНОЕ ГОРОД, ОЛЬХОВАЯ УЛИЦА, ДОМ 4, ЛИТЕРА А, ОФИС/КОМ. XV/21, ОГРН: 1045003353493, Дата присвоения ОГРН: 02.03.2004, ИНН: 5018092940) 

о взыскании 5 632 912,09 руб. 

при участии: по протоколу

УСТАНОВИЛ:

ПАО "МОЭК" (далее - Истец) обратилось с иском в Арбитражный суд г. Москвы к ООО "ОЛЕТА" (далее - Ответчик) о взыскании договорной неустойки по договору о подключении к системе теплоснабжения № 10-11/18-44 от 15.03.2018 в размере 5 632 912,09 руб., а также расходов по  оплате государственной пошлины в размере 51 165 руб.

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме.

Ответчик возражал против удовлетворения иска по доводам, изложенным в отзыве.

Выслушав представителей истца и ответчика, рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив представленные по делу доказательства в их совокупности и взаимной связи, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, между ПАО "МОЭК" и ООО "ОЛЕТА" заключен договор от 15.03.2018 №10-11/18-44 о подключении к системе теплоснабжения, по условиям которого ПАО "МОЭК" обязуется осуществить подключение к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, расположенного по адресу: пос. Внуковское, д. Рассказовка, ул. 13/4 (Объект), а Ответчик обязуется выполнить действии по подготовке Объекта к подключению и оплатить оказанные исполнителем услуги в порядке и на условиях, определенных в договоре.

В соответствии с п. 4.1 Договора о подключении плата за подключение составляет 112 305 530,35 руб.

Согласно п. 4.2 Договора о подключении указанная сумма подлежит оплате в следующем порядке:

- первый платеж в размере 25 755 781,92 руб. – в течении 15 дней с даты заключения Договора;

- второй платеж в размере 85 852 606,41 руб. – в течении 90 дней с даты заключения договора, но не позднее даты фактического подключения;

- оставшаяся доля платы за подключение в размере 697 142,02 руб. – в течении 15 дней с даты подписания Акта о подключении к системе теплоснабжения в отношении объектов 2 этапа (этап 15).

Два первых платежа на общую сумму 111 608 388,33 руб. произведены Ответчиком своевременно, что отражено в п. 3 дополнительного соглашения № 3 к договору от 15.03.2018 № 10-11/18-44 о подключении к системам теплоснабжения объектов комплексной застройки от 16.12.2019, и не оспаривается ни истцом, ни ответчиком.

Пунктом 4.2 указанного дополнительного соглашения установлены изменения п. 4.1 Договора, в связи с чем оставшаяся доля платы за подключение 1 049 853,45 руб. оплачивается в следующем порядке:

- 943 440,37 руб. в течении 15 дней с даты подписания сторонами Акта о подключении к системе теплоснабжения в отношении объектов 1 этапа строительства;

- 106 413,08 руб. – в течении 15 дней с даты подписания сторонами Акта о подключении к системе теплоснабжения в отношении объектов 2 этапа строительства.

15.10.2020 между сторонами было заключено дополнительное соглашение № 4, которым стороны вновь изменили п. 4.2 договора. 

Ответчиком не произведена оплата оставшейся доли платы в соответствии с п. 4.2 договора в редакции соглашения № 3 за период с 10.01.2020 (09.01.2020 истечение срока для платежа с даты подписания сторонами акта № Т-УП1-01-180110/0-АП/1405 от 24.12.2019) по 14.10.2020 (до даты изменения редакции п. 4.2 договора в силу заключенного дополнительного соглашения № 4).

Исходя из п. 5.3 Договора о подключении Истец вправе требовать от Ответчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,05% от суммы платы за подключение за каждый день просрочки, но не более 5% от размера Платы за подключение.

В соответствии со ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

В соответствии со ст.309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Ответчиком заявлено ходатайство о применении ст. 333 ГК РФ.

Суд не находит оснований для применения положений ст. 333 ГК РФ и уменьшении размера неустойки, поскольку считает, что подлежащая уплате неустойка соразмерна последствиям нарушения обязательств; Ответчик доказательств явной несоразмерности не представил; вместе с тем принял на себя обязательство по оплате оказанных исполнителем услуг в срок, однако действий по своевременному погашению задолженности не осуществил. 

Ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.

Как указано в п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» при рассмотрении вопроса о необходимости снижения неустойки по заявлению ответчика на основании статьи 333 ГК РФ судам следует исходить из того, что неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежного обязательства позволяет ему неправомерно пользоваться чужими денежными средствами. Поскольку никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, условия такого пользования не могут быть более выгодными для должника, чем условия пользования денежными средствами, получаемыми участниками оборота правомерно (например, по договорам о подключении к системе теплоснабжения).

Ответчик, не произвел своевременную оплату стоимости услуг, совершил просрочку исполнения денежного обязательства.

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Представленный расчет пени судом проверен, признан неверным. Суд не может согласится с расчетом истца, поскольку истец рассчитывает неустойку в том числе на сумму исполненного в срок обязательства, что противоречит правовой природе неустойки, как меры ответственности за неисполненное обязательство. 

В соответствии с условиями договора и действующим законодательством начисление неустойки производится за период с 10.01.2020 по 14.10.2020 в размере 146 455, 47 руб. 

Остальные доводы и доказательства, приведенные и представленные лицами, участвующими в деле, суд исследовал, оценил и не принимает ко вниманию в силу их малозначительности и/или безосновательности, а также в связи с тем, что по мнению суда, они отношения к рассматриваемому делу не имеют и (или) не могут повлиять на результат его рассмотрения.

В соответствии с ч. 1, 3 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь ст.ст. 8, 12, 309, 310, 314, 330, 333, 426, 450, 539, 544, 546 Гражданского кодекса РФ, ст.ст. 49, 64-68, 71, 75, 110, 123, 156, 167-170, 176, 180, 181, АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЕТА" (142701, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВИДНОЕ ГОРОД, ОЛЬХОВАЯ УЛИЦА, ДОМ 4, ЛИТЕРА А, ОФИС/КОМ. XV/21, ОГРН: 1045003353493, Дата присвоения ОГРН: 02.03.2004, ИНН: 5018092940) в пользу ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" (119526, МОСКВА ГОРОД, ВЕРНАДСКОГО ПРОСПЕКТ, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017, ОГРН: 1047796974092, Дата присвоения ОГРН: 16.12.2004, ИНН: 7720518494) неустойку в размере 146 455, 47 руб. (сто сорок шесть тысяч четыреста пятьдесят пять рублей сорок семь копеек), а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 330 руб. (одна тысяча триста тридцать рублей ноль копеек). 

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

СУДЬЯ

Е.Ю. Давледьянова