АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-10146/2024 

от 16 октября 2024 года 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области  

РЕШИЛ:

Исковые требования Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального округа  

Архангельской области (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью Строительная компания  

"Вектор" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в течение тридцати дней со дня  

вступления решения суда по делу № А05-10146/2024 в законную силу устранить  

следующие недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту на выполнение  

работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта "Средняя общеобразовательная  

школа на 352 учащихся с интернатом на 80 мест" от 02.07.2020 № 0124200000620002737, а  

именно: 

1. Входная группа - центральный вход в столовую с ул. Октябрьская:  

- на фасаде: восстановить покрытие фасада путем восстановления отделочного слоя и  

обновления окрашенной поверхности, 

- провести работы по устранению дефектов по облицовке ступеней плитками.  2. Входная группа - вход в подсобные помещения столовой:  

- на фасаде: восстановить покрытие фасада путем восстановления  

отделочного слоя и обновления окрашенной поверхности, 

- провести работы по устранению дефектов по облицовке ступеней плитками.  3. Входная группа - вход в интернат со двора с ул. Заводская:  

- на фасаде: восстановить покрытие фасада путем восстановления  

отделочного слоя и обновления окрашенной поверхности, 

- провести работы по устранению дефектов по облицовке ступеней плитками.  4. Входная группа -вход в столовую со двора:  

- на фасаде: восстановить покрытие фасада путем восстановления отделочного  

слоя и обновления окрашенной поверхности, 

- провести работы по устранению дефектов по облицовке ступеней плитками по всей  

площади ступеней входной группы. 5. Входная группа - вход в интернат со стороны ул. Октябрьская: 

 - на фасаде: восстановить покрытие фасада путем восстановления  

отделочного слоя и обновления окрашенной поверхности, 

- провести работы по устранению дефектов по облицовке ступеней плитками.  6. Входная группа - вход в интернат со стороны ул. Заводская:  

- на фасаде: восстановить покрытие фасада путем восстановления отделочного слоя и  

обновления окрашенной поверхности, 

- провести работы по устранению дефектов по облицовке ступеней плитками.  7. Входная группа - вход в мастерские со двора со стороны ул. Заводской:  

- на фасаде: восстановить покрытие фасада путем восстановления отделочного слоя и  

обновления окрашенной поверхности, 

- провести работы по устранению дефектов по облицовке ступеней плитками.  8. Входная группа - вход в школу со стороны ул. Заводская:  

- на фасаде: восстановить покрытие фасада путем восстановления отделочного слоя и  

обновления окрашенной поверхности, 

- провести работы по устранению дефектов по облицовке ступеней плитками.  

Место проведения работ: задние школы "Средняя общеобразовательная шкода на  

352 учащихся с интернатом на 80 мест", расположенная по адресу: Архангельская обл.,  

<

...>. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания  

"Вектор" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000 руб. 00 коп. государственной пошлины. 

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  

апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  

Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия. 

Судья Н.В. Бутусова.