Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-12595/2018

25 июня 2018 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  14 июня 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  25 июня 2018 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Панюшкиным Н.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОНТАЖ" (адрес:  Россия 192012, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр-кт ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ 116/1 ЛИТЕР Е/19-Н ОФИС 527, ОГРН:  1127847452292);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНТЕХСТРОЙ", (адрес:  Россия 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова 8, лит А; Россия 188660, п БУГРЫ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл ВСЕВОЛОЖСКИЙ р-н, ул ШКОЛЬНАЯ д. 11, корп. 1, пом. 20-Н, ОГРН:  1164704062764; 1164704062764);

третье лицо: акционерное общество "ФОРУМ НЕВА" (адрес:  Россия 196626, Санкт-Петербург, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК ШУШАРЫ, УЛИЦА ПУШКИНСКАЯ, ДОМ 25, КОРПУС 5, СТРОЕНИЕ 1, ОГРН:  1027804885239)

о взыскании 2 172 391 руб. 77 коп.

при участии

- от истца: ФИО1 по доверенности от 30.05.18, ФИО2 по доверенности от 17.07.17

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 20.04.18,

установил:

ООО "СТРОЙМОНТАЖ" после уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ просит взыскать с ООО "ЛЕНТЕХСТРОЙ" 1 041 180 руб. 44 коп. задолженности по оплате выполненных работ, 315 477 руб. 67 коп. пеней за просрочку оплаты на основании п.9.3. договора строительного подряда №07/ЛТС-16 от 13.12.16, 22 548 руб. 81 коп. убытков, связанных с доставкой материалов и заготовительно-складскими расходами и 786 745 руб. 80 коп. убытков, связанных с вынужденным простоем рабочих, а также 85 000 руб. 00 коп. расходов на оплату услуг представителя.

Ответчик иск отклонил.

Третье лицо – АО «Форум Нева» отзыв не представило.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен договор строительного подряда №07/ЛТС-16 от 13.12.16.

Начальный срок выполнения работ – 28.12.16.

Конечный срок выполнения работ – 21.03.17.

Цена работ составляет 2 290 000 руб. 00 коп.

В соответствии с п.3.3. договора ответчик – генподрядчик перечислил истцу – субподрядчику аванс в размере 229 000 руб.00 коп. на приобретение материалов.

Истец в обоснование факта выполнения работ представил односторонние акты сдачи – приемки работ формы КС-2, КС-3 №1 от 30.05.17.

Ответчик письмом от 14.11.17 исходящий № И-0231-ЛТС заявил отказ от подписания актов в связи с не предоставлением паспортов на материалы и товарно-транспортных накладных, что предусмотрено п.п.3.4, 4.7 договора. Следовательно, работы ответчиком не приняты.

При расчете неустойки истец не учел 10% ограничения, установленное п.9.3 договора.

Расчет убытков, связанных с доставкой материалов, заготовительно-складскими расходами, простоем рабочих истцом не представлен.

Документы, подтверждающие эти убытки, в материалах дела отсутствуют. Доставка материалов на объект входила в стоимость работ по договору.

Учитывая изложенное, иск не доказан по праву и размеру и удовлетворению не подлежит.

В связи с тем, что при подаче иска истцу была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины, с него подлежит взысканию в доход федерального бюджета 33 829 руб. 76 коп. государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОНТАЖ" в доход федерального бюджета 33 829 руб. 76 коп. государственной пошлины.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.