Арбитражный суд Хабаровского края

<

...>, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-1338/2025

г. Хабаровск

23 апреля 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 17 апреля 2025 года.

В полном объеме решение изготовлено 23 апреля 2025 года.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи  Д.Л. Малашкина

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Г.А. Паликовым,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Транснефть - Дальний Восток» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 680020, 

<

...>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Прораб» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 675000, 

<

...>)

о взыскании 2 288 330 руб. 88 коп.,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: Союз «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Приамурья» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 675000, 

<

...>),

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1 представитель по доверенности от 08.11.2022 № 203,

от ответчика – не явились,

третье лицо – не явилось,

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть - Дальний Восток» (далее – ООО «Транснефть - Дальний Восток», истец) обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Прораб» (далее – ООО «Прораб», ответчик) о взыскании 2 288 330 руб. 88 коп. неустойки по контрактам № ТДВ-1586-2023 от 09.10.2023 и

Определением суда от 06.02.2025 исковое заявление принято, возбуждено производство по делу № А73-1338/2025, назначено предварительное судебное заседание на 03.03.2025 в 10 часов 00 минут. К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Союз «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Приамурья».

Определением от 03.03.2025 дело назначено к судебному разбирательству на 17.04.2025 в 10 часов 00 минут.

Ответчик и третье лицо явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, извещены о времени и месте рассмотрения дела в судебном заседании в соответствии с правилами статей 121-123 АПК РФ, в том числе путем размещения сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Отзывы на иск ответчик и третье лицо не представили.

В соответствии с частями 1, 3, 5 статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в судебном заседании в отсутствие не явившихся ответчика и третьего лица по имеющимся доказательствам.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме, в обоснование привел доводы, изложенные в исковом заявлении и дополнительных письменных пояснениях.

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Между ООО «Транснефть - Дальний Восток» (заказчик) и ООО «Прораб» (подрядчик) заключен контракт № ТДВ-1586-2023 от 09.10.2023 на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организации системы «Танснефть» при реализации программы развития, технического перевооружения и реконструкции, программы  капитального и текущего ремонта по объекту «06-ТПР-004-027403 НПС №34. РНУ «Дальнереченск» Замена СОИ БИК №2. Техническое перевооружение».

Согласно  пункту 3.1 контракта № ТДВ-1586-2023 от 09.10.2023, подрядчик в установленные контрактом сроки и в счет контрактной цены выполняет за свой риск, своими силами и силами, согласованных заказчиком субподрядных организаций, все работы и услуги в объеме, определенном настоящим контрактом и рабочей документацией, а также обеспечивает страхование объекта в соответствии со статьей 27 контракта, предоставлает обеспечение исполнения обязательств по контракту в виде безусловных и безотзывных независимых гарантий и/или обеспечительного платежа в соответствии со статьей 26 контракта (если иной способ обеспечения исполнения обязательств по контракту не согласован сторонами, в том числе путем заключения дополнительных соглашений в соответствии с условиями контракта) и выполняет все иные требования, установленные контрактом.

В соответствии с пунктом 3.2 контракта № ТДВ-1586-2023 от 09.10.2023 в рамках выполнения работ и услуг по объекту(ам): 06-ТПР-004-027403 НПС № 34. РНУ «Дальнереченск». Замена СОИ БИК №2. Техническое перевооружение, заказчик поручает, а подрядчик в счет контрактной цены в соответствии с требованиями контракта, рабочей документацией и регламентов заказчика (в том числе с учетом их изменений в период срока действия контракта) обязуется осуществить следующее (включая,  но не ограничиваясь): получение всех необходимых разрешений и допусков к производству работ в соответствии с условиями контракта, требованиями регламентов заказчика и нормативных правовых актов Российской Федерации; выполнение строительно-монтажных работ, в том числе сооружение/демонтаж временных зданий и сооружений; поставку всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ и услуг по контракту (за исключением материалов и оборудования, входящих в поставку заказчика и указанных в Приложении 6); приемку, вывоз до мест складирования материалов и оборудования поставки заказчика согласно проекту организации строительства, хранение материалов и оборудования поставки заказчика на собственных и/или арендованных складах и площадках складирования, вывоз на объект материалов и оборудования поставки заказчика; проведение работ по вскрытию пересечений коммуникаций и сетей сторонних организаций, их техническое освидетельствование с привлечением специализированной организации, согласованной с эксплуатирующей организацией, получение заключения промышленной безопасности и, при необходимости, выполнение работ по результатам заключения (в соответствии с ТУ на пересечения владельца коммуникаций); проведение испытаний и участие (совместно с заказчиком) в пропуске диагностических приборов; выполнение пуско-наладочных работ, включая индивидуально-функциональное опробование согласно рабочей документации; участие (совместно с заказчиком) в комплексном опробовании систем и оборудования; формирование и предоставление заказчику исполнительной документации; выполнение работ по рекультивации нарушенных земель в соответствии с их целевым назначением на всей площади представленных заказчиком участков с оформлением по установленной форме документов (справок), подтверждающих проведение рекультивации в соответствии с рабочей документацией; передачу рекультивированных земельных участков правообладателям земельных участков, с соблюдением требований к выполнению рекультивации, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»), включая проведение измерений (исследований) о физических, химических и биологических показателях состояния почвы, определенных по итогам выполнения биологических мероприятий, в случаях, когда обязанность по биологической рекультивации закреплена за подрядчиком; совместный с заказчиком возврат земельных участков их правообладателям, предоставившим данные земельные участки заказчику во временное пользование, а также участие в урегулировании вопросов по соблюдению требований к выполнению технической и биологической рекультивации, возникающих у правообладателей земельных участков и уполномоченных государственных органов; сдачу объекта заказчику по Акту приемки законченного строительством объекта (форма КС-11, Приложение 37); получение совместно с заказчиком в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (ЗОС) в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;? сдачу Объекта (совместно с Заказчиком) приемочной комиссии по Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14, Приложение 36) или Акту приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (Ф-36, Приложение 46) и выполнение обязательств в течение гарантийного срока; охрану и содержание объекта (строительной площадки, в том числе площадок временных зданий и сооружений); выполнение иных работ, неразрывно связанных со строящимся (реконструируемым, ремонтируемым) объектом.

Согласно пункту 4.1 контракта № ТДВ-1586-2023 от 09.10.2023,  контрактная цена работ и услуг, подлежащая оплате подрядчику составляет  6 490 727 руб. 10 коп., кроме того НДС в сумме  1 298145 руб. 42 коп.

В соответствии с пунктами 5.1, 5.2 контракта № ТДВ-1586-2023 от 09.10.2023 работы, предусмотренные контрактом по объекту, должны быть начаты подрядчиком в сроки согласно приложению 2 «график выполнения работ» 01.05.2024 и полностью завершены не позднее 01.10.2024.

В пункте 34.1.1 контракта № ТДВ-1586-2023 от 09.10.2023  предусмотрено, что   заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке полностью или частично, уведомив об этом подрядчика в письменном виде, в том числе, в случае если подрядчик в течение 15 календарных дней от сроков, установленных графиком выполнения работ (приложение №2) не приступил к началу выполнения работ по контракту и/или по объекту.                                                                                                    Работы должны быть начаты с 01.05.2024, однако ответчик в указанный срок к выполнению отдельных видов работ не приступил. Просрочка составила  от 35 до 40 дней, по 56 работ из 60 на сумму 6 297 458 руб. 16 коп. Подрядчик не выполнил отдельные виды работ, которые должны быть начаты с 01.05.2024.

Письмом от 02.05.2024 исх. № 50 Подрядчик обратился к Заказчику с предложением расторгнуть контракт № ТДВ-1586-2023 от 09.10.2023 по причине возникших финансовых проблем, из-за которых ООО «Прораб» не может выполнить работы по заключенному контракту.

16.05.2024 Заказчиком в адрес Подрядчика направлено письмо (исх. № ТДВ/Б-01-11-27/8592) о срыве срока начала работ.

17.06.2024 ООО «Транснефть – Дальний Восток» направило Подрядчику уведомление исх. № ТДВ/11-20/10381 о расторжении контракта № ТДВ-1586-2023 от 09.10.2023 в одностороннем порядке в связи с нарушением срока начала выполнения работ.

Уведомление о расторжении контракта № ТДВ-1586-2023 от 09.10.2023 в одностороннем порядке получено ответчиком 18.06.2024.

Согласно пункту 29.14.3 контракта № ТДВ-1586-2023 от 09.10.2023 в случае, если заказчик откажется от исполнения контракта в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в пункте  34.1 контракта, подрядчик обязан исполнить обязательства, указанные в пункте 34.2 контракта, а заказчик вправе сверх штрафов, пеней и неустоек, предъявленных ранее за нарушения, предусмотренные статьей 29 контракта, предъявить подрядчику неустойку в размере 15 % от контрактной цены.

Согласно расчету истца неустойка по контракту  № ТДВ-1586-2023 от 09.10.2023 составила 1 168 330 руб. 88 коп.

01.04.2024 между ООО «Транснефть - Дальний Восток» (заказчик) и ООО «Прораб» (подрядчик) заключен контракт  № ТДВ-389-2024 на выполнение работ по строительству склада хранения материальных ценностей  НПС-26 РНУ «Белогорск».

Согласно  пункту 3.1 контракта № ТДВ-389-2024 от 01.04.2024 подрядчик в установленные контрактом сроки и в счет контрактной цены выполняет за свой риск, своими силами и силами, согласованных заказчиком субподрядных организаций, все работы и услуги в объеме, определенном настоящим контрактом и рабочей документацией, а также обеспечивает страхование объекта в соответствии с условиями  контракта.

В соответствии с пунктом 3.2 контракта № ТДВ-389-2024 от 01.04.2024 в рамках выполнения работ и услуг по объекту: 06-ТПР-007-035836 НПС-26. Склад хранения материальных ценностей. РНУ «Белогорск». Строительство; заказчик поручает, а подрядчик в счет контрактной цены в соответствии с требованиями контракта, рабочей документацией обязуется осуществить следующее (включая, но не ограничиваясь): получение всех необходимых разрешений и допусков к производству работ в соответствии с условиями Контракта и нормативных правовых актов Российской Федерации; выполнение строительно-монтажных работ; поставку всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ и услуг по контракту (за исключением материалов и оборудования, входящих в поставку заказчика и указанных в Приложении к контракту «График поставки материалов и оборудования заказчиком); приемку, вывоз до мест складирования материалов и оборудования поставки заказчика согласно проекту организации строительства, хранение материалов и оборудования поставки заказчика на собственных и/или арендованных складах и площадках складирования, вывоз на объект материалов и оборудования поставки заказчика; проведение работ по вскрытию пересечений коммуникаций и сетей сторонних организаций, их техническое освидетельствование с привлечением специализированной организации, согласованной с эксплуатирующей организацией, получение заключения  промышленной безопасности и, при необходимости, выполнение работ по результатам заключения (в соответствии с ТУ на пересечения владельца коммуникаций); выполнение пуско-наладочных работ; формирование и предоставление заказчику исполнительной и приемо-сдаточной документации, в том числе на электронном носителе в сканированном виде в соответствии с условиями пункта 21.3; выполнение работ по рекультивации нарушенных земель в соответствии с их целевым назначением на всей площади представленных заказчиком участков с оформлением по установленной форме документов (справок), подтверждающих проведение рекультивации в соответствии с рабочей документацией; совместный с заказчиком возврат земельных участков их правообладателям ,предоставившим данные земельные участки Заказчику во временное пользование, а также участие в урегулировании вопросов по соблюдению требований к выполнению технической и биологической рекультивации, возникающих у правообладателей земельных участков и уполномоченных государственных органов; сдачу объекта заказчику по Акту приемки законченного строительством объекта; охрану и содержание объекта (строительной площадки, в том числе,  площадок временных зданий и сооружений); выполнение иных работ, неразрывно связанных со строящимся(реконструируемым, ремонтируемым) объектом; выполнение обязательств в течение Гарантийного срока.

Согласно пункту 4.1 контракта № ТДВ-389-2024 от 01.04.2024, контрактная цена работ и услуг, подлежащая оплате подрядчику, составляет  18 666 666 руб. 67 коп., кроме того НДС в сумме  3 733 333 руб. 33 коп.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта № ТДВ-389-2024 от 01.04.2024 работы, предусмотренные контрактом по объекту, должны быть начаты подрядчиком в сроки согласно приложению 2 «график выполнения работ» 01.05.2024 и полностью завершены не позднее 18.10.2024.

В пункте 31.1 контракта № ТДВ-389-2024 от 01.04.2024 предусмотрено, что заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке полностью или частично, уведомив об этом подрядчика в письменном виде, в том числе, в случае если подрядчик в течение 15 календарных дней от сроков, установленных графиком выполнения работ (приложение №2) не приступил к началу выполнения работ по контракту и/или по объекту.

Работы должны быть начаты с 01.05.2024, однако ответчик в указанный срок к выполнению отдельных видов работ не приступил. Просрочка составила  40 дней по 4 видам работ из 122 на сумму 2 446 809 руб. 74 коп. Подрядчик не выполнил отдельные виды работ, которые должны быть начаты с 01.05.2024.

Заказчиком 13.05.2024 в адрес Подрядчика направлены документы для совместного приказа о допуске Подрядчика для выполнения работ по контракту № ТДВ-389-2024 от 01.04.2024.

15.05.2024 Подрядчик направил в адрес Заказчика проект производства работ.

Однако в срок, установленный контрактом № ТДВ-389-2024 от 01.04.2024, работы Подрядчиком не были начаты и не выполнялись.

17.06.2024 ООО «Транснефть – Дальний Восток» направило в адрес Подрядчика уведомление № ТДВ/11-20/10380 о расторжении контракта № ТДВ-389-2024 от 01.04.2024 в одностороннем порядке в связи с нарушением срока начала выполнения работ.

Уведомление о расторжении контракта № ТДВ-389-2024 от 01.04.2024 в одностороннем порядке получено ответчиком 18.06.2024, что последним не оспорено.

В соответствии с пунктом 26.5 контракта № ТДВ-389-2024 от 01.04.2024 в случае, если заказчик откажется от исполнения контракта в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным контрактом, заказчик вправе сверх штрафов, пеней и неустоек, предъявленных ранее за нарушения, предусмотренные контрактом, предъявить подрядчику неустойку в размере 5 % от контрактной цены.

Согласно расчету истца, неустойка по контракту  № ТДВ-389 -2024 от 01.04.2024 составила 1 120 000 руб. 00 коп.

Претензией от 17.06.2024, направленной в адрес ООО «Прораб», ООО «Транснефть – Дальний Восток» требовало уплатить неустойку по вышеуказанным контрактам.

ООО «Прораб» претензию оставило без удовлетворения.

Заключениями УФАС по Хабаровскому краю от 29.07.2024 №НВ/8204/24 и от  29.07.2024 №НВ/8208/24 рекомендовано сведения, представленные ООО «Транснефть – Дальний Восток» в отношении ООО «Прораб», включить в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения ООО «Транснефть – Дальний Восток» в Арбитражный суд Хабаровского края с настоящим иском.

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, арбитражный суд пришёл к следующим выводам.

В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно статье 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (статья 310 ГК РФ).                                                                              Согласно пунктам 1, 2 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

В силу пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора на основании пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации.                                                                                        Условиями заключенных между сторонами контрактов предусмотрено право заказчика на односторонний отказ от исполнения контракта.

Так, в пункте 34.1.1 контракта № ТДВ-1586-2023 от 09.10.2023 и в пункте 31.1.1 контракта № ТДВ-389-2024 от 01.04.2024 предусмотрено право заказчика отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке полностью или частично, уведомив об этом подрядчика в письменном виде, в том числе, в случае если подрядчик в течение 15 календарных дней от сроков, установленных графиком выполнения работ (приложение №2) не приступил к началу выполнения работ по контракту и/или по объекту.

В соответствии с пунктом 34.2 контракта № ТДВ-1586-2023 от 09.10.2023 и пунктом 31.2 контракта № ТДВ-389-2024 от 01.04.2024 уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта или его части по основаниям, оговоренным  в пункте 34.1 контракта № ТДВ-1586-2023 от 09.10.2023 и пункте 31.1 контракта № ТДВ-389-2024 от 01.04.2024, вручается подрядчику не менее чем за 20 календарных дней до предполагаемой даты расторжения контракта с указанием в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения контракта или его части, даты расторжения контракта или его части.

Статья 65 АПК РФ возлагает на каждое лицо, участвующее в деле, обязанность доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Как установлено из материалов дела, по условиям контракта № ТДВ-1586-2023 от 09.10.2023 работы должны быть начаты с 01.05.2024. Однако ответчик в указанный срок к выполнению отдельных видов работ на объекте не приступил. Просрочка составила от 35 до 40 дней, по 56 видам работ из 60 на сумму 6 297 458 руб. 16 коп. Подрядчик не выполнил работы, которые должны быть начаты с 01.05.2024.

Согласно условиям контракта № ТДВ-389-2024 от 01.04.2024, работы должны быть начаты с 01.05.2024. Между тем, ответчик в указанный срок к выполнению отдельных видов работ не приступил. Просрочка составила 40 дней по 4 видам работ из 122 на сумму 2 446 809 руб. 74 коп. Подрядчик не выполнил отдельные виды работ, которые должны быть начаты с 01.05.2024.

Уведомлениями от 17.06.2024 исх. № ТДВ/11-20/10380 и исх. № ТДВ/11-20/10381 истец уведомил ответчика об одностороннем отказе от исполнения контрактов № ТДВ-1586-2023 от 09.10.2023 и № ТДВ-389-2024 от 01.04.2024.

Указанные уведомления получены ответчиком 18.06.2024, что последним не опровергнуто.

В десятидневный срок с даты уведомления ответчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контрактов, нарушения условий контрактов подрядчиком не были устранены.

Таким образом, контракты № ТДВ-1586-2023 от 09.10.2023 и № ТДВ-389-2024 от 01.04.2024 считаются расторгнутыми с 10.07.2024.

Доказательств наличия обстоятельств объективно препятствующих выполнению работ, равно как и доказательств отсутствия вины в нарушении обязательства по выполнению работ в сроки, установленные контрактами № ТДВ-1586-2023 от 09.10.2023 и № ТДВ-389-2024 от 01.04.2024, ответчиком в материалы дела не представлено.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о правомерном одностороннем отказе заказчика от исполнения контрактов ввиду существенных нарушений обязательств со стороны  подрядчика.

На основании пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе неустойкой.

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 29.14.3 контракта № ТДВ-1586-2023 от 09.10.2023 установлено, что в случае, если заказчик откажется от исполнения контракта в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в пункте 34.1 контракта, подрядчик обязан исполнить обязательства, указанные в пункте 34.2 контракта, а заказчик вправе сверх штрафов, пеней и неустоек, предъявленных ранее за нарушения, предусмотренные статьей 29 контракта, предъявить подрядчику неустойку в размере 15 % от контрактной цены.

В соответствии с пунктом 26.5 контракта№ ТДВ-389-2024 от 01.04.2024 в случае, если заказчик откажется от исполнения контракта в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным контрактом,  заказчик вправе сверх штрафов, пеней и неустоек, предъявленных ранее за нарушения, предусмотренные контрактом, предъявить подрядчику неустойку в размере 5 % от контрактной цены.

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по контрактам, что послужило основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контрактов, истец начислил неустойку в общем размере 2 288 330 руб. 88 коп.

Согласно расчету истца, неустойка составила: 1 168 330 руб. 88 коп. – по контракту № ТДВ-1586-2023 от 09.10.2023 и 1 120 000 руб. 00 коп. – по контракту № ТДВ-389 -2024 от 01.04.2024, всего 2 288 330 руб. 88 коп.

Материалами дела подтверждается, что в срок установленный контрактами, ответчик не приступил к выполнению отдельных видов работ, работы не выполнял, в связи с чем, истцом правомерно начислена неустойка в соответствии с условиями контрактов.

Расчет неустойки, произведенный истцом, судом проверен, является верным арифметически и соответствует условиям контрактов.

Ответчик ходатайство об уменьшении неустойки в порядке статьи 333 ГК РФ не заявил, доказательства несоразмерности подлежащей взысканию неустойки последствиям нарушения обязательств по контрактам, равно как и доказательства возможности получения истцом необоснованной выгоды, в случае взыскания неустойки в заявленном размере, в материалы дела не представил.

Оснований для признания подлежащей взысканию неустойки несоразмерной последствиям неисполнения ответчиком обязательств по контрактам и уменьшения неустойки по правилам статьи 333 ГК РФ у суда не имеется. Не установлено судом по материалам дела и оснований для освобождения ответчика от ответственности за ненадлежащее исполнение (неисполнение) обязательств по контрактам № ТДВ-1586-2023 от 09.10.2023 и № ТДВ-389-2024 от 01.04.2024.

На основании изложенного исковое требование ООО «Транснефть - Дальний Восток» о взыскании с ООО «Прораб» неустойки в размере 2 288 330 руб. 88 коп. подлежит удовлетворению.

Поскольку исковые требования удовлетворены в полном объеме, судебные расходы истца по уплате государственной пошлины в размере 93 650 руб. 00 коп. подлежат отнесению на ответчика в  соответствии с правилами, установленными частью 1 статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Прораб» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Транснефть - Дальний Восток» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в размере 2 288 330 руб. 88 коп. и судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 93 650 руб. 00 коп.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья                                                                                            Д.Л. Малашкин