АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-13699/2017

28 июня 2018 года

г. Симферополь

Резолютивная часть решения объявлена 22 июня  2018 года.

Полный текст решения изготовлен 28 июня 2018 года.

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гризодубовой А.Н., при ведении протокола судебного заседания и его аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Юг» (шоссе Фиолентовское, 1/2, корпус А, литера М, 

<

...>; ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 9201516063/920101001) к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Крым «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6» (ул. Гагарина, 15, г. Симферополь, 

<

...>; ОГРНИП 1149102170854, ИНН/КПП 9102063951/910201001), третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора – Общество с ограниченной ответственностью «Технострой Крым» о взыскании 141 000,00 руб.

при участии представителей сторон:

от истца – Ивер Р.А., директор;

от ответчика - ФИО2, представитель по доверенности № 64/01-10 от 12.01.2018;

от третьего лица – не явился.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Строй-Юг» обратилось в Арбитражный суд с иском к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Крым «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6» о взыскании задолженность по контракту на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) от 26.10.2016г. №13/зк в сумме 141000 руб.

Ответчик в отзыве исковые требования не признал и просил в иске отказать.

Также ответчик пояснил, что истцом не выполнялись принятые на себя обязательства, контроль качества выполняемых строительных работ не осуществлялся, соответственно, никаких отметок в журнале заказчика истец не производил, фотофиксацию в течении всего периода оказания услуг с момента заключения контракта не осуществлял, отчеты об оказании услуг в соответствии с контрактом не представлял. Освидетельствование совместно с подрядчиком и оценку качества выполненных работ, скрываемых при производстве последующих работ не производил, равно как и формы КС2, КС 3, представленные подрядчиком к подписанию заказчика не анализировал.

Исследовав материалы дела, заслушав доводы и пояснения представителей истца и ответчика, арбитражный суд установил следующее.

Между ГБУ «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6» (заказчик) и ООО Строй-Юг (исполнитель) заключен контракт на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) от 26.10.2016г. №13/зк, согласно пункту 1.1. которого, исполнитель обязуется оказать заказчику услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ, на объекте: «капитальный ремонт ожогового отделения ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6» (2 этаж), расположенного по адресу: 

<

...>» в строгом соответствии с нормативными правовыми актами РФ, требованиями к товарам, материалам, используемыми для проведения работ, техническим заданием, проектной документацией, сметной документацией, сдать их результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат услуг и оплатить их в порядке и на условиях контракта.

Согласно п.1.2. Объем услуг, оказываемых Исполнителем, требования к оказываемым услугам, требования к результатам услуг определены в Техническом задании.

Оплата услуг согласно п.2.3. раздела 2 Контракта осуществляется по безналичному расчету ежемесячно согласно Акту оказанных услуг в течении 30 дней с даты подписания Акта оказанных услуг.

Стоимость услуг по осуществлению строительного контроля составляет 141 000 руб.

В силу пункта 4.2 договора началом оказания услуг по строительному контролю считается дата подписания сторонами настоящего контракта окончанием оказания услуг по строительному контролю 31.12.2016г.

В главе 3 контракта предусмотрено, что исполнитель обязуется оказывать заказчику следующие услуги по строительному контролю:

п. 3.1. Обязанности Исполнителя:

3.1.1. Приступить к оказанию услуг с даты, указанной в п. 10.1 настоящего контракта, создав для                 исполнения          обязательств   но настоящему        контракту      группу Строительного                 контроля в составе     не менее     3 (трех)       специалистов, имеющих соответствующую подготовку и разрешения для оказания услуг (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468), обеспечить постоянное присутствие указанных специалистов при выполнении работ на объекте.

3.1.2. Оказывать услуги по строительному контролю за выполнением строительно монтажных работ по объекту собственными силами.

3.1.3. Услуга строительного контроля должна включать проведение следующих контрольных мероприятий: проверка       полноты и соблюдения установленных сроков  выполнения Генподрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов, проверка выполнения                 Генподрядчиком  контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов; проверка полноты и                 соблюдения          установленных сроков  выполнения   Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов;

- совместно с Подрядчиком            освидетельствование и промежуточная приемка скрытых работ, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

-проверка совместно           с          Подрядчиком            соответствия завершенных  работ требованиям                 проектной и     подготовленной            на     ее  основе   рабочей    документации, результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов.

3.1.4. При      выявлении     недостатков   в  выполняемых       работах, совместно  с представителями Подрядчика и Заказчика принимать участие в составлении актов, в которых определять сроки устранения недостатков. Контролировать сроки устранения недостатков.

3.1.5.При       несвоевременном     или     некачественном выполнении  указаний  по устранению выявленных недостатков уведомлять об этом в письменной форме Заказчика и Подрядчика, предлагая принять меры по оперативному устранению недостатков.

3.1.6. При необходимости рекомендовать Заказчику проведение лабораторных и других испытаний качества материалов и изделий, применяемых в строительстве.

3.1.7. В процессе строительного контроля:

контролировать качество выполняемых строительно-монтажных работ, их соответствие проекту и требованиям нормативных документов; в случае не устранения замечаний Подрядчиком производить запись в Журнале производства    работ, письменно, уведомив          Заказчика о необходимости приостановки строительно-монтажных работ на Объекте; разрешать выполнение последующих работ только после устранения всех недостатков, допущенных на предыдущем этапе работ, строительный                 контроль осуществляется ежедневно (в рабочие дни) с отметкой в журнале заказчика, с фото фиксацией в течение всего периода оказания услуг с даты заключения Контракта, с целью соблюдения требований нормативных документов, в том      числе качества      строительно-монтажных работ, соответствия стоимости утвержденной проектно-сметной документации.

3.1.8. Проводить совместно с Подрядчиком освидетельствование и оценку качества выполненных                 работ, скрываемых при  производстве            последующих работ, а также запрещать производство дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.

3.1.9. Контролировать наличие и правильность ведения исполнительной первичной документации, и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве строительно-монтажных работ. Осуществлять проверку наличия документов, подтверждающих качественные характеристики конструкций, изделий, материалов и оборудования, используемых     при строительстве объекта, -технических паспортов, сертификатов,       документов,       отображающих       результаты лабораторных испытаний и т.д.

3.1.10. Контролировать исполнение Подрядчиком указаний   и предписаний, государственного строительного надзора и требований Заказчика, относящихся к качеству работ и применяемых в строительстве материалов, изделий и конструкций, оборудования и т.д.

3.1.11. Осуществлять контроль за соответствием объемов работ, предъявляемых к оплате Подрядчиком, фактически выполненным объемам работ. Производить проверку и подписание актов выполненных работ для представления их Заказчику.

3.1.12. Участвовать в проведении приемочной комиссией проверок качества отдельных узлов, конструкций, отдельных видов работ и Объекта в целом.

3.1.13.Участвовать в проверках, проводимыми  органами   государственного строительного надзора.

3.1.14. Назначить ответственных за проведение строительного контроля (далее -группа Строительного контроля), имеющих соответствующую квалификацию и закрепить их полномочия соответствующим приказом, с предоставлением копии приказа Заказчику.

Предоставить Заказчику документы, подтверждающие квалификацию Предоставить Заказчику приказ о назначении технического руководителя строительного контроля на Объекте.

3.1.16. Участвовать в работе приемочной комиссии по приемке результатов выполненных  Подрядчиком работ, контролировать подготовку          комплектов исполнительной документации Объекта (Журнал производства работ, скрытых работ, и т.д.). В случае     обнаружения     недоделок     и дефектов     участвовать     в     составлении соответствующего перечня.

3.1.17. Представлять Заказчику ежемесячно до 5-го числа следующего за отчетным месяцем отчет по проведенному строительному контролю в письменной форме с предоставлением фото материалов, визировать акты контрольных замеров объемов работ, выполненных на Объекте.

3.1.18.Использовать сведения, документы           или     любые другие материалы, предоставленные ему Заказчиком только для оказания услуг по настоящему контракту.

3.1.19.При необходимости изменения проекта или замены материалов или конструкций      докладывать  соответствующие предложения     Заказчику,     а также представителям проектной организации - без согласования с ними изменения строго запрещаются.

3.1.20.Осуществлять контроль за ведением общего       журнала производства работ установленного                 образца в соответствии с Порядком ведения общего журнала работ, а также)     специальных журналов       учета выполнения       работ           при     строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007),       утвержденных      приказом       Федеральной                 службой       по      экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7.

3.1.21. Осуществлять по мере готовности с участием представителей Подрядчика и Заказчика промежуточную приемку ответственных конструкций зданий и сооружений.

3.1.22. Знать  потребность  в  оборудовании и материалах, следить за их своевременным поступлением, участвовать в составлении рекламационных актов по качеству материалов, конструкций, оборудования.

3.1.23. Обеспечивать извещение Заказчика обо всех случаях аварийного состояния на Объекте и объемах работ по ликвидации аварий.

3.1.24. Проверять наличие согласования с соответствующими организациями порядка установки, опробования и регистрации технологических подъемных механизмов и оборудования, работающего под повышенным давлением.

3.1.25. Проверять действительную готовность каждого вида работ, конструкций, оборудования и объекта в  целом, проверять           наличие надлежаще оформленной технической     документации,     сверять     наличие     смонтированного   и     установленного оборудования, внесенного в перечни и описи, к актам приемки, а также готовность сооружения под монтаж технологического оборудования .

3.1.26. Весь    персонал Исполнителя перед началом работ должен    быть проинструктирован     Исполнителем          по        мерам     безопасности         с подписью    в журнале инструктажа.

3.1.27.Выполнять другие    поручения Заказчика, связанные с контролем    за строительством Объекта и иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. Использовать в своей деятельности           утвержденную Заказчиком проектную документацию на Объект;

3.2.2. Получать от Заказчика все разрешительные документы на строительство Объекта;

3.2.3. Вносить предложения по устранению недоработок проектной документации;

3.2.4. Свободного доступа на строительную площадку Объекта в рабочее время и во внерабочее время в случае экстренных ситуаций; 3.2.5. Требовать от подрядчика: выполнения работ, в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной документацией, соблюдения требований нормативных документов относительно порядка выполнения и приемки работ; проведения лабораторных испытаний материалов и конструкций относительно их соответствия сертификатам качества, а оборудования - техническим (технологическим) паспортам и своевременного извещения о проведении таких испытаний; устранения отклонений от проектных решений, недостатков (дефектов) и недоработок и повторного предъявления работ для осуществления технического надзора; остановки выполнения работ до оформления актов на скрытые работы

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Предоставлять Исполнителю проектно-сметную и по его запросу иную документацию,                 необходимую для выполнения  Исполнителем         обязанностей по настоящему контракту

3.3.2. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, определенном разделом 3 настоящего контракта.

3.3.3.В течение         3-х       дней    принимать     решения         по вопросам, поднятым Исполнителем, в связи с выявленными нарушениями при производстве работ на Объекте;

3.3.4. Для выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору предоставить ему беспрепятственный доступ на Объект;

3.4.Заказчик вправе:

3.4.1. Осуществлять текущий контроль над деятельностью Исполнителя.

Разделом 2 установлен порядок расчетов, которым предусмотрено, что оплата осуществляется по безналичному расчету ежемесячно согласно Акту оказанных услуг в течение 30 дней с даты подписания Акта оказанных услуг.

Согласно технического задания, при выполнении работ на исполнителя возлагаются следующие обязательства:

1.1.      Контроль за соответствием строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

1.2.      Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых при строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.).

1.3.      Освидетельствование и оценка совместно с ответственными представителями подрядной организации выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.

1.4.      Осуществление промежуточной приемки ответственных конструкций.

1.5.      Контроль за состоянием и соответствием проекту поступающего на монтаж оборудования, качеством его монтажа, пуско-наладочными работами.

1.6.      Контроль за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ проектной документации, выполнение замеров физических объёмов выполненных работ.

1.7.      Учет выполненных и принятых объемов работ.

1.8.      Выполнение замеров физических объёмов выполненных работ.

1.9.      Контроль наличия и правильности оформления исполнительной документации (актов на скрытые работы, актов освидетельствования ответственных конструкций, исполнительной геодезической съемки смонтированных конструкций, частей зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ, результатов лабораторных испытаний) и контроль за внесением в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами.

1.10.    Контроль за исполнением строительно-монтажными организациями указаний и

предписаний авторского надзора и органов государственного строительного надзора, а также требований заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых строительно-монтажных работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и объектов в целом.

Участие в работе рабочих (приемочных) комиссий, в проверках, испытаниях, проводимых надзорными органами.

3.12. Участие в освидетельствовании объекта в случае консервации и в оформлении ' документации на консервацию или временное прекращение строительства, а также в оценке технического состояния объекта при передаче его подрядным организациям для продолжения работ.

3.13.    Участие в работе по приемке объекта строительства и сдаче его в эксплуатацию.

3.14.    Извещение Заказчика обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства.

3.15.    В случае обнаружения отклонений со стороны подрядной организации в выполнении работ на объекте от проектных, нормативных требований немедленно информировать об этом Заказчика и зафиксировать в журнале производства работ, выдать ответственному представителю подрядной организации предписание о приостановлении последующих видов работ; требовать переделку работ с недостатками или устранение недостатков.

3.16.    Проверка комплекта документов, необходимых для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов и предоставление указанных документов в орган государственного строительного надзора.

3.17.    Участие в получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Главой 5 контракта стороны определили порядок сдачи и приемки услуг, в соответствии с которым, исполнитель предоставляет заказчику ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, акт оказания услуг в 4 экземплярах. До 20.12.2016г. исполнитель предоставляет акт оказания услуг за год.

Надлежащее предоставление услуг исполнителем и приемка их результатов заказчиком оформляется актом приема-передачи оказанных услуг, после фактического оказания услуг (п.5.2 контракта)

В соответствии с п.10.1 контракта, календарные сроки оказания услуг определены сторонами, согласно графику выполненных работ по проведению капитального ремонта на объекте.

Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его обеими сторонами и действует до 31.12.2016г. (пункт 10.2 контракта).

По утверждению истца, ООО Строй-Юг осуществило строительный контроль (технический надзор) и направило в адрес заказчика акт N 3 без даты  на общую сумму 141 000 руб.

Проанализировав представленные доказательства, арбитражный суд считает исковые требования не обоснованными и не подлежащими удовлетворению исходя из следующего.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Изучив представленные в материалы дела договоры, арбитражный суд пришел к выводу, что данные договоры по своей правовой природе являются договорами возмездного оказания услуг.

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В качестве доказательств оказания услуг по контракту на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) истцом в материалы дела представлены фотографии неидентифицированного объекта  в количестве 9 листов.

Иных доказательств оказания услуг по техническому истцом в материалы дела не представлено.

Между сторонами сложились обязательственные отношения возмездного оказания услуг, к которым применимы положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу ст. 307, 309, 314 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, в установленные договором или законом сроки.

По общему правилу, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания обстоятельств дела, возложено на лицо, которое ссылается на эти обстоятельства, как на основание своих требований и возражений.

Из представленных документов следует, что истец перечислил в адрес ответчика 100 000 руб. в качестве оплаты услуг по договору.

Исходя из норм пункта 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации и поскольку стороны в силу статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе определять условия договора по своему усмотрению, обязанности исполнителя по договору возмездного оказания услуг могут включать в себя не только совершение определенных действий (деятельности), но и представление заказчику результата своих действий.

Эти обязанности предполагают различную степень прилежания при исполнении обязательства. Если в первом случае исполнитель гарантирует приложение максимальных усилий, то во втором - достижение определенного результата.

В соответствии с нормами пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ (оказанных услуг) является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 года N 51).

Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре. При рассмотрении споров, связанных с оплатой оказанных в соответствии с договором услуг, арбитражным судам необходимо руководствоваться положениями статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации, по смыслу которых исполнитель может считаться надлежаще исполнившим свои обязательства при совершении указанных в договоре действий (деятельности). При этом, следует исходить из того, что отказ заказчика от оплаты фактически оказанных ему услуг не допускается (пункт 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.09.1999 года N 48).

Из вышеназванных норм права следует, что обязанности исполнителя по договору возмездного оказания услуг могут включать в себя не только совершение определенных действий (деятельности), но и представление заказчику результата своих действий. Эти обязанности предполагают различную степень прилежания при исполнении обязательства. Если в первом случае исполнитель гарантирует приложение максимальных усилий, то во втором - достижение определенного результата.

Оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что ответчик не представил надлежащие и допустимые доказательства реального оказания услуг в рамках контракта,  заключенного сторонами.

Так, доказательств ежедневного исполнения обязательств по осуществлению технического надзора с отметкой в журнале заказчика истцом не представлено, материалы дела не содержат.

Более того, суду на вопрос суда относительно отсутствия соответствующих записей в общем журнале работ, истец пояснил, что ему в распоряжение указанный журнал не предоставлялся ответчиком. Доказательств удержания указанного журнала ответчиком также суду не представлено.

Пунктом 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

В силу пункта 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По смыслу приведенных норм права свобода граждан в заключении договора означает свободный выбор стороны договора, условий договора, свободу волеизъявления на его заключение на определенных сторонами условиях. Стороны договора по собственному усмотрению решают вопросы о заключении договора и его содержании.

В данном случае стороны договора четко определили вид услуги и порядок ее фиксации, который имеет вполне материальное подтверждение деятельности ответчика по исполнению договора.

Так, суду не представлено ни единого доказательства осуществления технического надзора по объекту.

Материалы дела не содержат материального подтверждения выполнения ответчиком принятых на себя обязательств в контексте порядка, последовательности выполнения работ и отчетности о проделанной работе по контракту.

Принимая во внимание вышеизложенное, исходя из анализа представленных суду документов, невозможно априори прийти к выводу о реальном оказании ответчиком услуг, обусловленных  контрактом, что является безусловным основанием для отказа в удовлетворении иска.

По смыслу ч. 1 ст. 64, ч.ч. 1, 2 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, с учетом представленных сторонами доказательств, обосновывающих требования и возражения лиц, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Стороны, согласно ст. ст. 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

В нарушение положений ст. ст. 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик не представил суду доказательств надлежащего исполнения обязательств  по контракту.

Поскольку процессуальным законодательством в основу распределения судебных расходов между сторонами положен принцип возмещения их истцу за счет проигравшей стороны в поре, расходы по оплате государственной пошлины, в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации остаются за истцом

Руководствуясь ст. ст. 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В иске отказать в полном объеме.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения, а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объеме) постановления судом апелляционной инстанции.

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса "Картотека арбитражных дел" http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Судья                                                                                                                  А.Н. Гризодубова