АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-5846/2020

г. Чебоксары

25 сентября 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 18 сентября 2020 года.

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Владимировой О.Е.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бондаревой Д.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Администрации Лапсарского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 428903, Чувашская Республика, д. Сятракасы (Лапсарского с/п), ул. Центральная, д. 3

к обществу с ограниченной ответственностью "Канцэнерго" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 428028, 

<

...>. оф. 11

об обязании устранить недостатки,

при участии:

от истца: ФИО1, главы сельского поселения, 

установил:

администрация Лапсарского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики обратилась в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Канцэнерго" об обязании в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу безвозмездно исполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту №23081904 от 03.09.2019, устранив недостатки на объекте "Ремонт автомобильных дорог по улицам 9 мая, Лесная, Советская, Южная д. Хирле-Сир Лапсарского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики", а именно: местами разрушение верхнего слоя, состоящего из асфальтной крошки; образование ямочности.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в иске. 

Ответчик письменных возражений на иск суду не представил. Копия определения суда от 20.08.2020 о назначении дела к судебному разбирательству была направлена ответчику заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в выписке из ЕГРЮЛ. Конверт возвращен органом почтовой связи с отметкой "Истек срок хранения". Все судебные акты по делу были также объявлены публично путем размещения на официальном сайте суда. Следовательно, ответчик считается извещенным надлежащим образом.

Суд в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрел дело в отсутствие ответчика.

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, суд установил следующее.

03.09.2019 администрация Лапсарского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики (заказчик) и общество с ограниченной ответственностью "Канцэнерго" (подрядчик) заключили муниципальный контракт №23081904, по условиям которого подрядчик обязуется в установленный настоящим контрастом срок выполнить работы по ремонту автомобильных дорог по улицам 9 мая, Лесная, Советская, Южная д. Хирле-Сир Лапсарского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики (далее - объект), объем, содержание и качество которых определены техническим заданием (приложение №1 к контракту), сметной документацией (приложение №2 к контракту), действующими ГОСТ, СНиП и техническими регламентами, (далее - работы) и передать их результат заказчику, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их. Идентификационный код закупки (ИКЗ): 193211681565521160100100230014211244.

Согласно пункту 1.1 контракта подрядчик обязуется выполнить весь комплекс работ по ремонту в соответствии с условиями контракта, согласно техническому заданию (приложение № 1 к контракту) и сметной документации (приложение №2 к контракту), являющихся неотъемлемой частью контраста.

Цена контракта составляет 2 066 411 (Два миллиона шестьдесят шесть тысяч четыреста одиннадцать) руб. (пункт 2.1 контракта).

В силу пункта 2.4 контракта финансирование выполняемых работ по контракту осуществляется: за счет республиканских средств бюджета Чувашской Республики, поступивших в бюджет Лапсарского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики в размере 1 343 167 (Один миллион триста сорок три тысячи сто шестьдесят семь) руб. 15 коп.; за счет средств бюджета Лапсарского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики в размере 723 243 (Семьсот двадцать три тысячи двести сорок три) руб. 85 коп.

В соответствии с пунктом 3.1 контракта сроки выполнения работ по контракту: в течение 30 календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

Согласно пункту 8.1 контракта основанием для оплаты выполненных подрядчиком работ являются подписанные заказчиком, подрядчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль, акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета на оплату, счета-фактуры.

Оплата производится за счет республиканских средств бюджета Чувашской Республики, поступивших в бюджет Лапсарского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики, за счет средств бюджета Лапсарского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики на основании счета-фактуры Подрядчика в течение 15 рабочих дней с даты подписания сторонами актов приемки выполненных работ (пункт 8.2 контракта).

Согласно акту о приемке выполненных работ от 06.11.2019 №1, справке о стоимости выполненных работ и затрат от 06.11.2019 №1, УПД от 06.11.2019 №42 (л.д. 56-58) работы выполнены истцом на сумму 1921832 руб. 09 коп.  

В период гарантийной срока после сдачи объекта в эксплуатацию были выявлены определенные недостатки (дефекты).

Письмом от 20.04.2020 (л.д. 15) истец уведомил ответчика о необходимости направления представителя для осмотра автомобильной дороги на наличие недостатков.

Согласно акту по устранению недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока после сдачи объекта, от 30.04.2020 (л.д. 19-20) комиссией выявлены следующие недостатки:

- местами разрушение верхнего слоя, состоящего из асфальтной крошки;

- образование ямочности.

Согласно вышеуказанному акту, комиссия пришла к выводу о том, что необходимо устранить выявленные недостатки в срок до 15.06.2020.

Ввиду того, что мероприятия по устранению выявленных недостатков ответчиком в установленные актом сроки не выполнены, дефекты не устранены, истец обратился в суд с настоящим иском.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В пункте 1 статьи 721 ГК РФ установлено, что качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, заказчик вправе потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 722 ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 724 ГК РФ заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

Пунктом 2 статьи 755 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

В соответствии с п.п. 4.2.2 контракта подрядчик принял на себя обязательства выполнять работы, обеспечивая их надлежащее качество, в соответствии со сметной документацией, Техническим заданием, условиями Контракта и нормативной документацией действующего законодательства Российской Федерации.

В силу пункта 11.1 контракта подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ.

Пунктом 11.2 контракта установлено, что гарантийный срок на выполняемые по контракту работы составляет 60 месяцев с момента подписания акта приемки объекта, на используемые при выполнении работ товары – согласно законодательству и условиям изготовителя.

Подрядчик устраняет дефекты и недостатки, выявленные в течение гарантийного срока в порядке и сроки, предусмотренные в контракте (пункт 11.2 контракта).

Пунктом 11.3 контракта предусмотрено, что если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

Факт наличия недостатков подтвержден материалами дела и ответчиком не опровергнут.

Доказательств того, что выявленные недостатки произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ответчик суду не представил.

В связи с изложенным, иск подлежит удовлетворению в полном объеме. 

Государственная пошлина относится на ответчика по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Канцэнерго" в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу безвозмездно исполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту №23081904 от 03.09.2019, устранив недостатки на объекте "Ремонт автомобильных дорог по улицам 9 мая, Лесная, Советская, Южная д. Хирле-Сир Лапсарского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики, а именно: местами разрушение верхнего слоя, состоящего из асфальтной крошки; образование ямочности.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Канцэнерго" в доход федерального бюджета 6`000 (Шесть тысяч) руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья

О.Е. Владимирова