АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

 Челябинск 

23 июля 2024 года Дело № А76-6199/2023  

Судья Арбитражного суда Челябинской области Вишневская А.А., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Билаловой И.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью «Главное строительное управление», ОГРН  1187456000060, к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания  «СтройПроект», ОГРН 1116672003557, о взыскании в размере 30 226 454 руб. 62 коп.,  

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью  «Строймеханизация», ОГРН: 1057422066460,  

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Удовлетворить исковые требования частично. 

Взыскать с ответчика – общества с ограниченной ответственностью  Строительная компания «СтройПроект», в пользу истца – общества с ограниченной  ответственностью «Главное строительное управление», задолженность в следующем  порядке:  

-неотработанный аванс по договору строительного субподряда № ГСУ-МЗ-ВУ-4  от 30.06.2022 в размере 10 398 407 руб. 40 коп., проценты за пользование чужими  денежными средствами в размере 960 341 руб. 88 коп., с последующим начислением  процентов за каждый день просрочки, начиная с 15.08.2023 по день фактической  уплаты долга,  

-неустойку за нарушение срока выполнения работ по договору строительного  субподряда № ГСУ-МЗ-ВУ-4 от 30.06.2022 за период с 02.10.2022 по 30.12.2022 в  размере 2 376 000 руб.,  

-штраф за непредоставление исполнительной документации на выполненный  объем работ по договору строительного субподряда № ГСУ-МЗ-ВУ-4 от 30.06.2022 в  размере 300 000 руб.;  

-неотработанный аванс по договору строительного субподряда № ГСУ-МЗ-КП-2  от 15.06.2022 в размере 7 156 486 руб. 59 коп., проценты за пользование чужими  денежными средствами в размере 733 073 руб. 18 коп., с последующим начислением  процентов за каждый день просрочки, начиная с 15.08.2023 по день фактической  уплаты долга,  

-неустойку за нарушение срока выполнения работ по договору строительного  субподряда № ГСУ-МЗ-КП-2 от 15.06.2022 в размере 1 505 768 руб. 31 коп.;  

-штраф за непредоставление исполнительной документации на выполненный  объем работ по договору строительного субподряда № ГСУ-МЗ-КП-2 от 15.06.2022 в  размере 300 000 руб.,  

а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере  136 106 руб. 64 коп.  

В удовлетворении остальной части требований – отказать. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не  изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции (ч. 1 ст. 180 АПК РФ).  

Настоящее решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со  дня его принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд  Челябинской области.  

Судья А.А. Вишневская 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах  рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  http://18aas.arbitr.ru.