Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А40-211272/24-96-1427

16 декабря 2024 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 02.12.2024

Полный текст решения изготовлен 16.12.2024

Арбитражный суд в составе:

судья Гутник П.С. (единолично), при ведении протокола секретарем судебного заседания Анпиловой Э.Ю., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРСАН КАПИТАЛ" Г.Москва, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 26.05.2014, ИНН: 

<

***>, КПП: 770301001 

к ответчику ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПАРТНЕР" Г.Москва, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 10.04.2018, ИНН: 

<

***>, КПП: 770101001 

о взыскании 64 692 631,91 руб. 

при участии: 

от истца: ФИО1 по дов. от 21.10.24г.; адвокат; 

от ответчика: не явился, извещён,

Рассмотрев материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРСАН КАПИТАЛ" (далее по тексту – Истец) обратилось в арбитражный суд с иском к ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПАРТНЕР" (далее по тексту – Ответчик), в котором просило суд:

1.Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму неосновательного обогащения в отношении Контракта № 0408/03 от 04.08.2022 г. (лот № 5) в размере 5 415 531,68 рублей (пять миллионов четыреста пятнадцать тысяч пятьсот тридцать один рубль шестьдесят восемь копеек), включая штраф и пени.

2.Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму неосновательного обогащения в отношении Контракта № 0408/08 от 04.08.2022 г. (лот №7) в размере 7 810 674,57 рублей (семь миллионов восемьсот десять тысяч шестьсот семьдесят четыре рубля пятьдесят семь копеек), включая штраф и пени.

3.Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму неосновательного обогащения в отношении Контракта № 0408/06 от 04.08.2022 г. (лот №8) в размере 7 420 131,78 рублей (семь миллионов четыреста двадцать тысяч сто тридцать один рубль семьдесят восемь копеек), включая штраф и пени.

4.Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму неосновательного обогащения в отношении Контракта № 0408/05 от 04.08.2022 г. (лот №9) в размере 6 382 166,25 рублей (шесть миллионов триста восемьдесят две тысячи сто шестьдесят шесть рублей двадцать пять копеек), включая штраф и пени.

5.Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму неосновательного обогащения в отношении Контракта № 0408/04 от 04.08.2022 г. (лот №10) в размере 5 852 676,27 рублей (пять миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи шестьсот семьдесят шесть рублей двадцать семь копеек), включая штраф и пени.

6.Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму неосновательного обогащения в отношении Контракта № 0408/02 от 04.08.2022 г. (лот №11) в размере 7 594 475,29 рублей (семь миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи четыреста семьдесят пять рублей двадцать девять копеек), включая штраф и пени.

7.Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму неосновательного обогащения в отношении Контракта № 0408/01 от 04.08.2022 г. (лот №12) в размере 24 216 976,07 рублей (двадцать четыре миллиона двести шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей семь копеек), включая штраф и пени.

Истец требования поддержал в полном объеме по основаниям изложенным в иске.

Ответчик не воспользовался предоставленными ему АПК РФ процессуальными правами, отзыв или иную письменную позицию по спору не представил, требования истца не оспорил, не предоставил истребованные судом доказательства оплаты задолженности либо ее отсутствия, извещенный надлежащим образом о дате, месте и времени проведения судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, в связи с чем, суд рассматривает спор в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ в его отсутствие.

Заслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему.

Обществом с ограниченной ответственностью ООО «СтройПартнер» (далее по тексту Ответчик) в адрес Общества с ограниченной ответственностью ООО «КИРСАН КАПИТАЛ» (далее по тексту Истец) были направлены коммерческие предложения от 29.07.2022 № 2907/02, № 2907/05, № 2907/01, № 2907/27 согласно запросу Истца № 106/22 от 27.07.2022. Истец в свою очередь, рассмотрев заявленные предложения Ответчика, выразил согласие на дальнейшее сотрудничество и заключения договоров на поставку и монтаж строительных материалов для ремонта многоквартирных жилых домов.  

04.08.2022 г. между Истцом и Ответчиком были заключены Договоры (Контракты) на поставку и монтаж материалов для многоквартирных жилых домов:

1) Контракт № 0408/03 (далее – Контракт-1), согласно которому Подрядчик обязался по заданию Заказчика выполнить поставку и монтаж материалов для многоквартирного жилого дома (далее – по тексту Работы), расположенного по адресу: 

<

...> в объеме, установленном в Техническом задании (лот №5).

2) Контракт № 0408/08 (далее – Контракт-2), согласно которому Подрядчик обязался по заданию Заказчика выполнить поставку и монтаж материалов для многоквартирного жилого дома (далее – по тексту Работы), расположенного по адресу: 

<

...> в объеме, установленном в Техническом задании (лот №7). 

3) Контракт № 0408/06 (далее – Контракт-3), согласно которому Подрядчик обязался по заданию Заказчика выполнить поставку и монтаж материалов для многоквартирного жилого дома (далее – по тексту Работы), расположенного по адресу: 

<

...> в объеме, установленном в Техническом задании (лот №8). 

4) Контракт № 0408/05 (далее – Контракт-4), согласно которому Подрядчик обязался по заданию Заказчика выполнить поставку и монтаж материалов для многоквартирного жилого дома (далее – по тексту Работы), расположенного по адресу: 

<

...> в объеме, установленном в Техническом задании (лот №9). 

5) Контракт № 0408/04 (далее – Контракт-5), согласно которому Подрядчик обязался по заданию Заказчика выполнить поставку и монтаж материалов для многоквартирного жилого дома (далее – по тексту Работы), расположенного по адресу: 

<

...> в объеме, установленном в Техническом задании (лот №10). 

6) Контракт № 0408/02 (далее – Контракт-6), согласно которому Подрядчик обязался по заданию Заказчика выполнить поставку и монтаж материалов для многоквартирного жилого дома (далее – по тексту Работы), расположенного по адресу: 

<

...> в объеме, установленном в Техническом задании (лот №11). 

7) Контракт № 0408/01 (далее – Контракт-7), согласно которому Подрядчик обязался по заданию Заказчика выполнить поставку и монтаж материалов для многоквартирного жилого дома (далее – по тексту Работы), расположенного по адресу: 

<

...> в объеме, установленном в Техническом задании (лот №12). 

Контракт № 0408/03 от 04.08.2022 г. (лот № 5)

Согласно п. 3.1 Контракта 0408/03 срок выполнения работ составляет 110 (сто десять) календарных дней с момента заключения контракта, то есть до 22.11.2022 включительно. Данный факт также подтверждается календарным планом (Приложение №2 к Спецификации Контракта).

Согласно пункта 2.1 Контракта цена Контракта составила 9 362 143 (девять миллионов триста шестьдесят две тысячи сто сорок три) рубля 16 копеек. По Контракту предусмотрен авансовый платеж в размере 30 (тридцати) % (п.2.6.1 Контракта). 

Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует по 30.12.2022 (п.9.1 Контракта). 

В соответствии с п.2.6.1 Контракта Истец перечислил в адрес Ответчика сумму аванса в размере 2 808 642 (два миллиона восемьсот восемь тысяч шестьсот сорок два) рубля 95 копеек рублей, что подтверждается платежным поручением №541 от 08.08.2022. 

По состоянию на дату подачи Иска обязательства Ответчика перед Истцом не исполнены. 

Следовательно, ООО «КИРСАН КАПИТАЛ» имеет правовые основание для истребования с ООО «СтройПартнер» денежных средств в части неосновательного обогащения в размере неотработанного аванса.

Согласно п. 7.4 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика штраф в размере 5 (пяти) % цены Контракта. 

Поскольку, Истец выполнил в полном объеме обязательства по Контракту, перечислил в соответствии с условиями контракта деньги Ответчику в срок, указанный в Контракте, Истец имеет правовые основания для истребования с Ответчика за невыполнение условий контакта стоимостью 9 362 143 руб. 16 коп. суммы штрафа в размере 5 (пяти) % - 468 107 (четыреста шестьдесят восемь тысяч сто семь) рублей 16 копеек (9 362 143,16 х 5%).

Пункт 7.3 Контракта предусматривает что, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплату пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены Контракта.

Таким образом, с Ответчика в пользу Истца подлежит выплате пеня за весь период просрочки исполнения обязательств Ответчиком в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки до момента перечисления денежных средств Ответчиком.

В соответствии с п.9.1 контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 30.12.2022 года.

Следовательно, пеня за период с 31.12.2022 года по дату составления досудебной претензии (19.07.2024) за 566 дней, исходя из цены контракта – 9 362 143 руб. 16 коп., составила: 2 138 781 (два миллиона сто тридцать восемь тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 57 копеек.

Требование (претензию) Истца от 19.07.2024 г. № 577 о возврате суммы аванса, взыскании штрафных санкций, взыскании пени - Ответчик добровольно не удовлетворил, оставил без ответа.

На основании вышеперечисленного, общая сумма долга по Контракту № 0408/03 от 04.08.2022 г. по состоянию на 19.07.2024 г. составляет - 2 808 642,95 руб. (авансовый платеж) + 468 107,16 (штраф) + 2 138 781,57 (пени) = 5 415 531,68 рублей. 

Контракт № 0408/08 от 04.08.2022 г. (лот №7)

Согласно п. 3.1 Контракта 0408/08 срок выполнения работ составляет 90 (девяносто) календарных дней с момента заключения контракта, то есть до 02.11.2022 включительно. Данный факт также подтверждается календарным планом (Приложение №2 к Спецификации Контракта).

Согласно пункта 2.1 Контракта цена Контракта составила 13 502 763 (тринадцать миллионов пятьсот две тысячи семьсот шестьдесят три) рубля 90 копеек. По Контракту предусмотрен авансовый платеж в размере 30 (тридцати) % (п.2.6.1 Контракта). 

Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует по 30.12.2022 (п.9.1 Контракта). 

В соответствии с п.2.6.1 Контракта Истец перечислил в адрес Ответчика сумму аванса в размере 4 050 829 (четыре миллиона пятьдесят тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 17 копеек, что подтверждается платежным поручением №544 от 08.08.2022. 

По состоянию на дату подачи Иска обязательства Ответчика перед Истцом не исполнены. 

Следовательно, ООО «КИРСАН КАПИТАЛ» имеет правовые основание для истребования с ООО «СтройПартнер» денежных средств в части неосновательного обогащения в размере неотработанного аванса.

Согласно п. 7.4 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика штраф в размере 5 (пяти) % цены Контракта. 

Поскольку, Истец выполнил в полном объеме обязательства по Контракту, перечислил в соответствии с условиями контракта деньги Ответчику в срок, указанный в Контракте, Истец имеет правовые основания для истребования с Ответчика за невыполнение условий контакта стоимостью 13 502 763 руб. 90 коп. суммы штрафа в размере 5 (пяти) % - 675 138 (шестьсот семьдесят пять тысяч сто тридцать восемь) рублей 19 копеек (13 502 763,90 х 5%).

Пункт 7.3 Контракта предусматривает что, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплату пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены Контракта.

Таким образом, с Ответчика в пользу Истца подлежит выплате пеня за весь период просрочки исполнения обязательств Ответчиком в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки до момента перечисления денежных средств Ответчиком.

В соответствии с п.9.1 контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 30.12.2022 года.

Следовательно, пеня за период с 31.12.2022 года по дату составления досудебной претензии (19.07.2024) за 566 дней, исходя из цены контракта – 13 502 763 руб. 90 коп., составила: 3 084 707 (три миллиона восемьдесят четыре тысячи семьсот семь) рублей 21 копейка.

Требование (претензию) Истца от 19.07.2024 г. № 578 о возврате суммы аванса, взыскании штрафных санкций, взыскании пени - Ответчик добровольно не удовлетворил, оставил без ответа.

На основании вышеперечисленного, общая сумма долга по Контракту № 0408/08 от 04.08.2022 г. по состоянию на 19.07.2024 г. составляет – 4 050 829,17 руб. (авансовый платеж) + 675 138,19 (штраф) + 3 084 707,21 (пени) = 7 810 674,57 рублей. 

Контракт № 0408/06 от 04.08.2022 г. (лот №8)

Согласно п. 3.1 Контракта 0408/06 срок выполнения работ составляет 90 (девяносто) календарных дней с момента заключения контракта, то есть до 02.11.2022 включительно. Данный факт также подтверждается календарным планом (Приложение №2 к Спецификации Контракта).

Согласно пункта 2.1 Контракта цена Контракта составила 12 827 611 (двенадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 57 копеек. По Контракту предусмотрен авансовый платеж в размере 30 (тридцати) % (п.2.6.1 Контракта). 

Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует по 30.12.2022 (п.9.1 Контракта). 

В соответствии с п.2.6.1 Контракта Истец перечислил в адрес Ответчика сумму аванса в размере 3 848 283 (три миллиона восемьсот сорок восемь тысяч двести восемьдесят три) рублей 47 копеек, что подтверждается платежным поручением №542 от 08.08.2022. 

По состоянию на дату подачи Иска обязательства Ответчика перед Истцом не исполнены. 

Следовательно, ООО «КИРСАН КАПИТАЛ» имеет правовые основание для истребования с ООО «СтройПартнер» денежных средств в части неосновательного обогащения в размере неотработанного аванса.

Согласно п. 7.4 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика штраф в размере 5 (пяти) % цены Контракта. 

Поскольку, Истец выполнил в полном объеме обязательства по Контракту, перечислил в соответствии с условиями контракта деньги Ответчику в срок, указанный в Контракте, Истец имеет правовые основания для истребования с Ответчика за невыполнение условий контакта стоимостью 12 827 611 руб. 57 коп. суммы штрафа в размере 5 (пяти) % - 641 380 (шестьсот сорок одна тысяча триста восемьдесят) рублей 58копеек (12 827 611,57 х 5%).

Пункт 7.3 Контракта предусматривает что, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплату пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены Контракта.

Таким образом, с Ответчика в пользу Истца подлежит выплате пеня за весь период просрочки исполнения обязательств Ответчиком в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки до момента перечисления денежных средств Ответчиком.

В соответствии с п.9.1 контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 30.12.2022 года.

Следовательно, пеня за период с 31.12.2022 года по дату составления досудебной претензии (19.07.2024) за 566 дней, исходя из цены контракта – 12 827 611 руб. 57 коп., составила: 2 930 467 (два миллиона девятьсот тридцать тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 73 копейки.

Требование (претензию) Истца от 19.07.2024 г. № 572 о возврате суммы аванса, взыскании штрафных санкций, взыскании пени - Ответчик добровольно не удовлетворил, оставил без ответа.

На основании вышеперечисленного, общая сумма долга по Контракту № 0408/06 от 04.08.2022 г. по состоянию на 19.07.2024 г. составляет – 3 848 283,47 руб. (авансовый платеж) + 641 380,58 (штраф) + 2 930 467,73 (пени) = 7 420 131,78 рублей. 

Контракт № 0408/05 от 04.08.2022 г. (лот №9)

Согласно п. 3.1 Контракта 0408/05 срок выполнения работ составляет 90 (девяносто) календарных дней с момента заключения контракта, то есть до 02.11.2022 включительно. Данный факт также подтверждается календарным планом (Приложение №2 к Спецификации Контракта).

Согласно пункта 2.1 Контракта цена Контракта составила 11 033 220 (одиннадцать миллионов тридцать три тысячи двести двадцать) рублей 40 копеек. По Контракту предусмотрен авансовый платеж в размере 30 (тридцати) % (п.2.6.1 Контракта). 

Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует по 30.12.2022 (п.9.1 Контракта). 

В соответствии с п.2.6.1 Контракта Истец перечислил в адрес Ответчика сумму аванса в размере 3 309 966 (три миллиона триста девять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 12 копеек, что подтверждается платежным поручением №543 от 08.08.2022. 

По состоянию на дату подачи Иска обязательства Ответчика перед Истцом не исполнены. 

Следовательно, ООО «КИРСАН КАПИТАЛ» имеет правовые основание для истребования с ООО «СтройПартнер» денежных средств в части неосновательного обогащения в размере неотработанного аванса.

Согласно п. 7.4 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика штраф в размере 5 (пяти) % цены Контракта. 

Поскольку, Истец выполнил в полном объеме обязательства по Контракту, перечислил в соответствии с условиями контракта деньги Ответчику в срок, указанный в Контракте, Истец имеет правовые основания для истребования с Ответчика за невыполнение условий контакта стоимостью 11 033 220 руб. 40 коп. суммы штрафа в размере 5 (пяти) % - 551 661 (пятьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки (11033966,12 х 5%).

Пункт 7.3 Контракта предусматривает что, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплату пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены Контракта.

Таким образом, с Ответчика в пользу Истца подлежит выплате пеня за весь период просрочки исполнения обязательств Ответчиком в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки до момента перечисления денежных средств Ответчиком.

В соответствии с п.9.1 контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 30.12.2022 года.

Следовательно, пеня за период с 31.12.2022 года по дату составления досудебной претензии (19.07.2024) за 566 дней, исходя из цены контракта – 11 033 220 руб. 40 коп., составила: 2 520 539 (два миллиона пятьсот двадцать тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 11 копеек.

Требование (претензию) Истца от 19.07.2024 г. № 572 о возврате суммы аванса, взыскании штрафных санкций, взыскании пени - Ответчик добровольно не удовлетворил, оставил без ответа.

На основании вышеперечисленного, общая сумма долга по Контракту № 0408/05 от 04.08.2022 г. по состоянию на 19.07.2024 г. составляет – 3 309 966,12 руб. (авансовый платеж) + 551 661,02 (штраф) + 2 520 539,11 (пени) = 6 382 166,25 рублей. 

Контракт № 0408/04 от 04.08.2022 г. (лот №10)

Согласно п. 3.1 Контракта 0408/04 срок выполнения работ составляет 90 (девяносто) календарных дней с момента заключения контракта, то есть до 02.11.2022 включительно. Данный факт также подтверждается календарным планом (Приложение №2 к Спецификации Контракта).

Согласно пункта 2.1 Контракта цена Контракта составила 10 117 860 (десять миллионов сто семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 42 копейки. По Контракту предусмотрен авансовый платеж в размере 30 (тридцати) % (п.2.6.1 Контракта). 

Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует по 30.12.2022 (п.9.1 Контракта). 

В соответствии с п.2.6.1 Контракта Истец перечислил в адрес Ответчика сумму аванса в размере 3 035 358 (три миллиона тридцать пять тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 13 копеек, что подтверждается платежным поручением №538 от 08.08.2022. 

По состоянию на дату подачи Иска обязательства Ответчика перед Истцом не исполнены. 

Следовательно, ООО «КИРСАН КАПИТАЛ» имеет правовые основание для истребования с ООО «СтройПартнер» денежных средств в части неосновательного обогащения в размере неотработанного аванса.

Согласно п. 7.4 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика штраф в размере 5 (пяти) % цены Контракта. 

Поскольку, Истец выполнил в полном объеме обязательства по Контракту, перечислил в соответствии с условиями контракта деньги Ответчику в срок, указанный в Контракте, Истец имеет правовые основания для истребования с Ответчика за невыполнение условий контакта стоимостью 10 117 860 руб. 42 коп. суммы штрафа в размере 5 (пяти) % - 505 893 (пятьсот пять тысяч восемьсот девяносто три) рубля 02 копейки (11033966,12 х 5%).

Пункт 7.3 Контракта предусматривает что, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплату пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены Контракта.

Таким образом, с Ответчика в пользу Истца подлежит выплате пеня за весь период просрочки исполнения обязательств Ответчиком в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки до момента перечисления денежных средств Ответчиком.

В соответствии с п.9.1 контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 30.12.2022 года.

Следовательно, пеня за период с 31.12.2022 года по дату составления досудебной претензии (19.07.2024) за 566 дней, исходя из цены контракта – 10 117 860 руб. 42 коп., составила: 2 311 425 (два миллиона триста одиннадцать тысяч четыреста двадцать пять) рублей 12 копеек.

Требование (претензию) Истца от 19.07.2024 г. № 574 о возврате суммы аванса, взыскании штрафных санкций, взыскании пени - Ответчик добровольно не удовлетворил, оставил без ответа.

На основании вышеперечисленного, общая сумма долга по Контракту № 0408/04 от 04.08.2022 г. по состоянию на 19.07.2024 г. составляет – 3 035 358,13 руб. (авансовый платеж) + 505 893,02 (штраф) + 2 311 425,12 (пени) = 5 852 676,27 рублей. 

Контракт № 0408/02 от 04.08.2022 г. (лот №11)

Согласно п. 3.1 Контракта 0408/04 срок выполнения работ составляет 90 (девяносто) календарных дней с момента заключения контракта, то есть до 02.11.2022 включительно. Данный факт также подтверждается календарным планом (Приложение №2 к Спецификации Контракта).

Согласно пункта 2.1 Контракта цена Контракта составила 13 129 009 (тринадцать миллионов сто двадцать девять тысяч девять) рублей 10 копеек. По Контракту предусмотрен авансовый платеж в размере 30 (тридцати) % (п.2.6.1 Контракта). 

Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует по 30.12.2022 (п.9.1 Контракта). 

В соответствии с п.2.6.1 Контракта Истец перечислил в адрес Ответчика сумму аванса в размере 3 938 702 (три миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот два) рубля 73 копейки, что подтверждается платежным поручением №539 от 08.08.2022. 

По состоянию на дату подачи Иска обязательства Ответчика перед Истцом не исполнены. 

Следовательно, ООО «КИРСАН КАПИТАЛ» имеет правовые основание для истребования с ООО «СтройПартнер» денежных средств в части неосновательного обогащения в размере неотработанного аванса.

Согласно п. 7.4 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика штраф в размере 5 (пяти) % цены Контракта. 

Поскольку, Истец выполнил в полном объеме обязательства по Контракту, перечислил в соответствии с условиями контракта деньги Ответчику в срок, указанный в Контракте, Истец имеет правовые основания для истребования с Ответчика за невыполнение условий контакта стоимостью 13 129 009 руб. 10 коп. суммы штрафа в размере 5 (пяти) % - 656 450 (шестьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей 45 копеек (13 129009,10 х 5%).

Пункт 7.3 Контракта предусматривает что, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплату пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены Контракта.

Таким образом, с Ответчика в пользу Истца подлежит выплате пеня за весь период просрочки исполнения обязательств Ответчиком в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки до момента перечисления денежных средств Ответчиком.

В соответствии с п.9.1 контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 30.12.2022 года.

Следовательно, пеня за период с 31.12.2022 года по дату составления досудебной претензии (19.07.2024) за 566 дней, исходя из цены контракта – 13 129 009 руб. 10 коп., составила: 2 999 322 (два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч триста двадцать два) рубля 11 копеек.

Требование (претензию) Истца от 19.07.2024 г. № 576 о возврате суммы аванса, взыскании штрафных санкций, взыскании пени - Ответчик добровольно не удовлетворил, оставил без ответа.

На основании вышеперечисленного, общая сумма долга по Контракту № 0408/02 от 04.08.2022 г. по состоянию на 19.07.2024 г. составляет – 3 938 702,73 руб. (авансовый платеж) + 656 450,45 (штраф) + 2 999 322,11 (пени) = 7 594 475,29 рублей. 

 Контракт № 0408/01 от 04.08.2022 г. (лот №12)

Согласно п. 3.1 Контракта 0408/01 срок выполнения работ составляет 90 (девяносто) календарных дней с момента заключения контракта, то есть до 02.11.2022 включительно. Данный факт также подтверждается календарным планом (Приложение №2 к Спецификации Контракта).

Согласно пункта 2.1 Контракта цена Контракта составила 41 865 288 (сорок один миллион восемьсот шестьдесят пять тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 65 копеек. По Контракту предусмотрен авансовый платеж в размере 30 (тридцати) % (п.2.6.1 Контракта). 

Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует по 30.12.2022 (п.9.1 Контракта). 

В соответствии с п.2.6.1 Контракта Истец перечислил в адрес Ответчика сумму аванса в размере 12 559 586 (двенадцать миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 60 копеек, что подтверждается платежным поручением №540 от 08.08.2022. 

По состоянию на дату подачи Иска обязательства Ответчика перед Истцом не исполнены. 

Следовательно, ООО «КИРСАН КАПИТАЛ» имеет правовые основание для истребования с ООО «СтройПартнер» денежных средств в части неосновательного обогащения в размере неотработанного аванса.

Согласно п. 7.4 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика штраф в размере 5 (пяти) % цены Контракта. 

Поскольку, Истец выполнил в полном объеме обязательства по Контракту, перечислил в соответствии с условиями контракта деньги Ответчику в срок, указанный в Контракте, Истец имеет правовые основания для истребования с Ответчика за невыполнение условий контакта стоимостью 41 865 288 руб. 65 коп. суммы штрафа в размере 5 (пяти) % - 2 093 264 (два миллиона девяносто три тысячи двести шестьдесят четыре) рубля 43 копейки (41865288,65 х 5%).

Пункт 7.3 Контракта предусматривает что, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплату пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены Контракта.

Таким образом, с Ответчика в пользу Истца подлежит выплате пеня за весь период просрочки исполнения обязательств Ответчиком в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки до момента перечисления денежных средств Ответчиком.

В соответствии с п.9.1 контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 30.12.2022 года.

Следовательно, пеня за период с 31.12.2022 года по дату составления досудебной претензии (19.07.2024) за 566 дней, исходя из цены контракта – 41 865 288 руб. 65 коп., составила: 9 564 125 (девять миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи сто двадцать пять) рублей 04 копейки.

Требование (претензию) Истца от 19.07.2024 г. № 575 о возврате суммы аванса, взыскании штрафных санкций, взыскании пени - Ответчик добровольно не удовлетворил, оставил без ответа.

На основании вышеперечисленного, общая сумма долга по Контракту № 0408/01 от 04.08.2022 г. по состоянию на 19.07.2024 г. составляет – 12 559 586,60 руб. (авансовый платеж) + 2 093 264,43 (штраф) + 9 564 125,04 (пени) = 24 216 976,07 рублей. 

Итого, общая сумма задолженности Ответчика перед истцом по Контрактам составляет: 7 810 674,57 руб. (Контракт № 0408/08 от 04.08.2022 г.) + 5 415 531,68 (Контракт № 0408/03 от 04.08.2022 г.) + 7 420 131,78 (Контракт № 0408/06 от 04.08.2022 г.) + 6 382 166,25 (Контракт № 0408/05 от 04.08.2022 г.) + 5 852 676,27 (Контракт № 0408/04 от 04.08.2022 г.) + 7 594 475,29 (Контракт № 0408/01 от 04.08.2022 г.) + 24 216 976,07 (Контракт № 0408/04 от 04.08.2022 г.) = 64 692 631 (шестьдесят четыре миллиона шестьсот девяносто две тысячи шестьсот тридцать один) рубль 91 копейка. 

Уведомлениями № 669-675 от 29.08.2024 г. истец уведомлял ответчика о расторжении договора путем направления в адрес ответчика на электронную почту (согласно п. 12.1 Контрактов в адрес стороны указанному в статье 13 Контрактов). На основании п. 12.1 Контракта - В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. Следовательно договор считать расторгнутым 29.08.2024г.

 В силу п. 1 ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

В соответствии с пунктом 63 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 25) с учетом положения пункта 2 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, или юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в ЕГРИП или в Едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом.

При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. п. 63, 67 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ», юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, либо по адресу, указанному самим юридическим лицом (например, в тексте договора), а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не находится по указанному адресу; юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ); например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения.

В соответствии с п. 7.1 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг и иным законодательством РФ.

Согласно п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с ч. 1 ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно п. 1 ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или иными правовыми актами.

В силу ч. 1 ст. 64, ст. 71 и 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств, при оценке которых он руководствуется правилами ст. ст. 67 и 68 АПК РФ об относимости и допустимости доказательств.

Оценив представленные в дело доказательства в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК РФ, руководствуясь названными нормами права, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований. 

Госпошлина распределена на основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПАРТНЕР" (ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРСАН КАПИТАЛ" (ИНН: 

<

***>) по договору № 0408/03 от 04.08.2022 года: неосновательное обогащение в размере 2 808 642 руб. 95 коп., штраф в размере 468 107 руб. 16 коп., неустойку в размере 2 138 781 руб. 57 коп.; по договору № 0408/08 от 04.08.2022 года: неосновательное обогащение в размере 4 050 829 руб. 17 коп., штраф в размере 675 138 руб. 19 коп., неустойку в размере 3 084 707 руб. 21 коп.; по договору № 0408/06 от 04.08.2022 года: неосновательное обогащение в размере 3 848 283 руб. 47 коп., штраф в размере 641 380 руб. 58 коп., неустойку в размере 2 930 467 руб. 73 коп.; по договору № 0408/05 от 04.08.2022 года: неосновательное обогащение в размере 3 309 966 руб. 12 коп., штраф в размере 551 661 руб. 02 коп., неустойку в размере 2 520 539 руб. 11 коп.; по договору № 0408/04 от 04.08.2022 года: неосновательное обогащение в размере 3 035 358 руб. 13 коп., штраф в размере 505 893 руб. 02 коп., неустойку в размере 2 311 425 руб. 12 коп.; по договору № 0408/02 от 04.08.2022 года: неосновательное обогащение в размере 3 938 702 руб. 73 коп., штраф в размере 656 450 руб. 45 коп. неустойку в размере 2 999 322 руб. 11 коп.; по договору № 0408/02 от 04.08.2022 года: неосновательное обогащение в размере 3 938 702 руб. 73 коп., штраф в размере 656 450 руб. 45 коп. неустойку в размере 2 999 322 руб. 11 коп.; по договору № 0408/01 от 04.08.2022 года: неосновательное обогащение в размере 12 559 586 руб. 60 коп., штраф в 2 093 264 руб. 43 коп., неустойку в размере 9 564 125 руб. 04 коп., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 200 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья П.С. Гутник