Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-49954/2017

09 октября 2017 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  05 октября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен  09 октября 2017 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью  "Отделпроект" (адрес:  Россия 192076, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...> ЛИТЕР 3/701, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "Севзапинжтехнология" (адрес:  Россия 196084, 

<

...> лит.Л, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании 2 583 900 руб. 00 коп.

 

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 29.08.2017, ФИО3 по доверенности от 23.08.2017

- от ответчика: ФИО4 по доверенности от 10.01.2017

установил:

ООО "Отделпроект" просит взыскать с ООО "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "Севзапинжтехнология" 2 583 900 руб. 00 коп., составляющих 2 349 000 руб. 00 коп. задолженности по оплате выполненных работ и 234 900 руб. 00 коп. неустойки за просрочку оплату на основании договор № 107-16С от 17.05.2016.

Ответчик иск отклонил, ссылаясь на наличие замечаний к разработанной документации. 

Судом установлено: 

Между сторонами был заключен договор № 107-16С от 17.05.2016 на выполнение работ по разработке рабочей документации. 

Общая стоимость работ составляет 2 610 000 руб. 00 коп. 

Срок окончания работ – 01.09.2016.

Истец-подрядчик выполнил работы и сдал их ответчику. Ответчик принял работы, что подтверждается подписанным сторонами актом сдачи-приемки работ от 21.12.2016. 

Согласно п.3.3.1 договора заказчик оплачивает выполненные и принятые работы в течение 10 рабочих дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в размере стоимости работ, указанной в акте за вычетом 10% в качестве гарантийного удержания в обеспечение выполнения подрядчиком обязательств по договору, включая устранение недостатков документации. 

Согласно п.п. 3,4 акта от 21.12.2016 удержание составляет 261 000 руб. 00 коп., что составляет 10% от общей суммы договора. Следует к перечислению 2 349 000 руб. 00 коп. 

Согласно п.5 акта претензий к качеству выполненных работ у заказчика на дату составления акта не имеется. 

В соответствии с п.7.9 договора ответчику начислены пени за просрочку платежа, которые с учетом 10% ограничения составляют 234 900 руб. 00 коп. 

Возражения ответчика, изложенные в отзыве, о наличии замечаний, с учетом п.3.3.1 договора и акта от 21.12.2016 следует признать необоснованными. 

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по государственной пошлине на ответчика. 

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "Севзапинжтехнология" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Отделпроект" 2 583 900 руб. 00 коп., из них: 2 349 000 руб. 00 коп. основного долга и 234 900 руб. 00 коп. неустойки, а также 35 920 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине. 

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сергеева О.Н.