8/2018-52212(1) 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А20-3619/2018

г. Нальчик

22 ноября 2018 года

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики в составе судьи Ф.А.Цыраевой,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Т.А.Кульчаевым,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску муниципального казенного  учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба  заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Каббалкгидрострой» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки выполненных работ в период гарантийного срока при участии в заседании: от истца – ФИО1 по доверенности от 19.04.2018, 

руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 174, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,   

РЕШИЛ:

Исковые требования муниципального казенного учреждения «Управление жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации  городского округа Нальчик удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Каббалкгидрострой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение двух месяцев со дня вступления в законную  силу настоящего судебного акта устранить недостатки выполненных работ, по  муниципальному контракту от 10.07.2017 № 0104300014417000107-215024, обнаруженные в  период гарантийного срока, в том числе:  

 1. по улице Колонтай № 16/улице Самотечная № 43 в г. Нальчике путем замены  асфальтобетонного покрытия на проезжей части напротив 3-го подъезда площадью 20 кв.м;  

 2. по улице Кооперативный пер. № 3 в г. Нальчике путем замены разрушенного  асфальтобетонного покрытия в объеме 40 кв.м напротив подъездов № 2,3;  

 3. по улице Кулиева № 5-а в г. Нальчике путем замены асфальтобетонного покрытия в  объеме 100 кв.м, путем замены разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части 8  кв.м. Так же устранить застой воды возле контейнерной площадки в объеме 25кв.м, путем  замены А/б покрытия на площади застоя;  

 4. по улице Санаторный проезд № 3 в г. Нальчике, путем замены  асфальтобетонного покрытия в объеме 16 кв.м, а так же вывоза строительного мусора;  

 5. по улице Шогенова № 6 в г. Нальчике путем замены  асфальтобетонного покрытия в объеме 36 кв.м.  

 6. по улице Профсоюзная № 218 в г. Нальчике путем замены  асфальтобетонного покрытия в объеме 10 кв.м.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Каббалкгидрострой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в сумме 6 000 (шесть тысяч) руб.  

 Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд  Кабардино-Балкарской Республики.  

Судья Ф.А. Цыраева