АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А45-2682/2021

г. Новосибирск

21 июля 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 14 июля 2021 года.

Решение изготовлено в полном объёме 21 июля 2021 года.

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи       Исаковой С.А, при ведении протокола помощником судьи Афанасьевым А.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью корпорация «Сибинжиниринг» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск, к обществу с ограниченной ответственностью «Ареал-Недвижимость» (ОГРН 

<

***>), г. Владивосток, о взыскании 468 858 руб. 66 коп.,

при участии в судебном заседании представителей:

истца: ФИО1. доверенность № 685 от 01.12.2021, диплом, паспорт;

ответчика: ФИО2, доверенность № 01-01/21 от 11.01.2021, диплом, паспорт; ФИО3, доверенность от 01.07.2021, паспорт,

установил:

общество с ограниченной ответственностью корпорация «Сибинжиниринг» (далее по тексту - истец) обратилась с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Ареал-Недвижимость» (далее по тексту - ответчик) о взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты  за выполненные работы в размере 468 858 руб.    66 коп.

Ответчик представил в материалы дела отзыв на исковое заявление, возражал против удовлетворения исковых требований истца.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения сторон, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований истца, при этом, отмечает следующее.

В соответствии со статьёй 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту - АПК РФ), каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Как следует из материалов дела, 20.12.2016 между ответчиком (заказчик) и истцом (генподрядчик) заключён договор генерального подряда № ГП201216 (далее по тексту – договор), по условиям которого генподрядчик обязался собственными и (или) привлечёнными силами в соответствии с условиями договора, заданием заказчика и проектной документацией выполнить строительные, пуско-наладочные и иные возможные работы, необходимые для полного сооружения, ввода в эксплуатацию и последующей нормальной эксплуатации объекта «Многоквартирный дом (корпус 1-4) с встроено-пристроенными помещениями и автостоянкой, расположенный в районе ул. Фонтанная, 3 в г. Владивостоке» (пункт 1.1.1 договора), а также работы по разработке проектной документации объекта и внесению изменений в неё (пункт 1.1.2 договора, дополнительные соглашения к договору), а заказчик обязался принять их результат и оплатить обусловленную договором цену.

Общая стоимость работ, в соответствии с пунктом 6.1 договора (в редакции дополнительного соглашения № 14 от 27.11.2018), составила 1 397 866 653 руб.  

Порядок приёмки работ определён сторонами в разделе 8 договора и разделён на три этапа: промежуточная приёмка работ, итоговая приёмка выполненных по договору работ и приёмка объекта по завершении строительства.

Порядок промежуточной приёмки строительных работ предусмотрен пунктом 8.2 договора: 

- генподрядчик ежемесячно не позднее 22 числа текущего месяца передаёт заказчику для утверждения и оплаты акт приёмки по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, исполнительную документацию, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты (пункт 8.2.1);

 - в течение 10 рабочих дней заказчик утверждает и принимает указанные документы либо мотивированно отказывает в их приёмке (пункт 8.2.2);

- в случае предоставления мотивированного отказа от приёмки работ за отчётный период генподрядчик устраняет основания для отказа в приёмке либо подтверждает заказчику сведения, указанные в акте приёмки выполненных работ и справке об их стоимости (пункт 8.2.4)

В случае, если генподрядчик не устранит изложенные в мотивированном отказе заказчика освоения отказа от приёмки работ за отчётный период в течение 5 рабочих дней с даты получения мотивированного отказа заказчика, приёмка работ, указанных в мотивированном отказе заказчика, не принимаются в данном отчётном периоде.;

 - при непредоставлении в установленный договором срок мотивированного отказа в приёмке работ, предоставленные акт КС-2 и справка КС-3 считаются утверждёнными, а работы – принятыми на основании одностороннего акта, составленного генподрядчиком (пункт 8.2.5).

В соответствии с пунктом 6.4 договора, в редакции дополнительного соглашения №14 от 27.11.2018, ежемесячные промежуточные платежи выплачиваются в течение 5 рабочих дней с момента подписания обеими сторонами акта по форме КС-2, справки по форме КС-3 и акта зачёта аванса, при условии получения заказчиком оригиналов следующих документов: счёта генподрядчика на оплату соответствующего промежуточного платежа, счёта-фактуры. 

Пунктом 16.4 договора предусмотрена ответственность заказчика за просрочку оплаты выполненных работ в виде уплаты пени в размере 0,015% от суммы не перечисленного своевременного платежа за каждый день просрочки.

Истец обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с ответчика неустойки за просрочку оплаты выполненных им работ в общей сумме       468 858 руб. 66 коп. за период с 22.03.2018 по 08.11.2019.

Возражая против удовлетворения исковых требований истца, ответчик сослался на те доводы, что начисление пени истцом осуществлено исходя из дат составления актов формы КС-2, тогда как фактическая приёмка работ была произведена позже, в установленном договором порядке, исходя из наличия у ответчика мотивированных возражений относительно приёмки работ.

Оценив заявленные ответчиком доводы и представленные в материалы дела в их обоснование доказательства, суд отмечает следующее.

Ответчиком осуществлялась промежуточная приёмка работ.

- в отношении начисленного истцом периода с 22.03.2018 по 22.03.2018 по актам за январь-февраль 2018 года.

Изначально акты формы КС-2 поступили от истца письмом исх. №241 от 22.02.2018 на сумму 34 208 877 руб. 32 коп. (вх. ответчика №98 от 22.02.2018г).

Ответчиком даны письменные отказы в приёмке актов КС-2: письма исх. № 91 от 01.03.2018, № 99 от 06.03.2018, № 107 от 13.03.2018, №217 от 19.03.2018. 

Повторная сдача спорных актов выполнена истцом 05.03.2018 (письмо исх. № 290), 12.03.2018 (письмо исх. №331), 13.03.2018 (письмо исх. №334), окончательно - сданы 21.03.2018 на сумму 12 889 691 руб. 06 коп.

Письмами исх. №282 от 02.03.2018, № 379 от 22.03.2018 истец частично соглашался с замечаниями ответчика и направлял откорректированные акты.

Фактическая оплата произведена ответчиком 22.03.2018.

Таким образом, просрочка оплаты за указанный период отсутствует.

- в отношении начисленного истцом периода с 13.09.2018 по 18.09.2018 по актам за июль-август 2018 года.

Изначально акты формы КС-2 поступили от истца письмом исх. №1015 от 22.08.2018 на сумму 99 803 354 руб. (вх. ответчика №522 от 22.08.2018).

Ответчиком даны письменные отказы в приёмке актов КС-2: письма исх. №551 от 04.09.2018, № 556 от 05.09.2018, №568 от 10.09.2018, №569 от 10.09.2018, №572 от 12.09.2018.

Письмами исх. № 1076 от 06.09.2018, №1108 от 13.09.2018 истец частично соглашался с замечаниями ответчика и корректировал акты.

Повторная сдача спорных актов выполнена истцом исх. №1099 от 11.09.2018 (вх. ответчика №562 от 11.09.2018) .

Окончательно работы сданы письмом исх. №1113 от 14.09.2018 (вх. ответчика №571 от 14.09.2018) на сумму 76 037 327 руб. 34 коп.

Фактическая оплата произведена ответчиком 17.09.2018 и 18.09.2018.

Таким образом, просрочка оплаты за указанный период отсутствует.

- в отношении начисленного истцом периода с 22.01.2019 по 25.01.2019 по актам ноябрь-декабрь 2018 года.

Изначально акты формы КС-2 поступили от истца письмом исх. №1519 от 21.12.2018 (вх. ответчика №807 от 21.12.2018).

Ответчиком даны письменные отказы в приёмке актов КС-2: письма исх. №№817, 828 от 24.12.2018, №№834, 836 от 25.12.2018, №847 от 27.12.2018, №№850, 851, 855 от 28.12.2018, № 4 от 10.01.2019, №6 от 14.01.2019,  №7 от 10.01.2019, №9 от 11.01.2019, № 24 от 21.01.2019

Письмами исх. №1556 от 27.12.2021, №1563 от 28.12.2018, №1570 от 29.12.2018, №8 от 15.01.2019, №6 от 14.01.2019,  №1654 от 28.12.2018, №25 от 17.01.2019, №37 от 18.01.2019, №1543 от 25.12.2018, №1551 от 27.12.2018, №№1566, 1568 от 29.12.21018, №30 от 08.01.2019, №46 от 21.01.2019, №51 от 22.01.2019 истец частично соглашался с замечаниями ответчика и направлял откорректированные акты.

Фактическая оплата произведена ответчиком 25.01.2019.

Таким образом, просрочка оплаты за указанный период отсутствует.

- в отношении начисленного истцом периода с 13.02.2019 по 21.02.2019 по актам за январь 2019 года.

Изначально акты формы КС-2 поступили от истца письмом исх. №55 от 22.01.2019 (вх. ответчика №40 от 22.01.2019).

Ответчиком даны письменные отказы в приёмке актов КС-2: письма исх. №27 от 23.01.2019, №34 от 25.01.2019, №№36, 37, 39 от 28.01.2019,  №№45, 48 от 29.01.2019, №№53, 54, от 30.01.2019, №№ 55, 56 от 31.01.2019,  №63 от 01.02.2019, № 65 от 04.02.2019, №82 от 07.02.2019.

Письмами исх. №№92, 94 от 29.01.2019, №100 от 30.01.2019, №114 от 31.01.2019, №122 от 05.02.2019, №128 от 05.02.2019, №№132, 133 от 06.02.2019, № 180 от 14.02.2019,  № 58 от 23.01.2019, № 166 от 12.02.2019, №172 от 13.02.2019, №№190, 191 от 18.02.2019, №200, 205 от 19.02.2019 истец частично соглашался с замечаниями ответчика и направлял откорректированные акты.

Фактическая оплата произведена ответчиком 21.02.2019.

Таким образом, просрочка оплаты за указанный период отсутствует.

- в отношении начисленного истцом периода с 20.03.2019 по 25.03.2019 по актам за январь- февраль 2019 года. 

Изначально акты формы КС-2 поступили от истца письмом исх. №234 от 22.02.2019 (вх. ответчика №132 от 22.02.2019).

Ответчиком даны письменные отказы в приёмке актов КС-2: письма исх. №143 от 22.02.2019, №158 от 27.02.2019, №№165,166 от 28.02.2019, №179 от 04.03.2019, №182 от 04.03.2019, № 189 от 06.03.2019, № 211 от 13.03.2019, №236 от 20.03.2019, №№ 197, 198, 199, 201 от 07.03.2019, №222 от 15.03.2019, №237 от 21.03.2019, №225 от 18.03.2019.

Письмами исх. №250 от 27.02.2019, № 318 от 13.03.2019, №320 от 13.03.2019, №278 от 07.03.2019, №283 от 11.03.2019, №310 от 13.03.2019, №321 от 13.03.2019, №319 от 13.03.2019, №№272, 274 от 05.03.2019, №293 от 12.03.2019, №341 от 18.03.2019, №345 от 19.03.2019, №№353, 354 от 20.03.2019, №356 от 21.03.2019, №368 от 22.03.2019 истец частично соглашался с замечаниями ответчика и направлял откорректированные акты.

Окончательно работы переданы к приёмке 22.03.2019.

Фактическая оплата произведена ответчиком 25.03.2019.

Таким образом, просрочка оплаты за указанный период отсутствует.

- в отношении начисленного истцом периода с 15.06.2019 по 21.06.2019 по актам за апрель-май 2019 года.

Изначально акты формы КС-2 поступили от истца письмом исх. №703 от 22.05.2019 (вх. ответчика №427 от 22.05.2019).

Ответчиком даны письменные отказы в приёмке актов КС-2: письма исх. №№ 452, 453, 454 от 28.05.2019, №306 от 09.04.2019, №№ 458, 459 от 30.05.2019, № 463 от 31.05.2019, №№ 466, 467 от 03.06.2019, № 523 от 19.06.2019, №№ 469, 474, 477, 478, 479 от 04.06.2019, №512 от 18.06.2019,

Письмами исх. №824 от 14.06.2019, №752 от 31.05.2019, №760 от 03.06.2019, №№ 811, 812, 813 от 11.06.2019, №№ 828, 829, 830 от 15.06.2019, №857 от 20.06.2019, №№867, 872 от 21.06.2019 истец частично соглашался с замечаниями ответчика и направлял откорректированные акты.

Фактическая оплата произведена ответчиком 21.06.2019.

Таким образом, просрочка оплаты за указанный период отсутствует.

- в отношении начисленного истцом периода с 16.07.2019 по 23.07.2019 по актам за май- июнь 2019 года.

Изначально акты формы КС-2 поступили от истца письмом исх. №886 от 21.06.2019 (вх. ответчика №534 от 21.06.2019).

Ответчиком даны письменные отказы в приемке актов КС-2: письма исх. № 537 от 26.06.2019, № 549 от 28.06.2019, № 550 от 01.07.2019, № 554 от 01.07.2019, № 555 от 01.07.2019, № 556 от 01.07.2019, № 568  от 03.07.2019, № 577 от 04.07.2019, № 585 от 08.07.2019.

Письмами исх. №  998 от 15.07.2019, № 1008 от 17.07.2019, № 1009 от 17.07.2019, № 1016 от 19.07.2019, № 1023 от 22.07.2019, № 1024 от 22.07.2019  истец частично соглашался с замечаниями ответчика и направлял откорректированные акты.

Окончательно работы переданы к приемке 22.07.2019

Фактическая оплата произведена ответчиком 23.07.2019.

Таким образом, просрочка оплаты за указанный период отсутствует.

- в отношении начисленного истцом периода с 14.08.2019 по 23.08.2019 по актам за июнь-июль 2019 года. 

Данные формы КС-2 поступили от истца письмом исх. №1042 от 22.07.2019 (вх. ответчика №657 от 23.07.2019).

Ответчиком даны письменные отказы в приёмке актов КС-2: письма исх.  № 655 от 25.07.2019, № 662 от 26.07.2019, №663 от 26.07.2019, №№667, 668 от 30.07.2019, №№672, 673 от 31.07.2019, № 678, 679, 681, 683 от 02.08.2019,  № 697 от 07.08.2019, № 727 от 15.08.2019, №939 от 06.09.2019, № 901 от 29.08.2019, № 754 от 22.08.2019.

Письмами исх. №1219 от 28.08.2019, №1215 от 28.08.2019, № 1135, №1096 от 02.08.2019, № 1152 от 16.08.2019, № 1163 от 19.08.2019, № 1185 от 22.08.2019, № 1186 от 23.08.2019, № 1190 от 23.08.2019, № 1219 от 28.08.2019  истец частично соглашался с замечаниями ответчика и направлял откорректированные акты.

Окончательно работы переданы к приёмке 21.08.2019, 22.08.2019.

Фактическая оплата произведена ответчиком 22.08.2019 и 23.08.2019.

Таким образом, просрочка оплаты за указанный период отсутствует.

- в отношении начисленного истцом периода с 22.08.2019 по 20.09.2019 по актам за июль 2019 года.

Изначально акты формы КС-2 поступили от истца письмом исх. №1080 от 31.07.2019 (вх. ответчика №680 от 31.07.2019).

Ответчиком даны письменные отказы в приёмке актов КС-2: письма исх.  №696 от 07.08.2019, № 721 от 13.08.2019, № 953 от 10.09.2019, № 959 от 11.09.2019, № 724 от 14.08.2019, № 728 от 15.08.2019, № 909 от 02.09.2019, №730 от 15.08.2019, № 933 от 05.09.2019, № 729 от 15.08.2019, № 744 от 20.08.2019, № 826 от 26.08.2019, № 918 от 04.09.2019, № 828 от 26.08.2019, № 904 от 30.08.2019, № 906 от 30.08.2019, № 958 от 11.09.2019, № 965 от 12.09.2019, № 975 от 16.09.2019.

Письмами исх. №1216 от 28.08.2019, №1206 от 27.08.2019, №1241 от 30.08.2019, №1199 от 26.08.2019, №1201 от 27.08.2019,  №1212 от 28.08.2019, №1218 от 28.08.2019, №1233 от 30.08.2019, №1252 от 02.09.2019, №1293 от 10.09.2019, №1280 от 06.09.2019, №1217 от 28.08.2019, №1244 от 02.09.2019, №1250 от 02.09.2019, №1259 от №03.09.2019, №1261от 04.09.2019, №1289 от 09.09.2019, №1294 от 10.09.2019, №1310 от 11.09.2019, №1316 от 12.09.2019, №1329 от 16.09.2019, №1003 от 23.09.2019 истец частично соглашался с замечаниями ответчика и направлял откорректированные акты.

Фактическая оплата произведена ответчиком 30.08.2019, 05.09.2019, 10.09.2019, 11.09.2109  и 20.09.2019. 

Таким образом, просрочка оплаты за указанный период отсутствует.

- в отношении начисленного истцом периода с 21.09.2019 по 08.11.2019 по актам за август 2019 года.

Счета на оплату в адрес ответчика поступили 27.11.2019 письмом исх. № 308 и 24.12.2019 письмом исх. № 316.

Ответчиком счета оплачены 27.11.2019 и 24.12.2019 соответственно.

Таким образом, просрочка оплаты за указанный период отсутствует.

Согласно требованиям статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признаётся арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нём сведения соответствуют действительности.

Проанализировав условия договора, в том числе пункт 6.4 договора, в редакции дополнительного соглашения №14 от 27.11.2018, содержание актов формы КС-2, учитывая осуществление ответчиком промежуточной приёмки работ, изучив переписку сторон, мотивы отказа ответчика от подписания актов КС-2, установив, что отказы ответчика в подписании первоначальных актов КС-2 являются мотивированными, несоблюдение истцом положений раздела 8 договора о порядке приёмки работ и составе необходимой для приёмки работ документации (в частности, исполнительной документации), отсутствие доказательств направления (вручения) исполнительной документации вместе с актами КС-2, принимая во внимание устранение ответчиком недостатков, указанных в письмах об отказе в подписании актов КС-2, суд пришёл к выводу об отсутствии у ответчика обязанности по оплате указанных в спорных актах работ в даты первоначальной передачи ответчику актов. Учитывая эти факты, сроки оплаты работ в соответствии с условиями договора должны исчисляться после устранения истцом замечаний, изложенных в отказах от подписания актов КС-2.

Вышеуказанные обстоятельства и представленные в материалы дела доказательства свидетельствуют о своевременной оплате ответчиком денежных средств истцу, в связи с чем, мера ответственности в виду взыскания пени за просрочку оплаты работ к ответчику применена быть не может. 

Учитывая изложенное, оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.

Судебные расходы распределяются в соответствии со статьёй 110 АПК РФ.     

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

решил:

в иске отказать.

Обществу с ограниченной ответственностью корпорация «Сибинжиниринг» выдать справку на возврат государственной пошлины в размере 688 руб., уплаченной  по платёжному поручению №118 от 29.01.2021.

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение месяца после принятия.

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья                                                                                        С.А. Исакова