Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

14. 02. 2024 года.                                                                                    Дело № А40-207650/23-43-1684

Резолютивная часть решения объявлена 09. 02. 2024 года.

Решение изготовлено в полном объеме 14. 02. 2024 года.

Судья Арбитражного суда г. Москвы ФИО1, единолично,

протокол судебного заседания вёл помощник судьи Гусейнова К.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Государственного казённого учреждения города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы " УКРиС " (ОГРН 

<

***>)

к ООО " СТРОЙСИТИ " (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 813 241 руб. 91 коп. – неустойки,

с участием представителей: от истца – ФИО2, доверенность №у-09-148/23 от 04.10.2023 г., от ответчика – не явился.

Изучив имеющиеся в деле документы, заслушав представителя, арбитражный суд

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск заявлен о взыскании 813 241 руб. 91 коп. – неустойки, на основании статей 309, 310, 330 ГК РФ.

Истец направил представителя в судебное заседание, который иск поддержал, повторив доводы, изложенные в исковом заявлении; представил истребованные судом документы; предъявил подлинники документов, имеющихся в деле в виде копий; каких-либо ходатайств не заявил.

Ответчик не представил отзыв на исковое заявление; документы, опровергающие иск не предъявил; расчет истца не оспорил; представителя в судебное заседание не направил; о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке, в соответствии со статьями 121-124 АПК РФ; каких-либо ходатайств не заявил.

Дело рассмотрено в соответствии с порядком предусмотренным ст. 156 АПК РФ, по имеющимся в деле документам, представленным истцом, в отсутствии отзыва ответчика и представителя ответчика.

Суд, с учетом изложенных истцом обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела документами, пришел к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

Из материалов дела усматривается, что между Государственным казенным учреждением города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» (далее по тексту - заказчик, ГКУ «УКРиС», Истец) и ООО «СТРОЙСИТИ» (далее по тексту - подрядчик, Ответчик) с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов определения подрядчика способом закупки аукцион в электронной форме, реестровый № закупки 0173200001422000367, протокол подведения итогов от 22.04.2022 заключен государственный контракт от 05.05.2022 № 0173200001422000367 на выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов- колясочников в многоквартирные жилые дома города Москвы по 32 адресам (далее по тексту - контракт).

На основании п. 1.1 контракта подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить комплекс работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в многоквартирные жилые дома города Москвы по 32 адресам (далее - работы) в объеме, установленном в техническом задании (приложение № 1 к контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - техническое задание), а заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

На основании п. 2.1 контракта цена контракта составляет 89 128 053,00 руб., в том числе НДС - 12 326 811,00 руб. Из них: 73 960 866,00 руб., в том числе НДС (20%)- 12 326 811,00 руб., 15 167 187,00 руб., не облагается НДС в соответствии с подп. 1 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ (далее - цена контракта).

На основании п. 2.8.2 контракта заказчик производит выплату подрядчику авансового платежа в размере 44 564 026,50 руб., что составляет 50% цены контракта, указанной в настоящей статье контракта, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со своего лицевого счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации контракта в Реестре контрактов, заключенных заказчиками. Обязательство заказчика по внесению авансового платежа, предусмотренное настоящим пунктом контракта, считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте контракта, с лицевого счета заказчика, указанного в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» контракта.

На основании п. 3.1 контракта сроки выполнения работ по контракту установлены в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью контракта: с даты заключения контракта, но не ранее 13.05.2022, по 31.12.2022, в соответствии с проектом контракта, техническим заданием (подрядчик выполняет работы в течение 150 календарных дней с даты акта открытия объекта), акт открытия объекта оформляется в течении 10 рабочих дней с даты заключения контракта.

По объектам ул. Свободы, д. 91, корп. 1, под. 1, ул. Свободы, д. 75, корп. 2, под. 4, г. Зеленоград, корп. 905, под. 2, дата открытия 13.05.2022, период выполнения работ с 13.05.2022 по 09.10.2022.

По объекту ул. Сталеваров, д. 10, корп. 3, под. 2, дата открытия 14.05.2022, период выполнения работ с 14.05.2022 по 10.10.2022.

По объектам ул. Гамалеи, д. 1, под. 1, ул. Уваровский пер., д. 5, под. 1, дата открытия 17.05.2022, период выполнения работ с 17.05.2022 по 13.10.2022.

По объектам ул. Лукинская, д. 9, под. 9, ул. Лукинская, д. 18, под. 2, ул. Лукинская, д. 8, под. 2, ул. Крылатские Холмы, д. 32, корп. 3. под. 1, ул. Крылатская, д.  29, корп. 2 под. 2, ул. Кунцевская, д. 4, корп. 2, под. 2, дата открытия 18.05.2022, период выполнения работ с 18.05.2022 по 14.10.2022.

По объектам ул. Маршала Баграмяна, д. 2, под. 3, ул. Лефортовский Вал, д. 9, под. 3, ул. 2-й Пятигорский пр., д. 2, под. 3, ул. 5-й кв. Капотни, д. 1, под. 6, дата открытия 19.05.2022, период выполнения работ с 19.05.2022 по 15.10.2022.

По объектам ул. Цимлянская, д. 20, под. 2, ул. 1-ая Вольская, д. 17, корп. 1, под. 1, ул. Некрасовская, д. 7, под. 6, ул. Вилиса Лациса, д. 25, корп. 2, под. 1, дата открытия 20.05.2022, период выполнения работ с 20.05.2022 по 16.10.2022.

По объектам ул. Ротерта, д. 10, корп. 4, под. 1, ул. Городецкая, д. 8, корп. 1, под. 5, ул. Рязанский проспект, д. 82, корп. 5, под. 1, дата открытия 23.05.2022, период выполнения работ с 23.05.2022 по 19.10.2022.

По объекту ул. Северный бульвар, д. 19, под. 2, дата открытия 27.05.2022, период выполнения работ с 27.05.2022 по 23.10.2022.

По объекту 

<

...>, под. 2, дата открытия 09.06.2022, период выполнения работ с 09.06.2022 по 05.11.2022.

На основании п. 4.1 контракта подрядчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания завершения выполнения работ, представляет заказчику комплект отчетной документации в 2 (двух) экземплярах, предусмотренной техническим заданием, и электронный структурированный УПД, подписанные подрядчиком.

На основании п. 5.1.4 контракта заказчик вправе осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

На основании п. 5.4.1 контракта подрядчик обязан своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с требованиями технического задания и представить заказчику отчетную документацию по итогам исполнения контракта.

01.12.2022 ГКУ «УКРиС» в присутствии представителя ООО «СтройСити», в лице ФИО3, действующего на основании доверенности от 01.12.2022 № 23/2022 подписан акт простоя, согласно которому определена просрочка в завершении выполнения работ по 25 объектам.

На основании п. 7.1. контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим контрактом, заказчик и подрядчик несут ответственность в соответствии с постановлением правительства РФ от 30.08.2017 №-1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 15.05.2017 №-570 и признании утратившим силу постановления правительства российской федерации от 25.11.2013 №-1063» и иным законодательством РФ.

На основании п. 7.3 контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки центрального банка российской федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени.

Согласно данным с сайта http://www.cbr.ru размер ставки рефинансирования, установленный Центральным банком Российской Федерации с 19.09.2022 составляет - 7,5%.

Общий размер неустойки, подлежащий оплате, составляет сумму 813 241,91 руб.

На основании п. 11.3 контракта до передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

На основании п. 11.3.1 контракта претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

ГКУ «УКРиС» в адрес ООО «СТРОЙСИТИ» была направлена претензия от 22.12.2022 № у-06-13512/22 с требованием оплаты неустойки в размере 813 241,91 руб. Ответ на претензию от 22.12.2022 № у-06-13512/22 ООО «СТРОЙСИТИ» представлен не был, неустойка в добровольном порядке оплачена не была.

Размер неустойки судом проверен, установлено, что арифметически и методологически выполнен верно в соответствии с условиями заключенного между сторонами договора, ответчиком не оспорен.

В соответствии со ст. 708 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п.1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает пли позволяет определить день его исполнения пли период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Требование истца о взыскании неустойки в сумме 813 241 руб. 91 коп. – законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, представленными истцом, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика, в соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ.

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 328, 329-331, 401, 420-424, 431-434, 702, 708, 709, 711, 720 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 121-124, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Взыскать с ООО " СТРОЙСИТИ " (ОГРН 

<

***>):

- в пользу Государственного казённого учреждения города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы " УКРиС " (ОГРН 

<

***>) 813 241 руб. 91 коп. – неустойки;

- в доход федерального бюджета РФ госпошлину в сумме 19 264 руб. 84 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

 

Судья

ФИО1