Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-104000/2024

18 апреля 2025 года

г.Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 05 марта 2025 года

Полный текст решения изготовлен 18 апреля 2025 года

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.Н. Мухортых,

рассмотрев в открытом судебном заседании  дело по исковому заявлению 

ООО "СПЕЦТЕХСТРОЙ"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к АО "ВСИ"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 2328300 руб.,

при участии в заседании:

от истца: ФИО1 представитель по доверенности б/н от 20.12.2024г.; 

от ответчика: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

ООО "СПЕЦТЕХСТРОЙ" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к АО "ВСИ" о взыскании задолженности в размере 2 328 300 руб. 00 коп., расходов по уплате государственной пошлины  в размере 94 849 руб. 00 коп., ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком своих обязательств перед истцом по оплате выполненных работ в рамках договора № Вав 61 08-08/2024/СТС от 08.08.2024г. 

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы искового заявления в полном объёме, а представитель ответчика для участия в нем не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте его проведения.

Рассмотрев материалы искового заявления Производственного кооператива «Ремонтник», исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, выслушав представителя истца, суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов.

В силу статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием для оплаты выполненных работ является факт принятия результата работ, доказательством передачи результата работ является акт приема-передачи или иной приравненный к нему документ.

Согласно материалам дела, между ООО «СПЕЦТЕХСТРОЙ» (далее - Подрядчик) и АО «ВСИ» (далее - Генподрядчик) был заключен Договор на выполнение подрядных работ по завершению строительства объекта: «Консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений в смену на территории Городской клинической больницы №64, ул. Вавилова д.61 (уровень 2) от «08» августа 2024 г.

В соответствии с п.2.1. Договора Подрядчик обязался выполнить подрядные Работы, указанные в Протоколе твердой договорной цены (Приложение № 2) по строительству объекта: «Консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений в смену на территории Городской клинической больницы №64, ул. Вавилова д.61 (уровень 2), в соответствии с Проектной и Рабочей документацией за Цену и в сроки, установленные настоящим Договором, используя материалы Подрядчика/Генподрядчика, в соответствии с Разделительной ведомостью обязанностей Сторон (Приложение № 2.1. к настоящему Договору), соблюдая промежуточные сроки и общий срок строительства Объекта, установленные Графиком выполнения работ, а Генподрядчик - принять и оплатить Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с требованиями Договора.

Стоимость работ, подлежащих выполнению на условиях договора, согласно приложения №3 к Договору составила 6 328 300 рублей.

Срок выполнения работ до 15.09.2024 года.

Подрядчик, в полном объеме выполнил свои обязательства, что подтверждается подписанными актами по форме КС-2,3 от 11.09.2024 года на сумму 6 328 300 рублей.

Генподрядчик частично оплатил стоимость выполненных работ на сумму 4 000 000 рублей платежным поручением №3310 от 23.08.2024 года.

Оплата остальной части выполненных работ на условиях, предусмотренных п. 4.4. заключенного Договора в полном объеме произведена не была.

На настоящий момент сумма задолженности составляет 2 328 300 рублей.

В порядке, предусмотренном п. 5 ст. 4 АПК РФ Истец обратился к ответчику с требованием погашения задолженности, однако ответчик претензию проигнорировал.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения с настоим иском в суд.

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно пункту 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Из положений статей 702, 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате работ по договору является совокупность следующих обстоятельств: выполнение работ и передача их результата заказчику.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате обусловленных договором работ является сдача работ заказчику путем подписания акта выполненных работ (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» (далее - информационное письмо №51).

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В соответствии с пунктом 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу (статья 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (статья 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

            Поскольку доказательств погашения спорной задолженности по оплате выполненных истцом работ в предусмотренный договором срок ответчиком не представлено, требования иска о взыскании 2 328 300 руб. 00 коп. основного долга по договору № Вав 61 08-08/2024/СТС от 08.08.2024г. являются обоснованными.

Принимая во внимание указанные обстоятельства дела, отсутствие в материалах дела доказательств оплаты ответчиком выполненных истцом работ по спорному договору, при наличии документально подтвержденных требований истца, суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования  удовлетворить.

            Взыскать с АО "ВСИ"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО "СПЕЦТЕХСТРОЙ"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность в размере 2 328 300 руб. 00 коп., расходы по уплате государственной пошлины  в размере 94 849 руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.

Судья                                                                      Е.А. Морозова