Арбитражный суд Хабаровского края

<

...>, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-3929/2025

г. Хабаровск

18 июня 2025 года

Резолютивная часть судебного акта объявлена «02» июня 2025 г.

Арбитражный суд Хабаровского края

в составе судьи В.Н. Трещевой

при ведении протокола судебного разбирательства секретарем судебного заседания Е.Р. Яровым

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Спецстройконсалтинг» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 693006, 

<

...>)

к Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 107174, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1, адрес:680000, 

<

...>)

о взыскании 1 213 359 руб. 17 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца - ФИО1, представитель по доверенности № ДВОСТ НЮ-107/Д от 14.07.2023, диплом о высшем образовании;

от ответчика - не явился, извещен надлежащим образом.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Спецстройконсалтинг» (далее – «истец») обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» (далее – «ответчик») взыскании основного долга по договору подряда 967 439 руб. 93 коп., пени в размере 245 919 руб. 24 коп., «открытую» неустойку и судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины.

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 12.05.2025 исковое заявление принято, возбуждено производство по делу № А73-3929/2025, назначено предварительное судебное заседание на «02» июня 2025 г. на 14 час. 30 мин.

Представитель истца в предварительном судебном заседании в порядке статьи 49 АПК РФ заявил ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которому просил суд взыскать с ответчика в пользу истца проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 274 630 руб. 78 коп.

Ответчик явку представителя в предварительное судебное заседание не обеспечил, однако представил мотивированный отзыв на исковое заявление, согласно которому ходатайствовал в случае удовлетворения исковых требований о применении норм статьи 333 ГК РФ и снизить размер взыскиваемой неустойки до разумных пределов.

В силу части 3 статьи 156 АПК РФ при неявке в судебное заседание ответчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, суд полагает возможным рассмотреть дело в его отсутствие по имеющимся в деле доказательствам.

Зафиксированным в протоколе судебного заседания определением, на основании части 4 статьи 137 АПК РФ с учетом разъяснений, изложенных в пункте 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству», суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание первой инстанции.

В ходе судебного разбирательства суд, рассмотрев материалы дела, установил следующие обстоятельства.

03.11.2022 между Обществом с ограниченной ответственностью «Спецстройконсалтинг» (далее - «подрядчик») и Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (далее - «заказчик») заключён договор на выполнение строительно-монтажных работ № ВГК Нефтес-226824/ДВОСТ, согласно пункту 1.1 которого, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ на объекте: Железнодорожная станция Ильинск-Сахалинский Дальневочсточной железной дороги. Примыкание железнодорожного пути необщего пользования ООО «ВГК «Нефтесервис» (код объекта 001.2022.10003696) (далее - Объект) на полигоне Дальневосточной железной дороги в интересах Дальневосточная дирекция инфраструктуры - СП ЦДИ - филиала ОАО "РЖД" (далее - эксплуатирующая организация), в составе инвестиционного проекта •«Технологическое присоединение к объектам железнодорожной инфраструктуры на станции Ильинск-Сахалинский ДВОСТ (ООО "ВГК Нефтесервис")».

Пунктом 1.2 установлено, что в рамках настоящего договора подрядчик выполняет строительно- монтажные работы и связанные с ним работы, включая пусконаладочные работы  в соответствии с условиями настоящего Договора и утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией.

Пунктом 2.1 договора (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 15.12.2022) установлено, что общая цена договора с учетом суммы всех налогов, стоимости материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на Объект, погрузочно-разгрузочными работами и хранением, стоимости строительно-монтажных работ, стоимости пусконаладочных работ, затрат ка строительство временных зданий и сооружений, инфляции, коэффициента снижения, определенного нормативными документами ОАО «РЖД» на момент заключения Договора, расходов на непредвиденные работы и затраты, а также все иных затрат и расходов подрядчика (включая затраты на персонал), связанные с выполнением работ, составляет 9 343 131 (Девять миллионов триста сорок три тысячи сто тридцать один) рубль 00 копеек, кроме того НДС 20 % 1 868 626 (Один миллион восемьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 20 копеек, всего с учетом НДС 11 211 757 (Одиннадцать миллионов двести одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 20 копеек и отражена в Ведомости договорной цены (Приложение № 1 к настоящему договору), в том числе:

на 2022 год:

общая цена Комплекса работ составляет 9 343 131 (Девять миллионов триста сорок три тысячи сто тридцать один) рубль 00 копеек, кроме того НДС 20 % 1 868 626 (Один миллион восемьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 20 копеек, всего с учетом НДС 11 211 757  рублей 20 копеек:

-  цена строительно-монтажных Работ составляет 9 343 131 (Девять миллионов триста сорок три тысячи сто тридцать один) рубль 00 копеек, кроме того НДС 20 % 1 868 626 (Один миллион восемьсот шестьдесят воешь ; тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 20 копеек, всего с учетом НДС 11 211 757 рублей 20 копеек.»

Согласно дополнительному соглашению № 2 от 27.02.2023 общая цена договора с учетом суммы всех налогов, стоимости материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на Объект, погрузочно-разгрузочными работами и хранением, стоимости строительно-монтажных работ, стоимости пусконаладочных работ, затрат ка строительство временных зданий и сооружений, инфляции, коэффициента снижения, определенного нормативными документами ОАО «РЖД» на момент заключения Договора, расходов на непредвиденные работы и затраты, а также все иных затрат и расходов подрядчика (включая затраты на персонал), связанные с выполнением работ, составляет 9 343 131 (Девять миллионов триста сорок три тысячи сто тридцать один) рубль 00 копеек, кроме того НДС 20 % 1 868 626 (Один миллион восемьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 20 копеек, всего с учетом НДС 11 211 757 (Одиннадцать миллионов двести одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 20 копеек и отражена в Ведомости договорной цены (Приложение № 1 к настоящему договору), в том числе:

на 2022 год:

- общая цена Комплекса работ составляет 7 283 470 рублей 00 копеек, кроме того НДС 20 % 1 456 694 руб. 00 коп., всего с учетом НДС 8 740 164 рублей 00 копеек:

-  цена строительно-монтажных работ составляет 7 283 470 рублей 00 копеек, кроме того НДС 20 % 1 456 694 руб. 00 коп., всего с учетом НДС 8 740 164 рублей 00 копеек.

на 2023 год:

- общая цена комплекса работ оставляет 2 059 655 руб. 00 коп., кроме того НДС 20 % 411 931 руб. 00 коп., всего с учетом НДС 2 471 586 руб. 00 коп.

цена строительно-монтажных работ составляет 2 059 655 руб. 00 коп., кроме того НДС 20 % 411 931 руб. 00 коп., всего с учетом НДС 2 471 586 руб. 00 коп.

В соответствии с пунктом 2.2 договора цена договора является твердой.

Пунктом 5.1 установлено, что дата начала производства комплекса работ начинается  с даты подписания договора, дата окончания производства  комплекса работ – 31 мая 2023 г. Сроки выполнения работ но настоящему договору определяются в календарном графике производства комплекса работ (приложение № 2 к договору, приложение № 7 к договору) (даже - календарный график).

Как следует из пункта 5.2 договора,  датой фактического окончания производства комплекса работ на объект считается дата утверждения акта № КС-14 приемочной комиссией.

Согласно пункту 5.3 договора, срок действия договора с даты подписания сторонами договора по 29 августа 2023 года.

Согласно пункту 10.1 договора, для обеспечения контроля за фактически выполненными объемами работ и финансированием строительства объекта подрядчик ежемесячно предъявляет заказчику выполненный объем работ.

Подрядчик в четырех экземплярах оформляет:

- акт о приемке выполненных работ по форме КС- 2 (далее - Акт КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (далее - Справка КС-3);

- накопительную ведомость, а также счет-фактуру на объем выполненных Работ за прошедший месяц, с указанием хода объекта в соответствии с п.1.1. настоявшего Договора и передает указанные документы по реестру заказчику не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца приемка работ за отчетный месяц производится Заказчиком до 5 (пятого) числа месяца, следующею за отчетным. Кроме того. Подрядчик оформляет в четырех экземплярах Акт смонтированного оборудования по форме ФСУ-3 (далее - Акт ФСУ-3) и передает заказчику по реестру не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца. По каждому источнику финансирования оформляются отдельные Акты КС-2. Одна Справки КС-3 за отчетный месяц, должна включать в себя все виды источников финансирования. Акты КС-2 не являются актами предварительной приемки Работ, не впекут переход к заказчику права собственности на результаты Работ и риска случайной гибели результатов работ, а подтверждают выполнение промежуточных работ за отчетный месяц для проведения расчетов с подрядчиком. Справка КС-3 является документом, подтверждающим стоимость выполненных подрядчиком работ за отчетный месяц с целью проведения промежуточных расчётов с подрядчиком.

Указанные документы передаются Заказчику по реестру приема-передачи документов с обязательным наличием подписи уполномоченного представителя Подрядчика.

Заказчик при получении реестра приема-передачи документов, провернет наличие всех документов согласно реестру приема-передачи и, при отсутствии замечаний, подписывает и проставляет дату фактического получения данного реестра.

Выполненные объемы работ должны быть документально подтверждены подрядчиком и в соответствующем порядке согласованы с эксплуатирующим структурным подразделением ОАО «РЖД» (балансодержателем).

Прочие затраты, затраты на строительство временных зданий и сооружений, а также непредвиденные затраты, учтены в цене Комплекса работ, определенной пунктом 2.1 настоящего Договора н отражены в Ведомости договорной цены. На предъявленные подрядчиком непредвиденные работы, выполненные в пределах, предусмотренных прочими расходами по настоящему Договору, оформляется дополнительное соглашение к договору с расшифровкой их в ведомости договорной цены в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. Затраты Подрядчика на непредвиденные работы и затраты на строительство временных зданий и сооружений возмещаются (оплачиваются) Заказчиком при их фактическом наличии и документальном подтверждении данных затрат за соответствующий период и на соответствующий объем работ в пределах установленного лимита средств согласно ведомости договорной цены.

Средства из резерва на непредвиденные работы и затраты, неизрасходованные на дату завершения Комплекса работ по Договору, не выплачиваются подрядчику и при окончательном расчете остаются в распоряжении заказчика.

В соответствии с пунктом 10.6 договора по результатам работ приемочной комиссии подписывается и утверждается акт КС-14.

Согласно пункту 11.1 договора, Заказчик производит оплату Комплекса работ в следующем порядке.

Оплата выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания первичных документов в соответствии с разделом 10 настоящего договора с учетом выплаченного аванса и гарантийных удержаний.

Гарантийное удержание - 2 % or стоимости выполненных работ оплачиваются заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления подтвержденного приемочной комиссией акта КС-14 и представления подрядчиком документов, указанных а п. 10.1. настоящего договора.

Срок уплаты гарантийного удержания - 2 (двух) % от стоимости работ увеличивается на период времени, затраченный подрядчиком на устранение дефектов, выявленных при приемке объекта, а также на возмещение ущерба, причиненною подрядчиком заказчику или третьим лицам.

Представленными в материалы дела актами, подписанными в двухстороннем порядке по форме КС-2 подтверждается факт выполнения подрядчиком и приемку заказчиком работ по спорному договору на общую сумму 9 792 140 руб. 40 коп., а именно акты:

- акт КС-2 № 1 от 30.11.2022 на сумму 8 740 164 руб. 00 коп.;

- акт КС-2 № 2 от 31.01.2023 на сумму 264 632 руб. 40 коп.;

- акт КС-2 № 3 от 29.08.2023 на сумму  787 344 руб. 00 коп.

Представленными в материалы дела платежными поручениями № 0000155585 от 15.12.2022  на  сумму 8 565 360 руб. 72 коп., № 0000035093 от 20.04.2023 на сумму  259 339 руб. 75 коп. подтверждается факт оплаты заказчиком спорных работ на общем размере 8 824 700 руб. 47 коп.

Итого общая сумма оплаченных ответчиком работ составила 8 824 700 руб. 47 коп.

При проведении временным управляющим работы по выявлению кредиторской и дебиторской задолженности ООО «Спецстройконсалтинг» было обнаружено, что по выполненному в 2023 году договору № ВГК Нефтес-226824/ДВОСТ от 03.11.2022 года расчет между сторонами произведен не полностью.

На 01.01.2024 года задолженность Дирекции по строительству сетей связи - филиала ОАО «РЖД» перед ООО «Спецстройконсалтинг» согласно акту сверки составила 967 439 руб. 93 коп. (задолженность образовалась в связи с неоплатой своевременно работ, принятых двумя актами выполненных работ по акту № КС-2 от 31.03.2023 года на сумму 264 632 руб. 40 коп. и по акту № КС-2 от 29.08.2023 года на сумму 787 344 руб. 00 коп.)

Указывая в акте сверки взаиморасчетов сумму задолженности в размере 967 439,93 рублей, Заказчик произвел расчет и начислил гарантийное удержание в размере 2% от стоимости выполненных работ, предусмотренное пунктом 11.1 договора.

В связи с неоплатой своевременно работ, принятых двумя актами выполненных работ от 31.03.2023 года и от 29.08.2023 года, и невыплатой гарантийного удержания после подписания акта № КС-14 истец направил в адрес ответчика претензию с требованием оплатить сумму образовавшейся задолженности.

Поскольку требование об оплате долга осталось неисполненным, истец обратился с настоящим иском в суд.

В силу статьи 740 (пункта 1) ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Из статьи 746 (пункта 1) ГК РФ следует, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В пункте 4 статьи 753 ГК РФ указано, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и односторонне изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Представленными в материалы дела актами, подписанными в двухстороннем порядке по форме КС-2 подтверждается факт выполнения подрядчиком и приемку заказчиком работ по спорному договору на общую сумму 9 792 140 руб. 40 коп., а именно акты:

- акт КС-2 № 1 от 30.11.2022 на сумму 8 740 164 руб. 00 коп.;

- акт КС-2 № 2 от 31.01.2023 на сумму 264 632 руб. 40 коп.;

- акт КС-2 № 3 от 29.08.2023 на сумму  787 344 руб. 00 коп.

Платежными поручениями № 0000155585 от 15.12.2022  на  сумму 8 565 360 руб. 72 коп., № 0000035093 от 20.04.2023 на сумму 259 339 руб. 75 коп. подтверждается факт оплаты заказчиком спорных работ частично, а именно на сумму 8 824 700 руб. 47 коп., в связи с чем образовалась задолженность в размере 967 439 руб. 93 коп.

В судебном заседании, представитель истца уточнил исковые требования в указанной части, в виду оплаты ответчиком долга, что подтверждается представленными в материалы дела  платежными поручениями № 5884 от 05.05.2025 на сумму 771 597 руб. 12 коп. (списано со счета 07.05.2025), № 5885 от 29.04.2025 на сумму 5 292 руб. 65 коп., № 5886 от 29.04.2025 на сумму 15 746 руб. 88 коп., № 5894 от 29.04.2025 на сумму 174 803 руб. 28 коп., всего на сумму 967 439 руб. 93 коп.

Истцом так же заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в общем размере за период с 15.03.2025 по 06.05.2025 в размере 274 630 руб. 78 коп.

Согласно пункту 1 статьи 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В силу пункта 3 статьи 395 ГК РФ проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Пунктом 48 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 Кодекса, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 Кодекса). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Проверив расчет процентов, предоставленный истцом, суд признал его обоснованным и арифметически верным.

Согласно пункту 6 статьи 395 ГК РФ, если подлежащая уплате сумма процентов явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд по заявлению должника вправе уменьшить предусмотренные договором проценты, но не менее чем до суммы, определенной исходя из ставки, указанной в пункте 1 настоящей статьи.

Представитель ответчика заявил о несоразмерности заявленных к взысканию процентов за пользование чужими денежным средствами, при этом соответствующих доказательств несоразмерности, не предоставил.

Оснований для освобождения ответчика от ответственности в силу статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, судом не установлено, как и не установлено оснований для снижения размера процентов.

Таким образом, требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 15.03.2025 по 06.05.2025 в размере 274 630 руб. 78 коп. заявлено правомерно и  с подлежит удовлетворению. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В связи с тем, что требования истца удовлетворяются полностью, судебные расходы в виде уплаченной истцом госпошлины по чеку от 29.04.2025 в сумме 17 296 руб. 00 коп. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца, и  госпошлина в размере 1 436 руб. 00 коп. подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить.

Взыскать с Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Спецстройконсалтинг» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 274 630 руб. 78 коп.

Взыскать с Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Спецстройконсалтинг» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) судебные расходы в виде уплаченной госпошлины в размере 17 296 руб. 00 коп.

Взыскать с Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  в доход федерального бюджета госпошлину в размере 1 436 руб. 00 коп.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья                                                                                                            В.Н. Трещева